24/2018-184644(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846-2) 226-55-25  

РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации (резолютивная часть)

Дело № А55-29040/2017

22 августа 2018 года

г.Самара

Резолютивная часть решения

 оглашена 22 августа 2018 года  

Решение в полном объеме изготовлено 22 августа 2018 года Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Лукина А.Г., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Коршуновой А.М., 

рассмотрев 22.08.2018 в судебном заседании дело по иску  Департамента градостроительства городского округа Самара  

к Обществу с ограниченной ответственностью СК «Мосстрой»  об обязании устранить недостатки  

третьи лица:  1) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 176 с 

углубленным изучением отдельных предметов" городского округа Самара,  2) Открытое акционерное общество «Самарагорпроект»,  

3) Общество с ограниченной ответственностью «ВолгаИнжинирингСпецТранс»  при участии в заседании представителей:  

от истца – ФИО1, доверенность от 12.07.2018 

от ответчика – ФИО2, доверенность от 13.02.2018  от третьих лиц (1 - 3) - не явились, извещены  

Руководствуясь статьями 110, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Обязать Общество с ограниченной ответственностью "СК "Мосстрой" в течении  месяца с даты вступления решения в законную силу, устранить за свой счет недостатки,  выявленные при эксплуатации детского сада МОУ № 176 городского округа Самара по  адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Советской Армии, д. 109, в  период течения гарантийного срока:  

- восстановить шумовые экраны на игровых площадках (30 кв.м), путем демонтажа  

поврежденных экранов и монтажа новых экранов в соответствии с проектной документацией;  

- загерметизировать стык примыкания тамбура к стене здания в тамбуре группы № 1 и  тамбуре группы № 2 (5 п.м) путем расшивки трещины, заполнения стыка герметизирующим  составом, восстановления отделки стен и потолка помещения;  

- устранить провал асфальтовой отмостки снаружи здания в районе тамбура группы № 1  (12 кв.м) путем демонтажа провалившегося асфальтового покрытия, устройства щебеночного  основания с уплотнением, восстановления асфальтовой отмостки;  

В удовлетворении остальной части заявленных требований отказать. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "СК "Мосстрой" в доход  федерального бюджета госпошлину в размере 6 000,00 рублей.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в  Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г. Самара, с направлением апелляционной  жалобы через Арбитражный суд Самарской области.  

Судья Лукин А.Г.