1020/2023-40875(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 

 

http://www.chuvashia.arbitr.ru/

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  резолютивная часть

Дело № А79-9285/2022

г. Чебоксары

30 марта 2023 года

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи  Владимировой О.Е.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

Администрации города Чебоксары Чувашской Республики (ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***>), 428032, г. Чебоксары, Чувашская Республика, ул. К.Маркса д.  36  

к обществу с ограниченной ответственностью "Алза" (ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***>), 428000, г. Чебоксары, Чувашская Республика, ул. Гагарина Ю.  д. 55,  

об обязании устранить недостатки работ, при участии 

от истца: ФИО2 по доверенности от 26.12.2022 № 29/01-10445 (сроком по  31.12.2023),  

руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

иск удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Алза" в течение трех  месяцев со дня вступления решения суда в законную силу безвозмездно устранить  по договору № 14 от 28.03.2016 недостатки работ, выявленных в ходе комплексного  обследования технического состояния конструкций выше отметки фундаментов  здания бассейна MAOУ «СОШ № 1» в г. Чебоксары, расположенного по адресу 

<

...>, указанных в заключении ООО «СтройЭкспертиза»   № 40/2020a, а именно:  

1. Привести конструкцию наружных самонесущих стен в соответствие с  действующими нормами.  

2. Сопряжения стен и колонн с полами выполнить закругленными. 3. Утеплить по наружному контуру плиту перекрытия на отм. -0.100. 

4. Заменить кладку цокольной части наружных стен на систему  вентилируемого фасада либо выполнить прижимную стенку из полнотелого  керамического кирпича, опирающуюся на фундамент.  

5. Для приведения температурно-влажностного режима к действующим  нормам со стороны системы вентиляции необходима замена установленного  приточно-вытяжного агрегата Ballu MACHINE Моделъ id 97165 / Slimline 80-50  Заказ № № RK16-014405-01 на оборудование, соответствующее фактическому  режиму эксплуатации помещения бассейна.  

6. Для приведения температурного режима к действующим нормам со  стороны системы отопления требуется увеличить площади нагревательных  элементов системы отопления не менее чем в два раза.  

7. Требуется применить защитные щиты или иные средства для  нагревательных приборов и элементов вентиляционной системы, расположенных  непосредственно на полу, для исключения получения ожогов и других возможных  травм занимающимися. Защитные щиты или иные средства защиты не должны  ухудшать работу инженерных систем. В случае замены систем отопления и  вентиляции, возможно предусмотреть размещение этих систем выше отметки пола  на 2.0 м.  

8. Для проветривания помещений в оконных переплетах необходимо  предусмотреть открывающиеся фрамуги или форточки, расположенные в верхней  части проемов.  

9. На подоконники оконных проемов и балки строительных конструкций  уложить с уклоном в сторону зала бассейна глазурованные или другие водостойкие  плитки.  

10. Усилить профнастил покрытия в местах его стыковки по длине,  уложив дополнительный лист профнастила сверху таким образом, чтобы  перекрыть место стыковки от прогона до прогона, либо выполнить раскладку  профнастила заново с соединением по длине на прогонах, либо подвести  дополнительные прогоны под место стыка профнастила.  

11. Для кровельных прогонов выполнить мероприятия по исключению  возможности скопления влаги.  

12. В конструкции кровли из ПBX мембраны, выполненной по  утеплителю без применения стяжки из бетона или цементно-песчаного раствора,  требуется выполнить переходные дорожки для возможности обслуживания кровли.  

13. Требуется заменить минераловатный утеплитель кровли, на  биостойкий и влагостойкий материал с прочностью на сжатие не менее 100кПa.  

14. Необходимо заменить поврежденные коррозией двери на двери с  антикоррозионным покрытием, применяемым при эксплуатации дверей в  помещении с мокрым режимом.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Алза" в доход  федерального бюджета 6 000 (Шесть тысяч) руб. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный  суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.  

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в  кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний  Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого  арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух  месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления  арбитражного суда.  

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики –  Чувашии.  

Судья О.Е. Владимирова  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 03.03.2023 2:59:00

 Кому выдана ВЛАДИМИРОВА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА