237/2024-5835(2) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00, www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А81-13140/2022

г. Салехард

02 февраля 2024 года

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи  Антоновой Е.В., при ведении протокола судебного заседания Секретарем судебного  заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому  заявлению общества с ограниченной ответственностью «ЗСК» (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>) к муниципальному учреждению «Управление капитального  строительства и капитального ремонта» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) о  взыскании 3 067 695 рублей 94 копеек,  

и по встречному исковому заявлению муниципального учреждения «Управление  капитального строительства и капитального ремонта» (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «ЗСК»  (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) о взыскании 189 764 рублей 88 копеек,  

с привлечением к участию в деле ООО Строительная компания «Сфера»  (ОГРН: 

<

***>), ООО «Надымгоравтодор»,  

при участии в судебном заседании: 

от ООО «ЗСК» - ФИО2, доверенность № 9 от 05.07.2022 (диплом);  ФИО3 (директор),  

от МУ «Управление капитального строительства и капитального ремонта» -  ФИО4, доверенность (диплом); ФИО5, доверенность,  

от третьих лиц - представители не явились; эксперт – ФИО6, 

руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

уточнённые исковые требования общества с ограниченной ответственностью «ЗСК»  удовлетворить частично.  

Взыскать с муниципального учреждения «Управление капитального  строительства и капитального ремонта» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в  

 

пользу общества с ограниченной ответственностью «ЗСК» (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>) задолженность за выполненные работы по контракту   № 0190300001221000312 в размере 148 627 рублей 78 копеек, неустойку в размере  62 177 рублей 93 копеек за период с 27.10.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по  20.10.2022, задолженность за выполненные работы по контракту   № 0190300001221000484 в размере 1 351 080 рублей 13 копеек, неустойку в размере  71 449 рублей 62 копеек за период с 24.11.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по  20.10.2022, расходы по уплате государственной пошлины в размере 20 347 рублей 00  копеек. Всего взыскать 1 653 682 рубля 46 копеек.  

Взыскать с муниципального учреждения «Управление капитального  строительства и капитального ремонта» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в  пользу общества с ограниченной ответственностью «ЗСК» (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>) неустойку в виде процентов за пользование чужими денежными  средствами, начисленные в порядке ст. 395 ГК РФ, исходя из суммы задолженности в  размере 148 627 рублей 78 копеек (или соответствующей ее части), начиная со  21.10.2022 по день фактической уплаты долга.  

Взыскать с муниципального учреждения «Управление капитального  строительства и капитального ремонта» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в  пользу общества с ограниченной ответственностью «ЗСК» (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>) неустойку в виде процентов за пользование чужими денежными  средствами, начисленные в порядке ст. 395 ГК РФ, исходя из суммы задолженности в  размере 1 351 080 рублей 13 копеек (или соответствующей ее части), начиная со  21.10.2022 по день фактической уплаты долга.  

В удовлетворении остальной части уточнённых исковых требований отказать. 

Встречные исковые требования муниципального учреждения «Управление  капитального строительства и капитального ремонта» удовлетворить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЗСК»  (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу муниципального учреждения  «Управление капитального строительства и капитального ремонта» (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>) неустойку за ненадлежащее исполнения обязательств по  контракту № 0190300001221000312 в размере 76 084 рублей 73 копеек и по контракту   № 0190300001221000484 в размере 113 680 рублей 15 копеек, расходы по уплате  государственной пошлины в размере 6 693 рублей 00 коп. Всего взыскать  196 457 рублей 88 копеек.  

С учетом зачета встречных однородных требований взыскать с муниципального  учреждения «Управление капитального строительства и капитального ремонта»  (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «ЗСК» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) задолженность в  размере 1 457 224 рублей 58 копеек.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЗСК»  (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в доход федерального бюджета 83 рубля  государственной пошлины.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  

законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  течение месяца со дня его принятия (изготовления его в полном объеме) путем подачи  апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через  Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа.  

Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения  формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет»  http://yamal.arbitr.ru.  

В случае обжалования решения в порядке апелляционного или кассационного  производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно  получить соответственно на интернет-сайте Восьмого арбитражного апелляционного  суда http://8aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Западно-Сибирского округа  http://faszso.arbitr.ru.  

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного  документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.  

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа разъясняет, что в  соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется  лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте  арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в  режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.  

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут  быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего  ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или  вручены им под расписку.  

Е.В. Антонова

Судья