АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

г. Элиста

31 мая 2021 года                                 Дело № А22–2357/2020

Резолютивная часть решения объявлена 24 мая 2021 года.

Арбитражный суд Республики Калмыкия в составе судьи Цадыковой Э.А. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Ставропольского края, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ЮГСТРОЙМЕГАПОЛИС» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к муниципальному учреждению Администрация Яшалтинского районного муниципального образования (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), третьи лица – Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, КП РК Дирекция «Стройзаказчик», о взыскании задолженности в общем размере 26 245 579 руб. 64 коп.,

при участии в судебном заседании:

от истца - представителя по доверенности №7 от 21.09.2020 ФИО2,

от ответчика – представителя по доверенности №1 от 11.01.2021 ФИО3,

от Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству РК – представителя по доверенности №1 от 11.01.2021 ФИО4, представителя по доверенности №9 от 26.01.2021 ФИО5, 

в судебном заседании в порядке статьи 163 АПК РФ объявлялся перерыв с 12 час. 26 мин. 17.05.2021 до 12 час. 30 мин. 24.05.2021, после завершения перерыва судебное заседание объявлено продолженным при участии: от истца – представителя по доверенности №7 от 21.09.2020 ФИО2, от ответчика – представителя по доверенности №1 от 11.01.2021 ФИО3, от Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству РК – представителя по доверенности №1 от 11.01.2021 ФИО4,   

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «ЮГСТРОЙМЕГАПОЛИС» (далее – истец, общество) обратилось в арбитражный суд с иском к муниципальному учреждению Администрация Яшалтинского районного муниципального образования Республики Калмыкия (далее – ответчик, администрация) о взыскании задолженности по муниципальному контракту №0105200000219000414 от 27.05.2019 в размере 24 937 893 руб. 60 коп., неустойки в размере 975 071 руб. 64 коп., убытков в виде упущенной выгоды в размере 332 614 руб. 40 коп.

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержала в полном объеме.

Представители Администрации и Министерства в судебном заседании иск не признали, повторив доводы, изложенные в отзывах. 

Представитель КП РК Дирекция «Стройзаказчик» в судебное заседание не явился, отзыв не направил. В судебном заседании 15.04.2021 директор КП РК Дирекция «Стройзаказчик» пояснил, что работы по представленным актам о приемке выполненных работ были фактически выполнены.

Суд на основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) рассматривает дело в отсутствие неявившейся стороны.

Выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела и оценив в совокупности представленные доказательства, арбитражный суд установил, что администрация (заказчик) и общество (подрядчик) по результатам аукциона заключили контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство подъезда к с. Красный Партизан от автомобильной дороги Яшалта – Соленое – Дивное», по условиям которого подрядчик принял на себя обязательства в установленный контрактом срок по заданию заказчика выполнить строительно-монтажные работы по объекту «Строительство подъезда к с. Красный Партизан от автомобильной дороги Яшалта – Соленое – Дивное» (далее – объект). 

Согласно пункту 1.1 контракта работы по контракту выполняются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативно-технических документов, проектно-сметной документацией, техническим заданием. 

Пунктом 1.2 контракта установлено, что местом выполнения работ является: Республика Калмыкия, подъезд к с. Красный Партизан от автомобильной дороги Яшалта – Соленое – Дивное. 

Согласно пункту 1.3 контракта, подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в пункте 1.1 контракта и ввести в эксплуатацию объект в соответствии с календарным графиком производства работ, установленным в приложении № 3. 

Цена контракта составляет 116 882 951 рубль 95 копеек, в том числе НДС 20%, является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта (пункт 3.1 контракта). Источником финансирования является бюджет Яшалтинского РМО РК (пункт 3.2 контракта). Согласно пункту 3.3 контракта оплата по контракту производится по факту приемки каждого выполненного этапа работ в течение 30 дней после подписания приемопередаточных документов, указанных в пункте 9.1 контракта. 

Срок выполнения работ по контракту определен в пункте 4.1: с момента заключения контракта до 15.12.2019. 

Контроль качества работ и контроль качества материалов осуществляется сторонами в соответствии с проектом, требованиями ГОСТ, СНиП, СП и другими нормативно-техническими документами, включая отраслевые стандарты и нормативы, и в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при осуществлении строительства автомобильной дороги (пункт 8.1 контракта).

Согласно пункту 9.1 контракта с 25 числа по 30 число каждого месяца подрядчик сдает заказчику выполненные объемы работ, с составлением акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и журнала учета выполненных работ (форма № КС-6А), а также исполнительную документацию, оформленную в соответствии с РД-11-02-2006. 

Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения акта приемки, подписанного подрядчиком, обязан подписать акт или дать мотивированный отказ. Причиной отказа является некомплектность актов на скрытые работы, применение материалов, не согласованных с заказчиком, обнаруженные недостатки в выполненных строительно-монтажных работах, а также иные отклонения от проекта, обоснованные заказчиком (пункт 9.2 контракта). 

В силу пункта 15.3 контракта, расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда по основанием, предусмотренным законодательством Российской Федерации, в результате одностороннего отказа от исполнения контракта. 

13 декабря 2019 года администрация приняла решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по причине нарушения подрядчиком сроков выполнения работ. 

Уведомление администрации об одностороннем отказе от исполнения контракта получено обществом 24.12.2019. 

Не согласившись с данным решением администрации, предприятие обжаловало его в судебном порядке. 

Решением Арбитражного суда Республики Калмыкия от 16.09.2020 по делу № А22- 282/2020 (оставлено без изменения постановлением 16 ААС от 12.01.2021 и постановлением АС СКО от 20.04.2021) признано недействительным решение от 13.12.2019 Муниципального учреждения Администрация Яшалтинского районного муниципального образования Республики Калмыкии об одностороннем отказе от исполнения Муниципального контракта от 27.05.2019 №0105200000219000414 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство подъезда к с.Красный Партизан от автомобильной дороги Яшалта - Соленое - Дивное».

Суды пришли к выводу, что действия общества, установившего невозможность выполнения предмета контракта в предусмотренные объем и срок, заблаговременно и неоднократно уведомившего администрацию, соответствуют требованиям статьей 716 и 719 Гражданского кодекса. Доказательств обратного не представлено. Поскольку вина общества в просрочке выполнения работ на спорном объекте не подтверждена, часть 2 статьи 715 Гражданского кодекса не применима к спорным правоотношениям – у администрации отсутствовало право на односторонний отказ от исполнения контракта по указанному основанию.

В качестве доказательств, подтверждающих выполнение контракта на сумму 24 937 893 руб. 60 коп., истец в материалы дела представил акты о приемке выполненных работ №№1, 2, 3, 4 от 11.12.2019, подписанные и заверенные сторонами без замечаний и разногласий. 

Ненадлежащее исполнение договорных обязательств по своевременной оплате выполненных работ явилось основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

Сложившиеся между сторонами правоотношения регулируются положениями Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) о подряде на выполнение проектных и изыскательских работ и подрядных работах для государственных или муниципальных нужд, Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ).

Согласно ст. 1  Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" настоящий Федеральный закон регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, в части, касающейся в том числе заключения гражданско-правового договора, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества), от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а также бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями либо иным юридическим лицом в соответствии с частями 1, 2.1, 4 и 5 статьи 15 настоящего Федерального закона (далее - контракт).

Согласно ст. 763 ГК РФ подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд. По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы (ст. 708 ГК РФ).

Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с настоящим Федеральным законом извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены. При заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, а в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о закупке. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей и статьей 95 настоящего Федерального закона (ст. 34 Закона №44-ФЗ).

В силу ст. 95 Закона №44-ФЗ изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в том числе при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта.

В соответствии со ст. 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

В силу требований п. 2 ст. 41 АПК РФ лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им правами. 

Судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия и состязательности сторон (ст. ст. 8, 9 АПК РФ).

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно ч. 2 ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Согласно п. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Поскольку ответчиком в нарушение статьи 65 АПК РФ не представлены доказательства оплаты задолженности, суд приходит к выводу, что требования истца о взыскании задолженности в сумме 24 937 893 руб. 60 коп. законны, обоснованы и подлежат удовлетворению.

Рассмотрев доводы ответчика, положенные в возражениях относительно исковых требований, суд пришел к следующим выводам.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2015), утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2015, в силу пункта 4 статьи 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации не подлежит взысканию плата за фактически оказанные услуги для государственных и муниципальных нужд в отсутствие заключенного государственного или муниципального контракта. Таким же образом указанное положение трактуется при наличии в контракте твердо установленной цены работ обусловленных контрактом.

Иной подход допускал бы поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных или муниципальных нужд в обход норм Закона о контрактной системе (статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно положениям ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.   

Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

В нарушение ст. 65 АПК РФ каких-либо доказательств, подтверждающих выполнение работ с недостатками, ответчиком не представлено, в том числе надлежащим образом не был составлен акт о дефектах, не проведена экспертиза.   

Таким образом, доводы ответчика в данной части судом признаются несостоятельными.   

Между тем, суд считает необходимым отметить, что согласно пункту 12 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» наличие акта приемки работ, подписанного заказчиком, не лишает заказчика права представить суду возражения по объему и стоимости работ.

Следовательно, подписание акта о приемке выполненных работ заказчиком не лишает его права заявить возражения по объему и качеству работ в период гарантийного срока.

В соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации взыскание неустойки является одним из способов защиты нарушенного права.

В силу пункта 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными залогом или договором.

Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

Неустойка является одним из способов обеспечения исполнения обязательств, средством возмещения кредитору потерь, вызванных нарушением должником своих обязательств.

В соответствии со ст. 34 Закона №44-ФЗ в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

В контракте стороны определили, что оплата производится поэтапно за фактически выполненные работы, в течение тридцати дней со дня подписания Заказчиком документов на оплату выполненных работ подписанных Подрядчиком, в том числе: (акта выполненных работ (форма КС-2) подписанных лицом, осуществляющим строительный Контроль, справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счета, счет - фактуры (при необходимости), а также представленной Подрядчиком исполнительной документации, согласно установленным требованиям нормативных документов.

В соответствии с разъяснениями по вопросам, возникающим в судебной практике, приведенным в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации «применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установлено, что при расчете пени, подлежащей взысканию в судебном порядке за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту в соответствии с частями 5 и 7 статьи 34 Закона о контрактной системе, суд вправе применить размер ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на момент вынесения судебного решения (пункт 38).

В соответствии с частью 5 статьи 34 Закона о контрактной системе пеня за просрочку заказчиком исполнения своих обязательств устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Следовательно, при добровольной уплате названной неустойки ее размер по общему правилу подлежит исчислению по ставке, действующей на дату фактического платежа.

При этом закон не содержит прямого указания на применимую ставку в случае взыскания неустойки в судебном порядке.

Вместе с тем по смыслу данной нормы, закрепляющей механизм возмещения возникших у кредитора убытков в связи с просрочкой исполнения обязательств, при взыскании суммы неустоек (пеней) в судебном порядке за период до принятия решения суда ко всему периоду просрочки подлежит применению ставка на день его вынесения.

Данный механизм расчета неустойки позволит обеспечить правовую определенность в отношениях сторон на момент разрешения спора в суде.

При присуждении неустойки по день фактического исполнения обязательства расчет суммы неустойки, начисляемой после вынесения решения, по смыслу пункта 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 г. N 7 осуществляется в процессе исполнения судебного акта судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве) по ставке, действующей на дату исполнения судебного решения.

При этом, принимая во внимание, что по смыслу статьи 330 ГК РФ взыскание неустойки направлено на компенсацию потерь кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением должником своих обязательств, при расчете неустойки должна быть применена ставка, позволяющая максимальным образом обеспечить защиту права кредитора и покрыть его инфляционные и иные потери.

С 01.01.2016 ставка рефинансирования ЦБ РФ приравнивается к значению ключевой ставки (постановление Правительства РФ от 08.12.2015 N 1340, указание ЦБ РФ от 11.12.2015 N 3894-У). 

Ключевая ставка на день вынесения решения установлена в размере 5% годовых. 

Таким образом, суд считает необходимым произвести перерасчет неустойки за период с 12.01.2020 по 13.10.2020 с учетом ставки 5%, в связи с чем размер неустойки за указанный период составляет 1 147 143 руб. 10 коп.

Поскольку суд не вправе выходить за пределы исковых требований, расчет истца не нарушает прав ответчика, суд удовлетворяет требование истца о взыскании неустойки в заявленном размере, ограниченном истцом добровольно, в размере 975 071 руб. 64 коп.

Согласно пункту 1 статьи 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы (пункт 2 статьи 15 ГК РФ).

В соответствии с правовой позицией, сформулированной в абзацах первом и втором пункта 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 25), по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 ГК РФ). Размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с разумной степенью достоверности. По смыслу пункта 1 статьи 15 ГК РФ, в удовлетворении требования о возмещении убытков не может быть отказано только на том основании, что их точный размер невозможно установить. В этом случае размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств дела, исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению.

Согласно правовой позиции, приведенной в пункте 14 Постановления N 25, по смыслу статьи 15 ГК РФ упущенной выгодой является неполученный доход, на который увеличилась бы имущественная масса лица, право которого нарушено, если бы нарушения не было; поскольку упущенная выгода представляет собой неполученный доход, при разрешении споров, связанных с ее возмещением, следует принимать во внимание, что ее расчет, представленный истцом, как правило, является приблизительным и носит вероятностный характер; это обстоятельство само по себе не может служить основанием для отказа в иске.

В пункте 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (далее - Постановление N 7) разъяснено, что при определении размера упущенной выгоды учитываются предпринятые кредитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления (пункт 4 статьи 393 ГК РФ). В то же время в обоснование размера упущенной выгоды кредитор вправе представлять не только доказательства принятия мер и приготовлений для ее получения, но и любые другие доказательства возможности ее извлечения.

В силу части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Лица, участвующие в деле несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 АПК РФ).

В соответствии с пунктом 2 статьи 401 ГК РФ вина должника в нарушении обязательства предполагается, пока не доказано обратное. Отсутствие вины в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства доказывается должником. В соответствии с абзацем 5 пункта 5 Постановления N 7, если должник несет ответственность за нарушение обязательства или за причинение вреда независимо от вины, то на него возлагается бремя доказывания обстоятельств, являющихся основанием для освобождения от такой ответственности, например обстоятельств непреодолимой силы.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 8 Постановления N 7, юридическая квалификация обстоятельства как непреодолимой силы возможна только при одновременном наличии совокупности ее существенных характеристик: чрезвычайности и непредотвратимости.

Не могут быть признаны непреодолимой силой обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий стороны обязательства, например, отсутствие у должника необходимых денежных средств, нарушение обязательств его контрагентами, неправомерные действия его представителей.

Доказательств невозможности исполнения обязательства в установленные договором сроки, в том числе, доказательств наличия обстоятельств, указывающих на отсутствие вины ответчика в нарушении обязательства, материалы дела не содержат.

Арбитражный суд, исследовав материалы дела, обращает внимание на то, что содержание контракта и действия сторон по его реализации свидетельствуют о наличии причинно-следственной связи между нарушением обязательств ответчиком и убытками истца, в результате чего общество лишилось возможности получения прибыли, на которую в условиях обычного гражданского оборота было вправе рассчитывать.

Таким образом, поскольку невозможность выполнения оставшейся части работ, а также невозможность выполнить работы в срок вызвана недобросовестным поведением заказчика, некачественность выполненных работ заказчиком не доказана, в сложившейся ситуации подлежит взысканию упущенная выгода в размере 332 614 руб. 40 коп.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны пропорционально удовлетворенным исковым требованиям. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 167, 168, 169, 170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «ЮГСТРОЙМЕГАПОЛИС» удовлетворить.

Взыскать с Муниципального учреждения Администрация Яшалтинского районного муниципального образования Республики Калмыкии в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЮГСТРОЙМЕГАПОЛИС» задолженность по муниципальному контракту №0105200000219000414 от 27.05.2019 в размере 24 937 893 руб. 60 коп., неустойку в размере 975 071 руб. 64 коп., убытки в виде упущенной выгоды в размере 332 614 руб. 40 коп., расходы по оплате государственной пошлины в размере 154 228 руб., всего – 26 399 807 руб. 64 коп.

Решение может быть обжаловано в течение одного месяца после его принятия в порядке, предусмотренном главой 34 АПК РФ, в Шестнадцатый Арбитражный апелляционный суд (г. Ессентуки) через Арбитражный суд Республики Калмыкия. 

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (г. Краснодар) в порядке, предусмотренном главой 35 АПК РФ, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, через Арбитражный суд Республики Калмыкия.

             Судья                                                                Э.А. Цадыкова