Арбитражный суд Краснодарского края 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

 

Дело № А32-10275/2023

г. Краснодар

02 мая 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 24 апреля 2023 года   Полный текст решения изготовлен 02 мая 2023 года  

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Полякова Д.Ю., при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению  

Администрации Крыловского сельского поселения Крыловского района, Краснодарский  край, Крыловский район, ст. Крыловская (ИНН 

<

***>),  

к Государственному унитарному предприятию Краснодарского края Северо-Восточная  водная управляющая компания «Курганинский групповой водопровод», Краснодарский  край, г. Армавир (ИНН 

<

***>),  

о взыскании, 

при участии в арбитражном процессе: от истца: не явился, извещен, от ответчика: ФИО2, по доверенности при ведении аудиозаписи,  

У С Т А Н О В И Л:

Администрация Крыловского сельского поселения Крыловского района (далее –  истец, администрация) обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании  с Государственного унитарного предприятия Краснодарского края Северо-Восточная  водная управляющая компания «Курганинский групповой водопровод» (далее – ответчик,  предприятие) о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по  муниципальному контракту № С-2 от 27.04.2022 в размере 138 486,63 руб.  

Истец явку представителя в заседание не обеспечил, о времени и месте слушания  дела надлежащим образом извещен.  

Представитель ответчика возражает против удовлетворения исковых требований,  представил отзыв на исковое заявление.  

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 136 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации (далее по тексту – АПК РФ), при неявке в  предварительное судебное заседание надлежащим образом извещенных истца и (или)  ответчика, других заинтересованных лиц, которые могут быть привлечены к участию в  деле, заседание проводится в их отсутствие.  

Согласно части 4 статьи 137 АПК РФ, если в предварительном судебном заседании  присутствуют лица, участвующие в деле, либо лица, участвующие в деле, отсутствуют в  предварительном судебном заседании, но они извещены о времени и месте судебного  заседания или совершения отдельного процессуального действия и ими не были заявлены  возражения относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить  

предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции,  за исключением случая, если в соответствии с настоящим Кодексом требуется  коллегиальное рассмотрение данного дела.  

Изучив материалы дела, суд посчитал дело подготовленным к рассмотрению,  завершил предварительное судебное заседание и перешел к судебному разбирательству в  судебном заседании.  

В соответствии с части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации (далее – АПК РФ) при неявке в судебное заседание арбитражного  суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте  судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие.  

На основании статьи 163 АПК РФ в судебном заседании 17.04.2023 объявлен  перерыв до 24.04.2023 до 14-05 часов.  

После перерыва заседание продолжено. 

В соответствии с частью 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации арбитражный суд оценивает относимость, допустимость,  достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную  связь доказательств в их совокупности.  

Суд, исследовав материалы дела и оценив в совокупности все представленные  доказательства, установил следующее.  

27.04.2022 между Администрацией Крыловского сельского поселения Крыловского  района (заказчик) и Государственным унитарным предприятием Краснодарского края  Северо-Восточная водная управляющая компания «Курганинский групповой водопровод»  (подрядчик) заключен муниципальный контракт № С-2 на выполнение реконструкции  головных водозаборных сооружений с устройством станции очистки воды  производительностью 3 500 м3 в станице Крыловской Крыловского района (ИКЗ  223233801056323380100100070034221414) (далее - Контракт), по условиям которого  Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению  реконструкции головных водозаборных сооружений с устройством станции очистки воды  производительностью 3 500 м3 в станице Крыловской Краснодарского края, в рамках  регионального проекта «Качество питьевой воды» федерального проекта «Чистая вода» в  соответствии с настоящим контрактом (пункт 1-1 Контракта)  

Цена контракта составляет 205 332 714 руб. 17 коп. Контрактом предусмотрены этапы его исполнения: 1 этап: с даты заключения Контракта по 31.12.2022 (включительно), стоимость этапа - 169 213 660,16 руб.; 

2 этап: с 01.01.2023 по 31.12.2023 (включительно), стоимость этапа 36 119 054,01  руб. (пункт 2.1 Контракта).  

Сторонами 31.10.2022 было заключено дополнительное соглашение № 2 к  Контракту об изменении цены Контракта. Согласно дополнительному соглашению цена  контракта составила 236 276 354,19 руб.:  

1 этап: с даты заключения Контракта по 31.12.2022 (включительно), стоимость  этапа 169 213 660 (сто шестьдесят девять миллионов двести тринадцать тысяч шестьсот  шестьдесят) рублей 16 копеек;  

- 2 этап: с 01.01.2023 по 31.12.2023 (включительно), стоимость этапа 67 062 694  (шестьдесят семь миллионов шестьдесят две тысячи шестьсот девяносто четыре) рубля 03  копейки.  

В соответствии с пунктом 5.7.1 Контракта, платежным поручением от 06.05.2022 №  128695 администрация Крыловского сельского поселения произвела авансовый платеж в  сумме 61 599 814,25 рублей 25 копеек.  

09.11.2022 сторонами подписаны Акт выполненных работ № 1 (форма КС-2) и  справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3) на сумму 16 716 101,01 руб.  

Работы оплачены платежным поручением от 17.11.2022 № 204797.  

25.11.2022 сторонами подписаны Акт выполненных работ № 2 (форма КС-2) и  справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3) на сумму 121 722 693,09 руб.  

Работы оплачены платежным поручением от 30.11.2022 № 327390. 

Таким образом, в рамках исполнения Контракта от 27.04.2022 № С-2 Подрядчиком  выполнены и сданы, а Заказчиком приняты и оплачены работы на общую сумму  138 438 794,10 рубля 10 коп.  

В срок до 31.12.2022 Подрядчик должен был сдать выполненные работы на  оставшуюся сумму 30 774 806 рублей 06 копеек.  

27.12.2022 по электронной почте Заказчиком было получено письмо с  предложением внести изменения в смету контракта в части порядка выполнения работ, в  связи с технической возможностью выполнения части работ из второго этапа в первом  этапе и выполнения части работ из первого этапа во втором этапе, с приложением  измененной сметы контракта на 10 листах.  

Заказчиком рассмотрено предложение о внесении изменений в смету контракта и  30.12.2022 направлено письмо в Министерство топливно-энергетического комплекса и  жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края об изменении существенных  условий Контракта.  

30.12.2022 сторонами подписано дополнительное соглашение № 4 к Контракту о  внесении изменений в приложение № 5 (Смету Контракта).  

В соответствии с частью 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд» информация об изменении контракта, в том  числе заключенное дополнительное соглашение, размещается Заказчиками в ЕИС в  течение 5 рабочих дней с даты изменения Контракта.  

Согласно статье 191 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока,  определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной  даты или наступления события, которыми определено его начало.  

Учитывая то, что дни с 31.12.2022 по 08.01.2023 являлись нерабочими днями,  течение срока для размещения в ЕИС дополнительного соглашения и измененной сметы  Контракта началось с первого рабочего дня 09.01.2023. Дополнительное соглашение с  обновленной сметой Контракта, содержащей 818 позиций, было размещено Заказчиком в  ЕИС 13.01.2023.  

18.01.2023 подрядчик предоставил документы о части выполненных работ в рамках  1 этапа.  

Документы о приемке работ по форме КС-2 и КС-3 на сумму 24 486 278,24 рублей  были переданы в администрацию Крыловского сельского поселения 18.01.2023 нарочно,  представителем Подрядчика (начальником ремонтно-строительного участка ГУП КК  «Северо-Восточная водная управляющая компания «Курганинский групповой  водопровод» ФИО3). Дата составления на указанных документах 18.01.2023 г.,  отчетный период с 26.11.2022 по 30.12.2022. Отметка ФБУ «РосСтройКонтроль»  ФИО4 проставлена на Акте выполненных работ 18.01.2023, что  подтверждается штампом организации.  

Согласно письму ФБУ «РосСтройКонтроль» от 20.01.2023 № РСК-СК/103,  полученному администрацией Крыловского сельского поселения 23.01.2023, Акт о  приемке выполненных работ № 3 от 18.01.2023 проверен и завизирован представителем  ФБУ «РосСтройКонтроль» 18.01.2023, после чего передан представителю ГУП  КК«Северо-Восточная водная управляющая компания «Курганинский групповой  водопровод» ФИО3  

Таким образом, Заказчиком подписан Акт выполненных работ на бумажном  носителе с уже имеющейся отметкой ФБУ «РосСтройКонтроль» 18.01.2023.  

На основании изложенного, администрация пришла к выводу о нарушении  ответчиком сроков выполнения работ, что повлекло начисление неустойки.  

Истцом в адрес ответчика направлена претензия 

Истец дважды направлял в адрес ответчика требования об уплате неустойки:  

- от 19.01.2023 исх. № 67/05-01, квитанция об отправке от 19.01.2023, отчет об  отслеживании почтового отправления от 14.02.2023 - вручено адресату 24.01.2023;  

- от 24.01.2023 исх. № 104/05-01, квитанция об отправке от 25.01.2023, отчет об  отслеживании почтового отправления от 14.02.2023 - вручено адресату 28.01.2023.  

Однако, данные претензии оставлены ответчиком без удовлетворения.  

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в  арбитражный суд с настоящим иском.  

Проверив и оценив представленные в материалы дела доказательства, суд пришел к  следующим выводам.  

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого  лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу,  оказать услуги, уплатить деньги и т.д. (пункт 1 статьи 307 Гражданского кодекса  Российской Федерации).  

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации  обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями  обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких  условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми  требованиями.  

Как указано в статье 310 Гражданского кодекса Российской Федерации  односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.  

Спорные отношения подпадают под правовое регулирование параграфа 4, 5 главы  37 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 №  44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд" (далее также - Закон № 44-ФЗ) с применением  в неурегулированной части общих положений о договоре подряда (параграф 1 главы 37  Гражданского кодекса Российской Федерации).  

В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона N 44-ФЗ данный Федеральный закон  регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных  нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок  товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких  закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, в  части, касающейся: планирования закупок товаров, работ, услуг; определения  поставщиков (подрядчиков, исполнителей); заключения гражданско-правового договора,  предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в  том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества), от имени  Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального  образования, а также бюджетным учреждением либо иным юридическим лицом в  соответствии с частями 1, 4 и 5 статьи 15 настоящего Федерального закона (далее -  контракт); особенностей исполнения контрактов; мониторинга закупок товаров, работ,  услуг; аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг; контроля за соблюдением  законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд (далее - контроль в сфере закупок).  

Согласно статье 763 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядные  строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758),  предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд,  осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на  выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд. По  государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для  государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить  

строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов  производственного и непроизводственного характера работы и передать их  государственному или муниципальному заказчику, а государственный или  муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или  обеспечить их оплату.  

Из содержания статьи 768 Гражданского кодекса Российской Федерации следует,  что к отношениям по муниципальным контрактам на выполнение подрядных работ для  муниципальных нужд применяются положения Гражданского кодекса Российской  Федерации, в части, не урегулированной им - Закон о подрядах для государственных или  муниципальных нужд.  

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по  договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой  стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик  обязуется принять результат работы и оплатить его.  

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд,  подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для  государственных нужд) положения, предусмотренные параграфом 1 главы 37 ГК РФ,  применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах  договоров (п. 2 ст. 702 ГК РФ).  

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской  Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный  договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить  иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые  условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.  

Пунктом 1 статьи 766 Гражданского кодекса Российской Федерации определено,  что государственный или муниципальный контракт должен содержать условия об объеме  и о стоимости подлежащей выполнению работы, сроках ее начала и окончания, размере и  порядке финансирования и оплаты работ, способах обеспечения исполнения обязательств  сторон.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской  Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения  работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также  сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не  установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором,  подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и  промежуточных сроков выполнения работы.  

Как следует из условий контракта, срок сдачи работ по 1 этапу на сумму 30  774 806,06 рублей – 31.12.2022.  

30.12.2022 сторонами подписано дополнительное соглашение № 4 к Контракту о  внесении изменений в приложение № 5 (Смету Контракта).  

В соответствии с частью 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 -  ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд» информация об изменении контракта, в том  числе заключенное дополнительное соглашение, размещается Заказчиками в ЕИС в  течение 5 рабочих дней с даты изменения Контракта.  

Согласно статье 191 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока,  определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной  даты или наступления события, которыми определено его начало.  

Учитывая то, что дни с 31.12.2022 по 08.01.2023 являлись нерабочими днями,  течение срока для размещения в ЕИС дополнительного соглашения и измененной сметы  Контракта началось с первого рабочего дня 09.01.2023. Дополнительное соглашение с  

обновленной сметой Контракта, содержащей 818 позиций, было размещено Заказчиком в  ЕИС 13.01.2023.  

18.01.2023 Подрядчик предоставил документы о части выполненных работ в  рамках 1 этапа.  

Документы о приемке работ по форме КС-2 и КС-3 на сумму 24 486 278 (двадцать  четыре миллиона четыреста восемьдесят шесть тысяч двести семьдесят восемь) рублей 24  копейки были переданы в администрацию Крыловского сельского поселения 18.01.2023  нарочно, представителем Подрядчика (начальником ремонтно-строительного участка  ГУП КК «Северо-Восточная водная управляющая компания «Курганинский групповой  водопровод» ФИО3). Дата составления на указанных документах 18.01.2023,  отчетный период с 26.11.2022 по 30.12.2022. Отметка ФБУ «РосСтройКонтроль»  ФИО4 проставлена на Акте выполненных работ 18.01.2023, что  подтверждается штампом организации.  

Согласно письму ФБУ «РосСтройКонтроль» от 20.01.2023 № РСК-СК/103 (копия  прилагается), полученному администрацией Крыловского сельского поселения 23.01.2023,  Акт о приемке выполненных работ № 3 от 18.01.2023 проверен и завизирован  представителем ФБУ «РосСтройКонтроль» 18.01.2023, после чего передан представителю  ГУП КК «Северо-Восточная водная управляющая компания «Курганинский групповой  водопровод» ФИО3  

Соответственно Заказчиком подписан Акт выполненных работ на бумажном  носителе с уже имеющейся отметкой ФБУ «РосСтройКонтроль» 18.01.2023.  

В соответствии с пунктом 5.9 Контракта документ о приемке, подписанный  Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в ЕИС автоматически с  использованием ЕИС направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о  приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с  настоящим пунктом такого документа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой  расположен Заказчик.  

Приемка результатов работ осуществляется Заказчиком в течение 20 (двадцати)  рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке с использованием  ЕИС (пункт 5.10 Контракта).  

Согласно пункту 5.10 Контракта общий срок приемки Заказчиком выполненных  работ составляет не более 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления  документа ° приемке с использованием ЕИС.  

Документ о приемке № 3 от 18.01.2023 был размещен Подрядчиком в ЕИС и  получен 18.01.2023 в 14:02, подписан в ЕИС 19.01.2023 в 09:07, что подтверждается  скриншотом с ЕИС (прилагается).  

Учитывая изложенное, Заказчиком сроки приемки работ не нарушены. 

Объективных обстоятельств, влекущих невозможность представить документы,  подтверждающие выполнение работ 31.12.2022 либо в день размещения дополнительного  соглашения в ЕИС, то есть 13.01.2023 ответчиком в материалы дела не представлено.  

Вместе с тем, подрядчиком обязательства по контракту исполнены с нарушением  установленных сроков.  

Частью 2 статьи 94 Закона № 44-ФЗ установлено, что поставщик (подрядчик,  исполнитель) в соответствии с условиями контракта, в том числе к установленному  контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара,  выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные контрактом.  

Частью 4 статьи 34 Закона № 44-ФЗ определено, что в контракт включается  обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика,  исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,  предусмотренных контрактом.  

На основании части 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, в случае просрочки исполнения  поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного  

обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или  ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику,  исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).  

Согласно части 7 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, пеня начисляется за каждый день  просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,  предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения  установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается  контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой  ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа  исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,  предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения  контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за  исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной  порядок начисления пени.  

В силу пункта 14.4 Контракта в случае просрочки исполнения подрядчиком  обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а  также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком  обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование  об уплате неустоек (штрафов, пеней).  

Пунктом 7.6 Контракта установлено, что в случае просрочки исполнения  подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, подрядчик оплачивает  заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,  предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения  установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой  действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской  Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему  обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.  

Согласно представленному истцом расчету, неустойка подлежит начислению за  период с 01.01.2023 по 18.01.2023 (18 дней):  

30 774 806,06 руб. * 18 * 1/300 * 7,5% = 138 486,63 руб. Указанный расчет судом проверен, признан верным. 

Доводы ответчика со ссылкой на ст. 191-193 ГК РФ о том, что неустойку  необходимо начислять с 10.01.2023, а не с 01.01.2023, подлежат отклонению, поскольку  условиями контракта сторонами согласована конкретная дата выполнения работ –  31.12.2022, при этом указанный срок был ответчиком нарушен, обязательство ответчика  не является денежным, в связи с чем, начисление неустойки с 01.01.2023 не противоречит  действующему законодательству.  

В связи с чем, требования истца о взыскании с ответчика неустойки за нарушение  сроков выполнения работ являются обоснованными и подлежат удовлетворению в полном  объеме.  

Оснований для списания неустойки в соответствии с Постановлением  Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 судом не установлено, поскольку, хотя сумма  начисленной неустойки составляет и менее 5 % от цены контракта, вместе с тем,  обязательства по контракту в части выполнения работ по первому этапу исполнены не в  полном объеме.  

В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу  которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае,  если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в  деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.  

Размер государственной пошлины для исковых требования истца в размере  138 486,63 рублей составляет 5 155 рублей.  

В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Налогового кодекса Российской Федерации  сумма налога исчисляется в полных рублях. Сумма налога менее 50 копеек отбрасывается,  а сумма налога 50 копеек и более округляется до полного рубля.  

Поскольку истец на основании статьи 333.37 Налогового кодекса Российской  Федерации освобожден от уплаты государственной пошлины, то государственная  пошлина в размере 5 155 рублей подлежит взысканию с ответчика в доход федерального  бюджета.  

На основании изложенного, руководствуясь статьями 41, 64-71, 110, 137, 156, 163,  167-176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л:

Взыскать Государственного унитарного предприятия Краснодарского края Северо-Восточная водная управляющая компания «Курганинский групповой водопровод» (ИНН  

<

***>) в пользу Администрации Крыловского сельского поселения Крыловского  района (ИНН 

<

***>) сумму неустойки за просрочку исполнение обязательств по  контракту от 27.04.2022 № С-2 в размере 138 486,63 руб.  

Взыскать Государственного унитарного предприятия Краснодарского края Северо-Восточная водная управляющая компания «Курганинский групповой водопровод» (ИНН  

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 5 155  руб.  

Решение может быть обжаловано в порядке и сроки, предусмотренные  Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.  

Судья Д.Ю. Поляков