35/2022-172139(1) 

 

Арбитражный суд Тамбовской области 

392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12  http://tambov.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А64-5504/2022

г. Тамбов

02 ноября 2022 года

Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи Попова Ю.В.  

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи  помощником судьи Кушеверской И.Г.  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

Управления градостроительства и архитектуры 

<

...> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик  «Техком»  

<

...>, этаж 2, каб. 3 (ОГРН1196820007120, ИНН 

<

***>) Третье лицо: 

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение социального  обслуживания населения «Центр социальных услуг для населения города Мичуринска и  Мичуринского района»  

<

...> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) об обязании устранить недостатки выполненных работ 

при участи в судебном заседании представителей: от истца: ФИО1, доверенность № 5 от 10.01.2022, паспорт 

от ответчика: не явился, извещён  от третьего лица: не явился, извещён  

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности,  предусмотренные ст. 41 Арбитражного процессуального кодекса РФ (АПК РФ),  разъяснены. Отводов составу суда не заявлено.  

Руководствуясь ст.ст. 102, 110, 112, 167-170, 174 АПК РФ, Арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

1. Обязать Общество с ограниченной ответственностью Специализированный  застройщик «Техком», 

<

...>, этаж 2, каб. 3 (ОГРН1196820007120, ИНН 

<

***>) не позднее одного месяца с  момента вступления настоящего решения в законную силу устранить недостатки по  

02 ноября 2022 года 

государственным контрактам: № 0164200003019003749_344701 от 23.01.2020 на долевое  участие в строительстве многоквартирных жилых домов для предоставления жилых  помещений (квартир) общей площадью не менее 29 кв.м и не более 33 кв.м для лиц из  числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и №  0164200003021001972_344701 от 19.07.2021 приобретение жилых помещений (квартир) на  первичном рынке жилья в городских округах Тамбовской области общей площадью не  менее 29 кв.м и не более 42 кв.м для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения родителей (68:26:083), а именно, устранить недостатки в домах (около домов),  расположенных по адресу: 

<

...>:  

- отмосток 

<

...>, д. 1 корпус 2, д. 1 корпус 3, д. 1 корпус 4 и д. 1 корпус  5 (вокруг зданий имеют многочисленные дефекты: просадки, провалы, щели, трещины,  неровности, отсутствует щебень при устройстве основания под отмостку, отмостки имеют  ширину менее 1-го метра) (государственные контракты № 0164200003019003749_344701  от 23.01.2020 и № 0164200003021001972_344701 от 19.07.2021);  

- входных площадок 

<

...>, д. 1 корпус 2, д. 1 корпус 3, д. 1 корпус 4 и  д. 1 корпус 5 (имеются трещины и проседания, расстояние от площадки до здания имеют  зазор до 30 мм) (государственные контракты № 0164200003019003749_344701 от  23.01.2020 и № 0164200003021001972_344701 от 19.07.2021);  

- асфальтного покрытия возле 

<

...>, д. 1 корпус 2, д. 1 корпус 3, д. 1  корпус 4 и д. 1 корпус 5 (покрытие имеет проломы, ямы, трещины, просадки, неровности,  на тротуаре около д. 1 корпус 5 яма залита цементом) (государственный контракт №  0164200003019003749_344701 от 23.01.2020);  

- наружного освещения 

<

...>, д. 1 корпус 2, д. 1 корпус 3, д. 1 корпус 4  и д. 1 корпус 5 (освещение не функционирует на 3-х столбах из 4-х, расположенных на  территории двора) (государственные контракты № 0164200003019003749_344701 от  23.01.2020 и № 0164200003021001972_344701 от 19.07.2021);  

- в работе системы вентиляции и газовых котлов д. 1 квартиры 2 и 3  (государственный контракт № 0164200003019003749_344701 от 23.01.2020).  

2. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Специализированный  застройщик «Техком» в доход федерального бюджета государственную пошлину в  размере 6 000 руб. 00 коп.  

3. Выдать истцу исполнительный лист после вступления решения в законную силу  по ходатайству взыскателя.  

4. Выдать налоговому органу исполнительный лист после вступления решения в  законную силу.  

5. Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы, решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в  Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, находящийся по адресу: 

<

...>, через Арбитражный суд Тамбовской области.  

Судья Ю.В. Попов 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 04.02.2022 8:12:00

Кому выдана ПОПОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ