АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00, 

 www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А81-9630/2024

г. Салехард

21 января 2025 года

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи Голощапова М.В., при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Хамитовым Р.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску муниципального казённого учреждения «Управление коммунального заказа» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «ЛенАр» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) о понуждении к надлежащему исполнению гарантийных обязательств,  

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Дельфин»,  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «ЛенАр» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, дата регистрации: 06.02.2008, адрес: 629601, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

<

...>) в рамках исполнения гарантийных обязательств по муниципальному контракту от 16.04.2021 № 7521/ЭК на выполнение работ по капитальному ремонту объекта муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Дельфин» в г. Муравленко», безвозмездно устранить дефекты, а именно:  

в срок до 15.06.2025 устранить провал покрытия отмостки, выполненной из брусчатки, в месте примыкания к зданию 2 подъезда 2 корпуса, путём перекладки брусчатки с устройством нового основания;  

в тридцатидневный срок со дня вступления в законную силу настоящего решения: 

- выполнить работы по замене, либо ремонту 2-х камер видеонаблюдения модель «Beward» B2520RZK (s/n 7722062352, 7722062330, 7722062355);  

- выполнить установку элемента запирающего устройства на створке оконного блока ПВХ в кабинете тренера блока Б (бассейн) и обеспечить герметичность притвора оконного блока;  

- выполнить замену резинового уплотнителя на створках оконного блока ПВХ в коридоре запасного выхода блока Б (бассейн) и обеспечить герметичность притвора оконного блока;  

- выполнить переустановку существующих дверных блоков, с полной заменой дверных коробок (материал исполнения принять деревянный массив, предварительно огрунтованный и окрашенный в цвет существующих полотен) в тамбурах подъездов 1 блока № 1, 2, 4 и 2 блока № 1-4.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЛенАр» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, дата регистрации: 06.02.2008, адрес: 629601, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

<

...>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000,00 руб.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня изготовления в полном объёме, путём подачи апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа.  

М.В. Голощапов

Судья