Арбитражный суд Мурманской области 

ул. Академика Книповича, д. 20, г.Мурманск, Мурманская область, 183038 

e-mail: murmansk.info@arbitr.ru 

http://murmansk.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

 

город Мурманск Дело № А42-2773/2024  

Резолютивная часть решения оглашена 06 мая 2024 года  Решение в полном объеме изготовлено 07 мая 2024 года  

 Судья Арбитражного суда Мурманской области Быкова Н.В.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником ФИО1,  рассмотрев в судебном заседании дело по иску  

некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в  многоквартирных домах в Мурманской области» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>; адрес: ул. Подстаницкого, д. 1, 

<

...>),  

к обществу с ограниченной ответственностью "Атлантис" (адрес: ул. Ленсовета,  д.75, литера А, помещ. 15-Н, оф. 1, Муниципальный округ Звёздное, г. Санкт- Петербург, 196158, ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)  

о взыскании 1 279 577 рублей 04 копейки; при участии в судебном заседании представителей: истца – не явился, извещен; ответчика – не явился, извещен; 

УСТАНОВИЛ:

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего  имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» (далее – истец,  

Заказчик) обратилась в Арбитражный суд Мурманской области с иском к обществу  с ограниченной ответственностью " Атлантис " (далее – ответчик, Подрядчик) о  взыскании неустойки в сумме 1 279 577 рублей 04 копейки.  

В судебное заседание стороны, извещенные надлежащим образом о времени и  месте рассмотрения дела, не явились.  

Отзыв Подрядчиком не представлен. 

В соответствии со статьей 156 АПК РФ суд считает возможным рассмотреть  дело в отсутствие сторон.  

Исследовав материалы дела, суд установил следующее. 

23.05.2022 сторонами заключены Договоры №№ 2022-ПСМР-58, 2022-ПСМР- 59, 2022-ПСМР-60 на выполнение работ по капитальному ремонту  многоквартирных домов, расположенных по адресам: Мурманская область,  н.

<

...> далее - МКД)  с аналогичными условиями.  

Дополнительными соглашениями от 10.01.2023 к указанным Договорам,  стоимость работ по капитальному ремонту в МКД определена:  

Адрес 

многоквартирного  дома  

Вид работ (согласно утвержденного краткосрочного плана)  

 Стоимость работ,  в том числе НДС/без 

НДС 

<

...>  

Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши  

 495 946,36  

Капитальный ремонт крыши  

8 189 177,46 

<

...>  

Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши  

 321 470,98  

Капитальный ремонт крыши  

5 325 358,52 

<

...>  

Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши  

 495 972,68  

Капитальный ремонт крыши  

8 189 370,39 

Ответчиком допущена просрочка исполнения обязательств в части разработки  проектной документации.  

Согласно Приложению № 2 к указанным Договорам, дата передачи проектной  документации, а также заключения государственной экспертизы Заказчику: не  позднее 24.07.2022.  

Акты приемки работ по разработке ПСД по спорным домам подписаны  19.12.2022. То есть, нарушено исполнение обязательств на 148 дней (период  25.07.2022 - 19.12.2022).  

Согласно пунктам 9.4 Договоров, в случае нарушения Подрядчиком срока  начала/окончания работ, предусмотренного пунктом 3.1 Договора, а также  нарушение срока окончания работ по отдельным видам работ (промежуточные  сроки работ) по каждому объекту, включая выполнение этапов работ по отдельным  элементам (системам) здания в соответствии с Календарным планом работ,  графиком производства работ, срока передачи исполнительной документации,  Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости  работ, сроки по которому нарушены, которая начисляется за каждый день  просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со  дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока  исполнения обязательства, включая срок исполнения.  

Истцом начислена неустойка на основании пунктов 9.3 Договоров за  просрочку исполнения обязательства по разработке проектной документации на  проведение капитального ремонта по вышеуказанным объектам в сумме 194 381  рубль 72 копейки (расчет: (495 946,36 руб.+ 321 470,98 руб.+ 495 972,68 руб.) х 148  дней х 0,1%)).  

Сроки окончания работ не соблюдены Подрядчиком. 

Согласно Приложению № 3 к указанным Договорам, работы по капитальному  ремонту должны быть окончены не позднее 08.11.2022.  

Акты выполненных работ по форме КС-2 подписаны сторонами 28.12.2022. Просрочка окончания работ с 09.11.2022 по 28.12.2022 составляет 50 дней. 

С учетом пункта 9.4 Договора, в отношении Подрядчика истцом начислен  штраф за просрочку исполнения обязательства в части сроков окончания работ по  

проведению капитального ремонта: (8 189 177,46 + 5 325 358,52 + 8 189 370,39) *  50 * 0,1 % = в сумме 1 085 195 рублей 32 копейки.  

24.01.2024 ответчику направлена претензия № 04/39/230121/390. 

04.04.2024 Заказчик обратился в суд с соответствующим иском.  

Суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению по  следующим основаниям.  

Возражений ответчиком не представлено. 

В соответствии со статьей 65 АПК РФ суд считает обоснованными расчеты,  произведенные истцом.  

Факты несвоевременного выполнения обязательств по договорам по  разработке проектной документации, по исполнению работ в установленный срок,  подтверждены.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 ГК РФ, по договору строительного  подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по  заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные  работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для  выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.  

Основания и размер неустойки согласован сторонами в договорах. 

В соответствии статьями 330, 331 ГК РФ подлежит взысканию с ответчика в  пользу истца неустойка (пени) в сумме  194 381 рубль 72 копейки и в сумме  1 085 195 рублей 32 копейки, а всего – 1 279 577 рублей 04 копейки.  

В соответствии со статьей 110 АПК РФ подлежат взысканию с Подрядчика в  пользу Заказчика судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме  25 796 рублей 00 копеек.  

Руководствуясь статьями 167-170, 110 Арбитражного процессуального  Кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Мурманской области  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Атлантис» (ИНН  

<

***>) в пользу некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта  

общего имущества многоквартирных домах в Мурманской области» (ИНН  

<

***>) неустойки в сумме 1 279 577 рублей 04 копейки и судебные расходы  по оплате государственной пошлины в сумме 25 796 рублей 00 копеек.  

 Решение может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции месячный  срок со дня принятия.  

 Судья Н.В. Быкова