Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-30891/2018

05 декабря 2018 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  29 ноября 2018 года.

Полный текст решения изготовлен  05 декабря 2018 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеева О.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: администрация муниципального образования "Каменногорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области (адрес:  Россия 188950, г Каменногорск, Ленинградская обл Выборгский р-н, ал Березовая 4; Россия 188800, Выборг, Ленинградская область, Выборгская 30, ОГРН:  1054700191655; 1054700191655);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "НОРД ИНЖИНИРИНГ" (адрес:  Россия 192102, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, наб РЕКИ ВОЛКОВКИ 7/А/410, ОГРН:  1117847270958);

о взыскании 1721717.86

при участии

-от истца: ФИО2 по доверенности от 09.01.18,

-от ответчика: не явился, о времени и месте извещен надлежащим образом,

установил:

Администрация муниципального образования "Каменногорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области обратилась с иском о взыскании с ООО "НОРД ИНЖИНИРИНГ" 1 678 317 руб. 35 коп. штрафа и 43 400 руб. 51 коп. пеней на основании муниципального контракта №0145300000915000004 от 07.04.15.

Ответчик отзыв по существу исковых требований не представил.

Судом установлено:

Между сторонами был заключен муниципальный контракт №0145300000915000004 от 07.04.15 на выполнение работ по реконструкции существующих водозаборных и водоочистных сооружений г. Каменогорска и дополнительные соглашения к нему.

Сумма работ по контракту составляет 335 663 470 руб. 00 коп.

Согласно п.1.2.2 дополнительного соглашения №14 от 21.12.16 срок завершения работ – 30.06.17.

Акт приемки законченного строительством объекта подписан – 06.08.18.

В связи с нарушением срока выполнения работ ответчику начислены пени в соответствии с п.5.3 контракта в размере 43 400 руб. 51 коп., которые подлежат взысканию.

Штраф в размере 1 678 317 руб. 35 коп., рассчитанный по п.5.2 контракта, взысканию не подлежит, так как за одно правонарушение не может применяться две меры ответственности.

В связи с тем, что истец освобожден от оплаты государственной пошлины, с ответчика подлежит взысканию в доход федерального бюджета 2 000 руб. 00 коп. государственной пошлины.

Руководствуясь статьями 309, 310, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 156, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "НОРД ИНЖИНИРИНГ" в пользу Администрации муниципального образования "Каменногорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области 43 400 руб. 51 коп. пеней, а в доход федерального бюджета 2 000 руб. 00 коп. государственной пошлины.

Выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Сергеева О.Н.