Четвертый арбитражный апелляционный суд

улица Ленина, дом 100б, Чита, 672000, http://4aas.arbitr.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Дело №А19-17327/2018

г. Чита

24 апреля 2019 года

Четвертый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего судьи Мациборы А.Е., рассмотрев в открытом судебном заседании при ведении протокола секретарем судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, 

иск Управления федерального казначейства по Иркутской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 664003, 

<

...>) к обществу с ограниченной ответственностью «Качугские коммунальные системы» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 664005, 

<

...>) о взыскании 258 661,71 руб., 

установил:

Управление федерального казначейства по Иркутской области обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Качугские коммунальные системы» о взыскании убытков (реального ущерба) в размере 258 661,71 руб.

Решением Арбитражного суда Иркутской области от 28.09.2018 исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с указанным решением, ответчик обратился в Четвертый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт. 

Определением Четвёртого арбитражного апелляционного суда от 10.12.2018 суд апелляционной инстанции перешел к рассмотрению дела №А19-17327/2018 по правилам, установленным для суда первой инстанции. 

Дело рассматривается в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представители участвующих в деле лиц в судебное заседание не явились. 

18.04.2019 от Управления федерального казначейства по Иркутской области и общества с ограниченной ответственностью «Качугские коммунальные системы»  поступили ходатайства об утверждении мирового соглашения от 18.04.2019 и прекращении производства по делу. 

Представлено мировое соглашение, подписанное от имени истца руководителем Управления федерального казначейства по Иркутской области ФИО2, действующей на основании Положения об Управления федерального казначейства по Иркутской области, утвержденного приказом Федерального казначейства от 27.12.2013 №316, от ответчика – генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Качугские коммунальные системы» – ФИО3, действующей на основании Устава. 

Мировое соглашение содержит следующие условия:

«1. На основании локального сметного расчета, утвержденного заместителем руководителя Управления Федерального казначейства по Иркутской области ФИО4 от 20 декабря 2016 года, с целью проведения ремонтновосстановительного ремонта трубопровода административного здания Управления Федерального казначейства по Иркутской области, находящегося по адресу: 

<

...>, стороны пришли к соглашению о распределении ремонтных работ, предусмотренных локальным сметным расчетом в следующем порядке:

№

пп

Наименование работ, предусмотренных локальным сметным расчетом от 20 декабря 2016 года

Сторона, в обязательство которой входит выполнение работ

1.

Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 25 м2

Управление Федерального казначейства по Иркутской области

2

Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м³ группа грунтов 3

Управление Федерального казначейства по Иркутской области

3

Демонтаж мостков на трубах водораспределения

Управление Федерального казначейства по Иркутской области

4

Демонтаж трубопроводов в каналах и надземная при условии давления 0,6 Мпа, температуре 115°С, диаметр труб: 50 мм.

ООО «Качугские коммунальные системы»

5

Демонтаж стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм.

ООО «Качугские коммунальные системы»

6

Устройство мостков на трубах водораспределения

Управление Федерального казначейства по Иркутской области

7

Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 Мпа, температуре 115°С, диаметр труб: 50 мм.

ООО «Качугские коммунальные системы»

8

Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм.

ООО «Качугские коммунальные системы»

9

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм.

ООО «Качугские коммунальные системы»

10

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм.

ООО «Качугские коммунальные системы»

11

Краны шаровые под приварку «LD» для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа

ООО «Качугские коммунальные системы»

12

Краны шаровые под приварку «LD» для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа

ООО «Качугские коммунальные системы»

13

Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими

ООО «Качугские коммунальные системы»

14

Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой

ООО «Качугские коммунальные системы»

15

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м. бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3.

Управление Федерального казначейства по Иркутской области

2. Стороны пришли к соглашению о том, что ООО «Качугские коммунальные системы» обязуется приступить к выполнению ремонтных работ №4, №5 и с №7 по №14 после завершения выполнения Управлением Федерального казначейства по Иркутской области работ №№1, 2, 3 и №6 локального сметного расчета и заблаговременного письменного уведомления об окончании работ.

3. ООО «Качугские коммунальные системы» обязуется выполнить работы № 4 и № 5 локального сметного расчета в срок, не превышающий 9 (девяти) рабочих дней; работы с № 7 по № 14 локального сметного расчета в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) рабочих дней, с момента получения письменного уведомления об окончании завершения работ №№ 1, 2, 3 и № 6 Управлением Федерального казначейства по Иркутской области.

4. Стороны обязуются осуществлять ремонтно-восстановительные работы трубопровода в соответствии с локальным сметным расчетом Управления Федерального казначейства по Иркутской области от 20 декабря 2016 года. В случае обнаружения скрытых (неучтенных), но необходимых, ремонтных работ (в том числе, в случае обнаружения деревянных лотков, изготовление и установка новых лотков, не упомянутых в настоящем соглашении), данные виды работ относятся на Управление Федерального казначейства по Иркутской области.

5. Ввиду выполнения совместных работ, состоящих из 15 позиций, вытекающих из локального сметного расчета от 20 декабря 2016 года, а также из настоящего мирового соглашения, Стороны договорились о том, что по завершению ремонтных работ каждой Стороны (с 1 по 3 позиции - 1 этап, с 4 по 5 позиции - 2 этап, 6 позиция - 3 этап, с 7 по 14 позиция - 4 этап, 15 позиция - 5 этап), Стороны (уполномоченные приказом или доверенностью представители Сторон) подписывают акты о приемке выполненных работ, с обязательным указанием в актах о приемке выполненных работ информации о наименовании выполненных работ, объеме и их стоимости (общее количество этапов - 5, общее количество актов выполненных работ - 5).

6. Управление Федерального казначейства по Иркутской области принимает выполненные с надлежащим качеством ремонтные работы ООО «Качугские коммунальные системы», как надлежащее выполнение своих обязательств по выполнению заключенного мирового соглашения и претензий не имеет.

7. Стороны подтверждают, что им известно о том, что в силу ст. 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением.

8. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству Истца или Ответчика.

9. Судебные расходы, которые были произведены Сторонами в связи с рассмотрением дела №А19-17327/2018 возлагаются на ту Сторону, которая произвела соответствующие судебные расходы и возмещению за счет противоположной стороны не подлежат.

10. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону, подлежит утверждению Четвертым апелляционным Арбитражным судом в порядке, предусмотренном ст. 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

11. Настоящее мировое соглашение подписано Сторонами в Российской Федерации, городе Иркутске, составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для Сторон соглашения, один экземпляр подлежит приобщению к материалам Арбитражного дела № А19-17327/2018.

12. Последствия, предусмотренные ч. 3 ст. 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, связанные с прекращением производства по делу в связи с заключением мирового соглашения Сторонам известны и понятны.»

Вопрос об утверждении мирового соглашения стороны просили рассмотреть в отсутствие представителей. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.

Согласно частям 4, 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны могут закончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном главой 15 названного Кодекса. Арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, уменьшение им размера исковых требований, признание ответчиком иска, не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по существу.

В силу части 1 статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса.

Суд апелляционной инстанции оценил в соответствии с требованиями главы 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленное сторонами мировое соглашение и пришел к выводу, что оно не противоречит закону и не нарушает прав и законных интересов третьих лиц. 

Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные пунктом 3 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, как следует из текста мирового соглашения, сторонам понятны.

В соответствии с частью 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу в случае утверждения мирового соглашения.

В силу пункта 3 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный суд апелляционной инстанции вправе отменить решение полностью или в части и прекратить производство по делу.

Поскольку мировое соглашение заключено в суде апелляционной инстанции, решение суда первой инстанции подлежит отмене, а производство по делу - прекращению.

Согласно части 4 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине распределяются между сторонами в соответствии с достигнутым соглашением.

В соответствии с условиями мирового соглашения судебные издержки понесенные сторонами остаются на той стороне, которая их понесла.

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в определении об утверждении мирового соглашения указывается на возвращение сторонам из федерального бюджета половины уплаченной ими государственной пошлины, за исключением случаев, если мировое соглашение заключено в процессе исполнения судебного акта арбитражного суда.

Ответчик при подаче апелляционной жалобы уплатил госпошлину в сумме 3000 руб. платежным поручением №503 от 01.10.2018.

Следовательно, ответчику подлежит возврату из федерального бюджета госпошлина в размере 1 500 руб.

Руководствуясь статьями, 139, 140, 141, пунктом 2 статьи 150, ст.258, ст.ст.268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда Иркутской области от 28.09.2018 по делу №А19-17327/2018 отменить, производство по делу прекратить.

Утвердить мировое соглашение, заключенное 18 апреля 2019 года между Управлением федерального казначейства по Иркутской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) и обществом с ограниченной ответственностью «Качугские коммунальные системы» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) на следующих условиях:

«1. На основании локального сметного расчета, утвержденного заместителем руководителя Управления Федерального казначейства по Иркутской области ФИО4 от 20 декабря 2016 года, с целью проведения ремонтновосстановительного ремонта трубопровода административного здания Управления Федерального казначейства по Иркутской области, находящегося по адресу: 

<

...>, стороны пришли к соглашению о распределении ремонтных работ, предусмотренных локальным сметным расчетом в следующем порядке:

№

пп

Наименование работ, предусмотренных локальным сметным расчетом от 20 декабря 2016 года

Сторона, в обязательство которой входит выполнение работ

1.

Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 25 м2

Управление Федерального казначейства по Иркутской области

2

Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м³ группа грунтов 3

Управление Федерального казначейства по Иркутской области

3

Демонтаж мостков на трубах водораспределения

Управление Федерального казначейства по Иркутской области

4

Демонтаж трубопроводов в каналах и надземная при условии давления 0,6 Мпа, температуре 115°С, диаметр труб: 50 мм.

ООО «Качугские коммунальные системы»

5

Демонтаж стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм.

ООО «Качугские коммунальные системы»

6

Устройство мостков на трубах водораспределения

Управление Федерального казначейства по Иркутской области

7

Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 Мпа, температуре 115°С, диаметр труб: 50 мм.

ООО «Качугские коммунальные системы»

8

Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм.

ООО «Качугские коммунальные системы»

9

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм.

ООО «Качугские коммунальные системы»

10

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм.

ООО «Качугские коммунальные системы»

11

Краны шаровые под приварку «LD» для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа

ООО «Качугские коммунальные системы»

12

Краны шаровые под приварку «LD» для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа

ООО «Качугские коммунальные системы»

13

Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими

ООО «Качугские коммунальные системы»

14

Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой

ООО «Качугские коммунальные системы»

15

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м. бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3.

Управление Федерального казначейства по Иркутской области

2. Стороны пришли к соглашению о том, что ООО «Качугские коммунальные системы» обязуется приступить к выполнению ремонтных работ №4, №5 и с №7 по №14 после завершения выполнения Управлением Федерального казначейства по Иркутской области работ №№1, 2, 3 и №6 локального сметного расчета и заблаговременного письменного уведомления об окончании работ.

3. ООО «Качугские коммунальные системы» обязуется выполнить работы № 4 и № 5 локального сметного расчета в срок, не превышающий 9 (девяти) рабочих дней; работы с № 7 по № 14 локального сметного расчета в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) рабочих дней, с момента получения письменного уведомления об окончании завершения работ №№ 1, 2, 3 и № 6 Управлением Федерального казначейства по Иркутской области.

4. Стороны обязуются осуществлять ремонтно-восстановительные работы трубопровода в соответствии с локальным сметным расчетом Управления Федерального казначейства по Иркутской области от 20 декабря 2016 года. В случае обнаружения скрытых (неучтенных), но необходимых, ремонтных работ (в том числе, в случае обнаружения деревянных лотков, изготовление и установка новых лотков, не упомянутых в настоящем соглашении), данные виды работ относятся на Управление Федерального казначейства по Иркутской области.

5. Ввиду выполнения совместных работ, состоящих из 15 позиций, вытекающих из локального сметного расчета от 20 декабря 2016 года, а также из настоящего мирового соглашения, Стороны договорились о том, что по завершению ремонтных работ каждой Стороны (с 1 по 3 позиции - 1 этап, с 4 по 5 позиции - 2 этап, 6 позиция - 3 этап, с 7 по 14 позиция - 4 этап, 15 позиция - 5 этап), Стороны (уполномоченные приказом или доверенностью представители Сторон) подписывают акты о приемке выполненных работ, с обязательным указанием в актах о приемке выполненных работ информации о наименовании выполненных работ, объеме и их стоимости (общее количество этапов - 5, общее количество актов выполненных работ - 5).

6. Управление Федерального казначейства по Иркутской области принимает выполненные с надлежащим качеством ремонтные работы ООО «Качугские коммунальные системы», как надлежащее выполнение своих обязательств по выполнению заключенного мирового соглашения и претензий не имеет.

7. Стороны подтверждают, что им известно о том, что в силу ст. 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением.

8. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству Истца или Ответчика.

9. Судебные расходы, которые были произведены Сторонами в связи с рассмотрением дела №А19-17327/2018 возлагаются на ту Сторону, которая произвела соответствующие судебные расходы и возмещению за счет противоположной стороны не подлежат.

10. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону, подлежит утверждению Четвертым апелляционным Арбитражным судом в порядке, предусмотренном ст. 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

11. Настоящее мировое соглашение подписано Сторонами в Российской Федерации, городе Иркутске, составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для Сторон соглашения, один экземпляр подлежит приобщению к материалам Арбитражного дела № А19-17327/2018.

12. Последствия, предусмотренные ч. 3 ст. 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, связанные с прекращением производства по делу в связи с заключением мирового соглашения Сторонам известны и понятны.»

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Качугские коммунальные системы» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) из федерального бюджета 1 500 рублей государственной пошлины.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в течение 2-х месяцев с даты его принятия только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, которые не были предметом рассмотрения в арбитражном суде кассационной инстанции в силу отсутствия оснований, предусмотренных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, могут быть обжалованы в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья                                                                                          А.Е. Мацибора