Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-133132/2019

30 сентября 2020 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  03 сентября 2020 года.

Полный текст решения изготовлен  30 сентября 2020 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: судьи Сергеевой О.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "Верес" (адрес:  Россия 190005, Санкт-Петербург, 4-я красноармейская 14 лит Б пом 6Р, ОГРН: 

<

***>);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "Промпрофсервис" (адрес:  Россия 190020, Санкт-Петербург, Стойкости 28 к.1, ОГРН: 

<

***>);

третье лицо: 

о взыскании 912 058 руб. 59 коп.

при участии

- от истца: ФИО2 по доверенности от 02.09.20

                   ФИО3 по доверенности от 02.09.20

- от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом

установил:

ООО "Верес" предъявило иск о взыскании с ООО "Промпрофсервис" 774 877 руб. 00 коп. задолженности по оплате выполненных работ 77 181 руб. 59 коп. неустойки за просрочку платежа на основании договора подряда № 1/30/2019 от 30.04.19, 60 000 руб. 00 коп. расходов на оплату услуг представителя.

Ответчик иск отклонил, ссылаясь на некачественное выполнение работ.

Судом установлено:

«30» апреля 2019 года между ООО «ПРОМПРОФСЕРВИС», в лице Генерального директора  ФИО4, действующего на основании Устава с одной стороны и «ВЕРЕС», в лице Генерального директора ФИО5, действующего на основании Устава с другой стороны, был заключён Договор подряда № 1/30/2019.

В соответствии с условиями Договора, ООО «ВЕРЕС» (Подрядчик) принял на себя обязательства по выполнению отделочных работ в отдельно стоящем здании, расположенном по адресу: 

<

...>, ЛИТ. Б.

Согласно Приложению № 2.2 «Сметная стоимость» к Договору подряда № 1/30/2019 от «30» апреля 2019 года стоимость работ по Договору подряда составила 1 371 523 (один миллион триста семьдесят одна тысяча пятьсот двадцать три) рубля.

Согласно Приложению № 6.1 «Дополнительные объёмы работ» к Договору подряда № 1/30/2019 от «30» апреля 2019 года стоимость дополнительных отделочных работ по Договору подряда составила 154 785 (сто пятьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят пять) рублей.

Согласно Приложению № 6.2 «Дополнительные объёмы работ» к Договору подряда № 1/30/2019 от «30» апреля 2019 года стоимость дополнительных отделочных работ по Договору подряда составила 264 764,50 (двести шестьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят четыре) рубля 50 копеек.

Согласно Приложению № 6.3 «Дополнительные объёмы работ» к Договору подряда № 1/30/2019 от «30» апреля 2019 года стоимость дополнительных электромонтажных работ по Договору подряда составила 177 316 (сто семьдесят семь тысяч триста шестнадцать) рублей.

Согласно Дополнительному соглашению № 8 «Об изменении стоимости единичных расценок» к Договору подряда № 1/30/2019 от «30» апреля 2019 года общая стоимость работ по Договору подряда была снижена на 183 847 (сто восемьдесят три тысячи восемьсот сорок семь) рублей, за счёт изменения единичной расценки на работы по укладке настенной плитки; по укладке напольной плитки; по установке перегородки из ГКЛ с 1-ой стороны.

Таким образом, общая стоимость работ по Договору подряда № 1/30/2019 от «30» апреля 2019 года с учётом дополнительных соглашений к нему составила 1 784 541,50 (один миллион семьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот сорок один) рубль 50 копеек.

Согласно условиям Договора подряда, а именно Приложению № 3 к Договору подряда № 1/30/2019 от «30» апреля 2019 года, оплата работ выполненных на объекте производится авансовыми платежами, переходящими в оплату за выполненные работы.

«Заказчик» перечисляет «Подрядчику» аванс в размере 30% от стоимости сводного сметного расчёта в течении 3-х (трёх) рабочих дней со дня выставления «Подрядчиком» счёта.

«Подрядчик» выставляет «Заказчику» счёт на авансирование производимых работ каждые 15 (пятнадцать) дней.

ООО «ПРОМПРОФСЕРВИС» (Заказчиком) платёжным поручением № 159 от «05» июня 2019 года была произведена предоплата по данному Договору в размере 370 000 (триста семьдесят тысяч) рублей.

            «26» июня 2019 года Сторонами были подписаны Акты о приёмке выполненных работ № 001

- на сумму 63 382 (шестьдесят три тысячи триста восемьдесят два) рубля; № 002 - на сумму 52 000 (пятьдесят две тысячи) рублей; № 003 - на сумму 46 800 (сорок шесть тысяч восемьсот) рублей; № 004 - на сумму 219 502 (двести девятнадцать тысяч пятьсот два) рубля.

            Таким образом, «26» июня 2019 года Сторонами было подписано 4 (четыре) Акта о приёмке выполненных работ на общую сумму 381 684 (триста восемьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят четыре) рубля.

ООО «ПРОМПРОФСЕРВИС» (Заказчиком) платёжным поручением № 194 от «26» июня 2019 года была произведена оплата по данному Договору в размере 381 684 (триста восемьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят четыре) рубля.

«11» июля 2019 года Сторонами были подписаны Акты о приёмке выполненных работ № 005

- на сумму 19 240 (девятнадцать тысяч двести сорок) рублей; № 006 - на сумму 19 500 (девятнадцать тысяч пятьсот) рублей; № 008 - на сумму 70 990 (семьдесят тысяч девятьсот девяносто) рублей.

«18» июля 2019 года Сторонами был подписан Акт о приёмке выполненных работ № 007 - на сумму 308 472 (триста восемь тысяч четыреста семьдесят два) рубля.

Таким образом, «11» июля 2019 года и «18» июля 2019 года Сторонами было подписано 4 (четыре) Акта о приёмке выполненных работ на общую сумму 418 202 (четыреста восемнадцать тысяч двести два) рубля.

ООО «ПРОМПРОФСЕРВИС» (Заказчиком) платёжным поручением № 245 от «22» июля 2019 года была произведена оплата по данному Договору в размере 70 990 (семьдесят тысяч девятьсот девяносто) рублей.

«30» июля 2019 года Сторонами был подписан Акт о приёмке выполненных работ № 009 - на сумму 314 977 (триста четырнадцать тысяч девятьсот семьдесят семь) рублей.

Дальнейших авансовых платежей от ООО «ПРОМПРОФСЕРВИС» в нарушении условий Договора подряда № 1/30/2019 от «30» апреля 2019 года за выполненные работы не поступало.

В соответствии с Актами о приёмке выполненных работ № 001, № 002, № 003, № 004, № 005, № 006, № 007, № 008 и № 009 результат работ принят Заказчиком без замечаний. 

Таким образом, по состоянию на «10» августа 2019 года задолженность ООО «ПРОМПРОФСЕРВИС» перед ООО «ВЕРЕС» по подписанным Актам о приёмке выполненных работ № 001, № 002, № 003, № 004, № 005, № 006, № 007, № 008 и № 009 составила 292 189 руб. 00 коп., с учётом авансовых платежей на общую сумму 822 674 руб. 00 коп.

10 августа 2019 года, ООО «ВЕРЕС» (Подрядчиком) был составлен и подписан в одностороннем порядке Акт о приёмке выполненных работ № 010 - на сумму 176 578 (сто семьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят восемь) рублей.

«23» августа 2019 года, ООО «ВЕРЕС» (Подрядчиком) были составлены и подписаны в одностороннем порядке Акты о приёмке выполненных работ № 011 - на сумму 5 720 (пять тысяч семьсот двадцать) рублей и № 012 - на сумму 300 390 руб. 00 коп.

Поскольку возражений от ООО «ПРОМПРОФСЕРВИС» (Заказчика) в адрес ООО «ВЕРЕС» (Подрядчика) в установленный срок не поступало, выполненные подрядчиком работы, указанные в Актах о приёмке выполненных работ № 010, № 011 и № 012 по Договору подряда № 1/30/2019 от «30» апреля 2019 года считаются принятыми Заказчиком без замечаний в полном объёме и на основании ст. 753 ГК РФ РФ подлежат оплате.

Таким образом, по состоянию на «20» августа 2019 года задолженность ООО «ПРОМПРОФСЕРВИС» перед ООО «ВЕРЕС» по Акту о приёмке выполненных работ № 010 составила 176 578 (сто семьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят восемь) рублей. А по состоянию на «03» сентября 2019 года задолженность ООО «ПРОМПРОФСЕРВИС» перед ООО «ВЕРЕС» по Актам о приёмке выполненных работ № 011 и № 012 составила 306 ПО (триста шесть тысяч сто десять) рублей.

По состоянию на «10» декабря 2019 года общая задолженность ООО «ПРОМПРОФСЕРВИС» перед ООО «ВЕРЕС» по Актам о приёмке выполненных работ №№ 001-012 составляет 774 877 (семьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят семь) рублей.

Кроме этого, на основании п. 8.4 Договора подряда № 1/30/2019 от «30» апреля 2019 года, в случае нарушения Заказчиком своих обязательств по оплате Подрядчик вправе потребовать уплаты пени в размере 0,1% от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной суммы. в_

С «10» августа 2019 года задолженность ООО «ПРОМПРОФСЕРВИС» перед ООО «ВЕРЕС» по подписанным Актам о приёмке выполненных работ № 001, № 002, № 003, № 004, № 005, № 006, № 007, № 008 и № 009 составила 292 189 (двести девяносто две тысячи сто восемьдесят девять) рублей. По настоящее время, данное платёжное требование 3аказчиком не исполнено.

За период с 10.08.2019 по 10.12.2019 неустойка составляет 77 181 руб. 59 коп.

Расходы на оплату услуг представителя в размере 60 000 руб. 00 коп. обоснованы договором №Ю-11/2019 на оказание юридических услуг, квитанцией к приходному кассовому ордеру №018 от 02.09.19.

С учетом двух судебных заседаний и сложности дела суд считает, что заявленный размер расходов соответствует оказанным услугам.

Учитывая изложенное, иск подлежит удовлетворению с отнесением расходов по оплате государственной пошлины на ответчика.

В связи с недоплатой государственной пошлины при подаче иска, с ответчика подлежит взысканию в доход федерального бюджета 11 197 руб. 00 коп.                  

Руководствуясь статьями 309, 310, 330, 711, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Промпрофсервис" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Верес" 852 058 руб. 59 коп, из них: 774 877 руб. 00 коп. основного долга и 77 181 руб. 59 коп. неустойки, а также 8 844 руб. 00 коп. расходов по оплате государственной пошлины и 60 000 руб. 00 коп. расходов на оплату услуг представителя.

            Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Промпрофсервис" в доход федерального бюджета 11 197 руб. 00 коп.

Выдать исполнительные листы в порядке ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

            Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

 

Судья                                                                                                    Сергеева О.Н.