Арбитражный суд Пермского края

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №  А50-24493/2019

11 декабря 2019 года

г. Пермь

Резолютивная часть решения объявлена 04 декабря 2019 года.

  Решение в полном объеме изготовлено 11 декабря 2019 года.

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Овчинниковой С. А. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ивановой Ю.А, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по иску муниципального автономного учреждения спортивной подготовки «Спортивная школа «Летающий лыжник» (618400, 

<

...> (тер. спортивный комплекс), ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Стройклининг» (618400, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

о взыскании 30951 руб. 91 коп.

при участии представителя истца ФИО1 - по доверенности от 18.11.2019,   

представителей ответчика ФИО2 - по доверенности от 12.10.2018, ФИО3, директор, 

установил:

муниципальное автономное учреждение спортивной подготовки «Спортивная школа «Летающий лыжник»  (далее истец) обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Стройклининг»  (далее ответчик) о взыскании неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами, штрафа по договору подряда №51 от 27.05.2016,

В судебном заседании истец на удовлетворении исковых требований настаивал.

Представитель ответчика требования не признавал по доводам, изложенным в отзыве, указал  на то, что при составлении акта проверки контрольно-ревизионного управления администрации города Березники от 06.09.2017 для выявления фактического объема выполненных работ ревизионной комиссией ответчик не приглашался. Каким образом и с помощью каких измерительных приборов и инструментов, производилось измерение строительных объемов не указано, соблюдалась ли при этом соответствующая методика, истцом не представлено. Кроме того, с момента приемки выполненных работ до проведения ревизии, прошел год, объект эксплуатировался и никаких претензий по качеству и объему работ не поступало. В материалы дела не представлено доказательств причинно-следственной связи, того, что выявленные расхождения являются результатом недобросовестного выполнения подрядчиком своих обязанностей по договору, а не возникли в процессе эксплуатации или халатного обращения заказчика.

Из материалов дела следует, между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) заключен договор подряда от 27.05.2016 №51 на выполнение работ устройству металлического шлагбаума и щита. 

Цена договора – 60722 руб. 22 коп. (п.6.1. договора). Источником оплаты являются средства местного бюджета.

Срок выполнения работ: начало 27.05.2016; окончание: 01.06.2016 (п.5.1. договора). 

Во исполнение названного договора между сторонами подписан акт приемки от 01.06.2016 №1 (КС-2) и соответствующая справка о стоимости работ (КС-3), согласно которым стоимость выполненных работ составила 60722 руб. 48 коп. 

Работы приняты заказчиком без замечаний и оплачены в полном объеме 02.06.2016. 

В период с июля по сентябрь 2017 года Контрольным управлением администрации г.Березники проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности заказчика, в ходе которой осуществлена с выходом на место выборочная проверка объемов работ, принятых МАУ «Лыжная база «Снежинка» по актам о приемке выполненных работ. В результате данной проверки было выявлено завышение объема работ и использованных материалов по следующим позициям, включенным в акт приемки выполненных работ № 1 от 01.06.2016 (акт по форме № КС-2):

«Раздел 1. Новый раздел»

- копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2, завышение на 1,87 м3;

- погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: погрузка мусора строительного с погрузкой вручную, завышение на 3,179 т;

- перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью Ют работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 15 км, завышение на 3,179 т;

- талоны МКУП «Полигон ТБО г.Березники» на вывоз мусора, завышение на 3 штуки;

- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня, завышение на 0,016 м3;

- щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 21-23 мм, завышение на 0,0176 м ;

-  устройство бетонной подготовки, завышение на 1,85 м ;

-  бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250), завышен на 1,856 м3;

- трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кл-БСт4кл и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 48 мм, толщина стенки 3,00 мм, I    завышение на 4,98 м;

- трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кл-БСт4кл и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 20 мм, толщина стенки 2 мм, завышение на 0,9 м.

Кроме этого, в акте указана установка металлических столбов высотой более 4 м с погружением в бетонное основание, фактически установлены столбы высотой 2,3 м. В связи с этим, в акте должны были быть указаны другие работы (ФЕР09-08-001-01 вместо указанных ФЕР09-08-001-04) и соответственно, применена другая расценка на эти работы. 

«Раздел 2. Рекламный щит»

 - копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 

<

0,7 м, группа грунтов 2, завышение на 1,5 м3;

- погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: погрузка мусора строительного с погрузкой вручную, завышение на 2,55 т;

- перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 15 км, завышение на 2,55 т;

- талоны МКУП «Полигон ТБО г.Березники» на вывоз мусора, завышение на 2 штуки;

-   устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня, завышение на 0,16 м3;

 - щебень из гравия для строительных работ марка Др. 8, фракция 21-23 мм, завышение на 0,18 м3;

 - устройство бетонной подготовки, завышение на 1,355 м3;

 - бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250), завышен на 1,384м3;

Кроме этого, в акте указана установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание, фактически установлены столбы высотой 2,3 м. В связи с этим, в акте должны были быть указаны другие работы (ФЕР09-08-001-01 вместо указанных ФЕР09-08-001-04) и соответственно применена другая расценка на эти работы.

По расчету истца размер фактически невыполненных работ составил 22251 руб. 60 коп. 

Ссылаясь на то, что включение в акт приемки от 01.09.2017 №1 необоснованных затрат в сумме  22251 руб. 60 коп., которые фактически не осуществлялись, свидетельствует о недобросовестном поведении ответчика, как участника гражданского оборота, и указывают на ненадлежащее исполнение им своих обязательств по договору подряда, заказчик претензионным письмом от 22.11.2017 №56 потребовал возвратить неосновательное обогащение, а также уплатить начисленные в порядке ст.1107 ГК РФ проценты и начисленный на основании п.7.1.3. договора единовременный штраф за ненадлежащее исполнение обязательств. 

Исследовав материалы дела, заслушав представителей истца и ответчика, арбитражный суд приходит к следующим выводам. 

В соответствии со ст.1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение). 

С учетом ст.1102 ГК РФ, ч.2 ст.65 АПК РФ в предмет доказывания по иску о взыскании неосновательного обогащения входит установление обстоятельств (факта) получения (сбережения) ответчиком имущества за счет истца; отсутствие для этого установленных законом, иными правовыми актами или сделкой основания; размер неосновательного обогащения. 

В обоснование заявленных требований истец ссылается на то, что в рамках договора им в пользу ответчика перечислены излишние денежные средства за фактически невыполненные работы. 

Согласно правовой позиции, изложенной в п.4 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 11.01.2000 №49 «Обзор практики рассмотрения дел, связанных с применением норм о неосновательном обогащении» правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения подлежат применению также к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате ошибочного исполненного. 

Поскольку обязательства сторон по договору подряда носят встречный характер (ст.ст.328, 702, 740 ГК РФ), в рамках которых заказчик обязан оплатить фактически выполненные работы (ст.711 ГК РФ), а безосновательное получение имущественных выгод одним лицом за счет другого лица в системе действующего правового регулирования не допускается (ст.10 ГК РФ), суд с учетом разъяснений, изложенных в пунктах 12, 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 №51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда», при рассмотрении настоящего дела исходит из того, что наличие подписанного между сторонами акта приемки работ не лишает заказчика права требовать от подрядчика в порядке ст.1102 ГК РФ возврата денежных средств, ошибочно оплаченных за фактически невыполненные работы. 

В силу ст.9 АПК РФ арбитражное судопроизводство осуществляется на основе состязательности. Обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.   Каждое лицо, участвующее в деле, обязано доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (ч.1, ч.2 ст.65 АПК РФ). 

В этой связи заказчик, ссылающийся  на ошибочность подписанного им акта приемки и излишнюю оплату в пользу подрядчика денежных средств, обязан предоставить арбитражному суду соответствующие доказательства в обоснование заявленных требований (ч.1 ст.65 АПК РФ).

В доказательство обоснованности заявленных требований истец представил в материалы дела акт проверки контрольно-ревизионного управления администрации города Березники от 06.09.2017г.

Вместе с тем, как следует из материалов дела, при составлении акта ревизионной комиссии представитель ответчика не участвовал. Доказательств того, что ответчик извещался о проведении проверки объемов выполненных работ, не представлено. 

Выявленные в акте завышения объемов работ по устройству металлического шлагбаума и щита не свидетельствует о том, что договорные обязательства выполнены подрядчиком ненадлежащим образом. 

В соответствии с п. 1 ст. 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений.

Из содержания договора не следует обязанность подрядчика при исполнении договора приобретать талоны на вывоз ТБО у МКУП «Полигон ТБО г. Березники» и подтверждать выполнение данной обязанности перед заказчиком. Ссылка истца на то, что такая обязанность предусмотрена локальным сметным расчетом, не принимается, поскольку в п. 5 ЛСР к договору талоны на вывоз мусора указаны не в качестве вида порученных работ, а как расценки на услуги. 

Более того, в силу п. 3 ст. 703 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором, подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания заказчика.

Из представленного в материалы дела акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № 1 от 01.06.2016 следует, что работы, предусмотренные договором, ответчиком выполнены, а истцом приняты в отсутствие возражений и замечаний относительно объема и качества работ, стоимость работ подтверждена справкой о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, также подписанной истцом. Более того, работы оплачены последним.

При таких обстоятельствах суд  первой инстанции приходит к выводу о том, что работы ответчиком выполнены в объеме, предусмотренном договором. Оснований для иного вывода из материалов дела не установлено.

Кроме того, суд находит заслуживающими внимания доводы ответчика о том, что с момента приемки выполненных работ до проведения ревизии пошел год, объект эксплуатировался и никаких претензий по качеству и объему работ не поступало. В материалы дела не представлено доказательств того, что выявленные расхождения являются результатом недобросовестного выполнения подрядчиком своих обязанностей по договору, а не возникли в процессе эксплуатации или халатного обращения заказчика.

Оценив в соответствии с требованиями гл. 7 АПК РФ представленные сторонами доказательства в их совокупности и взаимосвязи, исходя из фактических обстоятельств дела, направленности действий сторон,  суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска, поскольку факт и размер неосновательного обогащения на стороне ответчика за счет истца не доказан, в связи с чем ответчик не может быть признан лицом, обогатившимся за счет истца применительно к правилам ст. 1102 ГК РФ.

Поскольку в настоящем деле не установлено факта неисполнения денежного обязательства, основания для удовлетворения требований истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами с последующим начислением процентов на сумму неосновательного обогащения, также отсутствуют. 

Также необоснованно предъявлено требование о взыскании с ответчика штрафа на основании п. 7.1.3 договора.

Таким образом, оснований для удовлетворения исковых требований не имеется. 

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по уплате госпошлины по иску относятся на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.

Судья С.А. Овчинникова