34/2023-122365(1) 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 24 апреля 2023 года 

по делу А33-28914/2022 Красноярск

«24» апреля 2023 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

иск удовлетворить. 

Обязать акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) провести в срок до 31.08.2023  следующие работы по восстановлению благоустройства после произведённых аварийных  работ АО «КрасЭКо» в период с 03.06.2019 по 20.06.2019 на участке тепловой сети от ТК-9а5 до ТК-9а-6, расположенной по адресу: 

<

...> (в районе  многоквартирных домов № 1, по ул. Михайлова, № 22 по ул. Колесниченко):  

- демонтаж железобетонных плит на тротуарной дорожке с последующей подготовкой  основания;  

- планировка (разравнивание) грунта перед укладкой железобетонных плит;  

- устройство подстилающего слоя под существующие железобетонные плиты (из щебня,  ПГС с уплотнением);  

- качественная укладка демонтированных железобетонных плит, пригодных к  использованию, и замена поврежденных плит;  

- устройство асфальтобетонного покрытия толщиной не менее 5 см. на основание  железобетонных плит;  

- вдоль тротуара по обе стороны установка поребриков и бортовых камней с заменой  поврежденных бортовых камней при производстве аварийно-восстановительных работ;  

- восстановление газонного покрытия; 

- произвести утилизацию железобетонных плит, не пригодных для дальнейшего  использования, своими силами и за свой счет.  

 Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями установленными: 

- «ГОСТ 6665-91 Межгосударственный стандарт. Камни бетонные и железобетонные  бортовые. Технические условия";  

- "ГОСТ 9128-2013. Межгосударственный стандарт. Смеси асфальтобетонные,  полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных  дорог и аэродромов. Технические условия";  

- "ГОСТ 32961-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего  пользования. Камни бортовые. Технические требования";  

- "ГОСТ 22245-90. Государственный стандарт Союза ССР. Битумы нефтяные дорожные  вязкие. Технические условия"; - "СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство  территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75".  

Взыскать с акционерного общества «Красноярская региональная энергетическая  компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) в доход федерального  бюджета 6 000 руб. государственной пошлины.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья Т.В. Шевцова