Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

 резолютивная часть

Дело № А63-15879/2021

г. Ставрополь

16 января 2024 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Ващенко А.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в заседании суда исковое заявление 

администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, г. Изобильный,  ОГРН 

<

***>,  

к обществу с ограниченной ответственностью «Юг-Строй», с. Юца, Предгорный район,  Ставропольский край, ОГРН 

<

***>,  

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «Центр Независимых Экспертиз и  Контроля», г. Ставрополь, ОГРН 

<

***>,  

об обязании устранить дефекты, выявленные в ходе технического обследования автомобильных  дорог,  

и встречное исковое заявление 

общества с ограниченной ответственностью «Юг-Строй», с. Юца, Предгорный район,  Ставропольский край, ОГРН 

<

***>,  

к администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, г. Изобильный,  ОГРН 

<

***>,  

о признании гарантийных обязательств по муниципальному контракту № ЭА-64 в части  содержания подрядчиком участка дороги км. 0+000 – км. 1+260 по ул. Промышленная,  г. Изобильный, недействующими,  

при участии в судебном заседании представителя истца по первоначальному иску ФИО2 по  доверенности от 09.01.2024 № 01-7/57, представителя ответчика по первоначальному иску  ФИО3 по доверенности от 26.10.2021,  

в отсутствие представителя третьего лица. 

Руководствуясь статьями 167, 168, 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

заявление истца по первоначальному иску об уточнении исковых требований удовлетворить.  Первоначальные исковые требования удовлетворить.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Юг-Строй», с. Юца, Предгорный  

район, Ставропольский край, ОГРН 

<

***>, в месячный срок с момента вступления  

решения в законную силу устранить дефекты в рамках гарантийных обязательств по  

муниципальному контракту от 15.10.2019 № ЭА-64, выявленные в процессе экспертного  

натурного исследования 22.11.2022, а именно: по ул. Крупская, г. Изобильный на участке км 0+000 - км 1+255: 

- по нечетной стороне вблизи ул. Чапаева (пр. Крупской – название улицы с адресной  

таблички ближайшего к перекрестку дома; на адресных табличках остальных домов название  

ул. Чапаева) просадка вдоль кромки дорожного полотна глубиной 15 мм с сеткой трещин (ширина  поврежденного участка 0,5 м; длина поврежденного участка 49м);  

- по нечетной стороне вблизи магазина на пересечении с улицей Киевская (на расстоянии  13,0 м от пересечения с ул. Киевская, на удалении 1,4 м от примыкания дорожного полотна к  территории, примыкающей к магазину), по месту примыкания старого и вновь уложенного слоев  асфальтобетонного покрытия по всему краю прилегающей территории просадка глубиной 38 мм с  сеткой трещин (ширина поврежденного участка 1,4 м; длина поврежденного участка 21,0 м), часть  дефекта в виде гребня высотой 50 мм;  

- по нечетной стороне на расстоянии 12 м от проекции пересечения с ул. 8 Марта просадка  глубиной 1-2 см с сеткой трещин вдоль кромки (ширина поврежденного участка 0,9 м; длина  поврежденного участка 8,5 м);  

 по ул. Промышленная, г. Изобильный на участке км 0+000 – км 1+260: 

- напротив здания Сбербанка на расстоянии 9,8 м от перекрестка с ул. Ленина просадка  глубиной 50 мм с растрескиванием асфальтобетонного покрытия (ширина поврежденного участка  2,5 м; длина поврежденного участка 49м);  

- на перекрестке с ул. Ленина напротив ТК «Мебель» участок с просадкой  асфальтобетонного покрытия на всю ширину дорожного полотна (ширина поврежденного участка  7,6 м; длина поврежденного участка 23 м);  

-напротив дома № 36 (магазин «SHIL») просадка глубиной 50мм размером 13,5 x 3,5 м; 

- напротив дома № 26 Б (магазин «Батяня») деформация слоя асфальтобетонного покрытия в  виде пролома, выпучивания расколов слоя асфальтобетонного покрытия, просадка размером  14, 3 х 3,0 м;  

- напротив магазина «Blask Shark» проломы асфальтобетонного покрытия с обнажением  грунта размером 49,0 х 3,5 м;  

- напротив дома № 41 разрушение слоя асфальтобетонного покрытия с выкрашиванием  покрытия, сеткой трещин, просадка глубиной 20 мм (ширина поврежденного участка 3,5 м; длина  поврежденного участка 16,8 м);  

- напротив домов № 37-33 повреждение слоя асфальтобетонного покрытия размером  23,7 х 3,5 м в виде колейности, сетки трещин, деформация слоя асфальтобетона с наплывом на  обочину;  

- напротив дома № 31 вплоть до перекрестка просадка глубиной 40 мм, сетка трещин,  колейность (ширина поврежденного участка 3,5 м; длина поврежденного участка 101,5 м);  

- на перекрестке с ул. Доватора разрушение асфальтобетонного покрытия в месте  механического воздействия в виде пролома с заполнением водой и обнажением грунта (ширина  поврежденного участка 2,1 м; длина поврежденного участка 5,8 м);  

по ул. Доватора, г. Изобильный на участке км 0+000 – км 2+100: 

- напротив домов 1 а – 3 а просадка по кромке асфальтобетонного покрытия глубинной  32 мм справа, 18 мм по центральной части дорожного полотна (ширина поврежденного участка  1,3 м; длина поврежденного участка 14,0 м);  

- на всем протяжении исследуемого участка по четной стороне колейность с  растрескиванием асфальтобетонного покрытия от начала участка до ул. Колхозная;  

по ул. Железнодорожная, г. Изобильный на участке км 0+000 – км 1+555:  

- напротив домов 131-167 просадка размером 7,4 х 5,5 м (по всей ширине асфальтобетонного  покрытия);  

по ул. Строительная, п. Новоизобильный на участке км 0+000 – км 0+520:  

- на тротуаре вблизи д. 7/8 и д. 7/7, напротив дома № 3 кв. 2 в месте радиусного скругления  следы механических повреждений на поверхности тротуара; размеры поврежденного участка 2 м в  сторону кв. 4 дома № 3 и по всей радиусной части до люка, закрывающего коммуникационный  колодец;  

на участке км 6+000 – км 9+000 автодороги «Изобильный – Староизобильная - Смыков»: 

- на участке км 6+020 асфальтобетонного покрытия просадка глубиной 40 мм на всю ширину  проезжей части с сеткой трещин длиной 1,8 м;  

- «Изобильный-Спорный» на участке км 0+000-км 8+240; 

- напротив дома № 173 по ул. Мира, х. Спорный просадка глубиной 35 мм с трещиной  размером 2,5 х 1,5 м;  

- напротив дома № 165 (напротив дома № 142) по ул. Мира, х. Спорный просадка глубиной  40 мм с растрескиванием асфальтобетонного покрытия размером 5,0 х 1,42 м;  

- напротив домов № 159 и № 136 по ул. Мира, х. Спорный вблизи перекрестка с  пер. Заречный две просадки глубиной 25 мм каждая размерами 2,7 х 0,9 м и 1,9 х 1,0 м;  

- напротив дома № 151 по ул. Мира, х. Спорный две просадки глубиной 45 мм, размерами  5,5 х 1,0 м;  

- напротив школы по четной стороне ул. Мира просадка глубиной 35 мм размерами  2,1 х 1,2 м;  

- напротив детского сада (напротив дома № 93) по нечетной стороне просадка глубиной  70 мм на месте ранее выполненного ямочного ремонта размерами 6,5 х 1,5 м с наплывом слоя  асфальтобетона на обочину с высотой гребня 100 мм;  

- на участке км 0+040 просадка глубиной 60 мм с растрескиванием слоя асфальтобетона на  всю ширину проезжей части, размер поврежденного участка 40 х 6,5 м;  

- по всей протяженности исследуемого участка разрушение защитного слоя. В удовлетворении встречного иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Юг-Строй», с. Юца, Предгорный  район, Ставропольский край, ОГРН 

<

***>, государственную пошлину в размере 6 000  руб. в доход федерального бюджета.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству  взыскателя.  

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в  Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия  (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух  месяцев со дня вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом  рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья А.А. Ващенко