АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А76-38252/2023

10 апреля 2024 года

г. Челябинск

 

Арбитражный суд Челябинской области в составе судьи Михайлова К.В. при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Смирновой А.А.,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению муниципального  казенного учреждения «Управление капитального строительства» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Энергопроектстрой»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 301 646 руб. 18 коп., об обязании  устранить недостатки,  

Руководствуясь статьями 101, 110, 112, 150, 167-171, 176, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Энергопроектстрой» (ИНН  

<

***>) в пользу муниципального казенного учреждения «Управление капитального  строительства» (ИНН 

<

***>) штраф в размере 301 646 руб. 18 коп.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Энергопроектстрой» (ИНН  

<

***>) в течение тридцати календарных дней с даты вступления в законную силу  решения суда по настоящему делу устранить следующие недостатки выполненных работ по  муниципальному контракту № 558/22 от 02.11.2022:  

Поадресный перечень объектов, которые необходимо привести в надлежащее состояние в  

соответствии с ПУЭ-7 п. 2.4.55 и ПТЭЭП п. 2.3.11 

п/п  

Адрес 

номера 

отклонение стойки опор 

кол-во  

габарит до земли -  

опор 

от вертикали, м 

опор  

фактически, м 

(нарушение п. 2.3.11  

(нарушение ПУЭ п. 2.4.55: не  

ПТЭЭП)  

менее 5 м до земли)  

1 

ул. Горького, 26  

18-19 

4 

2 

ул. Горького, 26  

22-19 

3 

3 

ул. Горького, 26 -ул.  

17 

3,6 

ФИО1, 17/1 

4 

пр. К.Маркса, 45  

1-3 

5 

пр. К.Маркса, 45  

7-8 

1 

2 

6 

пр. К.Маркса, 45/3  

4-6 

7 

пр. К.Маркса, 45/3  

8 

0,8 

1 

8 

ул. ФИО1, 17/1  

3 1-3 

3,5 

9 

ул. ФИО1, 17/1  

1 

0,8 

1 

10 

пр. Ленина, 51/1  

5,7 

11 

пр. Ленина, 53/1  

1 1-12 

1 

2 

12 

пр. Ленина, 53/1  

9,10 

13 

пр. Ленина, 34 

9 

0,9 

1 

14 

пр. Ленинградская, 16/1

14,15 

3,5 

15 

пр. Московская, 35/1  

8,9 

16 

пр. Московская, 35/1  

8,18 

17 

ул. Первомайская, 16  

12 

1 

1 

3,5 

В случае неисполнения вступившего в законную силу решения суда по настоящему  делу в срок, указанный для исполнения решения суда, взыскать с общества с ограниченной  ответственностью «Энергопроектстрой» (ИНН 

<

***>) в пользу муниципального  казенного учреждения «Управление капитального строительства» (ИНН 

<

***>)  судебную неустойку в размере 5 000 руб. за каждый день неисполнения решения суда до  момента фактического исполнения решения суда.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Энергопроектстрой» (ИНН  

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 9 033 руб.  00 коп.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия  (изготовления в полном объеме), путем подачи жалобы через Арбитражный суд  Челябинской области.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы  решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия  постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Судья К.В. Михайлов