1.21/2022-64194(2) 

 

Арбитражный суд Псковской области ул. Свердлова, 36, г. Псков, 180000 http://pskov.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А52-6620/2021

город Псков

26 декабря 2022 года

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 174, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

обязать общество с ограниченной ответственностью «Строй Д», в рамках гарантийных  обязательств по договору подряда от 12.07.2018 по объекту «Капитальный ремонт  спортивного зала МБОУ «Харлапковская основная школа», в течение 20 рабочих дней в  период с 20 марта 2023 года по 14 апреля 2023 года, устранить следующие недоставки  выполненных работ:  

- трещины в штукатурке с высыпанием штукатурки в местах соединения кирпичной  стены с кладкой проемов по всей площади работ, путем замены поврежденной  оштукатуренной поверхности с соблюдением условий контракта, технических условий,  действующих норм и правил;  

- трещины по контуру внутренней части кладки из газобетонных блоков по всей  площади работ, путем замены поврежденной оштукатуренной поверхности с соблюдением  условий контракта, технических условий, действующих норм и правил.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строй Д» в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Строительная Артель» 80095 руб. 33 коп. пеней, а также  8333 руб. 50 коп. расходов по оплате государственной пошлины.  

В удовлетворении требования о взыскании убытков отказать.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Строительная Артель» из  федерального бюджета 1166 руб. 00 коп. государственной пошлины.  

На решение в течение месяца со дня принятия может быть подана апелляционная  жалоба в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд  Псковской области.  

Судья И.Ю.Стренцель  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 10.12.2021 8:49:37

 Кому выдана Стренцель Ирина Юрьевна