АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024 http: //www.Orenburg.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А47-19211/2022

г. Оренбург

19 июля 2024 года

Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи  Калашниковой А.В., при ведении протокола судебного заседания  секретарем судебного заседания Соколовой Е.В., рассмотрев в  открытом судебном заседании  

 дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя  ФИО1, г. Оренбург (ИНН 

<

***>,  ОГРНИП 

<

***>)  

 к индивидуальному предпринимателю ФИО2, г. Оренбург, пос. Ростоши (ИНН 

<

***>,  ОГРНИП 

<

***>)  

 с привлечением к участию в деле в качестве третьих лиц, не  заявляющих самостоятельных требований, относительно предмета  спора:  

 акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург»;  ФИО3;  ФИО4; 

 общества с ограниченной ответственностью «Региональная  лизинговая компания» (г. Оренбург);  

 общества с ограниченной ответственностью «Смаррт-Групп»  

 об истребовании блочно-модульной транспортабельной котельной,  путем обязании обеспечить беспрепятственный доступ для демонтажа  котельной и изъятия в месте нахождения;  

 о демонтаже котельной силами и средствами ФИО1 в течение 10 рабочих дней со дня вступления решения  суда в законную силу;  

 об обязании не чинить препятствия в демонтаже блочно-модульной  транспортабельной котельной;  

 разрешить доступ на земельный участок; 

 не чинить препятствия в проезде на земельный участок;  

 о взыскании судебной неустойки (с учетом уточнения, принятого  28.06.2024)  

 по встречному иску индивидуального предпринимателя ФИО2, г.Оренбург, пос. Ростоши (ИНН 

<

***>,  ОГРНИП 

<

***>)  

 к индивидуальному предпринимателю ФИО1, г. Оренбург (ИНН 

<

***>, ОГРНИП  

<

***>)  

 об обязании демонтировать котельную; 

 о заключении договора подряда по демонтажу объекта;  

 о взыскании судебной неустойки (с учетом уточнения, принятого  29.02.2024).  

 Руководствуясь статьями 49, 110, 167, 170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

1.Первоначальные исковые требования ФИО1 удовлетворить частично.  

 2.Обязать ФИО2 обеспечить  беспрепятственный доступ на земельный участок с кадастровым  номером 56:44:0127001:1802 по адресу: 

<

...>  для демонтажа блочно-модульной котельной, принадлежащей  ФИО1 и расположенной на данном  земельном участке. Демонтаж произвести силами и средствами  ФИО1 в течение 10 рабочих дней со дня  вступления решения в законную силу.  

 3.Обязать ФИО2 не чинить препятствия  ФИО1, его доверенным лицам, рабочим в  демонтаже блочно-модульной котельной, в том числе при  осуществлении следующих действий в рабочие дни (понедельник- пятница) в период времени с 10.00 до 18.00 для выполнения этапов  демонтажа:  

 первый рабочий день-демонтаж элементов линий наружной  инженерной обвязки, предусматривающий разборку прилегающих  участков трубопроводов подачи газа и воды, отвода и подачи  теплоносителя, обрезку пластин заземления и трубопровода  водоотведения, отключение и демонтаж питающей линии  электроснабжения;  

 второй день- демонтаж конструкций дымовой трубы - снятие  тепловой изоляции с элементов системы отведения продукта горения,  демонтаж элементов дымоотводов, демонтаж дымовой трубы;  

 третий день-демонтаж конструкций ступеней входной группы в  составе работ по демонтажу покрытия из тротуарной плитки и разборки  конструкций основания ступеней;  

 четвертый день-демонтаж модульной котельной выполняется в  сборе, без снятия с модулей основного технологического оборудования,  установленного в заводских условиях;  

 пятый день-погрузка и вывоз демонтированных конструкций и  блоков котельной в место их новой установки или хранения;  

 шестой день-демонтаж конструкций бетонного основания под  установку модулей котельной и дымовой трубы , выполнение работ по  разборке конструкций бетонного основания , подвоз грунта и засыпка  траншей и выемок из-под демонтированных конструкций фундамента,  погрузка и вывоз образовавшегося строительного мусора.  

 4. В рабочие дни (понедельник-пятница) в период времени с 10  час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. обязать ФИО2 не чинить препятствия в проезде на земельный участок с  кадастровым номером 56:44:127001:1802, по адресу: 

<

...> и механизмов с оборудованием, необходимых  для выполнения демонтажных работ.  

 В случае производства демонтажных работ с опережением  вышеуказанного графика, обязать ФИО2 не  чинить препятствия в выполнении демонтажных вне установленного  графика.  

 5. В случае неисполнения решения суда в течение 10-ти рабочих  дней с момента вступления в законную силу решения суда взыскать со  ФИО2 в пользу ФИО1 судебную неустойку в размере 1 000 руб. за каждый день  просрочки исполнения судебного акта.  

 6. В остальной части первоначального иска отказать. 

 7. В удовлетворении встречных исковых требований  индивидуального предпринимателя ФИО2  отказать.  

 Расходы по оплате судебной экспертизы в размере 25 000 руб. и  государственной пошлины в размере 6000 руб. взыскать с  индивидуального предпринимателя ФИО2 в  пользу индивидуального предпринимателя ФИО1.  

 Исполнительный лист выдать индивидуальному предпринимателю  ФИО1 в порядке статей 319, 320  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации после  вступления решения в законную силу.  

 Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме)  через Арбитражный суд Оренбургской области.  

 Судья А.В. Калашникова