АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

http://www.crimea.arbitr.ru         E-mail: info@crimea.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А83-18176/2021

21 июня 2022 года

город Симферополь

Резолютивная часть решения объявлена 14 июня 2022 года.

Решение изготовлено в полном объеме 21 июня 2022 года.

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Радвановской Ю.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Крутько В.В., рассмотрев в судебном заседании материалы дела по иску Федерального казенного учреждения «Пансионат «Горный» Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Крым и г. Севастополю» к Обществу с ограниченной ответственностью «Гарант» о взыскании денежных средств,

при участии представителей сторон:

от истца – ФИО1, представитель по доверенности №5 от 06.07.2021г.;

от ответчика – не явились;

УСТАНОВИЛ:

ФКУ «Пансионат «Горный» УФСИН по Республике Крым и г. Севастополю» обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением к ООО «Гарант» о взыскании пени за период с 01.01.2021г. по 20.06.2021г. в сумме 66 944.44 руб..

В судебное заседание 14.06.2022г. явился представитель истца; ответчик явку своего уполномоченного представителя не обеспечил, при этом был признан судом надлежаще уведомленным о дате, времени и месте проведения судебного заседания в порядке положений статьи 123 АПК РФ.

В отсутствии ходатайств, свидетельствующих о невозможности рассмотрения данного дела, а также во избежание нарушения процессуальных сроков, принимая во внимание полноту материалов дела, суд признал возможным рассмотреть его по существу. 

Судом установлены следующие обстоятельства.

06.10.2020г. между ФКУ «Пансионат «Горный» УФСИН по Республике Крым и г. Севастополю» и ООО «Гарант» был заключен государственный контракт № 0875100006920000044-01 на выполнение работ по капитальному ремонту.

Согласно пункта 1.1 контракта подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту комплекса из морских корпусов литера А и литера Б филиала пансионат «Семидворье» ФКУ пансионат «Горный» УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю, по адресу: г. Алушта, 

<

...>, согласно ведомости объёмов работ (Приложение № 1) и локального сметного расчета (Приложение № 2), а государственный заказчик обязуется обеспечить приемку и оплатить результаты выполненных подрядчиком работ, в порядке и сроки установленные контрактом.

В соответствии с пунктом 2.1 контракта (в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 19.11.2020г.) его цена является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнение: обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляем 4 392 957.07 руб., НДС не облагается.

Оплата производится государственным заказчиком за фактически выполненные и принятые объемы работ в безналичной форме, путем перечислен денежных средств на расчетный счет подрядчика на основании Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ затрат (форма КС-3), оформленных подрядчиком и счета на оплату. Счета и счет фактуры, выставленные к оплате подрядчиком, подлежат оплате государственным заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по соответствующему этапу работ. Обязательства по оплате выполненных работ считаются выполненными в день зачисления денежных средств на расчетный счет подрядчика (пункт 2.3 контракта).

Согласно пункта 3.1 контракта он вступает в силу (считается заключенным) с даты подписания сторонами и действует до 31.12.2020г..

Датой начала выполнения работ является момент подписания контракта, а срок завершения работ - 31.12.2020г. (пункты 3.2 и 3.3 контракта).

В соответствии с пунктом 7.1 контракта подрядчик в течение 48 часов письменно уведомляет государственного заказчика о факте выполнения работ отдельного этапа исполнения контракта и предоставляет государственному заказчику комплект отчетной документации: Акт выполненных работ (КС-2); Акт приема передачи выполненных работ; Справка о стоимости (КС-3); Акт приема-передачи оборудования; Акты скрытых работ; Акт приема-передачи исполнительной документации (схемы, чертежи); декларации и сертификаты соответствия; инструкция по эксплуатации от завода-изготовителя и гарантийные документы; счет-фактура; счет.

Государственный заказчик в течение 5 рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте 7.1 контракта, осуществляет приемку выполненных работ, в том числе проведение их экспертизы, рассматривает, и подписывает представленные документы и возвращает 1 экземпляр подрядчику либо в тот же срок государственный заказчик направляет в письменной форме мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ по форме КС-2 (пункт 7.2 контракта).

Согласно пункта 7.3 контракта государственный заказчик производит оплату выполненных работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания соответствующих актов о приемке выполненных работ сторонами контракта, оформленных по унифицированным формам КС-2, КС-3, подтверждающих выполнение работ в соответствующем отчетном периоде, при представлении подрядчиком документов, предусмотренных пунктом 7.2 контракта, осуществляет оплату подрядчику выполненных работ, в пределах цены контракта (с учетом положений пункта 2.3. контракта).

Пунктом 10.1 контракта предусмотрено, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и контрактом.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня. следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени (пункт 10.6 контракта).

Пунктом 12.4 контракта предусмотрено, что в случае невыполнения сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Республики Крым.

Как указывает истец в своем исковом заявлении, фактически строительные работы по контракту ответчиком были выполнены частично в объеме на сумму 2 645 829.23 руб., что подтверждается Актами о приемке выполненных работ № 1 от 03.12.2020г. на сумму 294 242.01 руб., № 2 от 03.12.2020г. на сумму 566 001.38 руб., № 3 от 24.12.2020г. на сумму 408 235.71 руб., № 4 от 24.12.2020г. на сумму 460 152.87 руб., № 3/1 от 16.03.2021г. на сумму 426 267.33 руб., № 3/2 от 16.03.2021г. на сумму 490 929.93 руб..

При этом, как указывает истец, ответчик принятые на себя обязательства не исполнил, работы в полном объеме как в установленный срок - до 31.12.2020г., не выполнил и в установленном порядке результаты работ в полном объеме не передал.

11.05.2021г. ФКУ «Пансионат «Горный» УФСИН по Республике Крым и г. Севастополю» принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта № 0875100006920000044-01 от 06.10.2020г..

15.07.2021г. ФКУ «Пансионат «Горный» УФСИН по Республике Крым и г. Севастополю» направило в адрес ООО «Гарант» претензию № 32/ТО/90-332 с требованием об оплате пени.

Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы представителей сторон, суд пришел к следующим выводам.

Так, согласно искового заявления просил суд взыскать с ответчика пеню за период с 01.01.2021г. по 20.06.2021г. в сумме 66 944.44 руб..

Квалифицируя спорные правоотношения сторон, суд признал их сложившимися в рамках исполнения контракта № 0875100006920000044-01 от 06.10.2020г., правовое регулирование которого предусмотрено главой 37 ГК РФ и Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», действующим на момент заключения контракта. 

Согласно части 8 статьи 3 Федерального закона № 44-ФЗ государственный (муниципальный) контракт - это договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных или муниципальных нужд.

 В соответствии с пунктом 2 статьи 763 ГК РФ  по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату. 

В силу пунктов 1, 2 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. 

В соответствии со статьей 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. 

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

11.05.2021г. ФКУ «Пансионат «Горный» УФСИН по Республике Крым и г. Севастополю» принято решение б/н об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта № 0875100006920000044-01 от 06.10.2020г., которое было направлено в адрес ООО «Гарант» и было возвращено отправителю 25.08.2021г. в связи с истечением срока хранения.

Частью 14 статьи 95 ФЗ № 44 установлено, что заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 указанной статьи. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

Учитывая изложенное и в связи с не устранением ответчиком нарушений условий контракта в период срока, установленного частью 14 статьи 95 ФЗ № 44, которое послужило основанием для принятия истцом решения об одностороннем отказе, решение истца об одностороннем отказе от исполнения контракта вступило в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления ответчика истцом об одностороннем отказе от исполнения Контракта, то есть – 07.09.2021г..

Таким образом, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта вступило в законную силу 07.09.2021г..

Доказательств выполнения работ в неисполненной части суду предоставлено не было. 

Истцом заявлено требование о взыскании с ответчика пени за период с 01.01.2021г. по 20.06.2021г. в сумме 66 944.44 руб. за нарушение срока исполнения обязательств.

В силу части 4 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. 

Согласно части 6, части 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе 5 гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

Ответственность подрядчика за нарушение срока выполнения работ предусмотрена пунктом 10.6 контракта.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня. следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени

В соответствии с частью 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно статьи 12 ГК РФ взыскание неустойки является одним из способов защиты нарушенного гражданского права.

Судом проверен расчет пени в нем усматриваются неточности в отношении применения значения ставки рефинансирования ЦБ РФ, однако, учитывая, что истцом ко взысканию заявлена сумма пени в меньшем размере, что является его правом и не нарушает прав и законных интересов ответчика, суд признал требования о взыскании пени за период с 01.01.2021г. по 20.06.2021г. в сумме 66 944.44 руб. такими, что подлежат удовлетворению.

В соответствии с частью 3-1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Согласно постановлению Президиума ВАС РФ от 17.01.2012г. № 9608/11 оспаривая расчет стороны, другая сторона должна дать собственный контррасчет с обоснованием иного подхода.

Ответчиком контррасчета взыскиваемых сумм не представлено.

Непредставление такого расчета расценивается как недобросовестность (Постановление Двадцать первого Арбитражного апелляционного суда от 24.04.2018 по делу № А83-5275/2017).

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Согласно пункта 1 части 1 статьи 333.21 НК РФ при цене иска до 100 000.00 руб. госпошлина составляет 4% цены иска, но не менее 2 000.00 руб..

При цене иска 66 944.44 руб. госпошлина составляет: 4% от 66 944.44 руб. = 2 677.78 руб..

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить.

2. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Гарант» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Федерального казенного учреждения «Пансионат «Горный» Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Крым и г. Севастополю» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) пеню за период с 01.01.2021г. по 20.06.2021г. в сумме 66 944.44 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в сумме 2 677.78 руб..

4. Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

5. Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа (248001, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.

Судья                                                                                                      Ю. А. Радвановская