АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А60-6914/2022

30 августа 2022 года

г. Екатеринбург

 

Резолютивная часть решения объявлена 23 августа 2022 года 

Полный текст решения изготовлен 30 августа 2022 года.

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи А.А. Малова при ведении протокола судебного заседания помощником судьи А.А. Роговцовой рассмотрел дело №А60-6914/2022

по первоначальному иску общества с ограниченной ответственностью "Победа" (ИНН 

<

***>; 

<

***>,)

к АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании 15 124 462 руб. 79 коп.,

 встречному иску АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Победа" (ИНН 

<

***>; 

<

***>)

о взыскании 76 269 руб. 09 коп.

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>).

при участии в судебном заседании:

от истца по первоначальному иску: ФИО1, представитель по доверенности от 20.09.2021, диплом,

от ответчика по первоначальному иску: ФИО2, представитель по доверенности от 12.01.2022, ФИО3, представитель по доверенности от 12.01.2022,

от третьего лица: ФИО4 – представитель по доверенности от 14.07.2022.

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов составу суда не заявлено.

общество с ограниченной ответственностью "Победа"  обратилось в суд с исковым заявлением к АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА с требованием о взыскании 15 124 462 руб. 79 коп. задолженности за поставленный по муниципальному контракту №45-ЭА-20 от 29.04.2020 товар.

Определением суда от 17.02.2022 о принятии искового заявления к производству и назначении предварительного судебного заседания предварительное судебное заседание назначено на 29.03.2022.

От ответчика 29.03.2022 поступил отзыв на исковое заявление, согласно которому ответчик против удовлетворения исковых требований возражает по основаниям, изложенным в отзыве. На основании ст. 75,131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отзыв приобщен к делу.

Ответчик 30.03.2022 обратился к суду со встречным иском, согласно которому просит взыскать с ООО «Победа» неустойку за нарушение сроков поставки товара по муниципальному контракту 55-ЭА-20 от 29.04.2020 на поставку технологического оборудования в сумме 473 899 руб. 83 коп. за период с 11.03.2021 по 26.04.2021.

Определением от 04.04.2022 встречное исковое заявление АДМИНИСТРАЦИИ    НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) от 30 марта 2022 года принято к производству Арбитражного суда Свердловской области.

От ответчика по встречному иску 11.05.2022 поступил отзыв на встречное исковое заявление. Согласно которому, ответчик против удовлетворения исковых требований возражает по основаниям, изложенным в отзыве. На основании ст. 75,131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отзыв приобщен к делу.

Согласно ч. 1 ст. 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда.

Суд считает необходимым на основании ч. 1 ст. 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>).

Учитывая привлечение к участию в деле третьего лица, суд считает необходимым отложить судебное заседание в порядке части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

От ответчика по первоначальному иску 06.06.2022 поступили дополнения к отзыву на исковое заявление. На основании ст. 75 АПК РФ дополнения приобщены к материалам дела.

От третьего лица 16.06.2022 поступило ходатайство о приобщении к материалам дела

Договор № 8/12 от 03.03.2022

Счёт-фактура № УТ-35 от 01.04.2022 к Договору № 8/12

Договор № 6/8 от 03.03.2022 к Договору № 6/8

Счёт-фактура № ут-11 от 01.04.2022 к Договору № 6/8

Договор № 5/9 от 03.03.2022 с допсоглашением № 1 от 16.03.2022

Счёт-фактура № УТ-12 от 01.04.2022 к Договору № 5/9

Договор № 4/10 от 03.03.2022

Счёт-фактура № УТ-8 от 01.04.2022 к Договору № 4/10

Договор № 3/11 от 03.03.2022

Счёт-фактура № УТ-9 от 01.04.2022 к Договору № 3/11

Договор № 3/13 от 03.03.2022

Счёт-фактура № УТ-7 от 01.04.2022 к Договору № 3/13

Договор № 3/13 от 03.03.2022

Счёт-фактура № УТ-7 от 01.04.2022 к Договору № 3/13

Договор № 3/14 от 03.03.2022 с допсоглашением № 1 от 16.03.2022

Счёт-фактура № УТ-2 от 01.04.2022 к Договору № 3/14

Договор № 1/22/15 от 03.03.2022

Счёт-фактура № УТ-9 от 01.04.2022 к Договору № 1/22/15

Договор № 05/04-1/17 от 06.04.2022

 

Счёт-фактура № 33 от 13.04.2022 к Договору № 05/04-1/17

Договор № 19/23 от 18.05.2022

Договор № 36/24 от 18.05.2022

Контракт на поставку товаров № ЭА2022-25/2022.79672 от 31.05.2022

На основании ст. 75 АПК РФ документы приобщены к материалам дела.

В связи с необходимостью получения дополнительных пояснений и доказательств по существу заявленных требований, суд определил отложить судебное заседание.

От третьего лица 11.07.2022 поступил отзыв. На основании ст. 75 АПК РФ отзыв приобщен к материалам дела.

От истца по встречному иску 06.07.2022 поступило заявление об уточнении исковых требований. Просят взыскать 76 269 руб. 09 коп. неустойку за нарушение сроков поставки Товара по муниципальному контракту 45-ЭА-20 от 29.04.2020 на поставку технологического оборудования за период с 11.03.2021 по 26.04.2021, обязать забрать товар, отгруженный и находящийся по адресу: 

<

...> разумный срок. На основании ст. 49 АПК РФ уточнение принято судом.

Поскольку доводы  сторон относительно существенных для дела обстоятельств требуют дополнительной документальной проверки, суд считает необходимым судебное разбирательство по делу отложить на основании ч. 5 ст. 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Истец по встречному иску уточнил исковые требования, просит взыскать с ООО «Победа» в пользу Администрации Невьянского городского округа неустойку (пени) за нарушение сроков поставки Товара по муниципальному контракту 45-ЭА-20 от 29.04.2020 г. на поставку технологического оборудования в сумме 76 269,09 руб. за период с 11.03.2021 по 26.04.2021, обязать ООО «Победа» забрать Товар, отгруженный и находящийся по адресу: 624191, 

<

...> д. За (здание МАОУ СОШ № 6 НГО) в течение 10 дней с даты вступления в силу решения суда. Уточнение принято судом, о чем сделана соответствующая запись в протоколе.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела, 29 апреля 2020 года по результатам электронного аукциона (извещение о проведении аукциона № 0162300019820000070 от 18.03.2020, размещенное на сайте www.zakupki.gov.ru, протокол подведения итогов электронного аукциона от 15.04.2020 №0162300019820000070-2-1) между ООО «ПОБЕДА» (Поставщик) и Администрацией Невьянского городского округа (Заказчик) был заключен муниципальный контракт № 45-ЭА-20.

Согласно п. 1.1. контракта поставщик обязуется поставить технологическое оборудование по наименованию, количеству, ассортименту и характеристикам согласно Спецификации, а также из своих материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами осуществить монтаж и ввод в эксплуатацию товара, в срок, указанный в разделе 4 Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар.

Цена контракта предусмотрена п.2.2. контракта и составляет 15 124 462, 79 руб.

По мнению истца, ООО «ПОБЕДА» осуществило надлежащим образом обязательство по поставке Товара на сумму 15 124 462,79 руб., 15 июня 2021 года ООО «ПОБЕДА» направило Заказчику претензию № 57 в которой потребовало оплаты поставленного Товара, однако данная претензия была оставлена без удовлетворения и ответа.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в Арбитражный суд Свердловской области с настоящим исковым заявлением о взыскании задолженности по оплате поставленного товара.

Суд, исследовав материалы дела, заслушав доводы и возражения сторон и оценив их в соответствии со ст. 71 АПК РФ, пришел к следующим выводам.

Правоотношения сторон по муниципальному контракту №45-ЭА-20 от 29.04.2020 регулируются главой 30 Гражданского кодекса РФ и Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ).

Согласно статье 1 Закона о контрактной системы N 44-ФЗ указанным законом регулируются отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок (пункт 1 статьи 1).

Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона и других федеральных законов, регулирующих отношения, указанные в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона. Нормы права, содержащиеся в других федеральных законах и регулирующие указанные отношения, должны соответствовать настоящему Федеральному закону (статья 2).

В соответствии с пунктом 8 статьи 3 Закона о контрактной системе под государственным или муниципальным контрактом понимается договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд.

В силу статьи 525 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее-ГК РФ) поставка товаров для государственных или муниципальных нужд осуществляется на основе государственного или муниципального контракта на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд, а также заключаемых в соответствии с ним договоров поставки товаров для государственных или муниципальных нужд (пункт 2 статьи 530).

К отношениям по поставке товаров для государственных или муниципальных нужд применяются правила о договоре поставки (статьи 506 - 522), если иное не предусмотрено правилами настоящего Кодекса. К отношениям по поставке товаров для государственных или муниципальных нужд в части, не урегулированной настоящим параграфом, применяются иные законы (пункт 2 названной статьи).

В соответствии со статьей 526 ГК РФ по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) поставщик (исполнитель) обязуется передать товары государственному или муниципальному заказчику либо по его указанию иному лицу, а государственный или муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров.

Согласно статье 527 ГК РФ государственный или муниципальный контракт заключается на основе заказа на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд, размещаемого в порядке, предусмотренном законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

В силу статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 527 ГК РФ государственный или муниципальный контракт заключается на основе заказа на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд, размещаемого в порядке, предусмотренном законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

В соответствии со статьями 309, 310, 314 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Как следует из материалов дела, 29 апреля 2020 года по результатам электронного аукциона (извещение о проведении аукциона № 0162300019820000070 от 18.03.2020, размещенное на сайте www.zakupki.gov.ru, протокол подведения итогов электронного аукциона от 15.04.2020 №0162300019820000070-2-1) между ООО «ПОБЕДА» (Поставщик) и Администрацией Невьянского городского округа (Заказчик) был заключен муниципальный контракт № 45-ЭА-20.

Согласно п. 1.1. контракта поставщик обязуется поставить технологическое оборудование по наименованию, количеству, ассортименту и характеристикам согласно Спецификации, а также из своих материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами осуществить монтаж и ввод в эксплуатацию товара, в срок, указанный в разделе 4 Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар.

Цена контракта предусмотрена п.2.2. контракта и составляет 15 124 462, 79 руб.

Согласно п.2.7. контракта заказчик оплачивает товар, поставленный поставщиком, монтаж и ввод в эксплуатацию в соответствии с контрактом, единовременным платежом путем перечисления цены контракта, на банковский счет поставщика в течение 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа») и (или) Акта сдачи - приемки Товара, работ на основании счета, счета-фактуры.

В соответствии с п. 3.4.1 Контракта Поставщик обязан помимо поставки обеспечить монтаж и ввод в эксплуатацию поставленного Товара.

В соответствии с п. 3.4.3. Поставщик принял на себя обязательство доставить Товар с соблюдением требований санитарного законодательства, своим транспортом либо с привлечением специализированной транспортной организации и за свой счет, а также при поставке представить все документы, относящиеся к Товару, указанные в разделе 12 контракта. Передать Заказчику Товар надлежащего качества в количестве, ассортименте согласно Спецификации.

В соответствии с п. 4.1. Контракта Товар должен быть поставлен, осуществлен монтаж и ввод Товара в эксплуатацию в течение 30 календарных дней с даты подписания Контракта, т.е. по 29.05.2020.

В соответствии с п. 4.2. Контракта Поставка Товара осуществляется одномоментно.

В соответствии с п. 5.1. контракта приемка, монтаж и ввод в эксплуатацию товара осуществляется в месте поставки товара.

Приложением № 2 к контракту определен адрес поставки товара - 

<

...> дом За. По данному адресу фактически располагается образовательное учреждение МАОУ СОШ №6, обеспечение нужд которой являлось целью заключения контракта.

В соответствии с п. 5.2 контракта при поставке товара поставщик должен передать Заказчику документы, предусмотренные п. 3.4.10 -обеспечение гарантийных обязательств (путем предоставления банковской гарантии либо внесением денежных средств на счет Заказчика). Данное требование установлено как муниципальным контрактом, так и ч.7.1 ст. 94 Закона о контрактной системе.

В соответствии с п. 5.5. Контракта для проверки соответствия поставленного Товара условиям Контракта, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза Товара может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе.

В соответствии с п. 5.8.3. Контракта Товар должен быть поставлен полностью.

В соответствии с п.12.3.1. при поставке Товара поставщик обязан на каждый товар предоставить Заказчику надлежащим образом оформленный пакет товаросопроводительной документации, обеспечивающей прослеживаемость Товара от изготовителя до Заказчика, включая: декларацию о соответствии (или сведения о декларации соответствия, в том числе ее регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший)/сертификат соответствия, заверенный держателем декларации (сертификата), либо органом по сертификации, либо нотариально (в случае, если товар подлежит обязательному декларированию (сертификации), свидетельство о государственной регистрации (в случае, если товар подлежит обязательной государственной регистрации на территории РФ), документы.

Между тем, установлено, что в нарушение условий контракта, на товар не предоставлены документы, предусмотренные пунктом 12.3.1. Контракта - сертификаты соответствия, заверенные держателем декларации (сертификата), либо органом по сертификации, либо нотариально (в случае, если товар подлежит обязательному декларированию (сертификации).

Также, в нарушение условий контракта, Поставщик по нижеуказанным позициям поставил Товар не в соответствии со Спецификацией:

- Позиция 51

Комплект лабораторного оборудования «Наблюдение за погодой» с руководством для учителя

Комплект лабораторного оборудования тип З

В составе комплекта отсутствует: градуированная мензурка для сбора дождевой воды - не менее 6 шт.; зажим для треноги, компаса и флюгера - не менее 1шт.; компас с застежкой- не менее 1 шт.; компас с фиксируемой стрелкой - не менее 1шт.; металлическое зеркало - не менее 1шт.; настенная доска для крепления карточек, покрытая фетром - не менее 2шт.; пластиковые карточки с велькроновой полоской с погодными символами - не менее 37шт.; пластиковые карточки с велькроновой полоской для записей - не менее 5шт.; самоклеющиеся велькроновые застежки - не менее 8шт.; сетка для подвешивания стабилизирующего груза - не менее 1 шт.; в техническом задании термометр (в диапазоне от -25 до +50 С) - не менее 6 шт.- а по факту термометр (в диапазоне от -10 до +50 С) - не менее 6шт .; ткань для очистки -не менее 2шт.; Руководство должно быть объемом менее 30 страниц формата А4 и содержать инструкции по проведению не менее 10 работ по природоведению. Руководство должно содержать описание состава комплекта, теоретические сведения о физических явлениях, относящихся к понятию «погодные условия», описание конструкций измерительных приборов.

Отсутствует сертификат качества и безопасности использования данного оборудования.

Комплект лаб. оборудования "Давление жидкостей. Схема водопровода"

Комплект лабораторного оборудования тип 2.

В составе комплекта отсутствует: резервуар для воды - не менее 1 шт.; в техническом задании батарея 4,5 В - не менее 2 шт- а по факту батарея 12 В-1 шт.;

протирочный материал(губка) - не менее 1 шт.

Отсутствует сертификат качества и безопасности использования данного оборудования.

- Позиция 52 

Мультисенсор KIDS«Экология»

l. He соответствуют габаритным размерам технического задания;

2.Датчики 2,3,5 позиции не встроены в мультисенсор, что не соответствует условиям технического задания.

Мультисенсор KIDS «Погода»

Не соответствуют габаритным размерам технического задания;

Датчики 1 позиции не встроен в мультисенсор, что не соответствует условиям технического задания.

Мультисенсор «Здоровье»

1. Не укомплектован коннектором для соединения манжеты к мультисенсору;

Сенсоры (классическое исполнение)

1 позиция сенсоры скорости потока воздуха и 2 позиция сенсор электронный компас представлены не по отдельности а в едином корпусе, что не соответствует условиям технического задания; Позиция 3 Сенсор усилия не оснащен крюком.

Программное обеспечение представлено на FLASH носителях не было. В соответствии с техническим заданием данное оборудование должно быть поставлено в специальных кейсах. Кейсы не поставлены. Отсутствует сертификат качества и безопасности использования данного оборудования.

- Позиция 54

Комплект лаб. оборудования "Природные явления" с руководством для учителя не менее 1шт.

Комплект должен быть предназначен для демонстрации не менее 100 экспериментов при изучении взаимодействия тел (сила, энергия), электричества и магнетизма, световых и тепловых явлений, свойств воды, воздуха и звука, условий роста растений. Оборудование должно быть укомплектовано в пластиковый чемодан размерами не менее ДхШхТ, см: 49x44x14, но не более 51x46x16см.

В комплект должно входить методическое пособие с описанием состава комплекта, инструктажем по технике безопасности при работе с оборудованием, описанием не менее 100 экспериментов; объемом не менее 109 стр. формата А4. В состав комплекта должны входить:

штативный стержень, цилиндрической формы не менее, см: 40х,5, со сквозными отверстиями для крепления, 3-цветная шкала (сектор по 5 см, цена деления не более 1 см), изготовленной из пластика- не менее 1 шт.; резонансная коробка - не менее 2 шт.;

камертон, длиной не менее 9 см, шириной не менее 1,3 см, металлический - не менее 1 шт.; весы, рычажного типа, разборные, максимальный вес до 40 г, чувствительность - не более 100 мг, пластик - не менее 6 шт.; должны иметь в составе - стойка, коромысло, регулировочная планка, не менее 2 чаши с подвесом;высокочувствительные весы механические, пружинные, цена деления не более 1г, максимальный вес до 100 г, пластик - не менее 2 шт.; ванна пластиковая прозрачная с боковыми отверстиями, размером не менее ДхШхВ, см: 20x10x8 - не менее 1 шт.; колба Эрленмейера, стеклянная с ценой деления не более 25 мл, высотой не менее 105 мм, объемом не менее 100 мл - не менее 1 шт; шланги силиконовые, длиной не менее 500мм - не менее 2 шт.; термометр спиртовой стеклянный, диапазон измерений от не менее -10 до не менее 110°С, цена деления не более 1°С -не менее 1 шт.; шприц, объемом не менее 30 мл, градуированный, цена деления не более 1мл, пластиковый - не менее 1 шт.; фонарь электрический с лампой накаливания, длиной не менее 14см, диаметром не менее 3,5см -не менее 1 шт.; элемент питания LR14 щелочной, размер АА, напряжение не менее 1.5В - не менее 4 шт.;провода соединительные, в пластиковой изоляции различных цветов, длина не менее 45см, допустимое рабочее напряжение не более 12 В DC/AC - не менее 5 шт.; груз, изготовленный из металла, массой не менее Юг- не менее 2 шт, массой не менее 50 г- не менее 2 шт.; пластиковая тележка размером, ДхШхВ, см: не менее 1,8x1x0,7, но не более 3,8x3x2,7 см- не менее 2 шт.; спиртовка, объемом не менее 60 мл - никелированная, с фитилем-не менее 1шт; тренога металлическая, высотой не менее 11см - не менее 1 шт.; сетка проволочная с керамической вставкой, размер сетки не менее, см: 9x9, диаметр вставки 6см - не менее 1 шт.; колесо гребное диаметром не менее 10 см,не менее чем с 8 лопастями, выполненное из пластика - не менее 1 шт.; воронка изготовленная из пластика, длиной не менее 5,5 см, диаметр не менее 6 см

не менее 1 шт.; молоток пластиковый длиной не менее 16см - не менее 1 шт.; свеча в жестяной гильзе - не менее 2 шт.; тарелка металлическая, диаметром не менее 14см - не менее 1 шт.; экран - не менее 4 шт, размером не менее ДхШхТ, мм: 89x89x1, но не более 91x91x3 мм, экраны должны быть изготовлены из различных материалов (например, дерева, пластика, стекла, акрила, металла); линза собирающая, двояковыпуклая, с фокусным расстоянием не менее +50мм, диаметром не менее 4,5см, - не менее 1 шт.; шарик пластмассовый диаметром не менее 2,5см - не менее 1 шт.; шарик стеклянный, диаметром не менее 1,6см - не менее 1 шт.; кольцо резиновые

не менее 10 шт.; стержень для натяжения струны, должен быть изготовлен из пластика, длиной не менее 4,5см, диаметром не менее 1,5см - не менее 2 шт.; надувные шары - не менее 10 шт.; стеклянная пипетка, объемом не менее 2 мл - не менее 1 шт.; катушка для компаса (роза ветров), квадратной формы размером не менее ДхШ, см: 6x6 с нанесенным рисунком, с отверстием диаметром не более 2 мм посередине - не менее 1 шт.; медный провод в пластиковой изоляции, на катушке длиной не менее 20 м, диаметром не более 0.5мм - не менее 1 шт.; нагревательный элемент (нить накала), на катушке, длиной не менее 20м, диаметром не менее 0.2мм - не менее 1 шт.; лампа накаливаниям цоколем ЕЮ, характеристики: не менее 2.5В, не менее 0.1А, 0.25 Вт - не менее 5 шт.; держатель для не менее 2 батарей размером АА, не менее 1 шт.; магнитная стрелка, с отверстием под опору, длиной не менее 3,5см,- не менее 1 шт.; магнит, 2 полюсный, цветовая разметка полюсов, не менее, см: 1,5х0,5х0,2,но не более 2,5x1,5x1,2 см сплав AINiCo - не менее 2 шт.; комплект гвоздей.

Вместо комплекта лабораторного оборудования "Природные явления" с техническими характеристиками описанными выше укомплектованного в чемодан, поставщик поставил другой товар а именно Набор лабораторный «Тепловые явления» производителя EDUSTRONG с другим назначением и содержанием в бумажной коробке, что не соответствует техническому заданию.

- Позиция 60

Поставленный товар не соответствует размерам и весу ( размеры 150-33-33мм, вес 78 грамм) характеристикам товара описанных в техническом задании.

Истцом не предоставлено доказательств, опровергающих наличие указанных недостатков, как и доказательств, подтверждающих факт поставки товара в соответствии с условиями контракта. 

В соответствии с п.3.4.10. Поставщик обязан предоставить обеспечение гарантийных обязательств при поставке Товара.

В соответствии с п.6.2 Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется в размере 2% от начальной (максимальной) цены контракта в сумме 347 688 (триста сорок семь тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей 80 коп.

В соответствии с ч.7.1 ст.94 Закона о контрактной системе «В случае установления заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) такого обеспечения в соответствии с настоящим Федеральным законом в порядке и в сроки, которые установлены контрактом».

В нарушение требований законодательства о контрактной системе и условий контракта Поставщиком до момента расторжения контракта и по настоящее время не предоставлено обеспечение гарантийных обязательств.

30.03.2021 заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, вступившее в законную силу 26.04.2021.

В силу положений части 8 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, стороны контракта наделены правом на односторонний отказ от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, влекущий расторжение такого контракта. В части 9 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ предусмотрено, что заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

С учетом вышеизложенного, суд приходит к выводу, что, поскольку, товар поставлен с нарушением срока установленного в муниципальном контракте, при этом, товар не соответствует условиям муниципального контракта (перечень несоответствий изложен выше), а также при поставке товара в нарушение условий муниципального контракта не было предоставлено обеспечение гарантийных обязательств, товар оплате со стороны администрации Невьянского городского округа не подлежит, исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Победа" удовлетворению не подлежат.

Истец по встречному иску обратился в Арбитражный суд Свердловской области с требованием о взыскании с ООО «Победа» в пользу Администрации Невьянского городского округа неустойки (пени) за нарушение сроков поставки товара по муниципальному контракту 45-ЭА-20 от 29.04.2020 на поставку технологического оборудования в сумме 473 899,83  руб. 83 коп. за период с 11.03.2021 по 26.04.2021.

В процессе рассмотрения дела истец по встречному иску уточнил исковые требования. Просит взыскать с ООО «Победа» в пользу Администрации Невьянского городского округа неустойку (пени) за нарушение сроков поставки Товара по муниципальному контракту 45-ЭА-20 от 29.04.2020 г. на поставку технологического оборудования в сумме 76 269,09 руб. за период с 11.03.2021 по 26.04.2021, обязать ООО «Победа» забрать Товар, отгруженный и находящийся по адресу: 624191, 

<

...> д. За (здание МАОУ СОШ № 6 НГО) в течение 10 дней с даты вступления в силу решения суда. Уточнение принято судом.

В обоснование встречного искового заявления заявитель указал, что в соответствии с п. 7.5. Контракта: «В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней)».

В соответствии с п.7.6. «Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени».

В силу ст. 329 Гражданского кодекса Российской Федерации одним из способов обеспечения исполнения обязательств является неустойка.

Согласно положениям п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В силу п. 1 ст. 332 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон.

По расчету истца по встречному иску, с учетом требований законодательства о контрактной системе, закрепленного в п. 7.6 Контракта размер неустойки (пени) на дату расторжения контракта составил: 76 269,09 руб. за период с 11.03.2021 по 26.04.2021.

Расчет истца по встречному иску судом проверен, признан соответствующим условиям контракта и не противоречащим действующему законодательству. 

Арифметическая правильность расчета ответчиком по встречному иску не оспорена. Факт нарушения сроков поставки подтверждается материалами дела, в связи с чем, встречные исковые требования подлежат удовлетворению в заявленной сумме  76 269 руб. 09 коп.

С учетом того, что материалами дела подтверждено, что ответчиком нарушены условия контракта, доказательств опровергающих установленные обстоятельства ответчиком по встречному иску не представлено, 30.03.2021 заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, у ответчика возникла обязанность вывезти поставленный с нарушением условий контракта товар.

В соответствии с пунктом 1 статьи 514 ГК РФ, когда покупатель (получатель) в соответствии с законом, иными правовыми актами или договором поставки отказывается от переданного поставщиком товара, он обязан обеспечить сохранность этого товара (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить поставщика.

В силу пункта 2 статьи 514 ГК РФ поставщик обязан вывезти товар, принятый покупателем (получателем) на ответственное хранение, или распорядиться им в разумный срок.

Поскольку доказан факт неисполнения ответчиком по встречному иску условий контракта, а также то обстоятельство, что товар хранится у истца по встречному иску, суд приходит к выводу о необходимости возложения на ООО «Победа» обязанности вывезти поставленный по  муниципальному контракту 45-ЭА-20 от 29.04.2020, отгруженный и находящийся по адресу: 624191, 

<

...> д. За (здание МАОУ СОШ № 6 НГО) в течение 10 дней с даты вступления в силу решения суда.

В соответствии с ч.1 ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицом, участвующим в деле, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются со стороны.  

Поскольку  истец освобожден от уплаты государственной пошлины, государственная пошлина  в размере 9051 руб., подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 167-170, 176  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требованиях общества с ограниченной ответственностью "Победа" (ИНН 

<

***>; 

<

***> ) отказать.

Исковые требования АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Победа" (ИНН 

<

***>; 

<

***>) в пользу АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>):

- 76 269 руб. 09 коп. неустойку (пени) за нарушение сроков поставки товара по муниципальному контракту 45-ЭА-20 от 29.04.2020 г. на поставку технологического оборудования за период с 11.03.2021 по 26.04.2021, 

4. Обязать общество с ограниченной ответственностью "Победа" (ИНН 

<

***>; 

<

***>) вывезти товар, отгруженный и находящийся по адресу: 624191, 

<

...> д. За (здание МАОУ СОШ № 6 НГО) в течение 10 дней с даты вступления в силу решения суда.

5. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Победа" (ИНН 

<

***>; 

<

***>) в доход федерального бюджета 9051 руб. государственной пошлины.

4. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

 Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

5. В соответствии с ч. 3 ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение». 

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела «Дополнение». 

 

Судья                                                         А.А. Малов