АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102

http://kirov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

 

Дело № А28-12321/2023

г. Киров

11 декабря 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 01 декабря 2023 года 

В полном объеме решение изготовлено 11 декабря 2023 года  

Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Прозоровой Е.Ю.

при ведении протокола судебного заседания с использованием сервиса онлайн- заседание и средств аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев дело по исковому заявлению 

общества с ограниченной ответственностью «АВЕНИР» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, адрес: 610004, 

<

...>)

к обществу с ограниченной ответственностью «СтройФормат» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, адрес: 427620, 

<

...>) о взыскании 1 159 549 рублей 36 копеек,

при участии в судебном заседании представителей:

истца-Курбатовой О.В., по доверенности от 16.10.2023 № 78, ФИО2, по доверенности от 19.06.2023 № 61,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «АВЕНИР» (далее - истец, ООО «АВЕНИР») обратилось в Арбитражный суд Кировской области с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью «СтройФормат» (далее - ответчик, ООО «СтройФормат») о взыскании 1 166 922 рублей 08 копеек, в том числе 1 083 889 рублей 60 копеек предварительной оплаты по договору подряда на ремонт помещения от 28.03.20023 № 20, 46 714 рублей 75 копеек штрафа за просрочку исполнения обязательств, 36 317 рублей 73 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.08.2023 по 08.11.2023, с дальнейшим начислением процентов за пользование чужими денежными с 09.11.2023 по день фактического погашения основной суммы долга.

Исковые требования основаны на положениях статей 309, 310, 450.1, 395, 487, 708 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивированы неисполнением ответчиком обязательств взятых на себя в рамках договора подряда на ремонт помещения от 28.03.20023 № 20. 

Ответчик отзыв на иск не представил, чем в силу части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принял на себя риск наступления последствий несовершения данного процессуального действия.

В судебном заседании представители истца поддержали уточненные исковые требования, настаивают на их удовлетворении. 

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, явку представителя в судебное заседание не обеспечил.

При указанных выше условиях арбитражный суд рассматривает дело в отсутствие представителя ответчика на основании части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Заслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд установил следующие фактические обстоятельства.

Между ООО «АВЕНИР» (заказчик) и  ООО «СтройФормат» (подрядчик) подписан договор подряда на ремонт помещения от 28.03.20023 № 20 (далее - договор) по условиям которого, подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить работы по ремонту и отделке здания швейного цеха (далее - объект), расположенного по адресу: УР, 

<

...>, в соответствии с условиями договора и приложениями к нему, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену в порядке и сроки, установленные договором (пункт 1.1 договора).

Виды работ по ремонту и отделке, производимые подрядчиком, устанавливаются в локальной смете от 21.03.2023 № 1252 (приложение № 1). Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине произошло существенное превышение определенной цены работ, подрядчик обязан своевременно предупредить об этом заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в договоре цены работ, вправе отказаться от договора (пункт 1.2 договора).

Работы, предусмотренные договором, выполняются подрядчиком в течение 60 рабочих дней с даты подписания договора: начало работ: с 29 марта 2023 года; окончание работ: 26 июня 2023 года. Сроки выполнения работ по локальной смете от 21.03.2023 № 1252 определяются подрядчиком по согласованию с заказчиком (пункты 2.1- 2.2 договора).

Стоимость работ по договору указана в локальной смете от 21.03.2023 № 1252, подлежащей согласованию сторонами (пункт 3.1 договора).

Оплата по договору производится в следующем порядке: 

- 437 795 рублей 00 копеек за выполнение работ по ремонту и отделке заказчик оплачивает следующим образом: 30% предоплата от каждого раздела локальной сметы. Окончательный расчет по каждому разделу локальной сметы - в течение 3-х рабочих дней с даты подписания акта выполненных работ по каждому разделу локальной сметы;

- 439 730 рублей 00 копеек за поставленные материалы заказчик оплачивает в течение 3-х рабочих дней после подписания договора. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств с расчетного счета заказчика на расчетный счет подрядчика. Обязательство заказчика по оплате выполненных работ считается исполненным после полной оплаты (пункт 3.2 договора).

В целях контроля надлежащего исполнения договора проводится освидетельствование каждого завершенного этапа выполненных работ. Приемка работ (этапа) по договору осуществляется по акту приема - передач после освидетельствования (пункт 6.1 договора).

Работы считаются принятыми со дня подписания документа(ов) о приемке (пункт 6.2 договора).

После выполнения всех работ по локальной смете от 21.03.2023 № 1252 подписывается акт приема-передач объекта с указанием всех выполненных работ (пункт 6.6 договора).

В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ (пункт 8.2 договора).

Стороны согласовали к договору Локальный сметный расчет от 20.03.2023 № 1252 (далее - смета № 1252), согласно которому подрядчик обязуется выполнить работы общей стоимостью 437 795 рублей 00 копеек, а также поставить материалы общей стоимостью 439 730 рублей 00 копеек.

К договору стороны подписали дополнительное соглашение от 18.05.2023 № 1 (далее - дополнительное соглашение № 1), в котором согласовали дополнительные работы по текущему ремонту объекта, согласно локальной смете от 23.04.2023 № 1278, а также  пункты 1.2, 2.2, 3.1, 3.2 и 6.6 договора изложили в новой редакции, в соответствии с которой:

- виды работ по ремонту и отделке, производимые подрядчиком, устанавливаются в локальной смете от 21.03.2023 № 1252 (приложение № 1) и в локальной смете от 23.04.2023 № 1278 (приложение № 2) (пункт 1.2 договора в редакции пункта 3 дополнительного соглашения № 1);

- сроки выполнения работ по локальной смете от 21.03.2023 № 1252 определяются подрядчиком по согласованию с заказчиком. Срок выполнения работ по локальной смете от 23.04.2023 № 1278 до 29.05.2023 (пункт 2.2 договора в редакции пункта 4 дополнительного соглашения № 1);

- стоимость работ по договору указана в локальных сметах от 21.03.2023 № 1252 и от 23.04.2023№ 1278, подлежащей согласованию сторонами (пункт 3.1 договора в редакции пункта 5 дополнительного соглашения № 1);

- 211 779 рублей 00 копеек за выполнение работ по демонтажу левой части объекта заказчик оплачивает следующим образом: 103 000 рублей 00 копеек в виде материала (строительного мусора) для самостоятельной реализации подрядчиком, 108 779 рублей 00 копеек в течение 3-х рабочих дней с даты подписания акта выполненных работ. Подрядчик обязан вывести материал (строительный мусор) стоимостью 103 000 рублей 00 копеек до момента подписания акта выполненных работ» (пункт 3.2 договора в редакции пункта 6 дополнительного соглашения № 1);

- после выполнения всех работ по локальным сметам от 21.03.2023№ 1252, от 23.04.2023 № 1278 подписывается акт приема - передач объекта с указанием всех выполненных работ (пункт 6.6 договора в редакции пункта 8 дополнительного соглашения № 1).

Стороны согласовали к договору Локальный сметный расчет от 23.04.2023 № 1278 (далее - смета № 1278), согласно которому подрядчик обязуется выполнить работы общей стоимостью 211 779 рублей 00 копеек.

Письмом от 17.05.2023 ответчик сообщил истцу, что в счет частичной оплаты работ по демонтажу, готов взять строительный мусор, оставшийся после демонтажа левой и правой части здания стоимостью 103 000 рублей 00 копеек. 

К договору стороны подписали дополнительное соглашение от 05.06.2023 № 2 (далее - дополнительное соглашение № 2), в котором согласовали дополнительные работы по текущему ремонту объекта, согласно локальным сметам от 22.04.2023№ 1268, от 22.05.2023 № 1288, а также пункты 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 и 6.6 договора изложили в новой редакции, в соответствии с которой:

- виды работ по ремонту и отделке, производимые подрядчиком, устанавливаются в локальных сметах от 21.03.2023 № 1252 (приложение № 1), от 23.04.2023 № 1278 (приложение № 2), от 22.04.2023 № 1268 (приложение № 3), от 22.05.2023 № 1288 (приложение № 4) (пункт 1.2 договора в редакции пункта 3 дополнительного соглашения № 2);

- окончание работ: в сроки предусмотренные пунктом 2.2 договора (пункт 2.1 договора в редакции пункта 4 дополнительного соглашения № 2);

- сроки выполнения работ по локальной смете от 22.04.2023 № 1268 по разделу 1 и от 22.05.2023 № 1288 до 05.07.2023 года. Срок выполнения работ по локальной смете от 22.04.2023 № 1268 по разделу 2 в течение 30 дней после внесения предоплаты Заказчиком на расчетный счет подрядчика (пункт 2.2 договора в редакции пункта 5 дополнительного соглашения № 2);

- стоимость работ по договору указана в локальных сметах от 21.03.2023 № 1252, от 23.04.2023 № 1278, от 22.04.2023 № 1268, от 22.05.2023 № 1288  подлежащей согласованию сторонами (пункт 3.1 договора в редакции пункта 6 дополнительного соглашения № 2);

- по локальной смете от 22.04.2023№ 1268: 233 049 рублей 00 копеек за выполнение работ по ремонту и отделке заказчик оплачивает следующим образом: 30% предоплата по разделу 1 локальной сметы; 30% предоплата по разделу 2 локальной сметы, после приемки работ по разделу 1 локальной сметы по акту приемки: окончательный расчет по каждому разделу локальной сметы -  в течение 3-х рабочих дней с даты подписания акта выполненных работ по каждому разделу локальной сметы; 238 177 рублей 00 копеек за поставленные материалы заказчик оплачивает в течение 3-х рабочих дней после подписания дополнительного соглашения № 2 к договору; по локальной смете от 22.05.2023 № 1288: 153 732 рубля 00 копеек за выполнение работ по ремонту и отделке заказчик оплачивает следующим образом: 30% предоплата от каждого раздела локальной сметы; окончательный расчет по каждому разделу локальной сметы - в течение 3-х рабочих дней с даты подписания акта выполненных работ по каждому разделу локальной сметы; 274 975 рублей 00 копеек за поставленные материалы заказчик оплачивает в течение 3-х рабочих дней после подписания дополнительного соглашения № 2 к договору (пункт 3.2 договора в редакции пункта 7 дополнительного соглашения № 2);

- после выполнения всех работ по локальным сметам от 21.03.2023 № 1252, от 23.04.2023 № 1278, от 22.04.2023 № 1268, от 22.05.2023 № 1288 подписывается акт приема-передач объекта с указанием всех выполненных работ (пункт 6.6 договора в редакции пункта 9 дополнительного соглашения № 2).

Стороны согласовали к договору Локальный сметный расчет от 22.04.2023 № 1268 (далее - смета № 1268), согласно которому подрядчик обязуется выполнить работы общей стоимостью 233 049 рублей 00 копеек, а также поставить материалы общей стоимостью 238 177 рублей 00 копеек.

Также стороны согласовали к договору Локальный сметный расчет от 22.05.2023 № 1288 (далее - смета № 1288), согласно которому подрядчик обязуется выполнить работы общей стоимостью 153 732 рубля 00 копеек, а также поставить материалы общей стоимостью 274 975 рублей 00 копеек.

Платежными поручениями от 22.03.2023 № 215 с указанием назначения платежа: «оплата по счету № 22 от 21.03.2023 за материалы по договору поставки № 17 от 21.03.2023» на сумму 439 730 рублей 00 копеек; от 28.03.2023 № 242 с указанием назначения платежа: «оплата по счету № 23 от 28.03.2023 по договору на оказание услуг № 20 от 28.03.2023» на сумму 30 618 рублей 00 копеек; от 19.04.2023 № 331 с указанием назначения платежа: «оплата по счету № 23 от 28.03.2023 по договору на оказание услуг № 20 от 28.03.2023» на сумму 172 165 рублей 50 копеек; от 06.06.2023 № 494 с указанием назначения платежа: «оплата по договору на оказание услуг № 20 от 28.03.2023 (окончательный расчет за демонтаж левой части здания)» на сумму 60 924 рубля 50 копеек; от 06.06.2023 № 495 с указанием назначения платежа: «оплата по договору на оказание услуг № 20 от 28.03.2023 (материалы по сметам № 1288, 1268, предоплата работ 30% по сметам № 1288, 1268)» на сумму 591 293 рубля 60 копеек, истец перечислил ответчику денежные средства в общей сумме 1 294 731 рубль 60 копеек.

В подтверждение факта исполнения ответчиком обязательств по договору на общую сумму 313 839 рублей 00 копеек истцом в материалы дела представлены акты от 18.04.2023 № 2 на сумму 102 060 рублей 00 копеек, от 31.05.2023 № 3 на сумму 211 779 рублей 00 копеек.

Письмом от 01.08.2023 № 129 (получено ответчиком), истец уведомил ответчика о расторжении договора, а также просил вернуть сумму предоплаты по договору, в том числе 131 007 рублей 60 копеек за невыполненные работы и 952 882 рубля 00 копеек за материалы.

Истец в претензии от 25.08.2023 № 153 потребовал вернуть 1 083 889 рублей 60 копеек предварительной оплаты по договору, а также уплатить сумму начисленного штрафа и процентов за пользование чужими денежными средствами. Указанная претензия оставлена ответчиком без ответа и удовлетворения.

Неисполнение требований претензии в добровольном порядке послужило причиной для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Исследовав представленные материалы и установленные обстоятельства, арбитражный суд приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В силу пункта 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 8 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда" основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Согласно пункту 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами; при отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (статья 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Факт перечисления ответчику денежных средств в общей сумме 1 294 731 рубль 60 копеек подтверждается представленным в материалы дела платежными поручениями. Также подтверждается учтенная истцом в качестве частичной оплаты работ по договору денежная сумма в размере 103 000 рублей 00 копеек (строительный мусор).  

Ответчиком обязательства по договору исполнены на общую сумму 313 839 рублей 00 копеек. 

При этом доказательств исполнения встречных обязательств по договору на всю сумму предварительной оплаты материалы дела не содержат.

Письмом от 01.08.2023 № 129 истец уведомил ответчика о расторжении договора. 

В силу положений пункта 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В силу статей 450, 453 Гражданского кодекса Российской Федерации после одностороннего отказа от исполнения договора, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается расторгнутым, обязательства сторон при расторжении договора прекращаются. 

В силу пункта 1 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации договор прекращается с момента получения уведомления об отказе от договора, если иное не предусмотрено законом или договором.

В случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.

В соответствии со статьей 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Ответчик не исполнил перед истцом обязательств по договору в полном объеме, доказательства выполнения работ на заявленную сумму, получения заказчиком такого результата в материалах дела отсутствуют, следовательно, после расторжения договора правовые основания для удержания ответчиком денежных средств в размере 1 083 889 рублей 60 копеек отсутствуют, полученные ответчиком денежные средства является неосновательным обогащением ответчика за счет истца и подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

В связи с нарушением сроков исполнения обязательств по договору истец взыскивает с ответчика штраф в размере 46 714 рублей 75 копеек.

Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пени) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

Факт просрочки исполнения обязательств по договору материалами дела подтвержден.  

Представленный истцом расчет штрафа, с учетом уточнения, проверен судом, признан верным, поскольку не противоречит условиям договора и установленным судом обстоятельствам, не нарушает права ответчика. Иной расчет штрафа (контррасчет) ответчиком суду не представлен.

С учетом указанных норм права и вышеизложенных обстоятельств, исковые требования истца о взыскании с ответчика 46 714 рублей 75 копеек штрафа являются обоснованными и подлежат удовлетворению в полном объеме.

Также истец в связи с просрочкой исполнения денежного обязательства по возврату предварительной оплаты на основании статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации просит взыскать с ответчика 36 317 рублей 73 копейки процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.08.2023 по 08.11.2023, с дальнейшим начислением процентов за пользование чужими денежными с 09.11.2023 по день фактического погашения основной суммы долга.

В силу пункта 2 статьи 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

В силу пункта 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами являются акцессорными по отношению к требованиям о взыскании неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса. Учитывая, что факт неосновательного обогащения установлен судом, правомерным является и начисление на указанную сумму процентов за пользование чужими денежными средствами.   

Представленный истцом расчет процентов за пользование чужими денежными средствами, с учетом уточнения, проверен судом, признан верным, поскольку не противоречит установленным судом обстоятельствам, не нарушает права ответчика. Иной расчет процентов за пользование чужими денежными средствами (контррасчет) ответчиком суду не представлен, период просрочки ответчиком не оспорен.

С учетом указанных норм права и вышеизложенных обстоятельств, исковые требования истца о взыскании с ответчика 36 317 рублей 73 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.08.2023 по 08.11.2023 являются обоснованными и подлежат удовлетворению в полном объеме.

Исковые требования истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствам, начиная с 09.11.2023 по день фактической оплаты долга, также подлежат удовлетворению в соответствии с пунктом 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», в порядке статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 24 595 рублей 00 копеек относятся на ответчика и подлежат возмещению ответчиком в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СтройФормат» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «АВЕНИР» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) неосновательное обогащение в размере 1 083 889,60 (один миллион восемьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят девять) рублей 60 копеек, штраф в размере 46 714,75 (сорок шесть тысяч семьсот четырнадцать) рублей 75 копеек, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 36 317,73 (тридцать шесть тысяч триста семнадцать) рублей 73 копейки с дальнейшим их начислением, начиная с 09.11.2023, исходя из ключевой ставки Банка России действовавшей в соответствующие периоды по день фактической уплаты долга, в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины 24 595 (двадцать четыре тысячи пятьсот девяносто пять) рублей.  

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок в соответствии со статьями 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Кировской области.

Судья                                                                                                Прозорова Е.Ю.