АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

 

21 октября 2024 года

 

Дело № А33-31336/2023

Красноярск

 

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 07 октября 2024 года.

В полном объёме решение изготовлено 21 октября 2024 года.

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Смольниковой Е.Р., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «ВПТ – Нефтемаш» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации – 23.11.2011, адрес: 107078, 

<

...>, эт/каб. 1/76)

к обществу с ограниченной ответственностью «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации – 24.09.2002, адрес: 660016, 

<

...>)

о взыскании задолженности, процентов за пользование чужими денежными средствами,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне истца: временного управляющего общества с ограниченной ответственностью «ВПТ - Нефтемаш» ФИО1 (109044, г. Москва, а/я 32),

при участии в судебном заседании:

от истца посредством сервиса «Онлайн-заседания» информационной системы «Картотека арбитражных дел»: ФИО2 - представителя, действующего на основании доверенности от 26.12.2023,

от ответчика: ФИО3 - представителя, действующего на основании доверенности № 117 от 18.05.2021, ФИО4 – представителя, действующего на основании доверенности № 68 от 09.02.2024 (до 31.12.2025),

при ведении протокола судебного заседания секретарем Миллер И.А., 

 

установил:

общество с ограниченной ответственностью "ВПТ - Нефтемаш" (далее – истец, подрядчик) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Славнефть-Красноярскнефтегаз" (далее – ответчик, заказчик) о взыскании 83 114 085,96 руб. задолженности по договорам № В041121/0097Д, В041121/0098Д от 20.01.2021, 10 307 285,21 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.01.2022 по 31.10.2023, процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.11.2023 по дату фактической оплаты задолженности.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 15.11.2023 возбуждено производство по делу.

Определением от 17.05.2024 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне истца привлечен временный управляющий общества с ограниченной ответственностью «ВПТ - Нефтемаш» ФИО1.

Третье лицо, извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, явку представителей для участия в судебном заседании не обеспечило. Сведения о дате и месте судебного заседания размещены на сайте Арбитражного суда Красноярского края. В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проводится в отсутствие представителей третьего лица.

Истец требования поддержал в иске. Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

20.01.2021 между обществами «ВПТ – Нефтемаш» (подрядчиком) и «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (заказчиком) заключены договоры № В041121/0097Д и № В041121/0098Д, согласно пункту 2.1 которых по заданию заказчика подрядчик обязуется выполнить работы по бурению в соответствии с условиями настоящего договора, в объеме и в сроки, определенные в наряд-заказах и соответствующих заявках, а заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с разделом 4 настоящего договора. Форма наряд-заказа приведена в Приложении 1.1.

В пункте 1 договоров указано, что «мобилизация» означает работы по перебазировке буровой установки и бригадного хозяйства для начала выполнения работ по настоящему договору с их пунктов местонахождения до первого местоположения и (или) перевалочного пункта. Мобилизацией также считаются работы по перебазировке буровой установки и бригадного хозяйства;

а. наземным транспортом на расстояние, превышающее 400 км;

b. с использованием авиа, водного и(или) железнодорожного транспорта без учета расстояния;

с. на месторождение или с месторождения с сезонным доступом.

Мобилизация считается законченной после того, как последний груз оборудования будет доставлен на первое местоположение и (или) перевалочный пункт.

Пунктами 3.1 и 3.2 договоров предусмотрено, что работы по настоящему договору выполняются с использованием буровых установок. Спецификация буровой установки приведена в приложении 1.2 к настоящему договору. Место выполнения работ, на котором по настоящему договору подрядчиком будут выполняться работы, площадки и скважины - указываются в соответствующих наряд-заказах и/или заявках, направляемых в соответствии с настоящим договором.

Согласно пункту 4.1 договоров они вступают в силу с даты их подписания обеими сторонами и действуют до 31.08.2022, но в любом случае до полного выполнения сторонами своих обязательств, возникших до указанной даты, в том числе до полного исполнения обязательств по взаиморасчетам.

Срок выполнения работ для каждой буровой установки может устанавливаться отдельно (пункт 4.2 договоров).

Работы по мобилизации включают следующие мероприятия: подготовку, инспекцию, погрузочно-разгрузочные, транспортные и прочие работы, необходимые для перевозки буровой установки и бригадного хозяйства (включая персонал буровой бригады, спецтранспорт и иное имущество, необходимое для начала работ на буровой площадке) к указанному заказчиком местоположению или перевалочному пункту (п. 2.1.1 раздел 3 договоров подряда). Согласно пунктам 2.2.1 раздела 3 договоров буровая установка должна быть представлена полностью укомплектованной для выполнения работ в соответствии со спецификацией, указанной в договоре, а также быть пригодной для работы в климатических условиях места выполнения работ. В приложениях 1.2 к договору отражены технические требования (спецификация) для буровой установки.

Пунктом 2.2 раздела 4 договоров предусмотрено, что платежи по настоящему договору будут осуществляться в российских рублях банковским переводом на расчетный счет подрядчика. Заказчик оплачивает выполненные работы в течение 60 дней, но не ранее 45 дней со дня предъявления подрядчиком заказчику:

- акта о приемке выполненных работ, подписанного обеими сторонами;

- оригинала счета-фактуры (оригиналов счетов-фактур), выставленного (выставленных) в отношении выполненных работ (в случае наличия у подрядчика законодательно установленной обязанности по составлению счетов-фактур);

- справки о стоимости выполненных работ и затрат, подписанной обеими сторонами;

- подписанной шкалы оценки качества (подготовляемой подрядчиком и утверждаемой заказчиком).

При этом, необходимым условием оплаты является соответствие данных оригинала счета-фактуры данным первичных документов, подтверждающих приемку работ.

В пункте 4.1 раздела 4 договоров указано, что ставки в настоящем разделе 4, включая приложения к договору, включают вознаграждение, все затраты и накладные расходы подрядчика, возникающие в связи с работами, за исключением случаев, прямо предусмотренных в настоящем договоре. Работы по договору выполняются иждивением подрядчика (из его материалов, его силами и средствами), за исключением случаев, оговорённых в договоре, обеспечение которыми возложено на заказчика. Условия, оговоренные в соответствующих пунктах как обязательства заказчика, должны быть учтены подрядчиком при определении соответствующих ставок по договору и являются необходимым условием обеспечения надлежащего выполнения подрядчиком обязанностей по договору.

Согласно пункту 8.1.1 раздела 4 договоров ставки мобилизации – это единовременно выплачиваемая ставка, включающая все расходы по перебазировке персонала подрядчика, буровой установки и бригадного хозяйства для выполнения работ по настоящему договору из их пунктов местонахождения до первого местоположения.

В соответствии с пунктом 1.1. договоров заявление производит оплату выполненных работ на основании  ставок, указанных ниже и приведенных в Приложениях к настоящему договору. Договорами подряда предусмотрена ставка мобилизации (фиксированная ставка - п. 7.4а), которая указана в п. 1.1 таблицы 1 приложения 4.1. и составляют 23 087 246,10 руб. (без НДС) по каждой скважине, для бурения которой мобилизованы персонал, вспомогательное имущество и оборудование. Ставка мобилизации подлежит включению в первый акт о приемке выполненных работ.

В силу пунктов 1 и 2 приложения 2.5 к договорам подрядчик представляет подробный план мобилизации (в форме гистограммы и текста), в котором указывается порядок доставки буровой установки (буровых установок), оборудования, материалов и персонала подрядчика. Подрядчик выделяет все ключевые проблемы, которые необходимо решить для успешной мобилизации. Перед любым переездом буровой установки с одной площадки на другую подрядчик согласовывает с заказчиком подробный план переезда.

11.02.2021 между сторонами подписан наряд-заказ № 1 к договору № В041121/0098Д от 20.01.2021, согласно которому настоящий наряд-заказ № 1 вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до 01.06.2022, но в любом случае до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему наряд-заказу и заявкам, действующим на дату окончания действия договора, в том числе до полного исполнения обязательств по взаиморасчетам. Подрядчик приступает к выполнению работ по настоящему наряд-заказу с 11.02.2021 и выполняет их до 01.06.2022. При этом, выполнение работ по данному наряд-заказу продолжается до окончания бурения последней скважины. Подрядчик выполняет работы по настоящему наряд-заказу в следующем месте: кустовая площадка № 16 (скв.1609,1610), Куюмбинский лицензионный участок. Для начала выполнения работ по настоящему наряд-заказу переезд не требуется. Ориентировочный объем работ, подлежащий выполнению подрядчиком по настоящему наряд-заказу, указан в приложении 1 к настоящему наряд-заказу. Фактический объем работ может отличаться. В любом случае подрядчик выполняет работы по настоящему наряд-заказу с использованием нижеуказанной буровой установки ZJ-50 DBS,  заводской № 2007-063F. Подробная спецификация буровой установки указана в Приложении 2 к настоящему наряд-заказу. 01.03.2021 между сторонами подписан наряд-заказ № 1 к договору № В041121/0097Д от 20.01.2021, согласно которому настоящий наряд-заказ № 1 вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до 31.08.2022, но в любом случае до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему наряд-заказу и заявкам, действующим на дату окончания действия договора, в том числе до полного исполнения обязательств по взаиморасчетам. Подрядчик приступает к выполнению работ по настоящему наряд-заказу с 01.03.2021 и выполняет их до 31.08.2022. При этом, выполнение работ по данному наряд-заказу продолжается до окончания бурения последней скважины. Подрядчик выполняет работы по настоящему наряд-заказу в следующем месте: кустовая площадка № 21 (скв. 2107, 2108, 2109, 2110), Куюмбинский лицензионный участок. Для начала выполнения работ по настоящему наряд-заказу переезд не требуется. Ориентировочный объем работ, подлежащий выполнения подрядчиком по настоящему наряд-заказу, указан в Приложении 1 к настоящему наряд-заказу. Фактический объем работ может отличаться. В любом случае подрядчик выполняет подрядчик выполняет работы по настоящему наряд-заказу с использованием нижеуказанной буровой установки. ZJ-50 DBS, заводской          № 2007-082F. Подробная спецификация буровой установки указана в Приложении 2 к настоящему наряд-заказу.

01.03.2021 между сторонами подписан наряд-заказ № 3 к договору № В041121/0098Д от 20.01.2021, согласно которому настоящий наряд-заказ № 3 вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до 01.06.2022, но в любом случае до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему наряд-заказу и заявкам, действующим на дату окончания действия договора, в том числе до полного исполнения обязательств по взаиморасчетам. Подрядчик приступает к выполнению работ по настоящему наряд-заказу с 01.03.2021 и выполняет их до 01.06.2022. При этом, выполнение работ по данному наряд-заказу продолжается до окончания бурения последней скважины. Подрядчик выполняет работы по настоящему наряд-заказу в следующем месте: кустовая площадка № 114 (скв.11406,11407,11408), Куюмбинский лицензионный участок. Для начала выполнения работ по настоящему наряд-заказу переезд не требуется. Ориентировочный объем работ, подлежащий выполнения подрядчиком по настоящему наряд-заказу, указан в приложении 1 к настоящему наряд-заказу. Фактический объем работ может отличаться. В любом случае подрядчик выполняет работы по заявкам заказчика. Подрядчик выполняет работы по-настоящему наряд-заказу с использованием буровой установки: БУ ZJ-50 DBS, заводской № 2007-054F. Подробная спецификация буровой установки указана в приложении 2 к настоящему наряд-заказу.

10.09.2021 между сторонами подписан наряд-заказ № 5 к договору № В041121/0098Д от 20.01.2021, согласно которому настоящий наряд-заказ № 5 вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до 31.12.2021, но в любом случае до полного выполнения сторонами своих обязательств по-настоящему наряд-заказу и заявкам, действующим на дату окончания действия договора, в том числе до полного исполнения обязательств по взаиморасчетам. Подрядчик приступает к выполнению работ по-настоящему наряд-заказу с 10.09.2021 и выполняет их до 31.12.2021. При этом, выполнение работ по данному наряд-заказу продолжается до окончания бурения последней скважины. Подрядчик выполняет работы по-настоящему наряд-заказу в следующем месте: кустовая площадка № 16 (скв. 1612), Куюмбинский лицензионный участок. Для начала выполнения работ по настоящему наряд-заказу переезд не требуется. Ориентировочный объем работ, подлежащий выполнения подрядчиком по настоящему наряд-заказу, указан в приложении 1 к настоящему наряд-заказу. Фактический объем работ может отличаться. В любом случае подрядчик выполняет работы по заявкам заказчика. Подрядчик выполняет работы по-настоящему наряд-заказу с использованием буровой установки БУ ZJ-50 DBS, заводской №2007-063F. Подробная спецификация буровой установки указана в приложении 2 к настоящему наряд-заказу.

21.12.2021 между сторонами подписан наряд-заказ № 6 к договору № В041121/0098Д от 20.01.2021, согласно которому настоящий наряд-заказ № 6 вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до 31.05.2022, но в любом случае до полного выполнения сторонами своих обязательств по-настоящему наряд-заказу и заявкам, действующим на дату окончания действия договора, в том числе до полного исполнения обязательств по взаиморасчетам. Подрядчик приступает к выполнению работ по-настоящему наряд-заказу с 25.12.2021 и выполняет их до 31.05.2022. При этом, выполнение работ по данному наряд-заказу продолжается до окончания бурения последней скважины. Подрядчик выполняет работы по-настоящему наряд-заказу в следующем месте: кустовая площадка № 51 (скв. 5101), Куюмбинский лицензионный участок. Для начала выполнения работ по настоящему наряд-заказу переезд осуществляется с КП № 16 ФИО5. Ориентировочный объем работ, подлежащий выполнения подрядчиком по настоящему наряд-заказу, указан в приложении 1 к настоящему наряд-заказу. Фактический объем работ может отличаться. В любом случае подрядчик выполняет работы по заявкам заказчика. Подрядчик выполняет работы по-настоящему наряд-заказу с использованием буровой установки: БУ ZJ-50 DBS заводской № 2007-063F. Подробная спецификация буровой установки указана в приложении 2 к настоящему наряд-заказу.

Согласно договорам субаренды и аренды от 09.04.2021 № 0020, от 08.04.2021, № 0021 от 01.04.2021 № 84, 01.06.2021 № 156 обществу «ВПТ – Нефтемаш» переданы во временное владение и пользование от общества «Нова энергетические услуги» буровые установки ZJ-50DBS (заводской № 2007-082F),  ZJ-50DBS (заводской № 2007-075F) ZJ-50DBS (заводской № 2007-063F) ZJ-50DBS (заводской № 2007-054F) и буровое оборудование в комплекте.

13.04.2021 между обществами «ВПТ – Нефтемаш» и «Славнефть - Красноярскнефтегаз» подписан акт о вводе в эксплуатацию буровой установки ZJ-50DBS (заводской              № 2007-063F) на скважине № 1609, куст № 16, Куюмбинский Л/У, а также акт о начале работ и акт от 13.04.2021 о возобновлении работ по бурению скважины.

28.04.2021 между обществами «ВПТ – Нефтемаш» и «Славнефть - Красноярскнефтегаз» подписан акт о вводе в эксплуатацию буровой установки 3000 ЭУК-1М № 15110 на скважине № 1711, куст № 17, Куюмбинский Л/У, а также акт о начале работ по бурению на скважине.

11.05.2021 между обществами  «ВПТ – Нефтемаш» и «Славнефть - Красноярскнефтегаз» подписан акт о вводе в эксплуатацию буровой установки ZJ-50DBS, заводской                № 2007-082F на скважине № 2107, куст № 21, Куюмбинский Л/У, а также акт о начале работ по бурению на скважине.

25.09.2021 между обществами «ВПТ – Нефтемаш» и «Славнефть - Красноярскнефтегаз» подписан акт о вводе в эксплуатацию буровой установки ZJ-50DBS, заводской            № 2008-054F на скважине № 11406, куст № 114, Куюмбинский Л/У, а также акт о начале работ по бурению на скважине.

Сопроводительным письмом от 02.11.2021 № 11-3475 через систему электронного документооборота «Диадок» по договорам подряда, обществом «ВПТ – Нефтемаш» в адрес общества «Славнефть-Красноярскнефтегаз» направленны подписанные обществом «ВПТ – Нефтемаш» акты о приемке выполненных работ по формам КС-2 и КС-3 на общую сумму 69 261 738,30 руб. (без учета 20% НДС), в том числе:

- акты № СНК/11-1 от 01.11.2021 (куст № 16, скважина № 1609), справка о стоимости выполненных работ от 01.11.2021 на сумму 23 087 246,10 руб. (без учета 20% НДС), акт о мобилизации бурового подрядчика от 29.10.2021, а также счет-фактура от 01.11.2021 № 111/01 на сумму 23 087 246,10 руб. (без учета 20% НДС);

- акты № СНК/11-2 от 01.11.2021 (куст № 17, скважина № 1711), справка о стоимости выполненных работ от 01.11.2021 на сумму 23 087 246,10 руб. (без учета 20% НДС), акт о мобилизации бурового подрядчика от 29.10.2021, а также счет-фактура от 01.11.2021 № 111/02 на сумму 23 087 246,10 руб. (без учета 20% НДС);

- акты № СНК/11-3 от 01.11.2021 (куст № 21 скважина № 2107), справка о стоимости выполненных работ от 01.11.2021 на сумму 23 087 246,10 руб. (без учета 20% НДС), акт о мобилизации бурового подрядчика от 29.10.2021, а также счет-фактура от 01.11.2021 № 111/03 на сумму 23 087 246,10 руб. (без учета 20% НДС);

- акты № СНК/11-4 от 01.11.2021 (куст № 114 скважина № 11406), справка о стоимости выполненных работ от 01.11.2021 на сумму 23 087 246,10 руб. (без учета 20% НДС), акт о мобилизации бурового подрядчика от 29.10.2021, а также счет-фактура от 01.11.2021 № 111/04 на сумму 23 087 246,10 руб. (без учета 20% НДС)

Подписание актов и иных документов с помощью электронно-цифровой подписи в системе электронного документооборота (Диадок) предусмотрено сторонами в дополнительном соглашении от 21.04.2021 № 1 к договорам подряда.

Заказчик указанные акты не подписал, мотивированных возражений не заявил.

До даты обращения с исковым заявлением в суд стоимость работ по мобилизации 3-х буровых установок и вспомогательного оборудования в размере 83 114 085,96 руб.,  включая НДС, не оплачена.

Претензия от 07.06.2022 исх. № 06-87 с требованием оплаты задолженности, в том числе по вышеуказанным актам была отклонена ответчиком письмами от 13.12.2021           № 23124 и от 16.12.2021 № 1234 по мотиву неукомплектованности буровых установок согласно спецификациям.

Поскольку ответчик отказался производить истцу оплату задолженности, истец обратился с исковым заявлением в арбитражный суд с требованиями о взыскании 83 114 085,96 руб. задолженности по договорам № В041121/0097Д, В041121/0098Д от 20.01.2021 и процентов за пользование чужими денежными средствами.

Возражая против удовлетворения исковых требований, ответчик ссылается на следующие обстоятельства:

- работы по мобилизации буровых установок подрядчиком фактически не выполнялись;

- буровые установки на объект не перемещались и не доставлялись, поскольку буровые установки находились во временном владении и пользовании истца на основании договоров аренды с обществом «Нова энергетические услуги»;

- персонал в полной численности и оборудование в необходимом количестве отсутствовали;

- подробный план мобилизации не направлялся;

- отсутствуют документы, подтверждающие выполнение подрядчиком работ по мобилизации;

- подрядчик не представил первичные документы, предусмотренные договором, подтверждающие факт проведения работ по мобилизации;

- акт о мобилизации бурового подрядчика общества «ВПТ – Нефтемаш» подписан лицами, в отношении которых не представлено сведений о наличии соответствующих полномочий, равным образом не доказано, что поименованные лица являются работниками ответчика;

- не представлены доказательства, подтверждающие надлежащее направление письма от 02.11.2021 № 11-3275 в адрес ответчика (отсутствует отметка в системе Диадок или квитанция о направлении посредством Почты России).

Истец, возражая на доводы ответчика, указывает:

- работы по мобилизации бурового оборудования и бригадного хозяйства (персонал буровой бригады вместе со вспомогательным имуществом и оборудованием) подрядчиком были выполнены и сданы заказчику;

- письмо от 02.11.2021 № 11-3275 направлено ответчику через систему электронного документооборота «Диадок» по договорам подряда, подписанные истцом акты о приемке выполненных работ по формам КС-2 и КС-3. Указанные акты подписаны ответчиком через систему электронного документооборота «Диадок». Подписание актов и иных документов с помощью электронно-цифровой подписи в системе электронного документооборота «Диадок» предусмотрено сторонами в дополнительном соглашении от 21.04.2021          № 1 к договорам подряда. Замечаний и мотивированных возражений к направленным актам о приемке выполненных работ в части мобилизации оборудования и персонала со стороны заказчика не поступало;

- заказчик, подписав договоры, не оспорив его в части стоимости и этапности работ, в том числе, включающей в себя мобилизацию, согласился и с необходимостью мобилизации, и с её стоимостью;

- при согласовании условий договоров в части размера ставок по мобилизации было предусмотрено, что перемещения буровых установок из других регионов не будет, в наряд-заказах к договорам указано, что переезд для начала работ не требуется;

- ответчик был уведомлен и не спорил с тем, что буровые установки являются арендованным имуществом. В частности, письмом исх. №7468 от 19.04.2021 ответчик запросил расшифровку затрат, входящие в ставку «Мобилизация». В ответ на данное письмо истец направил письмо исх. № 04-1374 от 20.04.2021 с приложением расшифровки затрат, в которой отдельной строкой указано «Аренда буровой и оборудования»;

- доводы ответчика в части того, что буровые установки на объект не перемещались, не доставлялись, персонал в полной численности и оборудование в необходимом количестве отсутствовали, являются несостоятельными, так как данные недостатки не являлись существенными, и на ход выполнения буровых работ по обоим договорам никаким образом не влияли. Наличие несоответствий оборудования требованиям договоров и/или примененного права влечёт применение заказчиком санкций к подрядчику, что предусмотрено пунктом 2.3.4 договоров, но не основанием для неоплаты мобилизации;

- заказчик буровые работы не приостанавливал, результат выполнения работ принял и оплатил. Результатом буровых работ, выполненных истцом, является наличие скважин, которыми ответчик пользуется для добычи полезных ископаемых, тем самым извлекает прибыль. Соответственно, так как буровые работы истцом выполнены, то мобилизация, как первый этап работ, была проведена, ввиду чего подрядчик на оборудовании осуществлял бурильные работы. Без завершения мобилизации в полной комплектации к выполнению работ подрядчик не смог бы приступить.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

20.01.2021 между обществами «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (заказчиком) и «ВПТ-Нефтемаш» (подрядчиком) были заключены договоры подряда № В041121/0097Д и В041121/0098Д по бурению скважин заказчика (договор), правоотношения по которым регулируются главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно части 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. В соответствии с пунктом 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно пункту 2.1 договоров по заданию заказчика подрядчик обязуется выполнить работы по бурению в соответствии с условиями настоящего договора, в объеме и в сроки, определенные в наряд-заказах и соответствующих заявках, а заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с разделом 4 настоящего договора. Форма наряд-заказа приведена в Приложении 1.1. Помимо оплаты стоимости выполненных работ пунктом 8.1.1 раздела 4 договоров предусмотрена оплата ставки мобилизации, включающей все расходы по перебазировке персонала подрядчика, буровой установки и бригадного хозяйства для выполнения работ по настоящему договору из их пунктов местонахождения до первого местоположения. Ставка мобилизации является фиксированной  (п. 7.4 а договоров), указана в п. 1.1 таблицы 1 приложения 4.1. и составляет 23 087 246,10 руб. (без НДС) по каждой скважине, для бурения которой мобилизованы персонал, вспомогательное имущество и оборудование. Ставка мобилизации подлежит включению в первый акт о приемке выполненных работ.

В пункте 1 договоров подряда от 20.01.2021 № В041121/0097Д и В041121/0098Д указано, что «мобилизация» означает работы по перебазировке буровой установки и бригадного хозяйства для начала выполнения работ по настоящему договору с их пунктов местонахождения до первого местоположения и (или) перевалочного пункта. Мобилизацией также считаются работы по перебазировке буровой установки и бригадного хозяйства:

а. наземным транспортом на расстояние, превышающее 400 км;

b. с использованием авиа, водного и(или) железнодорожного транспорта без учета расстояния;

с. на месторождение или с месторождения с сезонным доступом.

Работы по мобилизации включают следующие мероприятия: подготовку, инспекцию, погрузочно-разгрузочные, транспортные и прочие работы, необходимые для перевозки буровой установки и бригадного хозяйства (включая персонал буровой бригады, спецтранспорт и иное имущество, необходимое для начала работ на буровой площадке) к указанному заказчиком местоположению или перевалочному пункту (п. 2.1.1 раздел 3 договоров подряда). Согласно пункту 8.1.1 раздела 4 договоров ставки мобилизации – это единовременно выплачиваемая ставка, включающая все расходы по перебазировке персонала подрядчика, буровой установки и бригадного хозяйства для выполнения работ по настоящему договору из их пунктов местонахождения до первого местоположения.

Истец утверждает, что им произведены мобилизационные работы, представляя:

- акты о вводе в эксплуатацию буровых установок на Куюмбинском Л/У: ZJ-50DBS заводской № 2007-063F на скважине № 1609, куст № 16; 3000 ЭУК-1М № 15110 на скважине № 1711. куст № 17; ZJ-50DBS, заводской № 2007-082F на скважине № 2107, куст            № 21; ZJ-50DBS заводской № 2008-054F на скважине № 11406, куст № 114;

- акты о начале работ по бурению на скважинах от 13.04.2021, от 11.05.2021, от 25.09.2021,

- акты о приемке выполненных работ по формам КС-2 и КС-3 на общую сумму 69 261 738,30 руб. (без учета 20% НДС), в том числе: акты № СНК/11-1 от 01.11.2021 (куст № 16, скважина № 1609), справка о стоимости выполненных работ от 01.11.2021 на сумму 23 087 246,10 руб. (без учета 20% НДС), акт о мобилизации бурового подрядчика от 29.10.2021, а также счет-фактура от 01.11.2021 № 111/01 на сумму 23 087 246,10 руб. (без учета 20% НДС); акты № СНК/11-2 от 01.11.2021 (куст № 17, скважина № 1711), справка о стоимости выполненных работ от 01.11.2021 на сумму 23 087 246,10 руб. (без учета 20% НДС), акт о мобилизации бурового подрядчика от 29.10.2021, а также счет-фактура от 01.11.2021 № 111/02 на сумму 23 087 246,10 руб. (без учета 20% НДС); акты № СНК/11-3 от 01.11.2021 (куст № 21 скважина № 2107), справка о стоимости выполненных работ от 01.11.2021 на сумму 23 087 246,10 руб. (без учета 20% НДС), акт о мобилизации бурового подрядчика от 29.10.2021, а также счет-фактура от 01.11.2021 № 111/03 на сумму 23 087 246,10 руб. (без учета 20% НДС); акты № СНК/11-4 от 01.11.2021 (куст № 114 скважина № 11406), справка о стоимости выполненных работ от 01.11.2021 на сумму 23 087 246,10 руб. (без учета 20% НДС), акт о мобилизации бурового подрядчика от 29.10.2021, а также счет-фактура от 01.11.2021 № 111/04 на сумму 23 087 246,10 руб. (без учета 20% НДС).

Ответчик полагает, что ставка мобилизации подрядчику оплате не подлежит, т.к. буровые установки истцом не перемещались, они были арендованы у общества «Нова энергетические услуги» по договорам от 09.04.2021 № 0020, от 08.04.2021, № 0021 от 01.04.2021 № 84, 01.06.2021 № 156.

Таким образом, разногласия сторон по оплате ставок мобилизации обусловлены толкованием условий договоров.

Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации, изложенным в пункте 43 постановления от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора» условия договора подлежат толкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 Гражданского Кодекса Российской Федерации, другими положениями Гражданского Кодекса Российской Федерации, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статьи 3, 422 ГК РФ). При толковании условий договора в силу абзаца первого статьи 431 Гражданского Кодекса Российской Федерации судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений (буквальное толкование). Такое значение определяется с учетом их общепринятого употребления любым участником гражданского оборота, действующим разумно и добросовестно (пункт 5 статьи 10, пункт 3 статьи 307 ГК РФ), если иное значение не следует из деловой практики сторон и иных обстоятельств дела. Условия договора подлежат толкованию таким образом, чтобы не позволить какой-либо стороне договора извлекать преимущество из ее незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). Толкование договора не должно приводить к такому пониманию условия договора, которое стороны с очевидностью не могли иметь в виду. Значение условия договора устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом (абзац первый статьи 431 ГК РФ). Условия договора толкуются и рассматриваются судом в их системной связи и с учетом того, что они являются согласованными частями одного договора (системное толкование).

Суд приходит к выводу, что условиями договоров понятие мобилизации сформулировано как комплекс действий, направленных на перевозку буровой установки и бригадного хозяйства, то есть на их перемещение в пространстве к указанному местоположению или перевалочному пункту. Следовательно, иные расходы подрядчика, не связанные причинно-следственной связью с перевозкой как перемещением в пространстве понятием мобилизации не охватываются и по фиксированной для мобилизации ставке не оплачиваются. При этом, сторонами конкретный перечень действий, раскрывающих понятие мобилизация, не зафиксирован. Поскольку буровые установки на объекты не перемещались и не доставлялись с учетом использования их истцом на основании договоров аренды с обществом «Нова энергетические услуги», обязательство ответчика по оплате ставки мобилизации не возникло.

В качестве доказательства выполнения работ по мобилизации истцом в материалы дела представлены: акты о вводе в эксплуатацию буровых установок; акты о готовности бурового оборудования к спуску, а также иные акты. Вместе с тем, вся указанная документация подтверждает лишь готовность буровой установки к эксплуатации, но не факт осуществления обществом «ВПТ – Нефтемаш» действий по мобилизации, то есть действий по перемещению указанной буровой установки в пространстве.

Относительно актов о мобилизации бурового подрядчика ООО «ВПТ – Нефтемаш» на кустовых площадках ФИО5 Арбитражный суд указывает, что представленные акты подписаны лицами, в отношении которых не представлено сведений о наличии соответствующих полномочий, равным образом не доказано, что поименованные лица являются работниками заказчика, в связи с чем, акты мобилизации общества «ВПТ – Нефтемаш» оцениваются судом как односторонние документы, недостаточные для вывода о мобилизации установок.

Кроме того, факт несоблюдения требований по мобилизации персонала, а также иных установленных требований дополнительно подтверждается в актах предписания (выявлено множество нарушений, в том числе, в части персонала).

Из пунктов 1,  2.2.1 раздела 3, пунктов 1 и 2 приложения 2.5, приложений 1.2 договоров следует, что ставка мобилизации подлежит оплате при условии полного укомплектования буровой установки, а также при наличии подробного плана мобилизации (в форме гистограммы и текста), с указанием порядка доставки буровой установки (буровых установок), оборудования, материалов и персонала подрядчика. Однако, истцом в материалы дела данных документов не представлено. Ответчик по форме приложения 1.2 договоров представил пояснения с отражением сведений о укомплектованности в полном объёме буровых установок, не опровергнутые истцом.

На основании вышеизложенных доводов суд отказывает во взыскании стоимости работ по мобилизации буровых установок в размере 83 114 085,96 руб. в полном объёме.

Поскольку судом отказано в удовлетворении требований взыскании оплаты мобилизации, задолженности на сумму 83 114 085,96 руб. также отклоняются требования о взыскании процентов по статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начисленных на указанные суммы.

Государственная пошлина по настоящему спору составляет 200 000 руб. Учитывая результат рассмотрения спора, в соответствии со статьёй 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы по оплате государственной пошлины чеком-ордером публичного акционерного общества «Сбербанк» от 16.10.2023в размере 200 000 руб. подлежат отнесению на истца.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ). По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявленных требований отказать.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

 

Судья

Е.Р. Смольникова