АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

 

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

МОТИВИРОВАННОЕ

Дело № А07-3901/2022

г. Уфа

20 мая 2022 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Кузнецова Д.П., рассмотрев в порядке упрощенного производства исковое заявление Открытого акционерного общества "Синтез-Каучук" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к Обществу с ограниченной ответственностью "Башремстроймаш" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 305 754 руб. 59 коп.

На рассмотрение Арбитражного суда Республики Башкортостан поступило исковое заявление Открытого акционерного общества "Синтез-Каучук" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к Обществу с ограниченной ответственностью "Башремстроймаш" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании неустойки за нарушение сроков окончания выполнения работ по договору подряда №СК-12/2020-952 от 21.09.2020г. за период с 01.10.2021 по 23.12.2021г. в размере 40 036 руб. 08 коп., неустойки за нарушение сроков окончания выполнения работ по договору подряда №СК-12/2021-1318 от 10.06.2021г. за период с 11.06.2021г. по 08.07.2021г. в размере 265 718 руб. 51 коп., расходов по оплате государственной пошлины в размере 9 115 руб.

Согласно ч. 5 ст. 228 АПК РФ, о принятии искового заявления, заявления к производству суд выносит определение, в котором указывает на рассмотрение дела в порядке упрощенного производства и устанавливает для представления доказательств и отзыва на исковое заявление, отзыва на заявление ответчиком или другим заинтересованным лицом в соответствии со ст. 131 настоящего Кодекса срок, который не может составлять менее чем пятнадцать дней со дня вынесения определения о принятии искового заявления, заявления к производству. Одновременно с указанным определением сторонам направляются данные, необходимые для идентификации сторон, в целях доступа к материалам дела в электронном виде. Определение, вынесенное арбитражным судом по результатам рассмотрения вопроса о принятии искового заявления, заявления, размещается на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее следующего дня после дня вынесения этого определения.

Как видно из материалов дела, исковое заявление по настоящему делу принято судом первой инстанции в порядке упрощенного производства определением от 16 февраля 2022 года, установлены сроки представления в материалы дела документов, в том числе отзыва на иск, в срок до 11.03.2022г.

Кроме того, суд также указал, что стороны вправе представить в арбитражный суд, рассматривающий дело, и направить друг другу дополнительно документы, содержащие объяснения по существу заявленных требований и возражений в обоснование своей позиции, в срок до 06.04.2022г., а также проинформировал участников процесса, что решение по настоящему спору, рассматриваемому по правилам упрощенного производства, будет принято судом с 07.04.2022 по 14.04.2022г.

Судом 12 апреля 2022 года путем подписания резолютивной части вынесено решение.

От Общества с ограниченной ответственностью "Башремстроймаш" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) поступила апелляционная жалоба на решение суда.

В соответствии с ч. 2 ст. 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления или со дня подачи апелляционной жалобы.

В связи с поступлением апелляционной жалобы, изготовлено мотивированное решение.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела, 21 сентября 2020 года между ОАО «Синтез-Каучук» (заказчик, истец) к ООО «Башремстроймаш» (подрядчик, ответчик) был заключен договор подряда № СК-12/2020-952 (далее по тексту - Договор 1). 

Согласно условиям Договора 1 подрядчик обязался выполнить собственными силами и своего материала работы по следующим локальносметным расчетам (ЛСР):

-ЛСР№55-6-20 «Замена труб конденсатора №11/12. Цех ИП-2-6» на сумму 603003,47 руб.;

-ЛСР№55-7-20 «Замена трубок теплообменника поз.21/3. Цех ИП-2-6» на сумму 376996,53 руб.

-ЛСР№ 55-1-21 «Замена трубок конденсатора поз. 11/12.Дополнительная смета к смете №55-6-20.Цех Ип-2-6» на сумму 16326,34 руб.

Общая стоимость работ по Договору составляет 996 326 руб. 34 коп., в том числе НДС (20%) в размере 166 054 руб. 39 коп.

Согласно п. 3 договора были установлены следующие сроки выполнения работ:

- Срок начала выполнения работ: 25.09.2020г;

- Срок окончания выполнения работ: 30.09.2021г.

Предоплата в размере 392 000 руб. была произведена 08.10.2020г. заказчиком.

Ответчик в установленные договором сроки работы выполнил частично, в том числе:

- по ЛСР№ 55-7-20 на сумму 376 913,62руб. с НДС;

- по ЛСР№ 55-6-20 на сумму 272 467,84руб. с НДС.

С нарушением установленных договором сроков ответчиком выполнены работы по ЛСР 55-6-20 на сумму 330275,40 руб. (дата окончания работ 14.12.2021 г.) и по ЛСР №55-1-21 на сумму 16326,35 руб. (дата окончания работ 23.12.2021 г.)

Согласно п. 6.9 договора 1 в случае нарушения срока начала или окончания выполнения работ по каждому ЛСР Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 5% от стоимости указанных работ за каждый случай нарушения сроков по письменному требованию Заказчика.

Если указанная просрочка составит более 10 дней, то начиная с 10-го дня подрядчик обязан уплатить заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ по соответствующему ЛСР за каждый день просрочки по письменному требованию заказчика.

На основании ст. 330 Гражданского кодекса РФ, п. 6.9 Договора 1 по состоянию на день исполнения обязательства ответчику начислена неустойка в сумме 38011,60 руб., исходя из следующего расчета:

1. По ЛСР№ 55-6-20 «Замена труб конденсатора №11/12. Цех ИП-2-6» на сумму 603003,47 руб.

Просрочка составляет с 01.10.2021 г. по 14.12.2021 г . - 75 дней.

Стоимость работ по невыполненным в срок ЛСР составляет 330535,63 руб.

Штраф за нарушение сроков окончания работ составляет: 330535,63 *5/100=16526,78 руб.

Пени по данному виду работы составляет: 330535,63*0.1%*(75-10)= 21484,82 руб.

Итого неустойка по ЛСР№ 55-6-20 составляет 16526,78+21484,82 = 38011,60 руб.

2. ЛСР №55-1-21 «Замена трубок конденсатора поз.11/12.Дополнительная смета к смете №55-6-20.Цех Ип-2-6» на сумму 16326,34 руб.

Просрочка составляет с 01.10.2021 г. по 23.12.2021 г. - 84 дня.

Стоимость работ по невыполненным в срок ЛСР составляет 16326,34 руб.

Штраф за нарушение сроков начала работ составляет: 16326,34 *5/100= 816,32 руб.

Пени по данному виду работы составляет: 16326,34 *0.1%*(84-10)= 1208,15 руб.

Итого неустойка по ЛСР№55-1-21 составляет 816,33 +1208,15 = 2024,48 руб.

3. Общая сумма неустойки за нарушение срока окончания работ составляет: 38011,60+2024,48 = 40036,08 руб.

10 июня 2021 года между ОАО «Синтез-Каучук» (заказчик) и ООО «Башремстроймаш» (подрядчик) был заключен договор подряда № СК-12/2021-1318 (далее по тексту - Договор 2). 

Согласно условиям договора 2 подрядчик обязался выполнить собственными силами и своего материала работы по следующим ЛСР:

-ЛСР№ 52-10-20 «Ремонт кровли здания Ж-23 (над актовым залом и кабинетом делопроизводителей). Цех И- в ОАО «Синтез-Каучук»» на сумму 488364,15 руб.;

-ЛСР№52-9-20 «Ремонт кровли здания корпуса №5 (район фонарей). Цех И-5в ОАО «Синтез-Каучук»» на сумму 2093104,25 руб.;

-ЛСР№47-8-18 «Ремонт кровли здания И-5/п корпуса №1. Цех И-5п» на сумму 547503,97 руб.;

-ЛСР№47-5-20 «Ремонт кровли здания И-5п отд. И-10. Цех И-5п» на сумму 99000,87 руб.;

-ЛСР № 47-7-20 «Ремонт кровли здания И-5П корпуса №2, Цех И-5П» на сумму 282026.76 руб.

Общая стоимость работ по Договору 2 составляет 3 510 000 руб. в том числе НДС (20%).

Согласно п. 3 договора 2 были установлены следующие сроки выполнения работ:

- Срок начала выполнения работ: с момента заключения договора (10.06.2021г.);

- Срок окончания выполнения работ - 30.09.2021 г.

Предоплата в размере 1 404 000 руб. была произведена 22.06.2021г., таким образом, заказчик выполнил взятые на себя обязательства.

Ответчиком несвоевременно выполнены работы по ЛСР№ 52-9-20,47-8-18,47-7-20 на общую сумму 2922634,98 руб.

Нарушение срока выполнения работ по договору подряда №СК-12/2021-1318 от 10.06.2021 г обусловлено несвоевременным началом выполнения работ по договору.

Ответчик фактически приступил к работам в цехе И-5П 09.07.2021 г., в цехе И-5В - 10.08.2021 г., о чем составлены соответствующие акты допуска для производства ремонтных работ.

Таким образом, подрядчиком нарушены начальные сроки проведения следующих работ:

- по ЛСР№ 52-9-20 «Ремонт кровли здания корпуса №5 (район фонарей). Цех И-5в ОАО «Синтез-Каучук» на сумму 2093104,25 руб.;

-по ЛСР№47-8-18 «Ремонт кровли здания И-5/п корпуса №1. Цех И-5п» на сумму 547503.97 руб.;

-по ЛСР № 47-7-20 «Ремонт кровли здания И-5П корпуса №2. Цех И-5П» на сумму 282026.76 руб.

Согласно п. 6.9 договора подряда № СК-12/2021-1318 в случае нарушения срока начала или окончания выполнения работ по каждому ЛСР Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 5% от стоимости указанных работ за каждый случай сроков нарушения по письменному требованию Заказчика.

Если указанная просрочка составит более 10 дней, то начиная с 10-го дня подрядчик обязан уплатить заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ по соответствующему ЛСР за каждый день просрочки по письменному требованию заказчика.

На основании ст. 330 Гражданского кодекса РФ, п. 6.9 договора подряда №СК12/2021-1318 за нарушения срока начала работ ответчику начислена неустойка в сумме 254027.98 руб., исходя из следующего расчета:

1. По ЛСР№ 52-9-20 «Ремонт кровли здания корпуса №5 (район фонарей). Цех И-5в ОАО «Синтез-Каучук»

Просрочка составляет с 11.06.2021 г. по 09.08.2021 г. - 60 дней.

Стоимость работ по невыполненным в срок ЛСР составляет 2093104,25 руб.

Штраф за нарушение сроков начала работ составляет: 2093104,25 *5/100= 104655,21 руб.

Пени по данному виду работы составляет: 2093104,25 *0.1%*(60-10)= 1047655,21

Итого неустойка по ЛСР№ 52-9-20 составляет 104655,21+104655,21 = 209310,42 руб.

2. По ЛСР№ 47-8-18 «Ремонт кровли здания И-5/п корпуса №1. Цех И-5п» и ЛСР №47-7-20 «Ремонт кровли здания И-5П корпуса №2. Цех И-5П»

Просрочка составляет с 11.06.2021 г. по 08.07.2021 г. - 28 дней.

Стоимость работ по невыполненным в срок ЛСР составляет 829530,73 руб.

Штраф за нарушение сроков начала работ составляет: 829530,73 *5/100= 41476,54 руб.

Пени по данному виду работы составляет: 829530,73*0.1%*(28-10)= 14931,55 руб.

Итого неустойка по ЛСР№ 47-8-18 и ЛСР № 47-7-20 составляет 41476,54 +14931,55= 56408,09 руб.

3. Общая сумма неустойки за нарушение начала работ составляет: 209310,42+56408,09 = 265718,51 руб.

Ответчику были направлены претензии № 307-юр от 14.10.2021 г. и № 377-юр от 13.12.2021 г., которые получены ответчиком, что подтверждается уведомлением о вручении почтового отправления и квитанцией почтового отправления, но ответчик добровольно требования, изложенные в претензиях, не исполнил.

Оценив представленные доказательства в их совокупности и выслушав доводы сторон в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В силу статей 64, 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

В соответствии со статьей 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия сторон. Стороны пользуются равными правами на заявление отводов и ходатайств, представление доказательств, участие в их исследовании, выступление в судебных прениях, представление арбитражному суду своих доводов и объяснений, осуществление иных процессуальных прав и обязанностей, предусмотренных названным кодексом.

В силу статей 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд на основе принципа состязательности с учетом представленных сторонами доказательств устанавливает значимые для дела обстоятельства. При этом каждая из сторон несёт риск процессуальных последствий непредоставления доказательств.

В соответствии со ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определённое действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определённого действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Проанализировав условия представленных договоров подряда № СК-12/2020-952 от 21 сентября 2020 года и № СК-12/2021-1318 от 10 июня 2021 года, суд приходит к выводу, что сторонами заключен договор подряда, следовательно, между сторонами возникли отношения, регулируемые главой 37 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Договоры подряда № СК-12/2020-952 от 21 сентября 2020 года и № СК-12/2021-1318 от 10 июня 2021 года, содержат все существенные условия договора подряда, по которым сторонами достигнуто соглашение, соответствует требованиям закона о форме и содержании, подписан сторонами, оснований полагать о незаключенности либо ничтожности договора у суда не имеется.

В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 1 статьи 706 Гражданского кодекса Российской Федерации, если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

В силу пункта 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Согласно статье 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Как предусмотрено пунктом 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно пункту 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком должны оформляться актом, подписанным обеими сторонами.

В соответствии со статьей 753 Гражданского кодекса Российской Федерации и разъяснениями, изложенными в пункте 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда" (далее - информационное письмо N 51) принятые заказчиком работы подлежат оплате. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Как следует из материалов дела, 21 сентября 2020 года между ОАО «Синтез-Каучук» (заказчик, истец) к ООО «Башремстроймаш» (подрядчик, ответчик) был заключен договор подряда № СК-12/2020-952 (далее по тексту - Договор 1). 

Согласно условиям Договора 1 подрядчик обязался выполнить собственными силами и своего материала работы по следующим локальносметным расчетам (ЛСР):

-ЛСР№55-6-20 «Замена труб конденсатора №11/12. Цех ИП-2-6» на сумму 603003,47 руб.;

-ЛСР№55-7-20 «Замена трубок теплообменника поз.21/3. Цех ИП-2-6» на сумму 376996,53 руб.

-ЛСР№ 55-1-21 «Замена трубок конденсатора поз. 11/12.Дополнительная смета к смете №55-6-20.Цех Ип-2-6» на сумму 16326,34 руб.

Общая стоимость работ по Договору составляет 996 326 руб. 34 коп., в том числе НДС (20%) в размере 166 054 руб. 39 коп.

Согласно п. 3 договора были установлены следующие сроки выполнения работ:

- Срок начала выполнения работ: 25.09.2020г;

- Срок окончания выполнения работ: 30.09.2021г.

Предоплата в размере 392 000 руб. была произведена 08.10.2020г. заказчиком.

Ответчик в установленные договором сроки работы выполнил частично, в том числе:

- по ЛСР№ 55-7-20 на сумму 376 913,62руб. с НДС;

- по ЛСР№ 55-6-20 на сумму 272 467,84руб. с НДС.

С нарушением установленных договором сроков ответчиком выполнены работы по ЛСР 55-6-20 на сумму 330275,40 руб. (дата окончания работ 14.12.2021 г.) и по ЛСР №55-1-21 на сумму 16326,35 руб. (дата окончания работ 23.12.2021 г.)

Согласно п. 6.9 договора 1 в случае нарушения срока начала или окончания выполнения работ по каждому ЛСР Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 5% от стоимости указанных работ за каждый случай нарушения сроков по письменному требованию Заказчика.

Если указанная просрочка составит более 10 дней, то начиная с 10-го дня подрядчик обязан уплатить заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ по соответствующему ЛСР за каждый день просрочки по письменному требованию заказчика.

На основании ст. 330 Гражданского кодекса РФ, п. 6.9 Договора 1 по состоянию на день исполнения обязательства ответчику начислена неустойка в сумме 38011,60 руб., исходя из следующего расчета:

1. По ЛСР№ 55-6-20 «Замена труб конденсатора №11/12. Цех ИП-2-6» на сумму 603003,47 руб.

Просрочка составляет с 01.10.2021 г. по 14.12.2021 г . - 75 дней.

Стоимость работ по невыполненным в срок ЛСР составляет 330535,63 руб.

Штраф за нарушение сроков окончания работ составляет: 330535,63 *5/100=16526,78 руб.

Пени по данному виду работы составляет: 330535,63*0.1%*(75-10)= 21484,82 руб.

Итого неустойка по ЛСР№ 55-6-20 составляет 16526,78+21484,82 = 38011,60 руб.

2. ЛСР №55-1-21 «Замена трубок конденсатора поз.11/12.Дополнительная смета к смете №55-6-20.Цех Ип-2-6» на сумму 16326,34 руб.

Просрочка составляет с 01.10.2021 г. по 23.12.2021 г. - 84 дня.

Стоимость работ по невыполненным в срок ЛСР составляет 16326,34 руб.

Штраф за нарушение сроков начала работ составляет: 16326,34 *5/100= 816,32 руб.

Пени по данному виду работы составляет: 16326,34 *0.1%*(84-10)= 1208,15 руб.

Итого неустойка по ЛСР№55-1-21 составляет 816,33 +1208,15 = 2024,48 руб.

3. Общая сумма неустойки за нарушение срока окончания работ составляет: 38011,60+2024,48 = 40036,08 руб.

10 июня 2021 года между ОАО «Синтез-Каучук» (заказчик) и ООО «Башремстроймаш» (подрядчик) был заключен договор подряда № СК-12/2021-1318 (далее по тексту - Договор 2). 

Согласно условиям договора 2 подрядчик обязался выполнить собственными силами и своего материала работы по следующим ЛСР:

-ЛСР№ 52-10-20 «Ремонт кровли здания Ж-23 (над актовым залом и кабинетом делопроизводителей). Цех И- в ОАО «Синтез-Каучук»» на сумму 488364,15 руб.;

-ЛСР№52-9-20 «Ремонт кровли здания корпуса №5 (район фонарей). Цех И-5в ОАО «Синтез-Каучук»» на сумму 2093104,25 руб.;

-ЛСР№47-8-18 «Ремонт кровли здания И-5/п корпуса №1. Цех И-5п» на сумму 547503,97 руб.;

-ЛСР№47-5-20 «Ремонт кровли здания И-5п отд. И-10. Цех И-5п» на сумму 99000,87 руб.;

-ЛСР № 47-7-20 «Ремонт кровли здания И-5П корпуса №2, Цех И-5П» на сумму 282026.76 руб.

Общая стоимость работ по Договору 2 составляет 3 510 000 руб. в том числе НДС (20%).

Согласно п. 3 договора 2 были установлены следующие сроки выполнения работ:

- Срок начала выполнения работ: с момента заключения договора (10.06.2021г.);

- Срок окончания выполнения работ - 30.09.2021 г.

Предоплата в размере 1 404 000 руб. была произведена 22.06.2021г., таким образом, заказчик выполнил взятые на себя обязательства.

Ответчиком несвоевременно выполнены работы по ЛСР№ 52-9-20,47-8-18,47-7-20 на общую сумму 2922634,98 руб.

Нарушение срока выполнения работ по договору подряда №СК-12/2021-1318 от 10.06.2021 г обусловлено несвоевременным началом выполнения работ по договору.

Ответчик фактически приступил к работам в цехе И-5П 09.07.2021 г., в цехе И-5В - 10.08.2021 г., о чем составлены соответствующие акты допуска для производства ремонтных работ.

Таким образом, подрядчиком нарушены начальные сроки проведения следующих работ:

- по ЛСР№ 52-9-20 «Ремонт кровли здания корпуса №5 (район фонарей). Цех И-5в ОАО «Синтез-Каучук» на сумму 2093104,25 руб.;

-по ЛСР№47-8-18 «Ремонт кровли здания И-5/п корпуса №1. Цех И-5п» на сумму 547503.97 руб.;

-по ЛСР № 47-7-20 «Ремонт кровли здания И-5П корпуса №2. Цех И-5П» на сумму 282026.76 руб.

Согласно п. 6.9 договора подряда № СК-12/2021-1318 в случае нарушения срока начала или окончания выполнения работ по каждому ЛСР Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 5% от стоимости указанных работ за каждый случай сроков нарушения по письменному требованию Заказчика.

Если указанная просрочка составит более 10 дней, то начиная с 10-го дня подрядчик обязан уплатить заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ по соответствующему ЛСР за каждый день просрочки по письменному требованию заказчика.

На основании ст. 330 Гражданского кодекса РФ, п. 6.9 договора подряда №СК12/2021-1318 за нарушения срока начала работ ответчику начислена неустойка в сумме 254027.98 руб., исходя из следующего расчета:

1. По ЛСР№ 52-9-20 «Ремонт кровли здания корпуса №5 (район фонарей). Цех И-5в ОАО «Синтез-Каучук»

Просрочка составляет с 11.06.2021 г. по 09.08.2021 г. - 60 дней.

Стоимость работ по невыполненным в срок ЛСР составляет 2093104,25 руб.

Штраф за нарушение сроков начала работ составляет: 2093104,25 *5/100= 104655,21 руб.

Пени по данному виду работы составляет: 2093104,25 *0.1%*(60-10)= 1047655,21

Итого неустойка по ЛСР№ 52-9-20 составляет 104655,21+104655,21 = 209310,42 руб.

2. По ЛСР№ 47-8-18 «Ремонт кровли здания И-5/п корпуса №1. Цех И-5п» и ЛСР №47-7-20 «Ремонт кровли здания И-5П корпуса №2. Цех И-5П»

Просрочка составляет с 11.06.2021 г. по 08.07.2021 г. - 28 дней.

Стоимость работ по невыполненным в срок ЛСР составляет 829530,73 руб.

Штраф за нарушение сроков начала работ составляет: 829530,73 *5/100= 41476,54 руб.

Пени по данному виду работы составляет: 829530,73*0.1%*(28-10)= 14931,55 руб.

Итого неустойка по ЛСР№ 47-8-18 и ЛСР № 47-7-20 составляет 41476,54 +14931,55= 56408,09 руб.

3. Общая сумма неустойки за нарушение начала работ составляет: 209310,42+56408,09 = 265718,51 руб.

Истец просит взыскать с ответчика неустойку за нарушение сроков окончания выполнения работ по договору подряда №СК-12/2020-952 от 21.09.2020г. за период с 01.10.2021 по 23.12.2021г. в размере 40 036 руб. 08 коп., неустойку за нарушение сроков окончания выполнения работ по договору подряда №СК-12/2021-1318 от 10.06.2021г. за период с 11.06.2021г. по 08.07.2021г. в размере 265 718 руб. 51 коп.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с пунктом 60 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности при просрочке исполнения, законом или договором может быть предусмотрена обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму (неустойку), размер которой может быть установлен в твердой сумме - штраф или в виде периодически начисляемого платежа - пени (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Лицо, нарушившее обязательство, несет ответственность установленную законом или договором (статья 401 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Расчет неустойки, представленный истцом, проверен судом, признан арифметически верным, контррасчет ответчиком не представлен, сумма финансовой санкции документарно не оспорена (статьи 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказывать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Согласно пунктам 69, 71, 73, 75 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (пункт 1 статьи 333 ГК РФ).

Оснований для снижения суммы пени в порядке статьи 333 ГК РФ суд не усмотрел с учетом отсутствия в материалах дела как заявления ответчика о ее несоразмерности последствиям нарушения обязательства, так и доказательств такой несоразмерности (пункты 71, 73 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств").

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что требования истца о взыскании неустойки за нарушение сроков окончания выполнения работ по договору подряда №СК-12/2020-952 от 21.09.2020г. за период с 01.10.2021 по 23.12.2021г. в размере 40 036 руб. 08 коп., неустойки за нарушение сроков окончания выполнения работ по договору подряда №СК-12/2021-1318 от 10.06.2021г. за период с 11.06.2021г. по 08.07.2021г. в размере 265 718 руб. 51 коп., обоснованны и подлежат удовлетворению. 

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на ответчика в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст. ст. 110, 167, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Открытого акционерного общества "Синтез-Каучук" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Башремстроймаш" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Открытого акционерного общества "Синтез-Каучук" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку за нарушение сроков окончания выполнения работ по договору подряда №СК-12/2020-952 от 21.09.2020г. за период с 01.10.2021 по 23.12.2021г. в размере 40 036 руб. 08 коп., неустойку за нарушение сроков окончания выполнения работ по договору подряда №СК-12/2021-1318 от 10.06.2021г. за период с 11.06.2021г. по 08.07.2021г. в размере 265 718 руб. 51 коп., расходы по оплате государственной пошлины в размере 9 115 руб.  

Решение подлежит немедленному исполнению.

Исполнительный лист выдать по заявлению взыскателя.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

По заявлению лица, участвующего в деле, может быть составлено мотивированное решение. Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления.

Решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае составления мотивированного решения арбитражного суда такое решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия через Арбитражный суд Республики Башкортостан, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации решение суда первой инстанции, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть обжалованы в арбитражный суд кассационной инстанции по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 288.2 настоящего Кодекса.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить на Интернет-сайте www.kad.arbitr.ru.

 

Судья                            Д.П. Кузнецов