1189/2018-81257(1) 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 06 апреля 2018 года 

по делу А33-5374/2018 Красноярск 

06 апреля 2018 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить. 

Внести изменения в контракт от 11.07.2017 № 137-ЕП/44-2017, заключенный между  Федеральным государственным унитарным предприятием "Главное промышленно- строительное управление" Федеральной службы исполнения наказаний, г. Красноярск и  государственным средним профессиональным образовательным учреждением  "Дивногорское училище олимпийского резерва", г. Дивногорск), а именно: изложить в  следующей редакции:  

 пункт 3.1. государственного контракта от 11.07.2017 № 137-ЕП/44-2017: «Срок  завершения работ: 01.08.2018 года»;  

пункт 14.13 государственного контракта от 11.07.2017 № 137-ЕП/44-2017: «Контракт  вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31.08.2018 года, либо до  расторжения контракта. Окончание срока действия контракта не освобождает Стороны от  исполнения своих обязательств по контракту».   

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд.  

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд  Красноярского края.  

Судья С.А. Красовская