Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

04. 07. 2019 года.                                                Дело № А40-25527/19-43-226

Резолютивная часть решения объявлена 27. 06. 2019 года.

Решение изготовлено в полном объеме 04. 07. 2019 года.

Судья Арбитражного суда г. Москвы Романов О.В., единолично,

протокол судебного заседания вёл секретарь судебного заседания Фёдоров А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

ООО " Элвекон " (ОГРН 

<

***>) к ООО " Ника " (ОГРН 

<

***>)

о взыскании 851 612 руб. 49 коп. - долга,

с участием представителей: от истца – ФИО1, по доверенности № 4 от 05.02.2019 г.; от ответчика – не явился.

Изучив имеющиеся в деле документы, заслушав представителя, арбитражный суд

У  С  Т  А  Н  О  В  И  Л  :

Иск заявлен о взыскании 851 612 руб. 49 коп. - долга, на основании статей 309, 310, 506, 711, 740 ГК РФ.

Истец направил в судебное заседание представителя, который поддержал заявленный иск, повторив доводы, изложенные в исковом заявлении, представил истребованные судом документы, предъявил подлинники документов, имеющихся в материалах дела в виде копий; каких-либо ходатайств не заявил.

Ответчик не направил представителя в судебное заседание, не представил отзыв на исковое заявление, истребованные судом документы, опровергающие иск не предъявил, расчет истца не оспорил; о времени и месте судебного заседания извещен в установленном порядке в соответствии со статьями 121-124 АПК РФ; каких-либо ходатайств не заявил.

Дело рассмотрено в соответствии с порядком предусмотренным ст. 156 АПК РФ, по имеющимся в деле документам, представленным истцом, в отсутствии отзыва и представителя ответчика.

Суд, с учетом изложенных истцом и ответчиком обстоятельств и доводов, в соответствии с имеющимися в материалах дела документами, пришел к следующим выводам и считает установленными следующие обстоятельства:

На основании Договора подряда № 01-05-17 от 30.05.2017 г., заключенного между ООО « Элвекон » (Подрядчик), и ООО «Ника» (Заказчик), Подрядчиком были полностью выполнены электромонтажные работы и работы по монтажу слаботочных систем в сборно-разборных рекламных конструкциях для продвижения бренда «BUD» (BUD BEER GARDEN) в четырех городах: Санкт-Петербург, Сочи, Москва, Казань.

Согласно п. 1.1 Договора «Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на свой риск собственными и привлеченными силами и средствами выполнить электромонтажные работы и работы по монтажу слаботочных систем с закупкой расходных материалов в возводимых Заказчиком рекламных конструкциях, в четырех различных городах (Санкт-Петербург, Сочи, Москва, Казань) и подключить объект к представляемым электрическим сетям и местным интернет-провайдерам.

Пунктом 2.1 общая стоимость работ по настоящему Договору и материалов определена сметными расчетами, а именно Приложением №1 - расчет стоимости электромонтажных работ и материалов, Приложением №2 -стоимости работ по монтажу слаботочных сетей и материалов, которая составляет 2 532 917 рублей 06 копеек, включая НДС 18% - 386 377 рублей 18 копеек.

В соответствии с п. 7.1. Договора в течение 2(двух) банковских дней с момента подписания настоящего Договора Заказчик производит авансовый платеж в размере 100 % стоимости материалов и командировочных расходов.

Со стороны Заказчика (ООО «Ника») был произведен авансовый платеж Подрядчику (ООО « Элвекон») на общую сумму 1 681 304 рубля 56 копеек (подтверждением являются платежные поручения №1566 от 06.06.2017 на сумму 861 782 руб. 77 коп., №1567 от 06.06.2017 г. на сумму 315 130 руб. 52 коп., №1516 от 02.06.2017 г. на сумму 369 335 руб. 47 коп., №1517 от 02.06.2017 г. на сумму 135 055 руб. 80 коп.)

22.06.2017 г. ООО «Элвекон» в обусловленные Договором сроки свои обязательства по Договору выполнил полностью, в связи с чем были составлены акты №1, 2, 3, 4 о приемке выполненных работ по форме № КС- 2 на электромонтажные работы в сборно-разборных рекламных конструкциях для продвижения бренда «BUD» (BUD BEER GARDEN), а также акты №1,2,3,4 о приемке выполненных работ по форме № КС- 2 на монтаж слаботочных систем(интернет и TV) в сборно-разборных рекламных конструкциях для продвижения бренда «BUD» (BUD BEER GARDEN). Кроме того, были составлены справки по форме КС-3, где была указана стоимость фактически выполненных работ с учетом удержания авансового платежа и указанием суммы долга, подлежащей оплате, а именно в размере 851 612 рублей 49 копеек, которые в тот же день были предоставлены по фактическому адресу ООО «Ника». К указанным документам Подрядчик, приложил счет -фактуры на оплату выполненных работ, в котором также указана сумма, подлежащая оплате.

Однако,ООО «Ника» подписать выполненные Подрядчиком в срок работы по акты о приемке выполненных работ по форме № КС- 2 и справки по форме КС-3 необоснованно отказалось, о чем сделана отметка в каждом акте о приемке выполненных работ. Письменное уведомление счета-фактуры о сумме подлежащей оплате по Договору №01-05-17 ООО «Ника» проигнорировало.

В результате, по Договору № 01-05-17 ООО «Ника» были перечислены денежные средства на счет ООО «Элвекон», состоящие из авансового платежа в размере 1 681  304 рубля 56 копеек.

Со своей стороны, ООО «Элвекон» своевременно и в полном объеме оплатил сумму налога по счету-фактуре НДС 18% в размере 386 377 рублей 18 коп от общей стоимости Договора (что подтверждается счетом-фактурой № от 22.06.2017 г). При сдаче налоговой декларации по НДС расхождений с этим контрагентом не обнаружено, так как Заказчик (ООО «Ника») в своей налоговой декларации вычел НДС с полной суммы Договора, что также подтверждает, что работу Заказчик признал выполненной.

19 сентября 2018 г., ООО «Элвекон», направил в адрес ответчика ООО «Ника» претензию, где было указано повторное требование о подписании актов о приемке выполненных работ в сборно-разборных рекламных конструкциях для продвижения бренда «BUD» (BUD BEER GARDEN) в четырех городах: Санкт-Петербург, Сочи, Москва, Казань. 

В силу статей 720 (приемка заказчиком работы, выполненной подрядчиком) и 753 (сдача и приемка работ) Гражданского кодекса РФ явка на объект для приемки работ является обязанностью Заказчика, получившего от Подрядчика уведомление об окончании работ и акты о выполненных работах и их стоимости.

Согласно п. 6.2 настоящего Договора Заказчик после получения акта по форме № КС-2 и Справки по форме № КС-3 в течение 5(пяти) рабочих дней обязуется рассмотреть и принять результат выполненных работ, оформив представленные Подрядчиком документы, либо в этот же срок направить Подрядчику в письменном виде мотивированный отказ от приемки выполненных работ с указанием перечня конкретных недостатков, дефектов и недоделок, сроков их устранения или переоформления документов о результатах выполненных работ. В случае отсутствия в течение 5 (пяти) рабочих дней в письменном виде мотивированного отказа от приемки выполненных работ с указанием перечня конкретных недостатков, дефектов и недоделок, сроков их устранения или переоформления документов о результатах выполненных работ - работы считаются принятыми.

В связи с этим, при отсутствии своевременного письменного ответа (мотивированного отказа) от Заказчика, в течение установленного Договором времени, работы считаются принятыми Заказчиком в том объеме, в котором ООО «Элвекон» как Подрядчик указал в приемочных актах.

В соответствии с п. 4 ст. 753 Гражданского кодекса РФ, односторонний акт сдачи-приемки работ является действительным и подлежит оплате.

Согласно ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно п.1 ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

Требование истца о взыскании долга в сумме 851 612 руб. 49 коп. - законное, обоснованное, соответствует условиям договора, заключенного сторонами, подтверждено, имеющимися в деле документами, представленными истцом, не оспорено и не опровергнуто ответчиком и подлежит удовлетворению.

Расходы по уплате госпошлины относятся на ответчика, в соответствии со статьями 110, 112 АПК РФ. 

В соответствии с изложенным, на основании статей 8, 9, 11, 12, 153, 154, 161, 307-310, 314, 328, 401, 420-424, 431-434, 702, 708, 709, 711, 720 ГК РФ, руководствуясь статьями 41, 65, 66, 71, 75, 81, 110, 112, 121-124, 155, 156, 162, 166-171, 176, 177, 180-182, 318, 319 АПК РФ, арбитражный суд

Р  Е  Ш  И  Л  :

Взыскать с ООО " Ника " (ОГРН 

<

***>) в пользу ООО " Элвекон " (ОГРН 

<

***>) 851 612 руб. 49 коп. - долга и расходы по уплате госпошлины в сумме 20 032 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия.

 

Судья                                                           О.В. Романов