121/2018-109179(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А29-7945/2018

04 декабря 2018 года

г. Сыктывкар

 

Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Суслова М.О.,  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Густовым А.В.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>)  

к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  

об обязании устранить недостатки работ и возмещении вреда, 

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 171, 176, 180-181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить. 

2. Обязать индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в течение  одного месяца с момента вступления решения в законную силу устранить  недостатки работ по ремонту кровли пристройки к магазину, находящемуся по  адресу: 

<

...>, выполненных  по договору подряда от 01 октября 2017 года, в том числе:  

- обеспечить по всей площади кровли герметичность продольных и  поперечных стыков между листами настила, а также между фартуками и настилом;  

- оборудовать фартук и обеспечить герметизацию между кирпичной стеной  жилого здания и кровлей на участке, примыкающем к парапету магазина;  

- обустроить фартук высотой не менее 150 мм. на участке примыкания  кровли к торцевой стене жилого здания, выполнив соединение листов фартука  фальцем, а также их герметизацию;  

- обустроить фартук высотой не менее 150 мм. на узле прохода  вентиляционной трубы через кровлю, выполнив соединение листов фартука  фальцем, а также их герметизацию;  

- выполнить вынос карниза от плоскости стен не менее 600 мм.;  - обустроить «гребенки» между фасонными элементами кровли;  

- устранить механические повреждения кровельных листов в виде сквозных  отверстий;  

- устранить повреждения в торце крыши, закрепив и установив доски в  нижней подшивке карниза и фронтона;  

- устранить последствия протечек воды с кровли в помещениях пристройки к  магазину, находящемуся по адресу: 

<

...>, путем безвозмездного исправления повреждений  потолка и внутренней отделки стен в помещениях № 1 (торговый зал, площадью  91,4 кв.м.), № 10 (склад, общей площадью 39,4 кв.м.), № 11 (склад, обшей площадью  13,1 кв. м.), № 12 (торговый зал, общей площадью 23,5 кв.м.).  

3. Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу  индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>) 6 000 руб. судебных расходов по оплате государственной  пошлины.  

4. Исполнительный лист выдать после вступления решения суда в законную  силу.  

5. Разъяснить, что решение суда может быть обжаловано в апелляционном  порядке во Второй арбитражный апелляционный суд (г.Киров) с подачей жалобы  через Арбитражный суд Республики Коми в месячный срок со дня изготовления в  полном объеме.  

Судья М.О. Суслов