Арбитражный суд Московской области   107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  

http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А41-8613/23

22 мая 2023 года

г.Москва

 Резолютивная часть объявлена 16 мая 2023 года. Полный текст решения изготовлен 22 мая 2023 года. 

Судья Арбитражного суда Московской области Р.С. Солдатов ,  при ведении протокола помощником судьи Т.В. Забелиной  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-8613/23  по исковому заявлению  

ООО "АПЕКС ГРУПП" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

к АО "ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ МОСЭНЕРГО" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) о взыскании задолженности в размере 2 570 394, 00 руб., расходов по  оплате госпошлины в размере 35 852, 00 руб.  

При участии в судебном заседании - согласно протоколу.  

УСТАНОВИЛ:

ООО "АПЕКС ГРУПП" обратилось в Арбитражный суд Московской области с  исковым заявлением к АО "ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ МОСЭНЕРГО" о  взыскании задолженности в размере 2 570 394, 00 руб., расходов по оплате госпошлины в  размере 35 852, 00 руб.  

В судебном заседании представитель ответчика исковые требования не признал. 

Дело рассмотрено в соответствии со ст.ст. 121-124, 153, 156 Арбитражного  процессуального кодекса РФ (далее также АПК РФ) в отсутствие представителя истца,  извещенного надлежащим образом о месте и времени рассмотрения дела, что  подтверждается информацией официального сайта «Почта России» - http://почта- россии.рф/ - отслеживание почтовых отправлений, в том числе публично путем  размещения информации на официальном сайте ВАС РФ http://kad.arbitr.ru/.  

Исследовав материалы дела и представленные доказательства, суд установил  следующее.  

Между АО «ТЭК Мосэнерго» (далее - Ответчик, Генподрядчик) и ООО «Апекс  Групп» (далее - Истец, Субподрядчик), в рамках выполнения работ по строительству  Грозненской 1ЭС и выполнения работ основного периода строительства объекта «Амурская  ТЭС. Обеспечение нужд Амурского ГПЗ» во исполнение Договоров подряда № ОП-ГР/И2015-от 19.11.2015 г., № АТЭС-3/2017ОП от 10.08.2017 г. заключенных между АО «ТЭК  Мосэнерго» (Генподрядчик) и ООО «ГЭХ Инжиниринг» (Заказчик) были заключены  следующие Договоры субподряда: № 13/ГРТ/19-1507 от 03.06.2019 г.; № 16/АМР/ОРУ/1834 от 19.03,2018г. (далее - Договоры).  

Работы по указанным Договорам были выполнены Субподрядчиком в полном  объеме. Акты о приемке выполненных работ (по формам КС-2, КС-3) и Акты  

окончательной приемки выполненных работ (по форме Приложения № 8 к Договорам)  подписаны Сторонами без замечаний.  

По Договору Субподряда № 13/ГРТ/19-1507 от 03.06.2019 г. работы были  выполнены на общую сумму 1 959 821 руб. 06 коп., что подтверждается Актом  окончательной приемки выполненных работ от 29 июля 2019 г., Актом окончательной  приемки выполненных работ от 25 сентября 2019 г. и Актами о приемке выполненных  работ (по форме КС-2).  

По Договору субподряда № № 16/АМР/ОРУ/18-34 от 19.03.2018 г. работы были  выполнены на общую сумму 49 448 059 (сорок девять миллионов четыреста сорок восемь  тысяч пятьдесят девять) рублей 20 копеек, что подтверждается Актом окончательной  приемки выполненных работ от 30 ноября 2019 г.(подписан сторонами 04.09.2020г.) и  Актами о приемке выполненных работ (по форме КС-2).  

По условиям п.8.4. и п.8.5. Договоров, при оплате выполненных Работ,  Генподрядчик удерживает в счет Гарантийной суммы денежные средства из сумм  соответствующих платежей, в размере 5 % от суммы платежей за выполненные Работы.  Гарантийная сумма представляет собой согласованный Сторонами способ обеспечения  надлежащего исполнения обязательств Субподрядчика по настоящему Договору, не  является удерживаемой Генподрядчиком суммой и Субподрядчик получает право на  выплату Гарантийной суммы в полном объеме после истечения Гарантийного срока и при  условии отсутствия претензий со стороны Генподрядчика (и/или Заказчика), в связи с чем  на Гарантийную сумму не начисляются проценты, минус любые иные суммы, которые  Субподрядчик должен уплатить Генподрядчику в соответствии с условиями настоящего  Договора, не уплаченные к дате оплаты Гарантийной суммы. Выплата Субподрядчику  гарантийной суммы осуществляется в порядке, предусмотренном п. 8.6. Договоров.  

С учетом способа формирования и стоимости выполненных работ по Договорам  общая сумм гарантийных удержаний по Договорам составила 2 570 394 рубля 00 копеек.  

Согласно п.8.6. Договоров 5% общей цены, указанной в п.3.1. Договоров,  являющейся Гарантийной суммой, будут оплачены Субподрядчику после истечения  Гарантийного срока на Работы, в течение 30 рабочих дней с даты предоставления.  Субподрядчиком соответствующего счета, выставленного после истечения Гарантийного  срока.  

Таким образом, гарантийная сумма является частью стоимости выполненных  Субподрядчиком работ и подлежит выплате в специальные сроки, которые установлены  пунктом п.8.6. Договоров.  

По условиям п.10.2 Договоров гарантийный срок на результат выполненных Работ  начинается с даты подписания Сторонами Акта окончательной приемки выполненных  работ по форме Приложения № 8 к Договорам и истекает по истечении 24 месяцев.  

В связи с истечением 25.09.2021 г. по Договору № 13/ГРТ/19-1507 от 03.Об.2019г.'  предусмотренного п. 10.2 Гарантийного срока и отсутствия заявленных в указанный срок  претензий и требований со стороны Генподрядчика, ООО «Апекс Групп» 30.09.2021 г. в  адрес АО «ТЭК Мосэнерго» было направлено требование (исх. № 320/ГрТЭС от  28.09.2021г.) о возврате сформированной гарантийной суммы с приложением счета на  оплату на общую сумму 97 991 руб. 04 коп. Требование (исх. № 320/ГрТЭС от 28.09.2021г.)  и счет на оплату № 93 от 27.09.2021 г. получены АО «ТЭК Мосэнерго» 07.10.2021 г., что  подтверждается отчетом об отслеживании отправления.  

В связи с истечением 07.09.2022г. по Договору № 16/АМР/ОРУ/18-34 от 19.03.2018г.  предусмотренного п. 10.2 Гарантийного срока и отсутствия заявленных в указанный срок  претензий и требований со стороны Генподрядчика (Заказчика), ООО «Апекс Групп»  05.10.2022г. в адрес АО «ТЭК Мосэнерго» было направлено требование (исх. № 1538 от  04.10.2022г.) о возврате остатка сформированной гарантийной суммы с приложением счета  на оплату на общую сумму 2 472 402 руб. 96 коп. Требование (исх. № 1538 от 04.10.2022г.) и  

счет № 103 от 04.10.2022 г. получены АО «ТЭК Мосэнерго» 21.10.2022г., что  подтверждается почтовым уведомлением.  

Согласно п.8.6. Договоров возврат гарантийной суммы должен быть произведен в  течение 30 дней, с даты предоставления Субподрядчиком соответствующего счета,  выставленного после истечения Гарантийного срока.  

Согласно ст. 191 ГК РФ, течение срока, определенного периодом времени,  начинается на следующий день после календарной даты или наступления события,  которыми определено его начало.  

С учетом изложенного оплата согласно предоставленных счетов должна быть  произведена Генподрядчиком в срок до 26.10.2021 г. по Договору № 13/ГРТ/19-1507 от  03.06.2019г., в срок до 06.12.2022 г. по Договору № 16/АМР/ОРУ/18-34 от 19.03.2018г.  

В нарушение требований статей 309, 310, 702, 740, 746 Гражданского кодекса РФ и  условий Договоров АО «ТЭК Мосэнерго» в установленный срок оплату не произвело,  мотивированного отказа от оплаты гарантийной суммы в адрес ООО «Апекс Групп» не  направило, таким образом Генподрядчик необоснованно уклоняется от исполнения  принятых на себя по договорам обязательств по оплате выполненных работ, фактически не  доплатив 5% от цены каждого договора.  

Сложившиеся между сторонами отношения, возникшие в связи с заключением  Договора, по своей правовой природе, являются подрядными, регулируются, помимо  общих норм об обязательствах, положениями главы 37 ГК РФ.   

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию  другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик  обязуется принять результат работы и оплатить его (пункт 1 статьи 702 ГК РФ).  

Согласно пункту 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и  конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут  быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные  сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено  договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так  и промежуточных сроков выполнения работы.  

В соответствии со ст.740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик  обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный  объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать  подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить  обусловленную цену.  

В соответствии с пунктом 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и  приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.  

Согласно статьям 711, 746 ГК РФ обязанность заказчика по оплате подрядчику  обусловленной договором цены возникает с момента сдачи результатов выполненных  работ.  

На основании статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться  надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, а  при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота  или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения  принятых на себя обязательств не допускается.  

Из собранных в материалы дела документов явствует, что ответчик свои денежные  обязательства не исполнил – выполненные работы не оплатил, доказательств погашения  задолженности не представил, следовательно, требование истца о взыскании суммы  основного долга является обоснованным и подлежит удовлетворению в полном объеме.  

В силу ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать  обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и  возражений. При этом согласно ст.68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно  закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут  

подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами. Согласно ст. ст. 8, 9 АПК  РФ, стороны пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск  наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в  том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований  или возражений.  

Ответчик не предоставил в материалы дела доказательств оплаты. 

В соответствии со ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по  своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и  непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд  оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в  отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.  

Оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями  8, 307, 310, 395, 702, 708, 711, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации,  Арбитражный суд Московской области полагает, что заявленные исковые требования  подлежат удовлетворению.  

Расходы по оплате государственной пошлины распределяются между сторонами в  соответствии со ст.ст. 110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации.  

Руководствуясь статьями ст. 110, 112, 162, 167-170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Московской области  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.  

Взыскать с АО "ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ МОСЭНЕРГО" в пользу  

ООО "АПЕКС ГРУПП" задолженность в размере 2 570 394 руб., а также расходы по уплате  

государственной пошлины в размере 35852 руб. 

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в Десятый  арбитражный апелляционный суд.  

Судья Р.С. Солдатов