АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ

690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 54

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А51-12938/2018

г. Владивосток

26 ноября 2018 года

Резолютивная часть решения объявлена 19 ноября 2018 года. 

Полный текст решения изготовлен 26 ноября 2018 года.

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Саломая В.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества "Оборонэнерго" в лице филиала «Приморский» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата государственной регистрации 30.04.2009, место нахождения 690066, 

<

...>) к обществу с ограниченной ответственностью "ДВ Капитал" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата государственной регистрации 09.09.2013, место нахождения 690003, 

<

...>),

третье лицо акционерное общество «Солнечная долина Владивостока»,

о взыскании 3443169,54 руб.

при участии в заседании: от истца ФИО2 по доверенности от 10.09.2018, от третьего лица ФИО3 по доверенности от 08.08.2018, директор ФИО4, 

у с т а н о в и л :

Акционерное общество «Оборонэнерго» обратилось в суд к обществу с ограниченной ответственностью «ДВ Капитал» с заявлением о взыскании основного долга в размере 3001204,97 рублей по договору №19-ТП от 05.10.2011 об осуществлении технологического присоединения, пени, начисленной за период с 01.01.2018 по 20.02.2018 в размере 441964,98 рублей, взыскании пени за каждый день в размере 8665,98 рублей с 21.02.2018 по день фактической оплаты суммы основного долга, расходов по оплате государственной пошлины.

Определением суда от 19.07.2018 к участию в деле в качестве третьего лица, не самостоятельных требований относительно предмета спора акционерное общество «Солнечная долина Владивостока».

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте предварительного судебного разбирательства, в заседание суда представителей не направил. Дело рассмотрено в его отсутствие в порядке части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

От ответчика через канцелярию суда поступил письменный отзыв, согласно которого просил отказать в удовлетворении заявленных требований, указав на то, что сетевой организацией по договору «19-ТП от 05.10.2011 не выполнялось, какие-либо первичные документы, подтверждающие факт выполнения работ АО «Оборонэнерго», отсутствуют. Все мероприятия по техническому присоединению были выполнены АО «Солнечная долина Владивостока». АО «Оборонэнерго» было выполнено только фактическое присоединение энергопринимающих устройств.

Представитель истца поддержал заявленные требования в полном объеме. 

Представитель третьего лица возражал по заявлению АО «Оборонэнерго», пояснил, что мероприятия по техническому присоединению согласно договора №19-ТП от 05.10.2011 были выполнены самим акционерным обществом «Солнечная долина Владивостока»

Суд, руководствуясь статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, объявлял перерыв в судебном заседании с 14.11.2018 до 19.11.2018.

Об объявлении перерыва лица, участвующие в деле,  уведомлены в соответствии с пунктом 13 Постановление Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 № 99 «О процессуальных сроках» путем размещения на информационном сервисе «Календарь судебных заседаний» на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о времени и месте продолжения судебного заседания.

Исследовав материалы дела, заслушав пояснения лиц, участвующих в деле, суд пришел к следующим выводам.

Между ОАО «Оборонэнерго» (сетевая организация) и ООО «Далта-Восток-1» (заявитель) 05.10.2011 заключен договор №19-ТП об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Согласно пункту 1 договора, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения электропринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых устройств 500 (кВт); категория надежности III; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 6 (кВ); ранее присоединенная в точке присоединения, указанной в пункте 3 настоящего договора, мощность нет (кВт).

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора. 

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объектов 1-ой очереди строительства комплексной жилой застройки, расположенных в районе ул. 50 лет октября. 1, пос. Трудовое, г. Владивосток (пункт 2 договора).

Точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям и располагается на расстоянии до 25 метров от границы участка заявителя, на котором будут располагаться присоединяемые объекты заявителя (пункт 3 договора).

Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении №1. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора (пункт 4 договора).

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения настоящего договора (пункт 5 договора).

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с постановлением Департамента по тарифам Приморского края №53/4 от 31.08.2011 и составляет: 7 503 011 руб. 39 коп., в том числе НДС 18% в сумме 1 144 527 руб. 16 коп., с учетом затрат ОАО «ДРСК» филиал «Приморские электрические сети») в размере: 7 479 081 руб. 90 коп., в том числе НДС 18% - 1 140 876 руб. 90 коп. (пункт 10 договора).

Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке: 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения настоящего договора и составляют: 750 301 руб. 14 коп., в том числе НДС 18% - 114 452 руб. 72 коп.; 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения настоящего договора и составляют: 2 250 903 руб. 42 коп., в том числе НДС 18% - 343 358 руб. 15 коп.;20 процентов за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня заключения настоящего договора и составляют: 1 500 602 руб. 28 коп., в том числе НДС 18 % - 228 905 руб. 43 коп.; 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня подписания сторонами акта о выполнении заявителем технических условий, акта об осмотре приборов учета и согласовании расчетной схемы учета электрической энергии (мощности), а также акта о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей и акта о разграничении эксплуатационной ответственности сторон составляет: 2 250 903 руб. 42 коп., в том числе НДС 18% - 343 358 руб. 15 коп.; 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения и составляют: 750 301 руб. 14 коп., в том числе НДС 18% - 114 452 руб. 72 коп. (пункт 11 договора).

09.07.2014 между истцом и ответчиком заключено соглашение о замене стороны в договоре №19-ТП от 05.10.2011 об осуществлении технологического присоединения, в соответствии с которым произведена стороны с ООО «Далта – Восток-1» на ООО «ДВ Капитал».

В соответствии с главой 3 соглашения на момент заключения заявителем в рамках договора № 19-ТП от 05.10.2011 был выплачен аванс Сетевой организации на сумму 4 501 806 руб. 42 коп., в том числе НДС 18%.

Одновременно с соглашением о замене стороны в договоре № 19-ТП был подписан протокол разногласий № 1 от 09.06.2014 в соответствии, с условиями которого размер платы за технологическое присоединение осуществляется Новым Заявителем в следующем порядке: 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня подписания сторонами акта о выполнении заявителем технических условий, акта об осмотре приборов учета и согласовании расчетной схемы учета электрической энергии (мощности), а также акта о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей и акта разграничения эксплуатационной ответственности Сторон и составляют 2 250 903,42 рублей (два миллиона двести пятьдесят тысяч девятьсот три рубля 42 копейки) с учетом НДС 18%; 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения и составляют 750 301,14 рублей (семьсот пятьдесят тысяч триста один рубль 14 копеек) с учетом НДС 18%.

15.08.2016 наименование истца было изменено с ОАО «Оборонэнерго» на АО «Оборонэнерго».

22.112017 стороны подписали акт о выполнении технических условий № 87 и акт № арт. 378 от 22.11.2017 проверки (замены), допуска расчетных приборов учета электроэнергии.

24.11.2017 стороны без претензий и разногласий подписали акт об осуществлении технологического присоединения № ПРМ/532 в соответствии, с пунктом 13 которого, стороны подтверждают, что технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрической сети сетевой организации выполнено в соответствии с правилами и нормами.

Правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики и потребителей электрической энергии установлены Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее по тексту - Закон N 35-ФЗ).

Согласно части 1 статьи 26 названного Закона технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.

Названные Правила определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

В силу пункта 16(4) Правил технологического присоединения для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, внесение платы за технологическое присоединение (за исключением случаев, урегулированных пунктом 16.2 настоящих Правил) осуществляется в следующем порядке: а) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения договора; б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения договора; в) 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня заключения договора; г) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения; д) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

Ответчиком было оплачено в виде авансового платежа 4 501 806 руб. 42 коп., что составляет более 50 % от стоимости технологического присоединения по договору.

В соответствии с положением абзаца 3 части 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", технологическое присоединение должно быть завершено в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченном им федеральным органом исполнительной власти.

Договор о технологическом присоединении по всем своим существенным условиям соответствует договору возмездного оказания услуг; к правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются помимо специальных норм положения главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Согласно пункту 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Согласно пункту 1 статьи 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

После оплаты ответчиком авансовых платежей, встречного исполнения обязательств со стороны АО «Оборонэнерго» не было предоставлено, технические условия были выполнены АО «Солнечная долина Владивостока», соответственно истец не имеет право требовать от ответчика исполнения обязательств по оплате не выполненных АО «Оборонэнерго» мероприятий по технологическому присоединению.

Право аренды земельных участков по адресу: пос. Трудовое, 

<

...>, включая участок с кадастровым номером 25:28:050080:2097, принадлежит АО «Солнечная долина Владивостока» соглашения с ООО «ДВ Капитал» от 10.05.2016 о передаче прав обязанностей по договору №ДЗ-136 аренды земельных участков для их комплексного освоения в целях жилищного строительства, в редакции дополнительного соглашения от 30.12.2016.

На земельном участке с кадастровым номером 25:28:050080:2097 АО «Солнечная долина Владивостока» приступило к реализации проекта по строительству жилых домов, 09.06.2017 получено разрешение RU 25304000-193/2017 на строительство двух 24-х этажных жилых домов, расположенные по адресу: пос. Трудовое, 

<

...>.

В связи с не исполнением мероприятий по технологическому присоединению АО «Оборонэнерго» и необходимостью обеспечения электроснабжения 1-ой очереди строительства, АО «Солнечная долина Владивостока» самостоятельно и за свой счет выполнило технические условия и договор № 19-ТП от 05.10.2011, что подтверждается договором подряда № 6-17 от 24.07.2017, заключенного с ООО «Индекс Строй Групп», актом и справкой по форме КС-2 и КС-3 № 1 от 22.11.2017, актами освидетельствования скрытых работ № ЭС-1 от 06.11.2017, № ЭС-2 от 14.11.2017, № ЭС-3  от 20.11.2017,   стоимость работ по технологическому присоединению ЭПУ объекта в целях обеспечения электроснабжением строительной площадки составила 3 975 000 руб. 

Согласно пункту 88 Правил N 861 по результатам мероприятий по проверке выполнения заявителем технических условий, сетевая организация в 3-дневный срок составляет и направляет для подписания заявителю подписанный со своей стороны в 2 экземплярах акт о выполнении технических условий (далее - акт о выполнении технических условий).

Заявитель в течение 5 дней со дня получения подписанного сетевой организацией акта о выполнении технических условий возвращает в сетевую организацию один экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий.

Акт о выполнении технических условий составляется в отношении заявителей, указанных в пункте 12 настоящих Правил, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно по одному источнику электроснабжения, а также заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13 и 14 настоящих Правил, и подписывается заявителем и сетевой организацией непосредственно в день проведения осмотра.

Пунктом 90 Правил N 861 предусмотрено, что срок проведения мероприятий по проверке сетевой организацией выполнения заявителем технических условий (с учетом направления заявителю подписанного сетевой организацией акта о выполнении технических условий) не должен превышать 10 дней со дня получения сетевой организацией уведомления от заявителя о выполнении им технических условий либо уведомления об устранении замечаний.

После выполнения технических условий и договора № 19-ТП от 05.10.2011 ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» в лице Артемовского отделения филиала ПАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт» 27.11.2017 подписало с АО «Солнечная долина Владивостока» в новой редакции Приложения к договору энергоснабжения № А0456 от 10.10.2017, а именно: Приложение 1 «Максимальная мощность энергопринимающего оборудования», Приложение 1.1 «Перечень актов об осуществлении технологического присоединения и (или) актов разграничения балансовой принадлежности электрических сетей», Приложение 2.1 «Договорные величины отпуска и потребления электрической энергии», Приложение 2.2 «Величины заявленной мощности», Приложение 3 «Перечень точек поставки и измерительных комплексов, по которым производится расчет за потребляемую электрическую энергию (мощность)», которые были дополнены с учетом выполненных АО «Солнечная долина Владивостока» мероприятий по технологическому присоединению согласно договору № 19-ТП от 05.10.2011.

Истцом в нарушение статей 64 – 68, 75 не представлены доказательства выполнения условий договора, в связи с чем, у суда не находится оснований для удовлетворения заявления заявителя. 

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы заявителя по уплате государственной пошлины относятся судом на него самого.

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

В удовлетворении исковых требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия.

Судья    Саломай В.В.