Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) 

ул. Курашова, д. 28, бокс 8, 

<

...> тел: +7 (4112) 34-05-80, https://yakutsk.arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

Дело № А58-235/2025

22 октября 2025 года

город Якутск

 Резолютивная часть решения объявлена 08.10.2025  

Полный текст решения изготовлен 22.10.2025 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе: судьи Терских В. С., при ведении протокола секретарем судебного заседания Борисовой С.И., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению муниципального казенного учреждения «Главстрой» городского округа «Город Якутск» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) № 10-ОСП от 17.01.2025 к обществу с ограниченной ответственностью «Сибтрансстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании установить пандус,  

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20 имени Героя Советского союза ФИО1» городского округа «Город Якутск» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),  

с участием в судебном заседании представителей: 

от истца: ФИО2 – по доверенности № 4/2025 от 26.02.2025 сроком действия до 31.12.2025 (диплом 103805 0014154);  

от ответчика: ФИО3 – по доверенности № 33 от 28.12.2025 сроком действия по 31.12.2027 (диплом КХ № 33034);  

от третьего лица: не явились, извещены, 

УСТАНОВИЛ:

Муниципальное казенное учреждение «Главстрой» городского округа «Город Якутск» обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Сибтрансстрой» о взыскании 161 930 руб. неосновательного  

обогащения в виде суммы оплаченных, но фактически невыполненных работ по муниципальному контракту № П-18/2023 от 14.05.2023 на поставку модульных спортивных сооружений для нужд МОБУ СОШ № 10, МОБУ СОШ № 20, в том числе 25 600 руб. стоимости детских баскетбольных стоек МОБУ СОШ № 10, 16 000 руб. стоимости установки пандуса МОБУ СОШ № 10, 120 330 руб. стоимости монтажа и изготовления крепежа для баскетбольных щитов МОБУ СОШ № 20.  

Определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 21.01.2025 исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства, без вызова сторон в соответствии со статьей 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 10.03.2025 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.  

Определением от 09.07.2025 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 20 имени Героя Советского союза ФИО1» городского округа «Город Якутск».  

К началу судебного заседания 07.10.2025 от третьего лица поступили пояснения от 03.10.2025 № 223 с подтверждением факта использования школой пандуса.  

Пояснения МОБУ СОШ № 20 приобщены к материалам дела. 

Представители истца и ответчика выступили с пояснениями по правовой позиции.  

Представитель истца поддержал заявленный ранее отказ от требования о взыскании неосновательного обогащения, исковые требования в части обязания установить пандус поддержал.  

Отказ истца от требования о взыскании 161 930 руб. неосновательного обогащения судом принят, производство по делу в данной части прекращено определением суда от 22.10.2025.  

При рассмотрении дела судом установлены следующие обстоятельства, имеющие значение для разрешения спора.  

Между муниципальным казенным учреждением «Главстрой» городского округа «Город Якутск» (Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Сибтрансстрой» (Поставщик) заключен муниципальный контракт № П-18/2023 от 14.05.2023 на поставку модульных спортивных сооружений для нужд МОБУ СОШ № 10, МОБУ СОШ № 20, по условиям которого Поставщик принимает на себя обязательства осуществить передачу спортивных залов собственными и привлеченными силами и  

средствами по адресу, указанному в п. 4.2. настоящего Контракта, в сроки, предусмотренные в п.4.1 Контракта, в объеме, установленном в Спецификации (приложение № 1 к Контракту), в соответствии с условиями настоящего Контракта и приложений к нему являющихся неотъемлемой частью Контракта (далее – Поставка), а Заказчик обязуется принять поставленные и установленные спортивные залы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом (пункт 2.1.).  

Цена Контракта составляет:75 000 000 руб., в том числе НДС (пункт 3.1.). Цена Контракта включает стоимость упаковки, фурнитуры, сборочных, установочных (с выполнением всех необходимых работ для обеспечения бесперебойного функционирования, в том числе выравнивания), погрузочно-разгрузочных, пусконаладочных работ, транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, хранению, таможенному оформлению и страхованию спортивных залов и иные расходы, связанные с приобретением спортивных залов (пункт 3.3.).  

Согласно пункту 4.1. Контракта срок поставки и установки: Начало: с момента заключения муниципального контракта; Окончание: 10 августа 2023 (включительно).  

Согласно пункту 4.2. Контракта место установки: 

- 677008, Республика Саха /Якутия/, 

<

...>, МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 имени Героя Советского Союза ФИО1» Городского округа «город Якутск»;  

- 677001, Республика Саха /Якутия/, 

<

...>, МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 имени Д.Г. Новопашина» Городского округа «город Якутск».  

Согласно условиям приобретения Поставщик передает спортивные залы в объеме, указанном в Техническом задании (Приложение № 2), по цене, указанной в Спецификации (Приложение № 1), согласно Графику передачи (приложение № 7), и в соответствии с условиями Контракта (пункт 4.3.1.).  

В соответствии с пунктом 4.4. Контракта Стороны установили, что моментом передачи спортивных залов по Контракту считать дату подписания Акт итоговой приемки.  

Поставка осуществлена Поставщиком, о чем сторонами были подписаны соответствующие акты приема-передачи от 22.09.2023, а также итоговые акты от 22.09.2023.  

Истец платежным поручением № 132088 от 27.09.2023 перечислил ответчику сумму в размере 75 000 000 руб.  

В 2024 году Контрольно-счетной палатой города Якутска была проведена проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на строительство и реконструкцию муниципальных общеобразовательных учреждений в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2017-2032 годы» за 2022-2023 годы и текущий период 2024 года.  

В ходе проверки Контрольно-счетной палатой города Якутска был составлен акт № 33 от 31.07.2024 по результатам контрольного мероприятия.  

Согласно акту Контрольно-счетной палатой города Якутска № 33 от 31.07.2024 (стр.43) относительно объекта «МОБУ «СОШ № 20» в нарушение раздела 4.3 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» Технического задания предусматривающее условие для беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по территории в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 904/пр «Об утверждении СП 59.1330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность здания и сооружений для маломобильных групп населения», ответчиком работы по установке пандусов не произведены.  

В соответствии с пунктом 9.1. Контракта Поставщик гарантирует качество и безопасность приобретаемых Заказчиком спортивных залов, включая комплектующие изделия к нему (при наличии), в соответствии с настоящим Контрактом, действующими стандартами и техническими требованиями, установленными в Российской Федерации.  

На спортивные залы устанавливается гарантийный срок (три) года (пункт 9.2.).  

Согласно пункту 9.3. Контракта в течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки, выявленные в приобретаемых Заказчиком спортивных залах или комплектующих к ним (при наличии), если не докажет, что недостатки возникли в результате нарушения Заказчиком правил эксплуатации спортивных залов.  

Истец 11.12.2024 посредством почты направил в адрес ответчика претензию № 3245/ГЛС от 21.11.2024 с требованием, в том числе по установке пандуса по МОБУ «СОШ № 20».  

Ответчик претензию истца не исполнил, что явилось основанием обращения истца с настоящим иском в суд.  

Ответчик с иском не согласен, указывает, что мобильный пандус был приобретен и передан в адрес МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 имени Героя Советского Союза ФИО1» Городского округа «город Якутск», о чем был составлен  

и подписан Акт приема передачи от 19.03.2025, подписанный уполномоченными представителями ответчика и МОБУ СОШ № 20. В последующем, также по форме приложения № 3 к Контракту, был составлен Акт приема передачи от 21.03.2025, который с сопроводительным письмом был направлен в МКУ «Главстрой», о чем имеется отметка на письме с входящим номером № 149 ПЛС от 21.03.2025. Между тем, до настоящего времени данный акт истцом не был подписан.  

Судом было предложено третьему лицу представить пояснения о том, используется ли школой мобильный пандус, переданный ООО «Сибтрансстрой» по акту от 19.03.2025, обеспечивает ли указанный пандус условия для беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения.  

Третьим лицом представлены письменные пояснения от 03.10.2025 № 223, согласно которому МОБУ СОШ № 20 подтвердило передачу ответчиком школе мобильного пандуса, который в настоящее время при необходимости устанавливается и используется для обеспечения условий беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения, о чем составлен и подписан акт приема-передачи от 19.03.2025.  

Суд, изучив и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, приходит к следующему выводу.  

Заключенный между сторонами муниципальный контракт № П-18/2023 от 14.05.2023 содержит элементы договоров поставки и подряда, регулируемые главами 30, 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а также в силу целей заключенного контракта правоотношения сторон, в том числе регулируются положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 7 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ).  

В соответствии с частью 1 статьи 525 ГК РФ поставка товаров для государственных или муниципальных нужд осуществляется на основе государственного или муниципального контракта на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд, а также заключаемых в соответствии с ним договоров поставки товаров для государственных или муниципальных нужд (пункт 2 статьи 530).  

Согласно части 2 статьи 525 ГК РФ к отношениям по поставке товаров для государственных или муниципальных нужд применяются правила о договоре поставки (статьи 506 - 522), если иное не предусмотрено правилами настоящего Кодекса.  

В соответствии со статьей 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.  

В силу части 1 статьи 509 ГК РФ поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров покупателю, являющемуся стороной договора поставки, или лицу, указанному в договоре в качестве получателя.  

В соответствии со статьей 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.  

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (часть 1 статьи 740 ГК РФ).  

В силу части 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.  

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями (статья 309 ГК РФ). Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (статья 310 ГК РФ).  

Исковые требования истца, с учетом уточнений, сводятся к обязанию ответчика установить пандус на объекте «МОБУ СОШ № 20», предусмотренный условиями муниципального контракта № П-18/2023 от 14.05.2023.  

Третьим лицом, а именно муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 20 имени Героя Советского союза  

ФИО1» городского округа «Город Якутск» (МОБУ СОШ № 20), для нужд которого и был заключен указанный контракт, представлены пояснения суду, что мобильный пандус фактически поставлен ответчиком, пандус в настоящее время при необходимости устанавливается и используется для обеспечения условий беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения.  

Факт передачи ответчиком и приемкой школой пандуса подтверждается двухсторонним актом приема-передачи от 19.03.2025. Таким образом, исковые требования истца фактически исполнены.  

Кроме того, ответчиком представлен акт приема-передачи мобильного пандуса от 21.03.2025 с сопроводительным письмом, который в свою очередь имеет отметку о получении МКУ «Главстрой».  

В соответствии с часть 5 статьи 454 ГК РФ к отдельным видам договора купли- продажи (розничная купля-продажа, поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд, контрактация, энергоснабжение, продажа недвижимости, продажа предприятия) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не предусмотрено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.  

Частью 1 статьи 454 ГК РФ установлено, что по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).  

Согласно статье 458 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором купли- продажи, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент:  

вручения товара покупателю или указанному им лицу, если договором предусмотрена обязанность продавца по доставке товара;  

предоставления товара в распоряжение покупателя, если товар должен быть передан покупателю или указанному им лицу в месте нахождения товара. Товар считается предоставленным в распоряжение покупателя, когда к сроку, предусмотренному договором, товар готов к передаче в надлежащем месте и покупатель в соответствии с условиями договора осведомлен о готовности товара к передаче. Товар не признается готовым к передаче, если он не идентифицирован для целей договора путем маркировки или иным образом.  

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимной связи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу о том, что поскольку ответчиком  

обязательства, об обязании исполнения которых истцом заявлены в настоящем деле, фактически исполнены, что подтверждается материалами дела, суд отказывает в удовлетворении исковых требований истца.  

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в связи с чем направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет».  

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Отказать в удовлетворении иска. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно – телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru.  

Судья В.С.Терских