АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40- 291878/2023-3-2262

г. Москва

26 февраля 2024 г.

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Федоточкина А.А.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Будагиловой Б.Б., с использованием средств аудиозаписи, рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ДВОРЕЦ  ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ "ХОРОШЕВО" 123154, ГОРОД МОСКВА,  МАРШАЛА ТУХАЧЕВСКОГО УЛИЦА, 20, 1, ОГРН: 1037739525273, Дата присвоения  ОГРН: 10.02.2003, ИНН: 7734077088 к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС" (107241, ГОРОД МОСКВА, ЩЁЛКОВСКОЕ  ШОССЕ, ДОМ 23А, ОФИС 413, ОГРН: 1117746076315, Дата присвоения ОГРН:  08.02.2011, ИНН: 7715850369) о взыскании суммы неустойки и штрафа в общем  размере 804 703,30 руб.,  

В судебное заседание явились: От истца: Любах Ю.А. дов. от 10.01.2024 г. диплом От ответчика: Олейник Ю.Н. дов. от 26.08.2021 г. диплом 

РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "ФЕНИКС" (107241, ГОРОД МОСКВА, ЩЁЛКОВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 23А, ОФИС  413, ОГРН: 1117746076315, Дата присвоения ОГРН: 08.02.2011, ИНН: 7715850369) в  пользу ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  "ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ "ХОРОШЕВО" 123154, ГОРОД  МОСКВА, МАРШАЛА ТУХАЧЕВСКОГО УЛИЦА, 20, 1, ОГРН: 1037739525273, Дата  присвоения ОГРН: 10.02.2003, ИНН: 7734077088 штраф за бесконтейнерное  складирование строительного мусора и неисполнение ежедневного вывоза мусора в  размере 300 000 (Триста тысяч) руб., штраф за нарушение п. 10.6 и 10.7 проекта  организации строительства, приведшее к протечке кровли здания в размере 100 000  (Сто тысяч) руб., штраф за нарушение п. 5.1.3 контракта в связи с не предоставлением  информации о ходе выполняемых работ в размере 100 000 (Сто тысяч ) руб., штраф за  нарушение п. 5.4.8 контракта в связи с ненадлежащим исполнением обязательства по  обеспечению сохранности конструктивных элементов здания в размере 100 000 (Сто  тысяч) руб., убытки в размере 46 880 (Сорок шесть тысяч восемьсот восемьдесят ) руб.,  

расходы по оплате госпошлины в размере 15 349 (Пятнадцать тысяч триста сорок  девять) руб. 17 коп.  

В удовлетворении остальной части исковых требований – отказать. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его изготовления в  полном объеме в Девятый арбитражный апелляционный суд.  

 Судья А. А. Федоточкин