Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-82039/2018

21 ноября 2018 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  15 ноября 2018 года.

Полный текст решения изготовлен  21 ноября 2018 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеева О.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: закрытое акционерное общество "ЭВРИКА"; Закрытое акционерное общество "ЭВРИКА" (адрес:  Россия 196084, Санкт-Петербург, Московский пр. 118; Россия 191023, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул ГОРОХОВАЯ 32/А/15Н, ОГРН:  1027809212595; 1027809212595);

ответчик: Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "ГЛАВНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР" Управления Делами Президента Российской Федерации (адрес:  Россия 121471, г МОСКВА, г МОСКВА, ул РЯБИНОВАЯ 43/1, ОГРН:  1027739667614);

о взыскании 18 604 933 руб. 33 коп.

при участии

- от истца: ФИО2 по доверенности от 20.11.17,

- от ответчика: ФИО3 по доверенности от 14.09.16,

установил:

ЗАО "ЭВРИКА" предъявило иск к ФГУП "ГЛАВНИВЦ" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ о взыскании 18 604 933 руб. 33 коп. неустойки за нарушение сроков выполнения этапов работ по контракту №400/К/15/30.

После уточнения исковых требований в порядке ст. 49 АКП РФ истец просит взыскать неустойку за нарушение сроков исполнения этапа №3 в размере 3 927 083 руб. 33 коп., штраф за некачественное выполнение работ по этапу №3 в размере 5 642 850 руб. 00 коп., неустойку за нарушение сроков выполнения работ по этапу №4 в размере 4 398 333 руб. 33 коп., неустойку по этапу №5 в размере 3 518 666 руб. 67 коп., неустойку по этапу №4 и этапу №5 просят взыскать по дату фактического исполнения обязательств.

Ответчик просит снизить размер неустойки и штрафа по мотивам, указанным в отзыве на иск. 

Судом установлено:

Между сторонами был заключен контракт №400/К/15/30 на выполнение составной части опытно-конструкторской работы, шифр темы «Филигрань-П».

Согласно условиям контракта ответчик – исполнитель выполнял работы поэтапно.

Ответчик не оспаривает факт нарушение сроков выполнения этапов работ №3 и №4. По этапу №5 ответчик обоснованно полагает, что он является продолжением государственных испытаний опытного образца изделия ОКР, поэтому сроки выполнения этого этапа не зависят от ответчика.

Учитывая, что работы по этапу №1 и №2 были сданы в согласованные сроки, ответчик обоснованно полагает, что расчет неустойки следует производить не от общей суммы контракта (65 000 000 руб. 00 коп.), а от стоимости этапов, по которым нарушен срок (39 444 000 руб. 00 коп.).

Суд принимает контррасчет неустойки, указный ответчиком в отзыве: по этапу №3 – в размере 2 737 542 руб. 70 коп.; по этапу №4 – в размере 1 496 571 руб. 10 коп.

Суд согласен с доводом ответчика о том, что штраф за некачественное исполнение обязательств, предусмотренных этапом №3, следует применять однократно, а не в тройном размере, как указано истцом. 

Штраф составит 1 880 950 руб. 00 коп.

Учитывая изложенное, общий размер неустойки, подлежащий взысканию с ответчика в пользу истца, составляет 5 751 063 руб. 80 коп.

Расходы по государственной пошлине в размере 97 215 руб. 17 коп. относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 309. 310, 330, 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с Федерального Государственного Унитарного Предприятия "ГЛАВНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР" Управления Делами Президента Российской Федерации в пользу закрытого акционерного общества "ЭВРИКА" 5 751 063 руб. 80 коп. неустойки и 97 215 руб. 17 коп. расходов по государственной пошлине.

Выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Сергеева О.Н.