19/2021-24406(1) 

Арбитражный суд Республики Карелия  ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625, E-mail: info@karelia.arbitr.ru  

официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А26-11580/2019

г. Петрозаводск

29 апреля 2021 года

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Карелия  

РЕШИЛ:

1. Иск Казенного учреждения Республики Карелия «Управление капитального  строительства Республики Карелия» удовлетворить.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная  компания "Строительная механика" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в  течение двух месяцев с момента вступления настоящего решения в законную силу  безвозмездно устранить недостатки работ, выполненных по государственному  контракту от 20.07.2018 года № 2зп-18 на выполнение работ по завершению  строительства объекта: «Строительство 43-х квартирного дома по ул. Пушкина в г.  Сортавала Сортавальского городского поселения Сортавальского муниципального  района Республики Карелия», а именно:  

- установить узел примыкания профилированных листов к вентиляционным  шахтам в соответствии с рабочей документацией (альбом ПБТ-18/16-АС лист 60);  

- герметизировать поперечные стыки металлических профилированных листов у  вентиляционных шахт, вытяжек канализационных стояков и трубостоек;  

- установить зонты прямоугольного сечения над вентиляционными шахтами в  соответствии с рабочей документацией (альбом ПБТ-18/16-АС листы 77-81,  типовой серией 5.904-51 ЗП.00.000-02);  

- установить на кровле планку ветровую, комбинированное ограждение с функцией  снегозадержания и высотой ограждения не менее 1,2 м в соответствии с рабочей  документацией (альбом ПБТ-18/16-АС лист 60, п. 8.3 СП 54.13330.2016);  

- установить профилированный кровельный лист на карнизном свесе кровли вдоль  оси «1» многоквартирного дома, обеспечив покрытие карнизной планки в  соответствии с рабочей документацией (альбом ПБТ-18/16-АС);  

- привести уровень асфальтобетонного покрытия у входных дверей в подъезды и  электрощитовую в соответствие с рабочей документацией (альбом ПБТ18/16-АС  листы 9, 10, 13, п. 6.26 СП 82.13330.2016);  

- восстановить разрушенную отмостку и укрепить откосы по периметру  многоквартирного дома в соответствии с п. 6.32 СП 82.13330.2016;  

- очистить от малярного состава, коррозии и окрасить в соответствии с п. п. 7.5.5.  7.7 СП 71.13330.2017 входные двери в подъездах, стены тамбуров подъездов;  

- заменить деформированный линолеум в квартирах №№ 2-5, 10, 12, 22, 24-26, 29,  41 в соответствии с п. 8.14.1 таб. 8.15 СП 71.13330.2017;  

- заменить потрескавшееся и отклеившееся покрытие пола из керамогранитной  плитки в соответствии с п. 8.14.1 таб. 8.15 СП 71.13330.2017;  

- восстановить отделку стен в квартирах №№ 1, 3-6, 10, 12, 22, 25-27, 29, 36, 37 в  соответствии с рабочей документацией (альбом ПБТ18/16-АС лист 23, п. 7.6.15 СП  71.13330.2017);  

- восстановить отделку поверхностей, окрашенных малярным составом, в  квартирах №№ 2, 3, 6, 10, 22, 27, 34, 37 в соответствии с рабочей документацией  (альбом ПБТ18/16-АС лист 23, п. п. 7.5.5, 7.7 СП 71.13330.2017);  

- восстановить отделку поверхностей, окрашенных малярным составом, в  помещениях коридоров 3-го этажа многоквартирного дома, поврежденную из-за  дефекта кровельного покрытия;  

- восстановить отделку стен тамбуров подъездов, поврежденных проникновением  атмосферных осадков через пороги входных дверей;  

- восстановить функционирование дренажной системы по внешнему контуру  здания, осуществить прочистку трубопровода дренажа, откачку воды из смотровых  колодцев;  

- восстановить дорожное покрытие и тротуары в соответствии с рабочей  документацией (альбом 18/16-ГП листы 4, 7, 10, альбом ПБТ-18/16-ПЗУ лист 6,  приложение № 3 к заключению судебной экспертизы);  

- восстановить освещение лестничных маршей первого и второго подъездов  многоквартирного дома в соответствии с рабочей документацией (альбом ПБТ- 18/16-ИОС1 лист 3, позиция 3 акта освидетельствования выявленных дефектов от  20.07.2020 года);  

- смонтировать приборы - радиаторные счетчики-распределители Doprimo на  радиаторы отопления в соответствии с локальной сметой № 02-01-03 «Отопление и  вентиляция».  

2. Взыскать с Общества ограниченной ответственностью "Проектно-строительная  компания "Строительная механика" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в  пользу Казенного учреждения Республики Карелия «Управление капитального  строительства Республики Карелия» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  судебные расходы по госпошлине в размере 6000 руб. и судебные расходы по  оплате экспертизы в размере 147000 руб.  

4. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного  месяца со дня изготовления полного текста решения в Тринадцатый арбитражный  апелляционный суд (191015, 

<

...>, лит.  А) через Арбитражный суд Республики Карелия.  

Судья Михайлова А.В. 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 12.08.2020 11:19:56

Кому выдана Михайлова Александра Викторовна