АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А60-47751/2017

05 декабря 2017 года

г. Екатеринбург

 

Резолютивная часть решения объявлена 29 ноября 2017 года

Полный текст решения изготовлен 05 декабря 2017 года

 

Арбитражный суд Свердловской области, в составе судьи Н.Я. Лутфурахмановой,  при ведении протокола судебного заседания помощником ФИО1,  рассмотрел в судебном заседании дело № А60-47751/2017 

по исковому заявлению Администрации городского округа Дегтярск (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "АМБИЕНТЕР БАУ"(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании устранить недостатки в выполненных работах,

 

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2, представитель по доверенности №01-01-13/49 от 11.01.2017 г.,

от ответчика: не явились, извещены.  

 

 Лица, участвующие в деле, о времени  и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

   Процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов суду не заявлено (ст. 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

 

Истец обратился в Арбитражный суд Свердловской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "АМБИЕНТЕР БАУ" об обязании общество с ограниченной ответственностью «АМБИЕНТЕР БАУ» в течение одного месяца с момента вступления в законную силу решения суда устранить недостатки в выполненных работах по муниципальному контракту № 0162300003313000007-0118694-02 от 08.07.2013 г. на выполнение работ по строительству объекта «под ключ»: Дошкольное образовательное учреждение па 150 мест по ул. Еагарина, 6 в г. Дегтярск Свердловской области, а именно:

-на 1 этаже здания (коридор) устранить протечку стояка сбросов воды;

-на 1 этаже здания (коридор) устранить трещины на штукатурке;

-на 2 этаже здания (подготовительная группа) устранить протечку воронки ливневой канализации;

-на 2 этаже здания (подготовительная группа) осуществить ремонт в части покрытия стены;

-на 2 этаже здания (подготовительная группа) устранить трещину на потолке;

-на 2 этаже здания (подготовительная группа) на потолке осуществить ремонт в части покрытия;

-на 2 этаже здания (подготовительная группа) в помещении туалета осуществить ремонт в части покрытая стены;

-на 2 этаже здания (подготовительная группа) в помещении спальни осуществить ремонт в части покрытия стены;

-на 2 этаже устранить протечку ливневой канализации;

-на 2 этаже здания (спортивный зал) устранить трещину между спортивным залом и музыкальным кабинетом;

- на 2 этаже здания (музыкальный кабинет) устранить трещину между музыкальным кабинетом и спортивным залом;

-2 этаж- в помещении туалета устранить протечку вытяжки канализационного стока;

-2 этаж (коридор) устранить протечку шва приемной воронки канализации;

- 2 этаж (группа «Винни-Пух»)- по периметру потолка устранить отслоения покрытия, трещину по всему периметру;

-2 этаж (группа «Ромашки») устранить протечку шва приемной воронки канализации;

-2 этаж (туалет) устранить протечку шва приемной воронки канализации;

-2 этаж (группа «Винни-Пух»)- на нижней части стены устранить отслоение покрытия, трещину;

-1 этаж-помещение пищеблока- устранить сквозную трещину на стене;

-1 этаж-второе помещение пищеблока- устранить сквозную трещину на

стене;

-1 этаж-третье помещение пищеблока- устранить сквозную трещину на перегородке стены;

-1 этаж (коридор)-устранить намокание стены, отслоение покрытия;

-1 этаж-помещение для хранения сыпучих продуктов- на верхней части стены устранить трещину;

-1 этаж-помещение для хранения фруктов устранить сквозную трещину на

стене;

-1 этаж (туалет для сотрудников) устранить намокание стены, отслоение покрытия;

-1 этаж (группа «Буратино»)-на стене устранить сквозную трещину; -1этаж (туалет сотрудников)-на потолке устранить отслоение покрытия, трещина;

-1 этаж (коридор)-устранить на стене трещину; -холл 1 этажа-на стене устранить трещину; -помещение прачечной- устранить намокание стены;

-комната охраны (I этаж)-в верхней части стены устранить трещину на

стене;

-вход в медицинский кабинет- в верхней части стены устранить трещину;

-медицинский кабинет- устранить сквозную трещину на стене;

-1 этаж (группа «Пчелки»)-в помещении для хранения одежды устранить намокание стойка, трещина по периметру стены;

-1 этаж (группа «Пчелки»)-помещение туалета, для умывания- устранить трещину по периметру стены;

-1 этаж (группа «Пчелки»)-помещение спальни- устранить трещину по периметру стены;

-крыльцо здания - устранить отхождение покрытия крыльца (плитки); -комната для хранения белья- устранить трещину на стене; -па фасаде здания- устранить отхождение плиты.

         Определением от 13.09.2017 г. арбитражный суд в порядке, установленном ст. ст. 127, 133, 135, 136 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принял исковое заявление к производству и назначил дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании. 

В предварительном судебном заседании истец требования поддержал.

Ответчик отзыв не представил, определение суда не исполнил.

Определением от 19.10.2017 г. дело назначено к судебному разбирательству.

В основном судебном заседании истец заявил ходатайство в порядке ст. 49 АПК РФ об уточнении исковых требований в виде конкретизации видов и объемов работ, подлежащих выполнению в целях устранения недостатков с указанием площадей и конкретного помещения. С учетом уточнения просит: 

- обязать общество с ограниченной ответственностью «АМБИЕНТЕР БАУ» в течение одного месяца с момента вступления в законную силу решения суда устранить недостатки в выполненных работах по муниципальному контракту № 0162300003313000007-0118694-02 от 08.07.2013 г. на выполнение работ по строительству объекта «под ключ»: Дошкольное образовательное учреждение на 150 мест по ул. ФИО3, 6 в г. Дегтярск Свердловской области, а именно:

1 этаж:

-помещение № 68, общей площадью 5,0 кв.м. устранить трещины на всю высоту этажа (3, 5 м.);

- помещение № 68, общей площадью 5,0 кв.м. устранить намокание стены;

-помещение № 69, общей площадью 21,4 кв.м., устранить трещины на всю высоту этажа (3,5 м.);

-помещение № 70, общей площадью 66, 8 кв.м., устранить трещины на всю высоту этажа (3, 5 м.);

-помещение № 67, общей площадью 7, 0 кв.м., устранить трещины на всю высоту этажа (3, 5 м.);

-помещение № 55, общей площадью 83,8 кв.м., устранить трещины на всю высоту этажа (3, 5 м.);

-помещение № 54, общей площадью 11,8 кв.м., устранить трещины на всю высоту этажа (3, 5 м.);

-помещение № 49, общей площадью 2, 1 кв.м., устранить горизонтальные трещины на высоте дверной коробки (2м. от уровня пола);

-помещение № 48, общей площадью 6,9 кв.м., устранить горизонтальные трещины на высоте дверной коробки (2м. от уровня пола);

-помещение № 52, общей площадью 13,3 кв.м., устранить горизонтальные трещины на высоте дверной коробки (2м. от уровня пола);

-помещение № 43, общей площадью 2,0 кв.м., устранить трещины на всю высоту этажа (3,5 м.);

-    помещение № 43, общей площадью 2,0 кв.м., устранить намокание стены в районе прохождения канализационных стоков;

-    помещение № 42, общей площадью 2,0 кв.м., устранить намокание стены в районе прохождения канализационных стоков;

-помещение № 33, общей площадью 10,8 кв.м. устранить трещины на всю высоту этажа (3, 5 м.);

- помещение № 29, общей площадью 10,9 кв.м. устранить трещины на всю высоту этажа (3, 5 м.);

-помещение № 28, общей площадью 22,5 к.в.м., устранить трещины на всю высоту этажа (3, 5 м.);

-помещение № 25, общей площадью 11,5 кв.м., устранить трещины на всю высоту этажа (3, 5 м.);

-помещение № 35, общей площадью 12, 7 кв.м., устранить намокание вентиляционной шахты;

-помещение № 22, общей площадью 8,9 кв.м., устранить трещины на всю высоту этажа (3, 5 м.);

-помещение № 21, общей площадью 8,1 кв.м., устранить трещины на всю высоту этажа (3, 5 м.);

-помещение № 13, общей площадью 23,0 кв.м. устранить намокание перекрытия в районе ливневой канализации;

-помещение № 7, общей площадью 74,7 кв.м. устранить намокание перекрытия в районе ливневой канализации;

- помещение № 6, общей площадью 66, 5 кв.м. устранить намокание перекрытия в районе ливневой канализации.

2 этаж:

-помещение № 81, общей площадью 7,0 кв.м. устранить намокание перекрытия в районе ливневой канализации;

-помещение № 82, общей площадью 23,2 кв.м., устранить трещины на всю высоту этажа (3, 5 м.);

-помещение № 79, общей площадью 5,0 кв.м., устранить намокание перекрытия в районе ливневой канализации;

-помещение № 92, общей площадью 56,6 кв.м., устранить намокание перекрытия в районе ливневой канализации;

-помещение № 84, общей площадью 103,2 кв.м. устранить намокание нижней части стены;

-помещение № 84, общей площадью 103,2 кв.м., устранить горизонтальную трещину на высоте 40 см под перекрытием;

-помещение № 104, общей площадью 69,2 кв.м. устранить намокание перекрытия в районе ливневой канализации;

-помещение № 85, общей площадью 103,2 кв.м., устранить протечку плиты перекрытия;

-помещение № 113, общей площадью 4,7 кв.м., устранить намокание перекрытия в районе ливневой канализации;

-помещение № 118, общей площадью 66,0 кв.м., устранить намокание перекрытия в районе ливневой канализации;

-помещение № 119, общей площадью 65,9 кв.м., устранить намокание стены;

-помещение №116, общей площадью 5,1 кв.м., устранить намокание перекрытия в районе канализационного стока;

-помещение № 111, общей площадью 40,4 кв.м., устранить намокание перекрытия в районе ливневой канализации.

Ходатайство судом удовлетворено на основании ст. 49 АПК РФ.

С учетом уточнения истец требования поддержал, приобщил к материалам дела копии документов, поименованных в ходатайстве о приобщении.

 Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд   

 

установил:

Как следует из материалов дела, в соответствии с условиями контракта № 0162300003313000007-0118694-02 от 08.07.2013 г. (далее - контракт) ответчик обязался выполнить работы по строительству объекта «под ключ»: «Дошкольное образовательное учреждение на 150 мест по ул. ФИО3, 6 в г. Дегтярск Свердловской области» согласно техническому заданию, локально-сметному расчету и графиком производства работ (п. 1.1). Стоимость работ согласно п. 2.1 контракта составляет 91 500 000 руб. 00 коп. Сроки выполнения работ согласованы в разделе 5 контракта.

 Отношения сторон по контракту регулируются положениями главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

По смыслу ст. 768 Гражданского кодека РФ к отношениям по муниципальным контрактам на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд применяются положения Гражданского кодекса РФ, в части, не урегулированной им – закон о подрядах для государственных или муниципальных нужд.

  В соответствии с пунктом 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Сущность муниципального контракта как правовой формы удовлетворения государственных нужд, опосредующих реализацию публичных интересов в определенной сфере, обуславливает создание такого правового режима размещения заказов, который, в отличие от классических гражданско-правовых конструкций, призван обеспечить достижение цели эффективного использования средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования (часть 1 статьи 1 N 94-ФЗ, пункт 1 статьи 1 №44-ФЗ). 

Приемка ответчиком выполненных работ влечет возникновение обязанности по их оплате (ст. 711, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда").

Принятие работ свидетельствует о потребительской ценности произведенных работ для заказчика и желании ими воспользоваться. Таким образом, при приемке работ без разногласий ответчик обязан произвести ее оплату.  

Работы по контракту выполнены подрядчиком, приняты и оплачены истцом (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU66340100-20 от 30.11.2015 г., акт итоговой проверки от 26.10.2015 г.). Данные обстоятельства сторонами не оспариваются и не составляют предмет исковых требований. 

При этом, наличие акта приемки работ, подписанного заказчиком, не лишает заказчика права представить суду возражения по объему, стоимости и качеству работ (пункты 12, 13 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда").

Как следует из материалов дела, в ходе эксплуатации результата работ заказчиком выявлены недостатки в выполненных работах.

В соответствии с пунктом 1 статьи 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

         Согласно п. 10.1.5 контракта гарантийный срок на работы составляет 60 месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию.

         Поскольку акт ввода в эксплуатацию подписан 30.11.2015 г., гарантийный срок истекает 30.11.2020 г. Таким образом, недостатки выявлены заказчиком в пределах гарантийного срока.

        Согласно пункту 1 статьи 722 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721 Кодекса).

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами (пункт 2 статьи 755 Гражданского кодекса Российской Федерации).

 Материалами дела подтверждается, что в ходе эксплуатации выявлены недостатки в выполненных работах. В связи с указанным, 04.04.2017 г. ответчику вручено письмо №01-01-13/1056 от 31.03.2017 г. со ссылкой на выявление недостатков и необходимостью явиться на совместный осмотр здания детского сада 10.04.2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: ФИО3, 6 в г. Дегтярск Свердловской области.

         Согласно акту осмотра здания №1 от 10.04.2017 г. подрядчик явку на осмотр не обеспечил. В ходе осмотра комиссией установлено наличие многочисленных недостатков (протечки потолков, ливневых труб, намокание стен и потолков), поименованных в данном акте. Поскольку подрядчик явку на осмотр и составление акта не обеспечил, истец направил ответчику письмо №01-01-13/1240 от 12.04.2017 г. с требованием устранить выявленные недостатки в срок до 15.05.2017 г. Данное письмо возвращено истцу за истечением срока хранения (ст. 165.1 ГК РФ). Однако, данные недостатки подрядчиком не устранены. Письмом №104 от 12.07.2017 г.  истец уведомил о том, что в связи с проливными дождями недостатки в работах усугубились массовыми протечками потолков, ливневых труб, намоканием стен и потолков. В подготовительной группе в дневное время при отсутствии детей провалился потолок, в раздаточной, штукатурка осыпается на столы, где происходит раздача пищи, аналогичные проблемы во всех группах второго этажа.  

В силу пункта 2 статьи 755 ГК РФ подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, ненадлежащего ремонта.

Положения названных норм предусматривают презумпцию вины подрядчика за недостатки (дефекты) выполненных работ, выявленных в пределах гарантийного срока.

         Пунктом 1 статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, потребовать от подрядчика, в том числе, безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

При таких обстоятельствах, принимая во внимание факт некачественно выполненных ответчиком работ, а также то обстоятельство, что требование об устранении недостатков заявлено истцом в пределах гарантийного срока с соблюдением условий договора и требований закона, в отсутствие доказательств обратного (статья 65 АПК РФ), требования истца являются правомерными и подлежат удовлетворению на основании статьи 723 ГК РФ.

На основании изложенного, требование истца о безвозмездном устранении недостатков подлежит удовлетворению на основании ст. 720, 721, 722, 723 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета на основании ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 167-170  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

1. Исковые требования  удовлетворить.

2. Обязать общество с ограниченной ответственностью «АМБИЕНТЕР БАУ» в течение одного месяца с момента вступления в законную силу решения суда устранить недостатки в выполненных работах по муниципальному контракту № 0162300003313000007-0118694-02 от 08.07.2013 г. на выполнение работ по строительству объекта «под ключ»: Дошкольное образовательное учреждение на 150 мест по ул. ФИО3, 6 в г. Дегтярск Свердловской области, а именно:

1 этаж:

-помещение № 68, общей площадью 5,0 кв.м. устранить трещины на всю высоту этажа (3, 5 м.);

- помещение № 68, общей площадью 5,0 кв.м. устранить намокание стены;

-помещение № 69, общей площадью 21,4 кв.м., устранить трещины на всю высоту этажа (3,5 м.);

-помещение № 70, общей площадью 66, 8 кв.м., устранить трещины на всю высоту этажа (3, 5 м.);

-помещение № 67, общей площадью 7, 0 кв.м., устранить трещины на всю высоту этажа (3, 5 м.);

-помещение № 55, общей площадью 83,8 кв.м., устранить трещины на всю высоту этажа (3, 5 м.);

-помещение № 54, общей площадью 11,8 кв.м., устранить трещины на всю высоту этажа (3, 5 м.);

-помещение № 49, общей площадью 2, 1 кв.м., устранить горизонтальные трещины на высоте дверной коробки (2м. от уровня пола);

-помещение № 48, общей площадью 6,9 кв.м., устранить горизонтальные трещины на высоте дверной коробки (2м. от уровня пола);

-помещение № 52, общей площадью 13,3 кв.м., устранить горизонтальные трещины на высоте дверной коробки (2м. от уровня пола);

-помещение № 43, общей площадью 2,0 кв.м., устранить трещины на всю высоту этажа (3,5 м.);

-    помещение № 43, общей площадью 2,0 кв.м., устранить намокание стены в районе прохождения канализационных стоков;

-    помещение № 42, общей площадью 2,0 кв.м., устранить намокание стены в районе прохождения канализационных стоков;

-помещение № 33, общей площадью 10,8 кв.м. устранить трещины на всю высоту этажа (3, 5 м.);

- помещение № 29, общей площадью 10,9 кв.м. устранить трещины на всю высоту этажа (3, 5 м.);

-помещение № 28, общей площадью 22,5 к.в.м., устранить трещины на всю высоту этажа (3, 5 м.);

-помещение № 25, общей площадью 11,5 кв.м., устранить трещины на всю высоту этажа (3, 5 м.);

-помещение № 35, общей площадью 12, 7 кв.м., устранить намокание вентиляционной шахты;

-помещение № 22, общей площадью 8,9 кв.м., устранить трещины на всю высоту этажа (3, 5 м.);

-помещение № 21, общей площадью 8,1 кв.м., устранить трещины на всю высоту этажа (3, 5 м.);

-помещение № 13, общей площадью 23,0 кв.м. устранить намокание перекрытия в районе ливневой канализации;

-помещение № 7, общей площадью 74,7 кв.м. устранить намокание перекрытия в районе ливневой канализации;

- помещение № 6, общей площадью 66, 5 кв.м. устранить намокание перекрытия в районе ливневой канализации.

2 этаж:

-помещение № 81, общей площадью 7,0 кв.м. устранить намокание перекрытия в районе ливневой канализации;

-помещение № 82, общей площадью 23,2 кв.м., устранить трещины на всю высоту этажа (3, 5 м.);

-помещение № 79, общей площадью 5,0 кв.м., устранить намокание перекрытия в районе ливневой канализации;

-помещение № 92, общей площадью 56,6 кв.м., устранить намокание перекрытия в районе ливневой канализации;

-помещение № 84, общей площадью 103,2 кв.м. устранить намокание нижней части стены;

-помещение № 84, общей площадью 103,2 кв.м., устранить горизонтальную трещину на высоте 40 см под перекрытием;

-помещение № 104, общей площадью 69,2 кв.м. устранить намокание перекрытия в районе ливневой канализации;

-помещение № 85, общей площадью 103,2 кв.м., устранить протечку плиты перекрытия;

-помещение № 113, общей площадью 4,7 кв.м., устранить намокание перекрытия в районе ливневой канализации;

-помещение № 118, общей площадью 66,0 кв.м., устранить намокание перекрытия в районе ливневой канализации;

-помещение № 119, общей площадью 65,9 кв.м., устранить намокание стены;

-помещение №116, общей площадью 5,1 кв.м., устранить намокание перекрытия в районе канализационного стока;

-помещение № 111, общей площадью 40,4 кв.м., устранить намокание перекрытия в районе ливневой канализации.

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "АМБИЕНТЕР БАУ"(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 6 000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек.

4. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

 Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

5. С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение». В случае неполучения  взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении. Взыскатель может обратиться в арбитражный суд с заявлением о выдаче исполнительного листа нарочно в иную дату. Указанное заявление должно поступить в суд не позднее даты,  указанной в карточке дела в документе «Дополнение».

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела «Дополнение». 

 

Судья                                                                Н.Я. Лутфурахманова