112/2020-94005(1) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е 

резолютивная часть

дело № А73-2852/2020

г. Хабаровск

09 июля 2020 года

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Трещевой В.Н. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  

рассмотрел в заседании суда дело по иску Краевого государственного  бюджетного учреждения здравоохранения «Клинико-диагностический  центр» Министерства здравоохранения Хабаровского края (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680009, 

<

...>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью «Строй Гарант» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680038, 

<

...>, помещение I (11))  

 об обязании устранить недостатки работ, взыскании 19 677 руб. 44  коп.  

при участии в судебном заседании: 

от истца – представитель по доверенности б/н от 12.05.2020 ФИО2,  

от ответчика – не явились 

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить. 

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Строй Гарант» в  течение 30 календарных дней с момента вступления решения суда по  настоящему делу в законную силу безвозмездно устранить недостатки работ  по внутренней отделке помещений в здании КГБУЗ «Клинико- диагностический центр» (680009, 

<

...>), выполненных по договору № 36 от 11.12.2017 г., а именно:  

Первый этаж: 

трещины стыков листов ГВЛ, по швам вспучивание отделочного слоя,  местами повреждение краски до 80 мм шириной вдоль стыка;  

справа от окна регистратора № 3 (под потолком фойе) не снят  малярный скотч;  

по центру зала в фойе непрокрашенные участки потолка до 0,2 кв.м.; в потолке приборы сигнализации испачканы краской; над переходом из фойе в коридор перепад по плоскости до 12 мм; за монитором (электронной очереди) трещина раскрытием до 5 мм; 

рядом со встроенным люком потолка (фойе) отслаивание, выпадение  окрасочного слоя;  

над окнами, слева от входа в фойе некачественное сопряжение  облицовки потолка и стен (неровности, вспучивание краски);  

над проемами дверей лифтовых шахт вспучивание окрасочного слоя.  

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Строй Гарант» в  течение 30 календарных дней с момента вступления решения суда по  настоящему делу в законную силу безвозмездно устранить недостатки работ  по внутренней отделке помещений в здании КГБУЗ «Клинико- диагностический центр» (680009, 

<

...>), выполненных по контракту № 5971 от 23.11.2017 г., а  именно:  

Второй этаж: 

в операционном зале 2 этажа деформирование наклеенной  солнцезащитной пленки окон (на стыках и по краям зазоры до 30 мм);  

в туалетной комнате трещины по углам стен, облицованных кафельной  плиткой (трещины в углах стен, раскрытием до 5 мм);  

на стене, отделяющей туалетную комнату от комнаты дежурного  персонала, трещина на всю высоту. Прогиб перегородки в месте образования  трещины;  

над дверным проемом комнаты дежурного персонала трещина  перегородки; отсутствие доборной планки в обналичке дверного блока;  

в коридоре, на перегородке, справа от дверного блока вспучивание  окрасочного слоя на площади до 0,5 кв.м.; в месте сопряжения обналички и  перегородки вспучивание, шелушение краски;  

в комнате дежурного персонала участки непрокрашеиного потолка по  углам. Под потолком пропуски в облицовке плиткой по углам стен.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строй  Гарант» в пользу Краевого государственного бюджетного учреждения  здравоохранения «Клинико-диагностический центр» Министерства  здравоохранения Хабаровского края штраф в размере 19 677 руб. 44 коп.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строй  Гарант» в пользу Краевого государственного бюджетного учреждения  здравоохранения «Клинико-диагностический центр» Министерства  здравоохранения Хабаровского края судебные расходы в виде уплаченной  госпошлины в сумме 8 000 руб. 00 коп., расходы на заключение  специалистов в размере 18 000 руб. 00 коп., итого 26 000 руб. 00 коп.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со  дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана  апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение,  если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня  принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия  решения.  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края. 

Судья В.Н.Трещева 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 18.06.2020 5:05:31

Кому выдана Трещева Валентина Николаевна