АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

28 января 2021 года

Дело № А33-15091/2020

Красноярск

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 21 января 2021 года.

В полном объёме решение изготовлено 28 января 2021 года.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи О.С. Щёлоковой, рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Сервисная компания "Колибри" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации: 20.02.2014, г. Красноярск)

к акционерному обществу "Управляющая строительная компания "Новый город"                   (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации: 27.07.2009, г. Красноярск)

о взыскании пени,

в присутствии:

от истца: ФИО1, по доверенности от 01.12.2019, 

от ответчика: ФИО2, по доверенности от 27.01.2020 № 47, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.А. Прокопивнюк,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Сервисная компания "Колибри" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к акционерному обществу "Управляющая строительная компания "Новый город" (далее – ответчик) о взыскании пени в размере 599 542,79 руб., расходов по оказанию юридических услуг в размере 35 000 руб. 

Определением 19.05.2020 исковое заявление принято к производству суда в порядке упрощенного производства.

Определением от 16.06.2020 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

Представитель истца настаивала на требовании по основаниям, приведенным в исковом заявлении и дополнительных пояснениях.

Представитель ответчика требование не признала по изложенным в отзыве на исковое заявление и дополнительных пояснениях основаниям.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Между обществом с ограниченной ответственностью "Сервисная компания "Колибри" (и акционерному обществу "Управляющая строительная компания "Новый город" заключены договоры от 10.04.2017 № УСК-54, от 19.05.2017 № УСК-81, от 24.05.2017 № УСК-83/2, от 17.04.2018 № 17-СР, от 19.06.2018 № УСК-126, от 20.06.2018 № УСК-133, от 26.09.2018 № 47, от 08.10.2018 № 49, от 21.08.2019 № 83.

Согласно пункту 1.1 договора № УСК-54 в период действия договора заказчик поручает, в исполнитель обязуется оказывать клининговые услуги и выполнять работы в соответствии с поданными заказчиком заявками, на условиях договора на следующем объекте – "Жилой дом № 2" инженерное обеспечение, комплекса многоэтажных жилых домов жилого района "Мичуринский" в Кировском районе г. Красноярска", расположенного по адресу: г. Красноярск, Кировский район, ул. Кутузова.

На основании пункта 1.2 договора № УСК-54 конкретный перечень, характеристики, количество, объем, иена, общая стоимость, дата начала и срок окончания работ, порядок оплаты и иные необходимые данные согласовываются сторонами в приложениях, которые оформляются письменно, вступают в силу с момента их подписания сторонами и являются неотъемлемой частью договора.

В силу пункта 3.1 договора № УСК-54 оплата работ производятся заказчиком в порядке, предусмотренном приложением на данные виды работ, на основании выставленного исполнителем счета.

В соответствии с пунктом 3.2 договора № УСК-54 заказчик производит оплату в соответствии с порядком, указанным в приложениях, являющихся неотъемлемой частью договора.

В случае задержки заказчиком окончательного расчета исполнитель вправе письменно потребовать от заказчика выплаты пени в размере 0,05% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки (пункт 4.2 договора № УСК-54).

Согласно пункту 1.1 договора № УСК-81 в период действия договора заказчик поручает, а исполнитель обязуется оказывать клининговые услуги и выполнять работы в соответствии с поданными заказчиком заявками, на условиях договора на следующем объекте - Жилой дом с подземной автопарковками и нежилыми помещениями инженерное обеспечение по ул. Пушкина, 32 в т. Красноярска (корпус №1, №2), расположенный по адресу: г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. Пушкина, 32.

На основании пункта 1.2 договора № УСК-81 конкретный перечень, характеристики, количество, объем, иена, общая стоимость, дата начала и срок окончания работ, порядок оплаты и иные необходимые данные согласовываются сторонами в приложениях, которые оформляются письменно, вступают в силу с момента их подписания сторонами и являются неотъемлемой частью договора.

В силу пункта 3.1 договора № УСК-81 оплата работ производятся заказчиком в порядке, предусмотренном приложением на данные виды работ, на основании выставленного исполнителем счета.

В соответствии с пунктом 3.2 договора № УСК-81 заказчик производит оплату в соответствии с порядком, указанным в приложениях, являющихся неотъемлемой частью договора.

В случае задержки заказчиком окончательного расчета исполнитель вправе письменно потребовать от заказчика выплаты пени в размере 0,05% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки (пункт 4.2 договора № УСК-81).

Согласно пункту 1.1 договора № УСК-83/2 в период действия договора заказчик поручает, а исполнитель обязуется оказывать клининговые услуги и выполнять работы в соответствии с поданными заказчиком заявками, на условиях договора на объекте, расположенном по адресу: г. Красноярск, пр. имени газеты Красноярский рабочий, 160, стр. 19, пом.21.

На основании пункта 1.2 договора № УСК-83/2 конкретный перечень, характеристики, количество, объем, иена, общая стоимость, дата начала и срок окончания работ, порядок оплаты и иные необходимые данные согласовываются сторонами в приложениях, которые оформляются письменно, вступают в силу с момента их подписания сторонами и являются неотъемлемой частью договора.

В силу пункта 3.1 договора № УСК-83/2 оплата работ производятся заказчиком в порядке, предусмотренном приложением на данные виды работ, на основании выставленного исполнителем счета.

В соответствии с пунктом 3.2 договора № УСК-83/2 заказчик производит оплату в соответствии с порядком, указанным в приложениях, являющихся неотъемлемой частью договора.

В случае задержки заказчиком окончательного расчета исполнитель вправе письменно потребовать от заказчика выплаты пени в размере 0,05% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки (пункт 4.2 договора № УСК-83/2).

Согласно пункту 1.1 договора № 17-СР в период действия договора заказчик поручает, а исполнитель обязуется оказывать услуги и выполнять работы в соответствии с поданными в письменном виде заказчиком заявками на условиях договора на площадке, расположенной по адресу бытовой городок зданий № 12,15,16, 17(I)-(II) этап, третьей очереди строительства комплекса многоэтажных жилых домов на территории бывшей промышленной зоны "Судостроительного Завода им. Г.Т. Побежимова" в г. Красноярске, по адресу: г. Красноярск, Свердловский район, пр-т имени газеты "Красноярский рабочий", 160.

На основании пункта 1.2 договора № 17-СР конкретный перечень, характеристики, количество, объем, иена, общая стоимость, дата начала и срок окончания работ, порядок оплаты и иные необходимые данные согласовываются сторонами в приложениях, которые оформляются письменно, вступают в силу с момента их подписания сторонами и являются неотъемлемой частью договора.

В силу пункта 3.1 договора № 17-СР оплата работ производятся заказчиком в порядке, предусмотренном приложением на данные виды работ, на основании выставленного исполнителем счета.

В соответствии с пунктом 3.2 договора № 17-СР заказчик производит оплату в соответствии с порядком, указанным в приложениях, являющихся неотъемлемой частью договора.

В случае задержки заказчиком окончательного расчета исполнитель вправе письменно потребовать от заказчика выплаты пени в размере 0,05% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки (пункт 4.2 договора № 17-СР).

Согласно пункту 1.1 договора № УСК-126 в период действия договора заказчик поручает, а исполнитель обязуется оказывать клининговые услуги и выполнять работы в соответствии с поданными заказчиком заявками на условиях договора на следующем объекте - Здание №12, инженерного обеспечения третьей очереди строительства комплекса многоэтажных жилых домов на территории бывшей промышленной зоны ООО "Судостроительный завод им, Г.Т. Побежимова в г. Красноярске" по адресу: г. Красноярск, проспект имени газеты "Красноярский рабочий", 160.

На основании пункта 1.2 договора № УСК-126 конкретный перечень, характеристики, количество, объем, иена, общая стоимость, дата начала и срок окончания работ, порядок оплаты и иные необходимые данные согласовываются сторонами в приложениях, которые оформляются письменно, вступают в силу с момента их подписания сторонами и являются неотъемлемой частью договора.

В силу пункта 3.1 договора № УСК-126 оплата работ производятся заказчиком в порядке, предусмотренном приложением на данные виды работ, на основании выставленного исполнителем счета.

В соответствии с пунктом 3.2 договора № УСК-126 заказчик производит оплату в соответствии с порядком, указанным в приложениях, являющихся неотъемлемой частью договора.

В случае задержки заказчиком окончательного расчета исполнитель вправе письменно потребовать от заказчика выплаты пени в размере 0,05% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки (пункт 4.2 договора № УСК-126).

Согласно пункту 1.1 договора № УСК-133 в период действия договора заказчик поручает, а исполнитель обязуется оказывать клининговые услуги и выполнять работы в соответствии с поданными заказчиком заявками, на условиях договора на следующем объекте - нежилые помещения № 263-266, расположенные по адресу: 

<

...>.

На основании пункта 1.2 договора № УСК-133 конкретный перечень, характеристики, количество, объем, иена, общая стоимость, дата начала и срок окончания работ, порядок оплаты и иные необходимые данные согласовываются сторонами в приложениях, которые оформляются письменно, вступают в силу с момента их подписания сторонами и являются неотъемлемой частью договора.

В силу пункта 3.1 договора № УСК-133 оплата работ производятся заказчиком в порядке, предусмотренном приложением на данные виды работ, на основании выставленного исполнителем счета.

В соответствии с пунктом 3.2 договора № УСК-133 заказчик производит оплату в соответствии с порядком, указанным в приложениях, являющихся неотъемлемой частью договора.

В случае задержки заказчиком окончательного расчета исполнитель вправе письменно потребовать от заказчика выплаты пени в размере 0,05% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки (пункт 4.2 договора № УСК-133).

Согласно пункту 1.1 договора № 47 в период действия настоящего договора заказчик поручает, а исполнитель обязуется оказывать услуги и выполнять работы в соответствии с поданными в письменном виде заказчиком заявками, на условиях договора на следующем объекте – "Жилой дом № 1 (квартал 1) инженерное обеспечение, комплекса многоэтажных жилых домов жилого района "Мичуринский" в Кировском районе г. Красноярска".

На основании пункта 1.2 договора № 47 конкретный перечень, характеристики, количество, объем, иена, общая стоимость, дата начала и срок окончания работ, порядок оплаты и иные необходимые данные согласовываются сторонами в приложениях, которые оформляются письменно, вступают в силу с момента их подписания сторонами и являются неотъемлемой частью договора.

В силу пункта 3.1 договора № 47 оплата работ производятся заказчиком в порядке, предусмотренном приложением на данные виды работ, на основании выставленного исполнителем счета.

В соответствии с пунктом 3.2 договора № 47 заказчик производит оплату в соответствии с порядком, указанным в приложениях, являющихся неотъемлемой частью договора.

В случае задержки заказчиком окончательного расчета исполнитель вправе письменно потребовать от заказчика выплаты пени в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки (пункт 4.2 договора № 47).

Согласно пункту 1.1 договора № 49 в период действия договора заказчик поручает, а исполнитель обязуется оказывать услуги и выполнять работы (далее - работы), в соответствии с поданными в письменном виде заказчиком заявками на условиях договора на следующем объекте - Жилой дом № 5, инженерное обеспечение, комплекса многоэтажных жилых домов жилого района "Мичуринский" в Кировском районе г. Красноярска.

На основании пункта 1.2 договора № 49 конкретный перечень, характеристики, количество, объем, иена, общая стоимость, дата начала и срок окончания работ, порядок оплаты и иные необходимые данные согласовываются сторонами в приложениях, которые оформляются письменно, вступают в силу с момента их подписания сторонами и являются неотъемлемой частью договора.

В силу пункта 3.1 договора № 49 оплата работ производятся заказчиком в порядке, предусмотренном приложением на данные виды работ, на основании выставленного исполнителем счета.

В соответствии с пунктом 3.2 договора № 49 заказчик производит оплату в соответствии с порядком, указанным в приложениях, являющихся неотъемлемой частью договора.

В случае задержки заказчиком окончательного расчета исполнитель вправе письменно потребовать от заказчика выплаты пени в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки (пункт 4.2 договора № 49).

Согласно пункту 1.1 договора № 83 в период действия договора заказчик поручает, а исполнитель обязуется оказывать услуги и выполнять работы (далее - работы) в соответствии с поданными в письменном виде заказчиком заявками, на условиях договора на площадке, расположенной по адресу: здание № 15, инженерное обеспечение, третьей очереди строительства комплекса многоэтажных жилых домов на территории бывшей промышленной зоны "Судостроительного завода им. Г. Т. Побежимова" в г. Красноярске.

На основании пункта 1.2 договора № 83 конкретный перечень, характеристики, количество, объем, иена, общая стоимость, дата начала и срок окончания работ, порядок оплаты и иные необходимые данные согласовываются сторонами в приложениях, которые оформляются письменно, вступают в силу с момента их подписания сторонами и являются неотъемлемой частью договора.

В силу пункта 3.1 договора № 83 оплата работ производятся заказчиком в порядке, предусмотренном приложением на данные виды работ, на основании выставленного исполнителем счета.

В соответствии с пунктом 3.2 договора № 83 заказчик производит оплату в соответствии с порядком, указанным в приложениях, являющихся неотъемлемой частью договора.

В случае задержки заказчиком окончательного расчета исполнитель вправе письменно потребовать от заказчика выплаты пени в размере 0,05% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки (пункт 4.2 договора № 83).

Спецификациями к договорам предусмотрены следующие условия оказания и оплаты услуг: 

1/ по договору № УСК-54

спецификация № 1 на сумму 61 836,00 руб.

платеж по договору производится заказчиком в размере 61 836,00 руб., НДС не облагается, на расчетный счет исполнителя после выполнения работ и подписания акта выполненных работ в течение 3-х рабочих дней,

время проведения работ с 10.04.2017 по 30.04.2017,

спецификация № 2 на сумму 390 442,00 руб.

платеж по договору производится заказчиком 100% предоплаты в размере 390 442,00 руб., НДС не облагается, на расчетный счет исполнителя во время выполнения работ,

срок проведения работ с 10.04.2017 по 14.04.2017,

спецификация № 3 на сумму 386 076,00 руб.

платеж по договору производится заказчиком 100% предоплаты в размере 386 076,00 руб., НДС не облагается, на расчетный счет исполнителя во время выполнения работ,

срок проведения работ с 02.05.2017 по 14.05.2017,

спецификация № 4 на сумму 420 871,00 руб.

платеж по договору производится заказчиком 100% предоплаты в размере 420 871,00 руб., НДС не облагается, на расчетный счет исполнителя во время выполнения работ,

срок проведения работ с 15.05.2017 по 30.06.2017,

спецификация № 5 на сумму 236 440,00 руб.

платеж по договору производится заказчиком 100% предоплаты в размере 236 440,00 руб., НДС не облагается, на расчетный счет исполнителя во время выполнения работ,

срок проведения работ с 16.05.2017 по 23.05.2017,

спецификация № 6 на сумму 416 383,00 руб.

платеж по договору производится заказчиком 100% предоплаты в размере 416 383,00 руб., НДС не облагается, на расчетный счет исполнителя во время выполнения работ (пункт 3.1),

срок проведения работ с 24.05.2017 по 29.05.2017,

спецификация № 7 на сумму 431 840,00 руб.

платеж по договору производится заказчиком 100% предоплаты в размере 431 840,00 руб., НДС не облагается, на расчетный счет исполнителя во время выполнения работ,

срок проведения работ с 30.05.2017 по 04.06.2017,

спецификация № 8 на сумму 562 036,00 руб.

платеж по договору производится заказчиком 100% предоплаты в размере 562 036,00 руб., НДС не облагается, на расчетный счет исполнителя во время выполнения работ,

срок проведения работ с 05.06.2017 по 12.06.2017,

2/ по договору № УСК-81

спецификация № 1 на сумму 37 621,05 руб.

платеж по договору производится заказчиком в размере 37 621,05 руб., НДС не облагается, на расчетный счет исполнителя после выполнения работ и подписания акта выполненных работ в течение 3-х рабочих дней,

срок проведения работ с 05.06.2017 по 12.06.2017,

спецификация № 2 на сумму 62 835,00 руб.

платеж по договору производится заказчиком 100% предоплаты в размере 62 835,00 руб., НДС не облагается, на расчетный счет исполнителя во время выполнения работ,

срок проведения работ с 22.05.2017 по 01.07.2017,

спецификация № 3 на сумму 317 547,00 руб.

платеж по договору производится заказчиком 100% предоплаты в размере 317 547,00 руб., НДС не облагается, на расчетный счет исполнителя во время выполнения работ,

срок проведения работ с 22.07.2017 по 31.07.2017,

спецификация № 5 на сумму 134 847,00 руб.

платеж по договору производится заказчиком 100% предоплаты в размере 134 847,00 руб., НДС не облагается, на расчетный счет исполнителя во время выполнения работ,

срок проведения работ с 01.08.2017 по 15.08.2017,

спецификация № 6 на сумму 297 058,00 руб.

платеж по договору производится заказчиком 100% предоплаты в размере 297 058,00 руб., НДС не облагается, на расчетный счет исполнителя во время выполнения работ,

срок проведения работ с 16.08.2017 по 31.08.2017,

спецификация № 7 на сумму 305 450,00 руб.

платеж по договору производится заказчиком 100% предоплаты в размере 305 450,00 руб., НДС не облагается, на расчетный счет исполнителя во время выполнения работ,

срок проведения работ с 02.07.2017 по 31.07.2017,

3/ по договору № УСК-83/2

спецификация № 1 на сумму 11 672,50 руб.

платеж по договору производится заказчиком 100% предоплаты в размере 11 672,50 руб., НДС не облагается, на расчетный счет исполнителя во время выполнения работ,

срок проведения работ с 25.05.2017 по 26.05.2017,

спецификация № 3 на сумму 15 660,00 руб. 

платеж по договору производится заказчиком 100% предоплаты в размере 15 660,00 руб., НДС не облагается, на расчетный счет исполнителя во время выполнения работ,

срок проведения работ с 01.03.2018 по 02.03.2018,

спецификация № 4 на сумму 20 010,00 руб.

платеж по договору производится заказчиком 100% предоплаты в размере 20 010,00 руб., НДС не облагается, на расчетный счет исполнителя во время выполнения работ,

срок проведения работ 27.04.2018, 28.04.2018, 03.05.2018,

спецификация № 5 на сумму 20 010,00 руб.

платеж по договору производится заказчиком 100% предоплаты в размере 20 010,00 руб., НДС не облагается, на расчетный счет исполнителя во время выполнения работ,

срок проведения работ с 06.06.2018, 07.06.2018, 08.06.2018,

спецификация № 6 на сумму 20 010,00 руб.

платеж по договору производится заказчиком 100% предоплаты в размере 20 010,00 руб., НДС не облагается, на расчетный счет исполнителя во время выполнения работ,

срок проведения работ с 25.07.2018 по 26.07.2018,

спецификация № 7 на сумму 20 010,00 руб.

платеж по договору производится заказчиком 100% предоплаты в размере 20 010,00 руб., НДС не облагается, на расчетный счет исполнителя во время выполнения работ,

срок проведения работ с 16.10.2018 по 17.10.2018,

спецификация № 8 на сумму 20 010,00 руб.

платеж по договору производится заказчиком 100% предоплаты в размере 20 010,00 руб., НДС не облагается, на расчетный счет исполнителя во время выполнения работ,

срок проведения работ с 05.03.2019 по 06.03.2019,

4/ по договору № 17-СР

спецификация от 17.04.2018 № 1 

порядок и сроки оплаты: после выполнения работ, подписания акта сдачи-приемки платеж по договору производится заказчиком в 100% оплате на расчетный счет исполнителя в течение 3-х календарных дней;

срок выполнения работ с 18.04.2018 по 21.04.2018,

спецификация от 27.05.2019 № 2 

порядок и сроки оплаты: после выполнения работ, подписания акта сдачи-приемки платеж по договору производится заказчиком в 100% оплате на расчетный счет исполнителя в течение 3-х календарных дней;

срок выполнения работ с 01.06.2019 по 30.06.2019,

5/ по договору № УСК-126

спецификация сумму 60 307,75 руб.

порядок и сроки оплаты: после выполнения работ, подписания акта сдачи-приемки платеж по договору производится заказчиком в 100% оплате на расчетный счет исполнителя в течение 3-х календарных дней;

срок выполнения работ с 25.06.2018 по 02.07.2018,

6/ по договору № УСК-133

спецификация на сумму 9 000,00 руб.

порядок и сроки оплаты: после выполнения работ, подписания акта сдачи-приемки платеж по договору производится заказчиком в 100% оплате на расчетный счет исполнителя в течение 3-х календарных дней;

срок выполнения работ с 21.06.2018 по 23.06.2018,

спецификация на сумму 39 900,00 руб.

порядок и сроки оплаты: после выполнения работ, подписания акта сдачи-приемки платеж по договору производится заказчиком в 100% оплате на расчетный счет исполнителя в течение 3-х календарных дней;

срок выполнения работ с 30.07.2018 по 03.08.2018,

спецификация на сумму 27 322,00 руб.

порядок и сроки оплаты: после выполнения работ, подписания акта сдачи-приемки платеж по договору производится заказчиком в 100% оплате на расчетный счет исполнителя в течение 3-х календарных дней;

срок выполнения работ 10.11.2018,

7/ по договору № 47

спецификация на сумму 110 152,51 руб.

порядок и сроки оплаты: после выполнения работ, подписания акта сдачи-приемки платеж по договору производится заказчиком в 100% оплате на расчетный счет исполнителя в течение 3-х календарных дней;

срок выполнения работ с 01.10.2018 по 31.10.2018,

8/ по договору № 49

спецификация на сумму 76 804,10 руб.

порядок и сроки оплаты: после выполнения работ, подписания акта сдачи-приемки платеж по договору производится заказчиком в 100% оплате на расчетный счет исполнителя в течение 3-х календарных дней;

срок выполнения работ с 01.10.2018 по 31.10.2018,

9/ по договору №83

спецификация на сумму 71 233,50 руб.

платеж по договору производится заказчиком после подписания акта сдачи-приемки работ в размере 71 233,50 руб., НДС не облагается, на расчетный счет исполнителя после выполнения работ в течение 3-х рабочих дней; оплата услуг специальной техники оплачивается в течение 3-х рабочих дней с момента подписания акта о приеме оказанных услуг;

срок выполнения работ с 26.08.2019 по 30.08.2019.

Исполнитель подписал в одностороннем порядке 

1/ по договору № УСК-54

акты от 06.06.2017 № 325 на сумму 61 836,00 руб., от 03.05.2017 № 225 на сумму 390 442,00 руб., от 07.06.2017 № 329 на сумму 386 076,00 руб., от 07.06.2017 № 330 на сумму 420 871,00 руб., от 07.06.2017 № 331 на сумму 236 440,00 руб., от 30.05.2017 № 240 на сумму 416 383,00 руб., от 06.06.2017 № 277 на сумму 431 840,00 руб., от 06.06.2017 № 278 на сумму 562 036,00 руб., 

2/ по договору № УСК-81

акты от 31.07.2017 № 384 на сумму 37 621,05 руб., от 31.07.2017 № 387 на сумму 62 835,00 руб., от 31.07.2017 № 382 на сумму 317 547,00 руб., от 17.08.2017 № 408 на сумму 354 684,00 руб., от 17.08.2017 № 410 на сумму 134 847,00 руб., от 17.08.2017 № 420 на сумму 297 058,00 руб., от 31.07.2017 № 388 на сумму 305 450,00 руб., 

3/ по договору № УСК83/2

акт от 31.05.2017 № 283 на сумму 11 672,50 руб.

Сторонами подписаны

1/ по договору № УСК-83/2 

акты от 01.03.2018 № 83 на сумму 15 660,00 руб., от 03.05.2018 № 178 на сумму 20 010,00 руб., от 09.06.2018 № 222 на сумму 20 010,00 руб., от 26.07.2018 № 275 на сумму 20 010,00 руб., от 17.10.2018 № 379 на сумму 20 010,00 руб., от 06.03.2019 № 34 на сумму 20 010,00 руб., 

2/ по договору № 17-СР

акты от 03.05.2018 № 177 на сумму 54 700,00 руб., от 31.05.2018 № 208 на сумму 26 500,00 руб., от 07.06.2018 № 135 на сумму 75 850,00 руб., 

3/ по договору № УСК-126

акт от 18.07.2018 № 268 на сумму 60 307,75 руб., 

4/ по договору № УСК-133

акты от 19.07.2018 № 269 на сумму 9 000,00 руб., от 12.11.2018 № 419 на сумму 39 900,00 руб., от 12.11.2018 № 420 на сумму 27 322,00 руб., 

5/ по договору № 47

акт от 10.12.2018 № 448 на сумму 110 152,51 руб., 

6/ по договору № 49

акт от 29.11.2018 № 429 на сумму 76 804,10 руб.,

7/ по договору №83

акт от 30.08.2019 № 261 на сумму 71 233,50 руб.

Заказчик оплатил оказанные услуги по договорам с нарушением установленных в спецификациях сроков, в связи с чем исполнитель начислил неустойку в общей сумме 620 700,38 руб. (подробный расчет приведен в заявлении об увеличении исковых требований от 13.11.2020).

Сторонами подписаны акты сверки за 2016-2019 годы.

Претензией от 19.11.2019 № 374 исполнитель просил оплатить неустойку за нарушение срока оплаты услуг. Претензия направлена 19.11.2019 Почтой России (квитанция) и вручена согласно отчету об отслеживании отправления заказчику 22.11.2019.

Исполнитель письмом от 18.02.2020 № 36 просил для проведения сверки предоставить первичный документы (акты) по договорам № УКС-54, УКС-81. Письмо направлено Почтой России 18.02.2020 (квитанция).

Заказчик в ответ в письме от 28.02.2020 № 351 сообщил о невозможности предоставить запрашиваемые акты за 2016-2017 годы  в связи с истечением срока хранения первичной документации.

Исполнитель письмом от 27.03.2020 № 88 просил для восстановления документов по договорам предоставить акты выполненных работ за 2016-2017 годы по договорам № УКС-54, УКС-81, УКС-83/2. Письмо направлено Почтой России 02.04.2020 (квитанция).

Заказчик в ответ в письме от 14.04.2020 сообщил о невозможности предоставить запрашиваемые акты за 2016-2017 годы  в связи с отсутствием первичной документации, а также указал на невозможность подписания документов генеральным директором, датированных более ранней датой, чем дата его вступления в должность.

Неустойка не оплачена заказчиком до настоящего времени, что послужило основанием для обращения исполнителя в суд с иском.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему (статьи 8, 307 Гражданского кодекса Российской Федерации). На основании статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Из материалов дела следует, что между обществом с ограниченной ответственностью "Сервисная компания "Колибри" (исполнитель) и акционерным обществом "Управляющая строительная компания "Новый город" (заказчик) заключены договоры от 24.05.2017                     № УСК-83/2, от 13.09.2019 № 84, от 01.10.2019 № 90, от 11.09.2019 № 91.

Согласно пункту 1.1 договора от 24.05.2017 № УСК-83/2 в период действия договора заказчик поручает, а исполнитель обязуется оказывать клининговые услуги и выполнять работы, в соответствии в поданными заказчиком заявками, на условиях договора на объекте, расположенном но адресу: г. Красноярск, пр. имени газеты Красноярский рабочий, 160 стр. 10, пом. 21.

В силу пункта 1.1 договора от 13.09.2019 № 84 в период действия договора заказчик поручает, а исполнитель обязуется оказывать услуги и выполнять работы, в соответствии с поданными в письменном виде заказчиком заявками, на условиях договора на площадке, расположенной по адресу: Жилой дом № 1, инженерное обеспечение, комплекса многоэтажных жилых домов в Академгородке г. Красноярска. Корпус 1,1 этап строительства.

Пунктом 1.1 договора от 01.10.2019 № 90 предусмотрено, что в период действия договора заказчик поручает, а исполнитель обязуется оказывать услуги и выполнять работы, в соответствии с поданными в письменном виде заказчиком заявками, на условиях договора на площадке, расположенной по адресу: здание № 16, инженерное обеспечение, третьей очереди строительства комплекса многоэтажных жилых домов на территории бывшей промышленной зоны "Судостроительного завода им. Г.Т. Побежимова" в г. Красноярске.

В соответствии с пунктом 1.1 договора от 11.09.2019 № 91 в период действия договора заказчик поручает, а исполнитель обязуется оказывать услуги и выполнять работы, в соответствии с поданными в письменном виде заказчиком заявками, на условиях договора на площадке, расположенной по адресу: здание № 15, инженерное обеспечение, третьей очереди строительства комплекса многоэтажных жилых домов на территории бывшей промышленной зоны "Судостроительного завода им. Г.Т. Побежимова" в г. Красноярске.

Правоотношения сторон регулируются положениями главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации.    

На основании статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Согласно статье 781 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в порядке и в сроки, предусмотренные договором возмездного оказания услуг.    

В соответствии со статьей 783 Гражданского кодекса Российской Федерации общие положения о подряде (статьи 702 - 729) и положения о бытовом подряде (статьи 730 - 739) применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям   779 - 782 настоящего Кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.

В силу статей 783 и 720 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг документом, удостоверяющим приемку заказчиком услуги, оказанной исполнителем, является акт возмездного оказания услуг.

Пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме (статья 331 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Из вышеприведенных положений статей 329, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что под неустойкой законодатель понимает денежную сумму, являющуюся мерой гражданско-правовой ответственности и одним из способов обеспечения обязательств, основанием для исчисления и последующего взыскания которой является неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, в частности просрочка исполнения обязательства. Соглашение о неустойки подлежит заключению сторонами в письменной форме.

Согласно спецификациями к договорам предусмотрены следующие условия оказания и оплаты услуг: 

1/ по договору № УСК-54

спецификация № 1 на сумму 61 836,00 руб.

платеж по договору производится заказчиком в размере 61 836,00 руб., НДС не облагается, на расчетный счет исполнителя после выполнения работ и подписания акта выполненных работ в течение 3-х рабочих дней,

время проведения работ с 10.04.2017 по 30.04.2017,

спецификация № 2 на сумму 390 442,00 руб.

платеж по договору производится заказчиком 100% предоплаты в размере 390 442,00 руб., НДС не облагается, на расчетный счет исполнителя во время выполнения работ,

срок проведения работ с 10.04.2017 по 14.04.2017,

спецификация № 3 на сумму 386 076,00 руб.

платеж по договору производится заказчиком 100% предоплаты в размере 386 076,00 руб., НДС не облагается, на расчетный счет исполнителя во время выполнения работ,

срок проведения работ с 02.05.2017 по 14.05.2017,

спецификация № 4 на сумму 420 871,00 руб.

платеж по договору производится заказчиком 100% предоплаты в размере 420 871,00 руб., НДС не облагается, на расчетный счет исполнителя во время выполнения работ,

срок проведения работ с 15.05.2017 по 30.06.2017,

спецификация № 5 на сумму 236 440,00 руб.

платеж по договору производится заказчиком 100% предоплаты в размере 236 440,00 руб., НДС не облагается, на расчетный счет исполнителя во время выполнения работ,

срок проведения работ с 16.05.2017 по 23.05.2017,

спецификация № 6 на сумму 416 383,00 руб.

платеж по договору производится заказчиком 100% предоплаты в размере 416 383,00 руб., НДС не облагается, на расчетный счет исполнителя во время выполнения работ (пункт 3.1),

срок проведения работ с 24.05.2017 по 29.05.2017,

спецификация № 7 на сумму 431 840,00 руб.

платеж по договору производится заказчиком 100% предоплаты в размере 431 840,00 руб., НДС не облагается, на расчетный счет исполнителя во время выполнения работ,

срок проведения работ с 30.05.2017 по 04.06.2017,

спецификация № 8 на сумму 562 036,00 руб.

платеж по договору производится заказчиком 100% предоплаты в размере 562 036,00 руб., НДС не облагается, на расчетный счет исполнителя во время выполнения работ,

срок проведения работ с 05.06.2017 по 12.06.2017,

2/ по договору № УСК-81

спецификация № 1 на сумму 37 621,05 руб.

платеж по договору производится заказчиком в размере 37 621,05 руб., НДС не облагается, на расчетный счет исполнителя после выполнения работ и подписания акта выполненных работ в течение 3-х рабочих дней,

срок проведения работ с 05.06.2017 по 12.06.2017,

спецификация № 2 на сумму 62 835,00 руб.

платеж по договору производится заказчиком 100% предоплаты в размере 62 835,00 руб., НДС не облагается, на расчетный счет исполнителя во время выполнения работ,

срок проведения работ с 22.05.2017 по 01.07.2017,

спецификация № 3 на сумму 317 547,00 руб.

платеж по договору производится заказчиком 100% предоплаты в размере 317 547,00 руб., НДС не облагается, на расчетный счет исполнителя во время выполнения работ,

срок проведения работ с 22.07.2017 по 31.07.2017,

спецификация № 5 на сумму 134 847,00 руб.

платеж по договору производится заказчиком 100% предоплаты в размере 134 847,00 руб., НДС не облагается, на расчетный счет исполнителя во время выполнения работ,

срок проведения работ с 01.08.2017 по 15.08.2017,

спецификация № 6 на сумму 297 058,00 руб.

платеж по договору производится заказчиком 100% предоплаты в размере 297 058,00 руб., НДС не облагается, на расчетный счет исполнителя во время выполнения работ,

срок проведения работ с 16.08.2017 по 31.08.2017,

спецификация № 7 на сумму 305 450,00 руб.

платеж по договору производится заказчиком 100% предоплаты в размере 305 450,00 руб., НДС не облагается, на расчетный счет исполнителя во время выполнения работ,

срок проведения работ с 02.07.2017 по 31.07.2017,

3/ по договору № УСК-83/2

спецификация № 1 на сумму 11 672,50 руб.

платеж по договору производится заказчиком 100% предоплаты в размере 11 672,50 руб., НДС не облагается, на расчетный счет исполнителя во время выполнения работ,

срок проведения работ с 25.05.2017 по 26.05.2017,

спецификация № 3 на сумму 15 660,00 руб. 

платеж по договору производится заказчиком 100% предоплаты в размере 15 660,00 руб., НДС не облагается, на расчетный счет исполнителя во время выполнения работ,

срок проведения работ с 01.03.2018 по 02.03.2018,

спецификация № 4 на сумму 20 010,00 руб.

платеж по договору производится заказчиком 100% предоплаты в размере 20 010,00 руб., НДС не облагается, на расчетный счет исполнителя во время выполнения работ,

срок проведения работ 27.04.2018, 28.04.2018, 03.05.2018,

спецификация № 5 на сумму 20 010,00 руб.

платеж по договору производится заказчиком 100% предоплаты в размере 20 010,00 руб., НДС не облагается, на расчетный счет исполнителя во время выполнения работ,

срок проведения работ с 06.06.2018, 07.06.2018, 08.06.2018,

спецификация № 6 на сумму 20 010,00 руб.

платеж по договору производится заказчиком 100% предоплаты в размере 20 010,00 руб., НДС не облагается, на расчетный счет исполнителя во время выполнения работ,

срок проведения работ с 25.07.2018 по 26.07.2018,

спецификация № 7 на сумму 20 010,00 руб.

платеж по договору производится заказчиком 100% предоплаты в размере 20 010,00 руб., НДС не облагается, на расчетный счет исполнителя во время выполнения работ,

срок проведения работ с 16.10.2018 по 17.10.2018,

спецификация № 8 на сумму 20 010,00 руб.

платеж по договору производится заказчиком 100% предоплаты в размере 20 010,00 руб., НДС не облагается, на расчетный счет исполнителя во время выполнения работ,

срок проведения работ с 05.03.2019 по 06.03.2019,

4/ по договору № 17-СР

спецификация от 17.04.2018 № 1 

порядок и сроки оплаты: после выполнения работ, подписания акта сдачи-приемки платеж по договору производится заказчиком в 100% оплате на расчетный счет исполнителя в течение 3-х календарных дней;

срок выполнения работ с 18.04.2018 по 21.04.2018,

спецификация от 27.05.2019 № 2 

порядок и сроки оплаты: после выполнения работ, подписания акта сдачи-приемки платеж по договору производится заказчиком в 100% оплате на расчетный счет исполнителя в течение 3-х календарных дней;

срок выполнения работ с 01.06.2019 по 30.06.2019,

5/ по договору № УСК-126

спецификация сумму 60 307,75 руб.

порядок и сроки оплаты: после выполнения работ, подписания акта сдачи-приемки платеж по договору производится заказчиком в 100% оплате на расчетный счет исполнителя в течение 3-х календарных дней;

срок выполнения работ с 25.06.2018 по 02.07.2018,

6/ по договору № УСК-133

спецификация на сумму 9 000,00 руб.

порядок и сроки оплаты: после выполнения работ, подписания акта сдачи-приемки платеж по договору производится заказчиком в 100% оплате на расчетный счет исполнителя в течение 3-х календарных дней;

срок выполнения работ с 21.06.2018 по 23.06.2018,

спецификация на сумму 39 900,00 руб.

порядок и сроки оплаты: после выполнения работ, подписания акта сдачи-приемки платеж по договору производится заказчиком в 100% оплате на расчетный счет исполнителя в течение 3-х календарных дней;

срок выполнения работ с 30.07.2018 по 03.08.2018,

спецификация на сумму 27 322,00 руб.

порядок и сроки оплаты: после выполнения работ, подписания акта сдачи-приемки платеж по договору производится заказчиком в 100% оплате на расчетный счет исполнителя в течение 3-х календарных дней;

срок выполнения работ 10.11.2018,

7/ по договору № 47

спецификация на сумму 110 152,51 руб.

порядок и сроки оплаты: после выполнения работ, подписания акта сдачи-приемки платеж по договору производится заказчиком в 100% оплате на расчетный счет исполнителя в течение 3-х календарных дней;

срок выполнения работ с 01.10.2018 по 31.10.2018,

8/ по договору № 49

спецификация на сумму 76 804,10 руб.

порядок и сроки оплаты: после выполнения работ, подписания акта сдачи-приемки платеж по договору производится заказчиком в 100% оплате на расчетный счет исполнителя в течение 3-х календарных дней;

срок выполнения работ с 01.10.2018 по 31.10.2018,

9/ по договору №83

спецификация на сумму 71 233,50 руб.

платеж по договору производится заказчиком после подписания акта сдачи-приемки работ в размере 71 233,50 руб., НДС не облагается, на расчетный счет исполнителя после выполнения работ в течение 3-х рабочих дней; оплата услуг специальной техники оплачивается в течение 3-х рабочих дней с момента подписания акта о приеме оказанных услуг;

срок выполнения работ с 26.08.2019 по 30.08.2019.

Истец подписал в одностороннем порядке 

1/ по договору № УСК-54

акты от 06.06.2017 № 325 на сумму 61 836,00 руб., от 03.05.2017 № 225 на сумму 390 442,00 руб., от 07.06.2017 № 329 на сумму 386 076,00 руб., от 07.06.2017 № 330 на сумму 420 871,00 руб., от 07.06.2017 № 331 на сумму 236 440,00 руб., от 30.05.2017 № 240 на сумму 416 383,00 руб., от 06.06.2017 № 277 на сумму 431 840,00 руб., от 06.06.2017 № 278 на сумму 562 036,00 руб., 

2/ по договору № УСК-81

акты от 31.07.2017 № 384 на сумму 37 621,05 руб., от 31.07.2017 № 387 на сумму 62 835,00 руб., от 31.07.2017 № 382 на сумму 317 547,00 руб., от 17.08.2017 № 408 на сумму 354 684,00 руб., от 17.08.2017 № 410 на сумму 134 847,00 руб., от 17.08.2017 № 420 на сумму 297 058,00 руб., от 31.07.2017 № 388 на сумму 305 450,00 руб., 

3/ по договору № УСК-83/2

акт от 31.05.2017 № 283 на сумму 11 672,50 руб.

Сторонами подписаны

1/ по договору № УСК-83/2 

акты от 01.03.2018 № 83 на сумму 15 660,00 руб., от 03.05.2018 № 178 на сумму 20 010,00 руб., от 09.06.2018 № 222 на сумму 20 010,00 руб., от 26.07.2018 № 275 на сумму 20 010,00 руб., от 17.10.2018 № 379 на сумму 20 010,00 руб., от 06.03.2019 № 34 на сумму 20 010,00 руб., 

2/ по договору № 17-СР

акты от 03.05.2018 № 177 на сумму 54 700,00 руб., от 31.05.2018 № 208 на сумму 26 500,00 руб., от 07.06.2018 № 135 на сумму 75 850,00 руб., 

3/ по договору № УСК-126

акт от 18.07.2018 № 268 на сумму 60 307,75 руб., 

4/ по договору № УСК-133

акты от 19.07.2018 № 269 на сумму 9 000,00 руб., от 12.11.2018 № 419 на сумму 39 900,00 руб., от 12.11.2018 № 420 на сумму 27 322,00 руб., 

5/ по договору № 47

акт от 10.12.2018 № 448 на сумму 110 152,51 руб., 

6/ по договору № 49

акт от 29.11.2018 № 429 на сумму 76 804,10 руб.,

7/ по договору №83

акт от 30.08.2019 № 261 на сумму 71 233,50 руб.

Ответчик оплатил оказанные услуги по договорам с нарушением установленных в спецификациях сроков, в связи с чем исполнитель начислил неустойку в общей сумме 620 700,38 руб. (подробный расчет приведен в заявлении об увеличении исковых требований от 13.11.2020).

Ответчиком в отношении подписанных истцом в одностороннем порядке актов (пункты 1-18 расчета неустойки истца в заявлении об увеличении исковых требований от 13.11.2020), а также подписанного сторонами акта от 03.05.2018 № 177 по договору № 17-СР (пункт 25 расчета неустойки истца в заявлении об увеличении исковых требований от 13.11.2020), ссылаясь на документальную неподтвержденность требования первичными документами, поскольку акты не подписаны ответчиком, не идентифицируются со спецификацией (подробные доводы ответчиком приведены в таблице, приобщенной судом к материалам дела 16.11.2020), акт от 03.05.2018 № 177 – не идентифицируется с договором, с платежным поручением, неизвестно на какой объект строительства составлен, спецификация отсутствует.

Фактически ответчиком заявлен довод о документальной неподтвержденности факта оказания услуг в отсутствие подписанных сторонами актов оказанных услуг.

Суд считает данный довод несостоятельным.

Истец пояснил, что предоставленные в материалы дела акты, подписанные им в одностороннем порядке, ранее были подписаны ответчиком; истец в досудебном порядке запрашивал у ответчика копии актов; ответчик сообщил о невозможности предоставить запрашиваемые акты за 2017 год  в связи с истечением срока хранения первичной документации, а также указал на невозможность подписания документов генеральным директором, датированных более ранней датой, чем дата его вступления в должность. Истцом в материалы дела представлена переписка сторон.

Как усматривается из материалов дела, в ходе досудебной переписки сторон факт оказания услуг ответчиком не оспаривался, оказанные услуги полностью оплачены ответчиком. 

Более того, сторонами подписаны акты сверки за 2016-2019 годы. В акте сверки за 2017 год имеются ссылки спорные на первичные документы (акты оказанных услуг), подписанные исполнителем в одностороннем порядке, которые совпадают по датам и сумма оказанных услуг с актами, представленными истцом. При подписании акта сверки за 2017 год для ответчика отсутствовала неопределенность относительно того, какие обязательства у него имеются. Ответчик не представил доказательств существования иных правоотношений с истцом в рамках указанных в акте сверки сведений. Акт сверки, отражающий сведения о спорных актах, оформленных в 2017 году, принимается судом в качестве надлежащего доказательства подтверждающего факт наличия актов и наличия сведений об актах у ответчика. Судом также учтено, что оказанные услуги полностью оплачены ответчиком. Факты подписания актов сверки за 2016-2019 годы и оплаты оказанных услуг ответчиком в ходе судебного разбирательства не оспаривались.

Кроме того, следует учитывать, что истцом представлены согласованные представителем ответчика (отметка на актах) промежуточные акты оказанных услуг от 31.07.2017 на сумму 62 835,00 руб. (к акту от 31.07.2017 № 387 по договору № УСК-81), от 31.07.2017 на сумму 317 547,00 руб. (к акту от 31.07.2017 № 382 по договору № УСК-81), от 17.08.2017 на сумму 134 847,00 руб. (к акту от 17.08.2017 № 410 по договору № УСК-81), от 17.08.2017 на сумму 297 058,00 руб. (к акту от 17.08.2017 № 420 по договору № УСК-81), от 31.07.2017 на сумму 305 450,00 руб. (к акту от 31.07.2017 № 388 по договору № УСК-81). Промежуточные акты содержат виды, объем и стоимость оказанных услуг.

В части подписанных сторонами актов оказанных услуг (по договору № УСК-83/2: акты от 01.03.2018 № 83 на сумму 15 660,00 руб., от 03.05.2018 № 178 на сумму 20 010,00 руб., от 09.06.2018 № 222 на сумму 20 010,00 руб., от 26.07.2018 № 275 на сумму 20 010,00 руб., от 17.10.2018 № 379 на сумму 20 010,00 руб., от 06.03.2019 № 34 на сумму 20 010,00 руб. (пункты 19-24 расчета неустойки истца в заявлении об увеличении исковых требований от 13.11.2020) ответчиком приведен контррасчет неустойки, поскольку, по мнению ответчика, при определении срока оплаты услуг подлежит применению разумный срок исполнения обязательства (статья 314 Гражданского кодекса Российской Федерации), в связи с тем, что исполнителем в нарушение условий договоров не выставлены счета на оплату.

Суд отклоняет данный довод ответчика, так как по условиям спорных договоров заказчик производит оплату в соответствии с порядком, указанным в приложениях, являющихся неотъемлемой частью договора. Спецификации к договору № УСК-83/2 содержат условие о внесении заказчиком 100% предоплаты на расчетный счет исполнителя во время выполнения работ; в спецификациях установлен срок выполнения работ. Следовательно, сторонами согласовано условие о сроке внесения предоплаты, основания для применения разумного срока, установленного статьей 314 Гражданского кодекса Российской Федерации, отсутствуют. При этом невыставление счетов на оплату правового значения не имеет, поскольку ответчик обладал достаточной информацией о размере и сроке внесения предоплаты за услуги.

Ответчик частично признал требование о взыскании неустойки по подписанным сторонами актам (пункты 26-34 расчета неустойки истца в заявлении об увеличении исковых требований от 13.11.2020), в том числе:

по договору № 17-СР

акты от 31.05.2018 № 208 на сумму 26 500,00 руб., от 07.06.2018 № 135 на сумму 75 850,00 руб., 

по договору № УСК-126

акт от 18.07.2018 № 268 на сумму 60 307,75 руб., 

по договору № УСК-133

акты от 19.07.2018 № 269 на сумму 9 000,00 руб., от 12.11.2018 № 419 на сумму 39 900,00 руб., от 12.11.2018 № 420 на сумму 27 322,00 руб., 

по договору № 47

акт от 10.12.2018 № 448 на сумму 110 152,51 руб., 

по договору № 49

акт от 29.11.2018 № 429 на сумму 76 804,10 руб.,

по договору №83

акт от 30.08.2019 № 261 на сумму 71 233,50 руб.

Общая сумма неустойки, начисление которой не оспорено ответчиком, составляет 85 116,74 руб.

Суд, проверив расчет неустойки, установил 

отсутствие оснований для взыскания неустойки по односторонним актам от 06.06.2017 № 135 по договору № УСК-54 в размере 4 390,36 руб., начисленной с 13.06.2017 по 01.11.2017, от 31.07.2017 № 384 по договору № УСК-81 в размере 5 511,48 руб., начисленной с 04.08.2017 по 23.05.2018, поскольку по условиям в спецификаций к договорам оплата должна быть произведена в речение 3-х дней после выполнения работ и подписания акта, при этом в материалах дела не содержится доказательств, подтверждающих дата вручения акта, что не позволяет определить дату начала периода просрочки;

отсутствие оснований для взыскания неустойки по одностороннему акту от 17.08.2017 № 408 по договору № УСК-81 в размере 49 655,76 руб., начисленной с 17.08.2017 по 23.05.2018, поскольку в нарушение условий договора истцом не представлена спецификация, подтверждающая наличие волеизъявления ответчика на оказание услуг,  

неверное определение дат начала периодов начисления неустойки в расчете неустойки истца в заявлении об увеличении исковых требований от 13.11.2020.

С ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка исходя из следующего расчета:

по договору № УСК-54

акт от 03.05.2017 № 225 на сумму 390 442,00 руб. (по спецификации оплата путем внесения предоплаты во время выполнения работ, время проведения работ с 10.04.2017 по 14.04.2017, то есть оплата до 14.04.2017)

с 03.05.2017 по 05.06.2017: 390 442,00 руб. х 0,05% х 34 дня = 6 637,51 руб.,

с 06.06.2017 по 28.09.2017: 90 442,00 руб. х 0,05% х 115 дней = 5 200,42 руб.,

акт от 07.06.2017 № 329 на сумму 386 076,00 руб. (по спецификации оплата путем внесения предоплаты во время выполнения работ, время проведения работ с 02.05.2017 по 14.05.2017, то есть оплата до 14.05.2017)

с 07.06.2017 по 01.11.2017: 386 076,00 руб. х 0,05% х 148 дней = 28 569,62 руб.,

акт от 07.06.2017 № 330 на сумму 420 871,00 руб. (по спецификации оплата путем внесения предоплаты во время выполнения работ, время выполнения работ по спецификации с 15.05.2017 по 30.06.2017, фактически услуги окончены 07.06.2017, поскольку акт датирован 07.06.2017 (ответчиком дата окончания оказания услуг подтверждена путем подписания акта сверки))

с 08.06.2017 по 01.11.2017: 420 871,00 руб. х 0,05% х 147 дней = 30 933,21 руб.,

акт от 07.06.2017 № 331 на сумму 236 440,00 руб. (по спецификации оплата путем внесения предоплаты во время выполнения работ, время проведения работ с 16.05.2017 по 23.05.2017, то есть оплата до 23.05.2017)

с 07.06.2017 по 23.05.2018: 236 440,00 руб. х 0,05% х 351 день = 41 495,22 руб.,

акт от 30.05.2017 № 240 на сумму 416 383,00 руб. (по спецификации оплата путем внесения предоплаты во время выполнения работ, время проведения работ с 24.05.2017 по 29.05.2017, то есть оплата до 29.05.2017)

с 30.05.2017 по 28.09.2017: 416 383,00 руб. х 0,05% х 122 дня = 25 399,36 руб.,

с 29.09.2017 по 23.05.2018: 6 825,00 руб. х 0,05% х 237 дней = 808,76 руб.,

акт от 06.06.2017 № 277 на сумму 431 840,00 руб. (по спецификации оплата путем внесения предоплаты во время выполнения работ, время проведения работ с 30.05.2017 по 04.06.2017, то есть оплата до 04.06.2017)

с 06.06.2017 по 01.11.2017: 431 840,00 руб. х 0,05% х 149 дней = 32 172,08 руб.,

с 02.11.2017 по 23.05.2018: 300 623,00 руб. х 0,05% х 203 дня = 30 513,23 руб.,

акт от 06.06.2017 № 278 на сумму 562 036,00 руб. (по спецификации оплата путем внесения предоплаты во время выполнения работ, время выполнения работ по спецификации с 05.06.2017 по 12.06.2017, фактически услуги окончены 06.06.2017, поскольку акт датирован 06.06.2017 (ответчиком дата окончания оказания услуг подтверждена путем подписания акта сверки))

с 07.06.2017 по 23.05.2018: 562 036,00 руб. х 0,05% х 351 день = 98 634,51 руб.,

по договору № УСК-81

акт от 31.07.2017 № 387 на сумму 62 835,00 руб. (по спецификации оплата путем внесения предоплаты во время выполнения работ, время проведения работ с 22.05.2017 по 01.07.2017, то есть оплата до 01.07.2017)

с 31.07.2017 по 23.05.2015: 62 835,00 руб. х 0,05% х 297 дней = 9 331,00 руб.,

акт от 31.07.2017 № 382 на сумму 317 547,00 руб. (по спецификации оплата путем внесения предоплаты во время выполнения работ, время выполнения работ по спецификации с 22.07.2017 по 31.07.2017, фактически услуги окончены 31.07.2017, поскольку акт датирован 06.06.2017 (ответчиком дата окончания оказания услуг подтверждена путем подписания акта сверки и промежуточного акта от 31.07.2017))

с 01.08.2017 по 23.05.2018: 317 547,00 руб. х 0,05% х 26 дней = 46 995,92 руб., 

акт от 17.08.2017 № 410 на сумму 134 847,00 руб. (по спецификации оплата путем внесения предоплаты во время выполнения работ, время проведения работ с 01.08.2017 по 15.08.2017, то есть оплата до 15.08.2017)

с 17.08.2017 по 23.05.2018: 134 847,00 руб. х 0,05% х 280 дней = 18 878,58 руб.,

акт от 17.08.2017 № 420 на сумму 297 058,00 руб. (по спецификации оплата путем внесения предоплаты во время выполнения работ, время выполнения работ по спецификации с 16.08.2017 по 31.08.2017, фактически услуги окончены 17.08.2017, поскольку акт датирован 17.08.2017 (ответчиком дата окончания оказания услуг подтверждена путем подписания акта сверки и промежуточного акта от 17.08.2017))

с 18.08.2017 по 23.05.2018: 297 058,00 руб. х 0,05% х 279 дней = 41 439,59 руб.

акт от 31.07.2017 № 388 на сумму 305 450,00 руб. (по спецификации оплата путем внесения предоплаты во время выполнения работ, время выполнения работ по спецификации с 02.07.2017 по 31.07.2017, фактически услуги окончены 31.07.2017, поскольку акт датирован 31.07.2017 (ответчиком дата окончания оказания услуг подтверждена путем подписания акта сверки и промежуточного акта от 31.07.2017))

с 01.08.2017 по 23.05.2018: 305 450,00 руб. х 0,05% х 296 дней = 45 205,12 руб.,

по договору № УСК-83/2

акт от 31.05.2017 № 283 на сумму 11 672,50 руб. (по спецификации оплата путем внесения предоплаты во время выполнения работ, время проведения работ с 25.05.2017 по 26.05.2017, то есть оплата до 26.05.2017)

с 31.05.2017 по 12.06.2018: 11 672,50 руб. х 0,05% х 378 дней = 2 206,08 руб.,

по договору № УСК-83/2 

акт от 01.03.2018 № 83 на сумму 15 660,00 руб. (по спецификации оплата путем внесения предоплаты во время выполнения работ, время выполнения работ по спецификации с 01.03.2018 по 02.03.2018, фактически услуги окончены 01.03.2018, поскольку акт датирован 01.03.2018 (ответчиком дата окончания оказания услуг подтверждена путем подписания акта)

с 02.03.2018 по 18.04.2018: 15 660,00 руб. х 0,05% х 48 дней = 375,84 руб.,

акт от 03.05.2018 № 178 на сумму 20 010,00 руб. (по спецификации оплата путем внесения предоплаты во время выполнения работ, время выполнения работ по спецификации с 27.04.2018, 28.04.2018, 03.05.2018, фактически услуги окончены 03.05.2018, поскольку акт датирован 03.05.2018 (ответчиком дата окончания оказания услуг подтверждена путем подписания акта)

с 04.05.2018 по 28.05.2018: 20 010,00 руб. х 0,05% х 24 дня = 240,12 руб.,

акт от 09.06.2018 № 222 на сумму 20 010,00 руб. (по спецификации оплата путем внесения предоплаты во время выполнения работ, время выполнения работ по спецификации с  06.06.2018, 07.06.2018, 08.06.2018, то есть оплата до 08.06.2018)

с 09.06.2018 по 29.06.2018: 20 010,00 руб. х 0,05% х 20 дней = 200,10 руб.

акт от 26.07.2018 № 275 на сумму 20 010,00 руб. (по спецификации оплата путем внесения предоплаты во время выполнения работ, время выполнения работ по спецификации с 25.07.2018 по 26.07.2018, то есть оплата до 26.07.2018)

27.07.2018 по 09.09.2019: 20 010,00 руб. х 0,05% х 411 дней = 4 112,06 руб.,

акт от 17.10.2018 № 379 на сумму 20 010,00 руб. (по спецификации оплата путем внесения предоплаты во время выполнения работ, время выполнения работ по спецификации с 16.10.2018 по 17.10.2018, фактически услуги окончены 17.10.2018, поскольку акт датирован 17.10.2018 (ответчиком дата окончания оказания услуг подтверждена путем подписания акта)

с 18.10.2018 по 09.09.2019: 20 010,00 руб. х 0,05% х 328 дней = 3 280,00 руб.

акт от 06.03.2019 № 34 на сумму 20 010,00 руб. (по спецификации оплата путем внесения предоплаты во время выполнения работ, время выполнения работ по спецификации с 05.03.2019 по 06.03.2019, фактически услуги окончены 06.03.2019, поскольку акт датирован 06.03.2019 (ответчиком дата окончания оказания услуг подтверждена путем подписания акта)

с 07.03.2019 по 09.09.2019: 20 010,00 руб. х 0,05% х 188 дней = 1 880,00 руб.,

по договору № 17-СР

акт от 03.05.2018 № 177 на сумму 54 700,00 руб. (по спецификации оплата после выполнения работ, подписания акта сдач-приемки в течение 3-х календарных дней, то есть оплата до (07.05.2018 (05-06.05.2018 – выходные дни))

с 10.05.2018 по 28.05.2018: 54 700,00 руб. х 0,05% х 19 дней = 519,65 руб.

Далее расчет неустойки подлежит определению в соответствии с пунктами 26-34 расчетом истца в заявлении об увеличении исковых требований от 13.11.2020 и составит 85 116,74 руб. (сумма не оспорена ответчиком). Общая сумма неустойки, подлежащей взысканию с ответчика 560 144,72 руб.

Ответчик заявил ходатайство о снижении неустойки на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Суд не усматривает оснований для снижения неустойки.

Из содержания положения абзаца первого статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что суду предоставлено право на снижение неустойки в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств.

В силу пункта 69 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (пункт 1 статьи 333 ГК РФ).

Пунктом 73 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" предусмотрено, что бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 56 ГПК РФ, часть 1 статьи 65 АПК РФ). Доводы ответчика о невозможности исполнения обязательства вследствие тяжелого финансового положения, наличия задолженности перед другими кредиторами, наложения ареста на денежные средства или иное имущество ответчика, отсутствия бюджетного финансирования, неисполнения обязательств контрагентами, добровольного погашения долга полностью или в части на день рассмотрения спора, выполнения ответчиком социально значимых функций, наличия у должника обязанности по уплате процентов за пользование денежными средствами (например, на основании статей 317.1, 809, 823 ГК РФ) сами по себе не могут служить основанием для снижения неустойки.

Согласно пункту 74 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" возражая против заявления об уменьшении размера неустойки, кредитор не обязан доказывать возникновение у него убытков (пункт 1 статьи 330 ГК РФ), но вправе представлять доказательства того, какие последствия имеют подобные нарушения обязательства для кредитора, действующего при сравнимых обстоятельствах разумно и осмотрительно, например, указать на изменение средних показателей по рынку (процентных ставок по кредитам или рыночных цен на определенные виды товаров в соответствующий период, валютных курсов и т.д.).

В соответствии с пунктом 75 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" при оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ). Доказательствами обоснованности размера неустойки могут служить, в частности, данные о среднем размере платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных средств, выдаваемым кредитными организациями лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, либо платы по краткосрочным кредитам, выдаваемым физическим лицам, в месте нахождения кредитора в период нарушения обязательства, а также о показателях инфляции за соответствующий период. Установив основания для уменьшения размера неустойки, суд снижает сумму неустойки.

В силу пункта 1 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Доказательств нарушения принципа свободы договора при заключении спорного договора сторонами не представлено. Признаков злоупотребления правами в действиях истца суд не усматривает.

Заключая договоры, стороны предусмотрели срок оплаты услуг, в качестве санкции за его нарушение согласована ответственность в виде неустойки в размере, равном 0,05 % и 0,1% за каждый день просрочки. Ответчик был согласен с данными условиями договоров, в связи с чем, и заключил указанные сделки с истцом. Договоры не относятся к договорам присоединения, при их заключении ответчик не был лишен возможности предлагать истцу иные условия договорной ответственности. В данном случае примененные истцом проценты неустойки представляет собой результат соглашения сторон и добровольного волеизъявления ответчика как стороны договора, являются обычно применяемыми в гражданских правоотношениях.

Названные обстоятельства свидетельствует о выполнении неустойкой своих функций как способа обеспечения исполнения обязательства, так и меры гражданско-правовой ответственности, что не нарушает баланс интересов должника и кредитора, стимулируя должника к правомерному поведению, в то же время, не позволяя кредитору получить несоразмерное удовлетворение за нарушенное право.

При таких обстоятельствах, суд не усматривает оснований для применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации и снижения неустойки.

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию 560 144,72 руб. неустойки.

Государственная пошлина за рассмотрение настоящего иска составляет 15 414,00 руб. 

Истец уплатил государственную пошлину в сумме 14 991,00 руб., то есть на 423,00 руб. менее установленного размера.

Учитывая результат рассмотрения дела, на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 13 527,88 руб. подлежат взысканию с ответчика в пользу истца (14 991,00 руб. х 90,24%), в размере 1 463,12 руб. – отнесению на истца (14 991,00 руб. х 9,76%); в доход федерального бюджета с ответчика подлежит взысканию 381,72 руб. государственной пошлины (423,00 руб. х 90,24%), с истца – 41,28 руб. (423,00 руб. х 9,76%).

Расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах (часть 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии с разъяснениями, приведёнными в пункте 11 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации  от 21.01.2016 № 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" разрешая вопрос о размере сумм, взыскиваемых в возмещение судебных издержек, суд не вправе уменьшать его произвольно, если другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов. Вместе с тем в целях реализации задачи судопроизводства по справедливому публичному судебному разбирательству, обеспечения необходимого баланса процессуальных прав и обязанностей сторон (статьи 2, 41 АПК РФ) суд вправе уменьшить размер судебных издержек, в том числе расходов на оплату услуг представителя, если заявленная к взысканию сумма издержек, исходя из имеющихся в деле доказательств, носит явно неразумный (чрезмерный) характер.

Исходя из бремени доказывания, в силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, требующее возмещения расходов на оплату услуг представителя, доказывает их размер и факт выплаты, обосновывает разумность расходов на оплату услуг представителя, другая сторона вправе доказывать их чрезмерность.

Истцом ко взысканию с ответчика по результатам рассмотрения настоящего дела заявлены судебные издержки на оплату услуг представителя в сумме 35 000,00 руб.

В подтверждение несения расходов представлены:

1/ договор на оказание юридических услуг от 02.04.2020 № 01/04, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью "Сервисная компания "Колибри" (заказчик) и индивидуальным предпринимателем ФИО1 (исполнитель), согласно пункту 1.1 которого заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию юридических услуг по изучению нормативного материала, подготовке и подаче искового заявления к акционерному обществу "Управляющая строительная компания "Новый город" о взыскании пени в связи с несвоевременной оплатой выполненных работ/оказанных услуг по заключенным между сторонами договорам в сумме 599 542,79 руб., подготовке дополнительных документов для передачи в суд. участие в предварительном судебном заседании, судебном заседании при рассмотрении дела в Арбитражном суде Красноярского края,

2/ счет на оплату от 09.06.2020 № 12 на сумму 35 000,00 руб.,

3/ платежное поручение от 09.06.2020 № 199 на сумму 35 000,00 руб.

Материалами дела №А33-15091/2020 подтверждается факт оказания представителем истца услуги. Представленные доказательства подтверждают факт несения расходов и их связь с рассмотрением настоящего дела. 

 Принимая во внимание объемом защищаемого права и проделанной представителем истца работы, суд считает, что заявленная сумма судебных издержек в размере 35 000,00 руб. отвечает критерию разумности (с применением расценок согласно рекомендуемым Минимальным ставкам стоимости некоторых видов юридической помощи, оказываемых адвокатами Адвокатской палаты Красноярского края, утвержденные решением Совета Адвокатской палаты Красноярского края от 29.06.2017 (протокол №09/17). 

Принимая во внимание частичное удовлетворение требований истца, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию 31 584,00 руб. (35 000,00 руб. х 90,24%) судебных издержек по оплате услуг представителя.

Настоящее  решение  выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа -  ). 

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

иск удовлетворить частично.

Взыскать с акционерного общества "Управляющая строительная компания "Новый           город" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации: 27.07.2009, г. Красноярск) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Сервисная компания "Колибри" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации: 20.02.2014, г. Красноярск) 560 144,72 руб. неустойки, 13 527,88 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины, 31 584,00 руб. судебных издержек по оплате услуг представителя.

В удовлетворении требований в оставшейся части отказать.

Взыскать с акционерного общества "Управляющая строительная компания "Новый               город" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации: 27.07.2009, г. Красноярск) в доход федерального бюджета 381,72 руб. государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Сервисная компания "Колибри" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации: 20.02.2014, г. Красноярск)                    в доход федерального бюджета 41,28 руб. государственной пошлины.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

О.С. Щёлокова