21/2017-114444(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А45-13604/2017

г. Новосибирск

27 июля 2017 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Зюзина С.Г.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  рассмотрел в судебном заседании дело по иску открытого акционерного  общества по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и  инженерных сооружений «Новосибирскавтодор» к федеральному казенному  учреждению «Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь»  Федерального дорожного агентства об изменении условий государственного  контракта.  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 181, 319 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

изменить государственный контракт № 189-14 от 09.09.2014 года:  установить срок окончания работ по контракту – 31.07.2018 года, установить  срок действия обеспечения исполнения контракта – 31.07.2018 года.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  порядке апелляционного производства в течение месяца со дня его принятия в  Седьмой Арбитражный апелляционный суд (г.Томск).  

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г.Тюмень) в срок, не  превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при  

условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через арбитражный суд  Новосибирской области.  

Судья С.Г. Зюзин