Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

г. Москва

Дело № А40-23600/18

116-171 

31 августа 2018 г.

Резолютивная часть решения объявлена 21 августа 2018 года

Полный текст решения изготовлен 31 августа 2018 года

Арбитражный суд в составе судьи Стародуб А. П., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело 

по исковому заявлению:  ООО "СТРОЙИНЖИНИРИНГ" (ОГРН: 

<

***>)

к ООО "АЛЬЯНС СТРОЙ" (ОГРН: 

<

***>)

о взыскании долга.

при участии представителей:

от истца: ФИО2 по доверенности от 15.09.2017 года.

от ответчика:  ФИО3 по доверенности от 03.04.2018 года. 

У С Т А Н О В И Л:

С учётом уточнения требования в порядке ст. 49 АПК РФ, ООО "СТРОЙИНЖИНИРИНГ" обратилось в арбитражный суд города Москвы с иском к ООО "АЛЬЯНС СТРОЙ" о взыскании суммы задолженности по дополнительному соглашению № 1 от 25.10.2016г. к договору  № П-20/2016 от 26.08.2016г. в размере 199.695,64 руб., по дополнительному соглашению № 2 от 07.11.2016г. к договору № П-20/2016 от 26.08.2016г. в размере 579.443,05  руб., по дополнительному соглашению № 3 от 07.08.2017г. к договору  № П-20/2016  от 26.08.2016г.  в размере 61 750 рублей. 

В судебном заседании представитель истца иск поддержал, представитель ответчика просил в иске отказать, представил отзыв.

Исследовав материалы дела, выслушав доводы представителя истца и ответчика, суд пришел к выводу, что заявленные требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 26 августа 2016 года между ООО «Альянс Строй» (далее – Подрядчик) и ООО «СТРОЙИНЖИНИРИНГ» (далее - Субподрядчик, а вместе – Стороны) был заключен Договор Субподряда № П-20/2016 (далее - Договор). В соответствии с п.1.1. Договора Субподрядчик обязался выполнить ряд строительных работ на Объекте Подрядчика: «Блок «В» в составе четвертого гуманитарного корпуса МГУ имени М.В. Ломоносова, расположенного по адресу: г. Москва, ЗАО, Район Раменки, Ленинские горы, д.1, стр.16 (далее –Объект), указанным пунктом Договора установлена обязанность Подрядчика принять и оплатить выполненные Субподрядчиком работы. 

25 октября 2016 года между Сторонами было подписано Дополнительное соглашение №1 к Договору (далее ДС-1), в котором уточнили Цену Договора путем изложения п. 4.1. Договора в новой редакции. 

В соответствии с Договором № П-20/2016  от 26.08.2016 г. и Дополнительным соглашением № 1  от 25.10.2016 г. к Договору № П-20/2016  от 26.08.2016 г., все работы были выполнены Истцом и приняты Ответчиком, о чем свидетельствуют подписанные Сторонами документы:

- Акт о приемке выполненных работ от 16.11.2016 г. за отчетный период с 25.10.2016 г. по 16.11.2016 г. (КС-2 № 1) на сумму - 1 916 900 руб. 00 коп.;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат от 16.11.2016 г. за отчетный период с 25.10.2016 г. по 16.11.2016 г. (КС-3 №1) на сумму - 1 916 900 руб. 00 коп.;

- Акт о приемке выполненных работ от 17.01.2017 г. за отчетный период с 17.11.2016 г. по 17.01.2017 г. (КС-2 № 2) на сумму - 786 030 руб. 00 коп.;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат от 17.01.2017 г. за отчетный период с 17.11.2016 г. по 17.01.2017 г. (КС-3 №2) на сумму - 786 030 руб. 00 коп.

Всего, Истцом, по Договору в рамках ДС-1 выполнено работ на общую стоимость – 2 702 930 руб. 00 коп.

Согласно п. 4.2. Договора № П-20/2016  от 26.08.2016 г. стоимость выполненных работ оплачивается Подрядчиком - Субподрядчику в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания Подрядчиком Акта о приемке выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ  (КС-2), путем перечисления соответствующей суммы на расчетный счет Субподрядчика.

Акт о приемке выполненных работ (КС-2 № 1) от 16.11.2016 г., Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3 №1) от 16.11.2016 г. - за отчетный период с 25.10.2016 г. по 16.11.2016 г. были подписаны 16.11.2016 г., следовательно, обязанность по оплате суммы выполненных работ в размере – 1 916 900 руб. 00 коп. Ответчиком должна быть исполнена до 14.12.2016 г.

Акт о приемке выполненных работ (КС-2 № 2) от 17.01.2017 г., Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3 №2) от 17.01.2017 г. - за отчетный период с 17.11.2016 г. по 17.01.2017 г. были подписаны 17.01.2017 г., следовательно, обязанность по оплате суммы выполненных работ в размере – 786 030 руб. 00 коп. Ответчиком должна быть исполнена до 14.02.2017 г.

В счет  оплаты работ по Договору в рамках ДС-1 от  Ответчика  поступили Истцу следующие суммы: 1 800 000 руб. 00 коп. (п.п. № 1726 от 06.10.2016) и 486 999 руб. 96 коп. (п.п. №74 от 13.01.2017г.).  

Кроме того, в счет оплаты услуг, согласно п. 7.5 Приложения № 3 к Договору, в рамках ДС-1, Истцом зачтена сумма в размере – 81 087 руб. 90 коп. Исходя из вышеуказанного, общая сумма выплат осуществленных Ответчиком по Договору в рамках ДС-1 составила – 2 368 087 руб. 86 коп.

Размер недоплаты выполненных Истцом работ по Договору в рамках ДС-1 составил – 334 842 руб. 14 коп.

Между тем, как верно указали стороны, из указанной суммы подлежит вычету сумма гарантийного удержания в размере 135 146 рублей 50 копеек, которая на дату принятия решения, уплате ответчиком истцу не подлежит.

Таким образом, требование Истца о взыскании с Ответчика остатка стоимости задолженности по Договору в рамках ДС-1, суммы в размере — 199 695 руб. 64 коп. (2 702 930  руб. 00 коп. (общая стоимость выполненных работ по Договору в рамках ДС-1) — 2 368 087 руб. 86 коп. (частичная оплата по Договору в рамках ДС-1)) – 135 146,50 рублей – является законным и обоснованным.

Кроме того, 07 ноября 2016 года в связи с возникшей необходимостью в производстве Истцом дополнительных работ между сторонами было подписано Дополнительное Соглашение №2 к Договору (далее - ДС-2). 

Все работы предусмотренные Договором в рамках ДС-2 были выполнены Истцом и приняты Ответчиком, о чем свидетельствуют подписанные Сторонами документы:

- Акт о приемке выполненных работ от 28.11.2016 г. за отчетный период с 08.11.2016 г. по 28.11.2016 г. (КС-2 № 1) на сумму - 755 410 руб. 00 коп.;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат от 28.11.2016 г. за отчетный период с 08.11.2016 г. по 28.11.2016 г. (КС-3 №1) на сумму - 755 410 руб. 00 коп.;

- Акт о приемке выполненных работ от 12.12.2016 г. за отчетный период с 29.11.2016 г. по 12.12.2016 г. (КС-2 № 2) на сумму - 759 883 руб. 00 коп.;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат от 12.12.2016 г. за отчетный период с 29.11.2016 г. по 12.12.2016 г. (КС-3 №2) на сумму - 759 883 руб. 00 коп.;

- Акт о приемке выполненных работ от 20.12.2016 г. за отчетный период с 13.12.2016 г. по 20.12.2016 г. (КС-2 №3) на сумму - 494 284 руб. 00 коп.;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат от 20.12.2016 г. за отчетный период с 13.12.2016 г. по 20.12.2016 г. (КС-3 №3) на сумму - 494 284 руб. 00 коп.;

- Акт о приемке выполненных работ от 09.02.2017 г. за отчетный период с 21.12.2016 г. по 09.02.2017 г. (КС-2 №4) на сумму - 782 085 руб. 00 коп.;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат от 09.02.2017 г. за отчетный период с 21.12.2016 г. по 09.02.2017 г. (КС-3 №4) на сумму - 782 085 руб. 00 коп.

Всего, Истцом, по Договору в рамках ДС-2 выполнено работ на общую стоимость – 2 791 662  руб. 00 коп.

Согласно п. 4.2. Договора № П-20/2016  от 26.08.2016 г. стоимость выполненных работ оплачивается Подрядчиком - Субподрядчику в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания Подрядчиком Акта о приемке выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ  (КС-2), путем перечисления соответствующей суммы на расчетный счет Субподрядчика.

Акт о приемке выполненных работ (КС-2 № 1) от 28.11.2016 г., Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3 №1) от 28.11.2016 г. - за отчетный период с 08.11.2016 г. по 28.11.2016 г. были подписаны 28.11.2016 г., следовательно, обязанность по оплате суммы выполненных работ в размере – 755 410 руб. 00 коп. Ответчиком должна быть исполнена до 26.12.2016 г.

Акт о приемке выполненных работ (КС-2 №2) от 12.12.2016 г., Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3 №2) от 12.12.2016 г. - за отчетный период с 29.11.2016 г. по 12.12.2016 г. были подписаны 12.12.2016 г., следовательно, обязанность по оплате суммы выполненных работ в размере – 759 883 руб. 00 коп. Ответчиком должна быть исполнена до 16.01.2017 г.

Акт о приемке выполненных работ (КС-2 №3) от 20.12.2016 г., Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3 №3) от 20.12.2016 г. - за отчетный период с 13.12.2016 г. по 20.12.2016 г. были подписаны 20.12.2016 г., следовательно, обязанность по оплате суммы выполненных работ в размере – 494 284 руб. 00 коп. Ответчиком должна быть исполнена до 24.01.2017 г.

Акт о приемке выполненных работ (КС-2 №4) от 09.02.2017 г., Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3 №4) от 09.02.2017 г. - за отчетный период с 21.12.2016 г. по 09.02.2017 г. были подписаны 09.02.2017 г., следовательно, обязанность по оплате суммы выполненных работ в размере – 782 085 руб. 00 коп. Ответчиком должна быть исполнена до 14.03.2017 г.

В счет  оплаты работ по Договору в рамках ДС-2 от  Ответчика  поступили Истцу следующие суммы: 500 000 руб. 00 коп. (п.п. № 1943 от 09.11.2016), 559 679 руб. 66 коп. (п.п. №71 от 13.01.2017г.), 562 993 руб. 68 коп. (п.п. №72 от 13.01.2017г.), 366 212 руб. 65 коп. (п.п. №73 от 13.01.2017г.).  Кроме того, в счет оплаты услуг, согласно п. 7.5 Приложения № 3 к Договору, в рамках ДС-2, Субподрядчиком зачтены следующие суммы: 22 662 руб. 30 коп., 22 796 руб. 49 коп., 14 828 руб. 52 коп., 23 462 руб. 55 коп. 

Исходя из вышеуказанного, общая сумма выплат осуществленных Подрядчиком по Договору в рамках ДС-2 составила – 2 072 635 руб. 85 коп.

Размер недоплаты выполненных Истцом работ по Договору в рамках ДС-2 составил – 719 026 руб. 15 коп.

Между тем, как верно указали стороны, из указанной суммы подлежит вычету сумма гарантийного удержания в размере 139 619,10 рублей, которая на дату принятия судом решения, ответчиком в адрес истца оплате не подлежит.

Таким образом, требование Истца о взыскании с Ответчика остатка стоимости задолженности по Договору в рамках ДС-2, суммы в размере — 579 443 руб. 05 коп. (2 791 662 руб. 00 коп. (общая стоимость выполненных работ по Договору в рамках ДС-2) — 2 072 635 руб. 85 коп. (частичная оплата по Договору в рамках ДС-2)) - 139 619,10 рублей– является законным и обоснованным.

Кроме того, 07 августа 2017 года в связи с возникшей необходимостью в производстве Истцом дополнительных работ между сторонами было подписано Дополнительное Соглашение №3 к Договору (далее - ДС-3). 

Все работы предусмотренные Договором в рамках ДС-3 были выполнены Истцом и приняты Ответчиком, о чем свидетельствуют подписанные Сторонами документы:

- Акт о приемке выполненных работ от 17.08.2017 г. за отчетный период с 07.08.2017 г. по 17.08.2017 г. (КС-2 № 1) на сумму – 65 000 руб. 00 коп.;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат от 17.08.2017 г. за отчетный период с 07.08.2017 г. по 17.08.2017 г. (КС-3 №1) на сумму - 65 000 руб. 00 коп.;

Всего, Истцом, по Договору в рамках ДС-3 выполнено работ на общую стоимость – 65 000 рублей.

Согласно п. 4.2. Договора № П-20/2016  от 26.08.2016 г. стоимость выполненных работ оплачивается Подрядчиком - Субподрядчику в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания Подрядчиком Акта о приемке выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ  (КС-2), путем перечисления соответствующей суммы на расчетный счет Субподрядчика.

Акт о приемке выполненных работ (КС-2 № 1) от 17.08.2017 г., Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3 №1) от 17.08.2017 г. - за отчетный период с 07.08.2017 г. по 17.08.2017 г. были подписаны 17.08.2017 г., следовательно, обязанность по оплате суммы выполненных работ в размере – 65 000 руб. 00 коп. Ответчиком должна быть исполнена до 14.09.2016 г.

Оплата выполненных работ по Договору в рамках ДС-3  Ответчиком  не производилась.

Размер недоплаты выполненных Истцом работ по Договору в рамках ДС-3 составил – 65 000 руб. 00 коп.

Из указанной суммы подлежит вычету сумма гарантийного удержания в размере 3 250 рублей.

Таким образом, требование Истца о взыскании с Ответчика задолженности по Договору в рамках ДС-3, суммы в размере – 61 750 руб. 00 коп – является законным и обоснованным.

В связи с чем, требования истца подлежат удовлетворению.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ суд относит на ответчика расходы по госпошлине.

В силу ст.333.40 НК РФ излишне уплаченная госпошлина подлежит возврату истцу из федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 65, 110, 167- 171, 176, 180 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ООО «Альянс Строй» (ОГРН: 

<

***>) в пользу ООО «СТРОЙИНЖИНИРИНГ» (ОГРН: 

<

***>) сумму задолженности по дополнительному соглашению № 1 от 25.10.2016г. к договору  № П-20/2016 

от 26.08.2016г. в размере 199.695,64 руб., по дополнительному соглашению № 2 от 07.11.2016г. к договору № П-20/2016 от 26.08.2016г. в размере 579.443,05  руб.,  по дополнительному соглашению № 3 от 07.08.2017г. к договору  № П-20/2016  от 26.08.2016г.  в размере 61.750 руб. , расходы  по госпошлине 19.817,77 руб.

Возвратить ООО «СТРОЙИНЖИНИРИНГ» (ОГРН: 

<

***>) излишне уплаченную госпошлину из федерального бюджета РФ в размере 4.371,23  руб., на возврат  госпошлины  выдать справку. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятый Арбитражный апелляционный суд.

Судья:

А.П. Стародуб