Шестой арбитражный апелляционный суд 

улица Пушкина, дом 45, город Хабаровск, 680000, 

официальный сайт:  http://6aas.arbitr.ru

e-mail: info@6aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

№ 06АП-6097/2022

26 декабря 2022 года

г. Хабаровск

Шестой арбитражный апелляционный суд  в составе:

судьи  Волковой М.О.. 

рассмотрев апелляционную жалобу публичного акционерного общества  «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»

на решение от  30.09.2022

по делу №А73-9808/2022

Арбитражного суда Хабаровского края,

рассмотренному в порядке упрощенного производства,

по иску публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «ЭнергоРемСервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании 219 609,91 руб.,

УСТАНОВИЛ:

публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС») обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края к обществу с ограниченной ответственностью «Энергоремсервис» (ООО «Энергоремсервис») с уточненным в порядке статьи 49 АПК РФ исковым заявлением  о взыскании неустойки в размере 219 609,91 руб. 

Дело рассмотрено в порядке главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 30.09.3022 с ответчика в пользу истца взыскано 109 804,96 руб. неустойки.

Не согласившись с принятым судебным актом, истец обжаловал его в апелляционном порядке, решение суда первой инстанции просил отменить, принять по делу новый судебный акт.

В обоснование апелляционной жалобы указывает на необоснованное применение судом первой инстанции статьи 333 ГК РФ и снижении размера неустойки, согласованного сторонами в договоре.

При этом сослался на то, что ответчиком не представлено доказательств явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства; ответчик, принимая участие в закупочной процедуре и подписав впоследствии договор, обладал всей необходимой информацией об условиях договора, в том числе о сроках выполнения работ и ответственности сторон за нарушение принятых на себя обязательств.

Ответчик в отзыве на доводы апелляционной жалобы возражал, считая решение суда законным и обоснованным.

В соответствии с частью 1 статьи 272.1 АПК РФ, пунктом 47 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.04.2017 №10 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве» апелляционная жалоба рассматривается судьей единолично по имеющимся в деле доказательствам, без проведения судебного заседания, без извещения лиц, участвующих в деле, о времени и месте проведения судебного заседания, без осуществления протоколирования в письменной форме или с использованием средств аудиозаписи.

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства, доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, апелляционный суд не усматривает оснований для отмены оспариваемого судебного акта.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, ПАО «ФСК ЕЭС» (заказчик) и ООО «ЭнергоРемСервис» (подрядчик) заключен договор от 31.05.2021  №807507, в соответствии с пунктом 2.1 которого подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по выполнению проектных работ по объекту, в том числе: предпроектное обследование; выполнение инженерных изысканий; разработке проектной документации (в том числе локальных смет и сводного сметного расчета); проведению экспертизы сметной документации; разработке закупочной документации. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке, предусмотренном договором.

Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в Календарном графике выполнения работ и стоимости (Приложение №1) и задании на проектирование (Приложение №4).

В соответствии с пунктом 2.2 результат выполненных работ по настоящему договору или его часть должны быть представлены подрядчиком заказчику на материальных носителях, а именно: в 5 (пяти) экземплярах на бумажном носителе, в 2 (двух) экземплярах в электронном виде (в формате MS Word, Excel, Visio, AutoCAD, Adobe Acrobat, DVD) и в 2 (двух) экземплярах на DVD в формате данных Системы комплектования Электронного архива документов ПАО «ФСК ЕЭС».

Электронная версия должна соответствовать ведомости основного комплекта результата выполненных работ и комплектоваться отдельно по каждому тому. Наименование файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию документации, представленной на бумажных носителях.

Результат выполненных работ должен быть выполнен в соответствии и с другими требованиями, указанными в нормативных документах электронного архива проектно-сметной документации ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденных приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 23.01.2008 №10 «Об утверждении нормативных документов электронного архива ПСД ОАО «ФСК ЕЭС».

Согласно пункту 3.1 договора начало выполнения работ – с момента заключения договора. Окончание выполнения работ – 30.11.2021, на что также указано в Приложении №1 - Календарный график выполнения работ и стоимости.

Выполнение отдельных работ, входящих в общий комплекс работ по договору, осуществляется подрядчиком в сроки, указанные в Календарном графике выполнения работ и стоимости (Приложение №1).

Пунктом 3.2 договора предусмотрено, что работа по разработке проектной документации (в том числе локальных смет) завершается созданием проектной документации, в отношении которой получено положительное заключение организации по проведению экспертизы, утвержденной заказчиком, а также принятой по акту о приемке выполненных работ и передаче прав.

Работа по разработке закупочной документации завершается созданием закупочной документации в полном объеме в соответствии с условиями настоящего договора, утвержденной заказчиком, а также принятой по актам сдачи-приемки результатов выполненных работ (пункт 3.3 договора).

Пунктом 3.4 договора предусмотрено, что подрядчик передает заказчику результаты выполненных работ на электронном и бумажном носителях в соответствии с пунктом 2.2 настоящего договора, а также исключительное право на результаты выполненных работ в полном объеме.

Согласно пункту 4.1 договора способом определения цены договора является базисно – индексный метод, основанный на применении текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000.

Цена договора, указанная в Календарном графике выполнения работ и стоимости (Приложение №1), в текущих ценах не является твердой и не является приблизительной, стоимость работ по договору составляет не более 756 232,50 руб., кроме того НДС 151 246,50 руб. Общая стоимость договора с НДС составляет не более 907 479 руб.

Согласно пункту 8.3 договора в течение 15 календарных дней после заключения договора подрядчик выполняет расчеты стоимости инженерных изысканий путем разработки соответствующих смет. Результат расчетов (сметы на выполнение инженерных изысканий) направляется подрядчиком на согласование заказчику.

В соответствии с пунктом 8.4 договора инженерные изыскания выполняются в сроки, установленные в Календарном графике выполнения работ и стоимости (Приложение №1). Подрядчик вправе досрочно выполнить инженерные изыскания, в этом случае заказчик вправе принять и оплатить их досрочно или в сроки, установленные Приложением №1 и в соответствии с условиями договора.

Пунктом 8.5 договора предусмотрено, что инженерные изыскания выполняются в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение №4), а также в соответствии с требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства, действующими на момент выполнения соответствующих работ в части состава и содержания соответствующих разделов документации.

Для выполнения инженерных изысканий подрядчик на основе Задания на проектирование (Приложение №4) разрабатывает программу инженерных изысканий, устанавливающую необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий, состав, объем и метод их выполнения.

В соответствии с пунктом 8.7 договора подрядчик обязан до предъявления заказчику согласовать результаты инженерных изысканий в специализированных организациях, уполномоченных на проведение согласований, в случае и порядке, установленных нормативными актами в области проектирования и строительства.

Согласно пункту 8.8 договора после согласования со специализированными организациями (в случае если согласование со специализированными организациями установлено требованиями заказчика или нормативными актами в области проектирования и строительства) результаты инженерных изысканий направляются заказчику в сопровождении оформленного со стороны подрядчика в 2 экземплярах акта о приемке выполненных работ и передаче прав.

Заказчик в сроки, указанные в пункте 7.1.4 договора, при отсутствии замечаний к результатам инженерных изысканий подписывает со своей стороны акт о приемке выполненных работ и передаче прав и один его экземпляр возвращает подрядчику.

При наличии у заказчика замечаний к результатам инженерных изысканий он направляет подрядчику мотивированный отказ от подписания указанного акта в сроки, указанные в пункте 7.1.4 договора.

Пунктом 8.9. договора предусмотрено, что подрядчик должен устранить обозначенные замечания в течение 5 рабочих дней после получения мотивированного отказа заказчика от подписания акта о приемке выполненных работ и передаче прав (если иной срок не согласован письменно сторонами) и передать измененный и (или) доработанный результат инженерных изысканий заказчику.

Обязательства подрядчика по выполнению инженерных изысканий считаются исполненными после подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ и передаче прав. Заказчик подписывает указанный в настоящем пункте акт после получения положительного заключения организации по проведению экспертизы в отношении результатов инженерных изысканий.

В силу положений пункта 9.1 договора заказчик по мере готовности передает подрядчику по акту приема-передачи, подписываемому сторонами, документацию, необходимую для разработки проектной документации, запрашиваемую подрядчиком. В течение 15 календарных дней после получения от заказчика задания на проектирование подрядчик выполняет расчеты стоимости изготовления проектной документации, путем разработки соответствующих смет. Результат расчетов (сметы на выполнение проектных работ) направляется подрядчиком на согласование заказчику (пункт 9.2 договора).

Разработка проектной документации осуществляется в сроки, установленные в Календарном графике выполнения работ и стоимости (Приложение №1). Подрядчик вправе досрочно разработать проектную документацию, в этом случае заказчик обязан принять и оплатить ее в соответствии с условиями договора (пункт 9.3 договора).

Проектная документация разрабатывается в соответствии документацией, переданной заказчиком (пункт 7.1.1 договора), заданием на проектирование, полученным подрядчиком от заказчика, требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства, действующими на момент выполнения соответствующих работ в части состава и содержания соответствующих разделов документации. Заказчик вправе вносить изменения в задание на проектирование в письменном виде на любом этапе выполнения работ по настоящему договору (пункты 9.4-9.5 договора).

Подрядчик обязан в соответствии с требованиями задания на проектирование до предъявления заказчику согласовать проектную документацию (технические решения, принятые в проектной документации) в специализированных организациях, уполномоченных на проведение согласований, в случае и порядке, установленных нормативными актами в области проектирования и строительства. После согласования со специализированными организациями проектная документация направляется заказчику в соответствии с требованиями задания на проектирование в сопровождении оформленного со стороны подрядчика в 2 экземплярах Акта о приемке выполненных работ и передаче прав.

Заказчик в сроки, указанные в пункте 7.1.4 настоящего договора, при отсутствии замечаний к проектной документации подписывает со своей стороны Акт о приемке выполненных работ и передаче прав и один его экземпляр возвращает подрядчику. При наличии у заказчика замечаний к проектной документации он направляет подрядчику мотивированный отказ от подписания указанного акта в сроки, указанные в пункте 7.1.4 договора (пункты 9.6-9.7 договора).

Подрядчик должен устранить обозначенные замечания в течение 5 рабочих дней после получения мотивированного отказа заказчика от подписания Акта о приемке выполненных работ и передаче прав (если иной срок не согласован письменно сторонами) и передать измененную и (или) доработанную проектную документацию заказчику.

При отказе либо уклонении подрядчика от выполнения доработок проектной документации заказчик вправе привлечь для фиксации и качественной оценки обнаруженных недостатков компетентное третье лицо, имеющее опыт ведения работ, аналогичных указанным в договоре, а также в случаях, предусмотренных нормативными актами в области проектирования и строительства, свидетельство о допуске к соответствующим видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией. Акт, подписанный указанным третьим лицом и заказчиком, направляется подрядчику. Подрядчик должен без дополнительной оплаты устранить отраженные в Акте недостатки в установленный заказчиком срок и возместить в течении 7 дней с момента получения требования заказчику понесенные последним расходы по привлечению третьего лица. В случае неустранения подрядчиком недостатков в соответствии с Актом, составленным согласно настоящего пункта договора, заказчик вправе привлечь для устранения недостатков работ третье лицо. Подрядчик в течение 7 дней с момента получения требования обязан возместить заказчику понесенные расходы на устранение недостатков, а также без предъявления каких-либо требований, по указанию заказчика, передать ему всю документацию, полученную от заказчика и (или) разработанную подрядчиком и оплаченную заказчиком.

Обязательства подрядчика по разработке проектной документации считаются исполненными после подписания заказчиком Акта о приемке выполненных работ и передаче прав. Заказчик подписывает указанный в настоящем пункте Акт после получения положительного заключения организации по проведению экспертизы по проектной документации (пункт 9.8 договора).

В силу положений пункта 10.1 договора закупочная документация разрабатывается в объеме, указанном в задании на проектирование (Приложение №4) и в сроки, установленные в Календарном графике выполнения работ и стоимости (Приложение №1). Закупочная документация направляется подрядчиком заказчику в сопровождении оформленного со стороны подрядчика в 2 экземплярах Акта сдачи-приемки результатов выполненных работ.

Заказчик в сроки, указанные в пункте 7.1.4 договора, при отсутствии замечаний к закупочной документации подписывает со своей стороны Акт сдачи-приемки результатов выполненных работ и один его экземпляр возвращает подрядчику.

При наличии у заказчика замечаний к закупочной документации он направляет подрядчику мотивированный отказ от подписания указанного акта в сроки, указанные в пункте 7.1.4 договора.

Пунктом 10.3 договора предусмотрено, что подрядчик должен устранить выявленные недостатки в течение 5 рабочих дней после получения мотивированного отказа заказчика от подписания Акта сдачи-приемки результатов выполненных работ (если иной срок не согласован письменно сторонами) и передать измененную и (или) доработанную закупочную документацию заказчику. Обязательства подрядчика по разработке закупочной документации считаются исполненными после подписания заказчиком Акта сдачи-приемки результатов выполненных работ.

В случае, если подрядчик в течение срока, указанного в пункте 7.1.4 договора, не получит подписанного заказчиком Акта сдачи-приемки результатов выполненных работ или Акта о приемке выполненных работ и передаче прав либо отказа от подписания соответствующего Акта или приемки соответствующих результатов выполненных работ, он обязан направить заказчику уведомление с требованием проведения совещания с заказчиком по вопросу приемки работ по договору. Отсутствие в указанные сроки Актов приемки выполненных работ, подписанных заказчиком, не свидетельствует о приемке результатов выполненных работ (пункт 10.4 договора).

В нарушение условий договора ответчик к установленному сроку принятые на себя обязательства не исполнил, в связи с чем истцом ответчику начислена неустойка.

Претензией от 10.02.2022 №МЗ/6/100 истец потребовал от ответчика уплатить неустойку.

Претензия ответчиком оставлена последним без удовлетворения, что стало истцу основанием для обращения в суд с настоящим иском.

К правоотношениям сторон подлежат применению положения главы 37 ГК РФ, регулирующей отношения по договору подряда, а также положения статей 309 и 310 ГК РФ, предусматривающих исполнение обязательства надлежащим образом.

Согласно статье 702 Гражданского кодекса РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчик) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

На основании статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (пункт 1 статьи 310 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться, в том числе, неустойкой.

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Размер неустойки установлен пунктом 11.2.1 договора.

Статья 65 АПК РФ возлагает на каждое лицо, участвующее в деле, обязанность доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Факт нарушения ответчиком сроков выполнения работ подтверждается  материалами дела и ответчиком не оспаривается.

По расчету истца размер неустойки за нарушение ответчиком сроков выполнения работ за период с 01.12.2021 по 31.03.2022 составил 219 609,91 руб. 

Произведенный истцом расчет неустойки судом проверен и признан верным и арифметически правильным.

Ответчиком расчет не оспорен, контррасчет не представлен.

Оснований для применения статьи 401 ГК РФ не установлено.

В ходе рассмотрения спора ответчиком заявлено о несоразмерности предъявленной к взысканию неустойки последствиям нарушения обязательства и применении статьи 333 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

Уменьшение неустойки, определенной договором и подлежащей уплате лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, допускается в исключительных случаях, если будет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды (пункт 2 статьи 333 ГК РФ).

Согласно пункту 74 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 №7), возражая против заявления об уменьшении размера неустойки, кредитор не обязан доказывать возникновение у него убытков (пункт 1 статьи 330 ГК РФ), но вправе представлять доказательства того, какие последствия имеют подобные нарушения обязательства для кредитора, действующего при сравнимых обстоятельствах разумно и осмотрительно, например, указать на изменение средних показателей по рынку (процентных ставок по кредитам или рыночных цен на определенные виды товаров в соответствующий период, валютных курсов и т.д.).

Исходя из пункта 75 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 №7, при оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для   должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ)   (пункт 75 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 №7).

При этом возможность ее уменьшения суд оценивает в каждом случае, с учетом конкретных обстоятельств возникшего спора, при оценке имеющихся в деле доказательств по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном их исследовании.

Исходя из правового подхода, сформулированного в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2000 №263-О, положения статьи 333 ГК РФ, закрепляющие право суда уменьшить размер подлежащей уплате неустойки, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, по существу, предписывают суду устанавливать баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и размером действительного ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения. Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, т.е., по существу, на реализацию требования части 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

Рассматривая ходатайство ответчика о применении статьи 333 ГК РФ, суд первой инстанции принимая во внимание условия договора (начисление неустойки в размере 0,2% от цены договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств, что составляет 73% годовых (32.8% от цены всего договора)), конкретные обстоятельства рассматриваемого дела, включая, в том числе факт отсутствия у ПАО «ФСК ЕЭС» каких-либо убытков в связи с допущенной ответчиком просрочкой, пришел к правомерному выводу о несоразмерности предъявленного к взысканию размер неустойки (пени) последствиям нарушения обязательства и необходимости снижения неустойки.

Исходя из необходимости соблюдения баланса между применяемой к ответчику мерой ответственности и последствиями ненадлежащего исполнения им обязательства, принимая во внимание компенсационную природу неустойки, суд первой инстанции уменьшил размер подлежащей взысканию пени за нарушение срока окончания работ по договору до 109 804,96 руб., применив при расчете пени размер 0,1% от цены договора за каждый день просрочки.

Проверив произведенный судом первой инстанции расчет неустойки, апелляционный суд признает его верным. Данный размер неустойки отвечает требованиям соразмерности, допущенному ответчиком нарушению обязательства и позволит компенсировать истцу негативные последствия ненадлежащего исполнения обязательства контрагентом, при этом не повлечет получения кредитором необоснованной выгоды.

Указанная сумма правомерно взыскана с ответчика в пользу истца.

С учетом изложенного, довод апелляционной жалобы о необоснованном снижении судом первой инстанции размера подлежащей взысканию неустойки подлежит отклонению.

Ссылка заявителя апелляционной жалобы на заключение договора на основании проведенной процедуры закупки и отсутствии возражений подрядчика относительно каких-либо его условий не принимается.

Как следует из материалов дела, спорный договор заключен сторонами по результатам закупочной процедуры в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными юридическими лицами» (Закон №223-ФЗ), постановления Правительства РФ от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

В силу части 29 статьи 3.4 Закона №223-ФЗ договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, документацией о конкурентной закупке, извещением об осуществлении конкурентной закупки или приглашением принять участие в такой закупке и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор.

По условиям Закона №223-ФЗ участник конкурентной закупки лишен возможности ведения переговоров при заключении договора, возможности влияния на условия договора при его заключении.

Факт того, что пункт договора, определяющий размер неустойки за нарушение принятых на себя обязательств, не оспорен и не признан недействительным, правового значения не имеет, поскольку указанное не лишает суд первой инстанции права на уменьшение неустойки в установленном порядке.

Каких-либо новых обстоятельств, которые могли бы повлиять на законность и обоснованность обжалуемого судебного акта, в апелляционной инстанции не установлено.

С учетом установленного, апелляционный суд приходит к выводу о правомерности оспариваемого решения и отсутствии оснований для удовлетворения апелляционной жалобы.

В этой связи решение суда отмене не подлежит.

Нарушений, являющихся согласно части 4 статьи 270 АПК РФ основанием для безусловной отмены судебного акта, судом первой инстанции не допущено.

Согласно статье 110 АПК РФ при отклонении заявленных требований расходы по оплате государственной пошлины относятся на сторону, обратившуюся в суд.

Руководствуясь статьями 258, 268-271, 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Хабаровского края от 30.09.2022 по делу №А73-9808/2022 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Дальневосточного округа в течение двух месяцев со дня его принятия через арбитражный суд первой инстанции только по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

 

Судья

М.О. Волкова