﻿

Арбитражный суд Тамбовской области

392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12

http://tambov.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А64-6513/2021

г. Тамбов

19 ноября 2021 года

Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи Истомина А.В.,

рассмотрев в порядке упрощённого производства дело по иску

общества с ограниченной ответственностью «Техсистемы», г. Тамбов                        (ОГРН 1166820058998, ИНН 6829123679) к 

обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Компания козерог», г. Тамбов (ОГРН 1026801163641, ИНН 6831023174)

о взыскании  задолженности

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Техсистемы» обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Компания козерог» о взыскании денежных средств в размере 2 166 314 руб., 51 коп., в том числе: 2 104 585 руб., 50 коп. – задолженность по договорам субподряда № 681 от 02.07.2020, № 682 от 02.07.2020, № 684 от 22.07.2020, № 690 от 25.09.2020, 61 729 руб., 01 коп. – проценты по ст. 395 ГК РФ за период с 06.09.2020 по 30.07.2021; процентов на сумму основного долга по ст. 395 ГК РФ с 01.08.2021 по день фактической оплаты суммы основного долга.

В силу требований ч.ч. 1, 2 ст. 227 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее - АПК РФ) настоящее дело подлежит рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Частью 5 ст. 228 АПК РФ определено, что суд рассматривает дело в порядке упрощённого производства без вызова сторон после истечения сроков, установленных судом для представления доказательств и иных документов.

Определением Арбитражного суда Тамбовской области от 21.09.2021 по делу                      №А64-6513/2021 о принятии искового заявления и рассмотрении дела в порядке упрощённого производства лицам, участвующим в деле, в установленные определением сроки было предложено представить в арбитражный суд и направить друг другу соответствующие доказательства (документы по существу заявленных требований и возражений).

Арбитражный суд располагает сведениями о получении истцом и ответчиком ко дню принятия решения копии определения о принятии искового заявления к производству и рассмотрении дела в порядке упрощённого производства (уведомления о вручении).

08.11.2021г. в материалы дела поступил отзыв ответчика от 01.11.2021, в котором он просит суд уменьшить размер начисленной пени на 50% ( л.д. 112-113). 

11.11.2021г. суд вынес решение в виде резолютивной части решения о взыскании с общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Компания козерог» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Техсистемы» основной долг по договорам субподряда №681 и №682 от 02.07.2020 года, №684 от 22.07.2020, №690 от 25.09.2020 в размере 2104585,50руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 06.09.2020 по 11.11.2021 в размере 102 350,39 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами начиная с 12.11.2021г. по день оплаты основного долга, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 33 832 руб.

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Компания Козерог» в установленный ч. 2 ст. 229 АПК РФ срок обратилось в арбитражный суд с заявлением об изготовлении мотивированного решения.

Из материалов дела следует, что между ООО «Техсистемы», (далее – истец, субподрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Компания Козерог» (далее – ответчик, Генподрядчик), был заключен Договор субподряда №681 на устройство песко-фибробетонной стяжки полов и тепло- звукоизоляции на объекте « 16-ти этажный многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: ул. Магистральная 41 корпус 7 подъезд 1 в г. Тамбове» от 02.07.2020г. ( далее- Договор1). 

Согласно п. 1.1 Договора1, Генподрядчик поручает, а Субподрядчик обязуется выполнить следующие работы: устройство песко-фибробетонной стяжки полов и тепло-звукоизоляции на 16–ти этажном многоквартирном жилом доме расположенном по адресу ул. Магистральная 41 корпус 7 подъезд 1 в г. Тамбове» (именуемый в дальнейшем Объект) в соответствии с заданием Генподрядчика Приложение №1 и №2 к договору. 

Согласно п. 3.1 Договора1, цена за выполняемую работу в соответствии с п. 1.1 договора составляет: 385 руб. в том числе НДС 20 % за 1 кв.м. песко-фибробетонной стяжки полов толщиной от 40 мм до 70 мм. Работы производятся иждивением Субподрядчика. Все необходимые для производства вышеуказанных работ расходные материалы приобретаются Субподрядчиком. Стоимость расходных материалов включена в общую цену работ, установленную в п.3.2 договора;

-177 руб. в том числе НДС 20% за 1 кв.м. за устройство тепло-звукоизоляции засыпанной керамзитовой толщиной от 100 мм до 200 мм с проливкой цементным молочком на первом этаже с переноской керамзита к месту устройства теплозвукоизоляции. Керамзитовый гравий необходимый для производства вышеуказанных работ приобретается Генподрядчиком. Стоимость керамзитного гравия исключена из общей цены работ, установленной в п. 3.2 договора, 

-6 руб., в том числе НДС 20% за 1 кв.м. за устройство тепло-звукоизоляции из рулонного материала Изолон ППЭ на втором-шестнадцатом этажах с переноской материала к месту устройства тепло- звукоизоляции. Необходимые для производства вышеуказанных работ расходные материалы приобретаются Генподрядчиком. Стоимость расходных материалов исключена из общей цены работ, установленной в п. 3.2 договора. 

Согласно п. 3.2 договора1, предварительная стоимость работ по договору составляет 2547528,70 руб., в том числе НДС 20% 424588,12 руб. и уточняется по фактическим замерам выполненных объемов работ согласно утвержденных Генподрядчиком актов и справок. Цена за выполненные работы одного кв.м. изменениям не подлежит. 

Основанием определения предварительной стоимости работ по договору является ведомость объемов и цены Приложение №1 и Выборка из локального сметного расчета Приложение №2 к договору. 

Согласно п. 3.3 Договора1, оплата по договору производится в следующем порядке: в течение 10 банковских дней с даты подписания Сторонами актов о приемке выполненных работ( форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) перечисляются денежные средства на расчетный счет Субподрядчика в размере 90% от суммы выполненных и принятых работ,

-оставшиеся денежные средства в размере 10% от суммы выполненных и принятых работ перечисляются на расчетный счет Субподрядчика в течение 30 дней после заселения объекта «16-ти этажный многоквартирный жилой дом расположенном по адресу ул. Магистральная 41 корпус 7 подъезд 1 в г. Тамбове». 

Также между сторонами ООО «Техсистемы», (далее – истец, субподрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Компания Козерог» (далее – ответчик, Генподрядчик), был заключен Договор субподряда №682 на устройство песко-фибробетонной стяжки полов и тепло- звукоизоляции на объекте « 16-ти этажный многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: ул. Магистральная 41 корпус 7 подъезд 2 в г. Тамбове» от 02.07.2020г. ( далее- Договор2). 

Согласно п. 1.1 Договора2, Генподрядчик поручает, а Субподрядчик обязуется выполнить следующие работы: устройство песко-фибробетонной стяжки полов и тепло-звукоизоляции на 16–ти этажном многоквартирном жилом доме расположенном по адресу ул. Магистральная 41 корпус 7 подъезд 2 в г. Тамбове» (именуемый в дальнейшем Объект) в соответствии с заданием Генподрядчика Приложение №1 и №2 к договору. 

Согласно п. 3.1 Договора2, цена за выполняемую работу в соответствии с п. 1.1 договора составляет: 385 руб. в том числе НДС 20 % за 1 кв.м. песко-фибробетонной стяжки полов толщиной от 40 мм до 70 мм. Работы производятся иждивением Субподрядчика. Все необходимые для производства вышеуказанных работ расходные материалы приобретаются Субподрядчиком. Стоимость расходных материалов включена в общую цену работ, установленную в п.3.2 договора;

-177 руб. в том числе НДС 20% за 1 кв.м. за устройство тепло-звукоизоляции засыпанной керамзитовой толщиной от 100 мм до 200 мм с проливкой цементным молочком на первом этаже с переноской керамзита к месту устройства теплозвукоизоляции. Керамзитовый гравий необходимый для производства вышеуказанных работ приобретается Генподрядчиком. Стоимость керамзитного гравия исключена из общей цены работ, установленной в п. 3.2 договора, 

-6 руб., в том числе НДС 20% за 1 кв.м. за устройство тепло-звукоизоляции из рулонного материала Изолон ППЭ на втором-шестнадцатом этажах с переноской материала к месту устройства тепло- звукоизоляции. Необходимые для производства вышеуказанных работ расходные материалы приобретаются Генподрядчиком. Стоимость расходных материалов исключена из общей цены работ, установленной в п. 3.2 договора. 

Согласно п. 3.2 договора2, предварительная стоимость работ по договору составляет 1979280,60руб., в том числе НДС 20% 329880,10 руб. и уточняется по фактическим замерам выполненных объемов работ согласно утвержденных Генподрядчиком актов и справок. Цена за выполненные работы одного кв.м. изменениям не подлежит. 

Основанием определения предварительной стоимости работ по договору является ведомость объемов и цены Приложение №1 и Выборка из локального сметного расчета Приложение №2 к договору. 

Согласно п. 3.3 Договора2, оплата по договору производится в следующем порядке: в течение 10 банковских дней с даты подписания Сторонами актов о приемке выполненных работ( форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) перечисляются денежные средства на расчетный счет Субподрядчика в размере 90% от суммы выполненных и принятых работ,

-оставшиеся денежные средства в размере 10% от суммы выполненных и принятых работ перечисляются на расчетный счет Субподрядчика в течение 30 дней после заселения объекта «16-ти этажный многоквартирный жилой дом расположенном по адресу ул. Магистральная 41 корпус 7 подъезд 2 в г. Тамбове». 

Также между сторонами ООО «Техсистемы», (далее – истец, субподрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Компания Козерог» (далее – ответчик, Генподрядчик), был заключен Договор субподряда №684 на устройство песко-фибробетонной стяжки полов и тепло- звукоизоляции на объекте « 16-ти этажный многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: ул. Магистральная 41 корпус 7 подъезд 3 в г. Тамбове» от 02.07.2020г. ( далее- Договор3). 

Согласно п. 1.1 Договора3, Генподрядчик поручает, а Субподрядчик обязуется выполнить следующие работы: устройство песко-фибробетонной стяжки полов и тепло-звукоизоляции на 16–ти этажном многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу ул. Магистральная 41 корпус 7 подъезд 3 в г. Тамбове» (именуемый в дальнейшем Объект) в соответствии с заданием Генподрядчика Приложение №1 и №2 к договору. 

Согласно п. 3.1 Договора3, цена за выполняемую работу в соответствии с п. 1.1 договора составляет: 385 руб. в том числе НДС 20 % за 1 кв.м. песко-фибробетонной стяжки полов толщиной от 40 мм до 70 мм. Работы производятся иждивением Субподрядчика. Все необходимые для производства вышеуказанных работ расходные материалы приобретаются Субподрядчиком. Стоимость расходных материалов включена в общую цену работ, установленную в п.3.2 договора;

-177 руб. в том числе НДС 20% за 1 кв.м. за устройство тепло-звукоизоляции засыпанной керамзитовой толщиной от 100 мм до 200 мм с проливкой цементным молочком на первом этаже с переноской керамзита к месту устройства теплозвукоизоляции. Керамзитовый гравий необходимый для производства вышеуказанных работ приобретается Генподрядчиком. Стоимость керамзитного гравия исключена из общей цены работ, установленной в п. 3.2 договора, 

-6 руб., в том числе НДС 20% за 1 кв.м. за устройство тепло-звукоизоляции из рулонного материала Изолон ППЭ на втором-шестнадцатом этажах с переноской материала к месту устройства тепло- звукоизоляции. Необходимые для производства вышеуказанных работ расходные материалы приобретаются Генподрядчиком. Стоимость расходных материалов исключена из общей цены работ, установленной в п. 3.2 договора. 

Согласно п. 3.2 договора3, предварительная стоимость работ по договору составляет 2548259,30руб., в том числе НДС 20% 424709,88 руб. и уточняется по фактическим замерам выполненных объемов работ согласно утвержденных Генподрядчиком актов и справок. Цена за выполненные работы одного кв.м. изменениям не подлежит. 

Основанием определения предварительной стоимости работ по договору является ведомость объемов и цены Приложение №1 и Выборка из локального сметного расчета Приложение №2 к договору. 

Согласно п. 3.3 Договора3, оплата по договору производится в следующем порядке: в течение 10 банковских дней с даты подписания Сторонами актов о приемке выполненных работ( форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) перечисляются денежные средства на расчетный счет Субподрядчика в размере 90% от суммы выполненных и принятых работ,

-оставшиеся денежные средства в размере 10% от суммы выполненных и принятых работ перечисляются на расчетный счет Субподрядчика в течение 30 дней после заселения объекта «16-ти этажный многоквартирный жилой дом расположенном по адресу ул. Магистральная 41 корпус 7 подъезд 3 в г. Тамбове». 

Также между сторонами ООО «Техсистемы», (далее – истец, субподрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Компания Козерог» (далее – ответчик, Генподрядчик), был заключен Договор субподряда №690 на устройство песко-фибробетонной стяжки полов и тепло- звукоизоляции на объекте « 16-ти этажный многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: ул. Магистральная 41 корпус 7 в г. Тамбове» от 02.07.2020г. ( далее- Договор4). 

Согласно п. 1.1 Договора4, Генподрядчик поручает, а Субподрядчик обязуется выполнить работы по устройству асфальтобетонного дорожного покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м куб. С учетом розлива вяжущих материалов толщиной не менее 6 см на объекте «16-ти этажный многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу ул. Магистральная 41 корпус 7 в г. Тамбове общей площадью 2723 кв.м.» (объект) в соответствии с заданием Генподрядчика. 

Работы производятся иждивением Субподрядчика. Все необходимые для производства вышеуказанных работ расходные материалы, используемые механизмы и оборудование приобретаются и поставляются на объект  Субподрядчиком. 

Согласно п. 3.2 договора4, предварительная стоимость работ по договору составляет 2614080руб., в том числе НДС 20% -435680 руб. и уточняется по фактическим замерам выполненных объемов работ согласно утвержденных Генподрядчиком актов и справок. Цена за выполненные работы одного кв.м. изменениям не подлежит. 

Согласно п. 3.3 Договора4, оплата по договору производится в следующем порядке: в течение 10 банковских дней с даты подписания Сторонами актов о приемке выполненных работ( форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) перечисляются денежные средства на расчетный счет Субподрядчика в размере 90% от суммы выполненных и принятых работ,

-оставшиеся денежные средства в размере 10% от суммы выполненных и принятых работ перечисляются на расчетный счет Субподрядчика в течение 30 дней после заселения объекта «16-ти этажный многоквартирный жилой дом расположенном по адресу ул. Магистральная, д. 41 корпус 7 в г. Тамбове». 

Согласно п. 7.1 Договоров, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Оплата за выполненные работы в нарушение условий Договоров  ответчиком в полном объеме не произведена. 

Задолженность ответчика перед истцом по Договорам составляет 2104585,50 руб.

            Стороны подписали акты сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2020 по 21.06.2021 (л.д. 13-14).  

Также истец начислил ответчику проценты за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 ГК РФ. 

В целях досудебного урегулирования спора, истец направил в адрес ответчика претензию от 14 сентября 2021 года с требованием об оплате задолженности ( л.д. 85-86). 

Ненадлежащее выполнение ответчиком своих обязательств в рамках договоров, послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Компания козерог» о взыскании основного долга по договорам субподряда №681 и №682 от 02.07.2020 года, №684 от 22.07.2020, №690 от 25.09.2020 в размере 2104585,50руб., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 06.09.2020 по 11.11.2021 в размере 102 350,39 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами начиная с 12.11.2021 по день оплаты основного долга ( с учетом уточнений). 

Исследовав материалы дела, изучив представленные по делу доказательства, суд находит исковое заявление подлежащим удовлетворению в полном объеме ввиду нижеследующего.

В силу части 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Исходя из правил, установленных в статьях 307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги, и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований и должны исполняться надлежащим образом  в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота и иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются согласно правилам статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Обязательства сторон установлены договорами субподряда №681 и №682 от 02.07.2020 года, №684 от 22.07.2020, №690 от 25.09.2020 и должны исполняться сторонами надлежащим образом. 

Данные Договоры регулируются нормами гражданского законодательства о подряде (гл. 37 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно п. 1 ст. 706 ГК РФ, если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

В соответствии с пунктом 1 статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не    предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

На основании части 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной. 

Задолженность ответчика перед истцом по Договорам составляет 2104585,50 руб., что подтверждается материалами дела. 

Кроме того, стороны подписали акты сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2020 по 21.06.2021 (л.д. 13-14).  

           Ответчик доказательств погашения задолженности в размере 2104585,50 руб. в материалы дела  не представил. 

Суд признает правомерным требование истца о взыскании суммы основного долга в размере  2104585,50 руб.

Поскольку ответчиком задолженность по Договорам не была оплачена, истец начислил проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 06.09.2020 по 11.11.2021 в размере 102 350,39 руб.

Главой 25 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами является мерой гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательства.

Федеральным законом № 315-ФЗ от 03.07.2016 г. ч. 1 ст. 395 Гражданского кодекса РФ изложена в следующей редакции: в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

В данной редакции закон действует с 01.08.2016 г. (п. 2 ст. 7 Федерального закона № 315-ФЗ от 03.07.2016 г.).

По информации Центрального Банка России ключевая ставка Банка России начиная с 06.09.2020 по 21.03.2021 -4,25%, с 22.03.2021 по25.04.2021- 4,50%, с 26.04.2021 по 14.06.2021-5%, с 15.06.2021 по  25.07.2021 – 5,50%, с 26.07.2021 по 12.09.2021 – 6,50%, с 13.09.2021 по 24.10.2021 – 6,75%, с 25.10.2021 по 11.11.2021 – 7,50 %.

Ответчик сумму начисленных процентов за пользование чужими денежными средствами не оспорил, доказательства её погашения и контррасчёт не представил, представленный истцом расчёт, исходя из приведённых методик расчётов процентов для соответствующих периодов, судом изучен и признан арифметически верным.

Требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 06.09.2020 по 11.11.2021 в размере 102 350,39 руб., заявлено истцом обоснованно и подлежит удовлетворению.

Поскольку ответчик ненадлежащим образом исполнил обязательства по договорам, истцом, заявлено требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами по день фактической оплаты основного долга начиная с 12.11.2021, начисленные на сумму основного долга 2104585,50 руб.

Главой 25 Гражданского кодекса предусмотрено, что взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами является мерой гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательства.

В соответствии с ч.ч. 1, 3 ст. 395 Гражданского кодекса в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Центрального Банка России (ЦБР), действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

В п. 48 постановления Пленума ВС РФ № 7 от 24.03.2016 г. «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъясняется, что сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам ст. 395 Гражданского кодекса, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства. При этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчёта процентов.

Таким образом, требование истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на сумму основного долга, начиная с 12.11.2021 и по день фактической уплаты суммы долга, заявлено правомерно и подлежит удовлетворению.

Статьей 9 АПК РФ закреплено, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Указанная норма Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации закрепляет общее правило о бремени доказывания. Содержание данного правила определяется действием принципа состязательности в арбитражном процессе.

Последствием неисполнения этой юридической обязанности (непредставление доказательств) может стать принятие судом решения, которое не будет соответствовать интересам стороны, не представившей доказательства в полном объеме.

Кроме того, в силу положений ч.ч. 3.1, 5 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В соответствии со ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что исковые требования заявлены обосновано и подлежат удовлетворению в полном объеме.

Расходы по государственной пошлине в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отнести на ответчика.

Руководствуясь ст.ст. 102, 110, 112, 167-170, 226-229 АПК РФ, Арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Компания козерог», г. Тамбов (ОГРН 1026801163641, ИНН 6831023174) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Техсистемы», г. Тамбов                        (ОГРН 1166820058998, ИНН 6829123679) основной долг по договорам субподряда №681 и №682 от 02.07.2020 года, №684 от 22.07.2020, №690 от 25.09.2020 в размере 2104585,50руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 06.09.2020 по 11.11.2021 в размере 102 350,39 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами начиная с 12.11.2021 по день оплаты основного долга, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 33 832 руб. 

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Компания козерог», г. Тамбов (ОГРН 1026801163641, ИНН 6831023174) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 203 руб.  

3. Истцу (по заявлению) и налоговому органу выдать исполнительные листы.

4. Направить лицам, участвующим в деле, решение заказным письмом с уведомлением о вручении.

5. Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в течение пятнадцати дней после его принятия в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, находящийся по адресу: Воронеж, ул. Платонова, д. 8, через Арбитражный суд Тамбовской области.

 

Судья                                                                                                     А.В. Истомин