405/2022-112607(2) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51 / 53-02-05, http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть) 

город Омск  № дела  11 июля 2022 года А46-4635/2022  

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Пантелеевой С.С.  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Арсеньевой Т.А.  

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной  ответственностью «ЗнакЪ качества» (ИНН6679069660, ОГРН 

<

***>, 620075, 

<

...> до 56, оф. 313) к Региональному фонду капитального  ремонта многоквартирных домов (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 644099, 

<

...>) об обязании ответчика принять выполненные работы по  договорам № 2019/097/ЭА от 22.01.2020, № 2019/096/ЭА от 22.01.2020, № 2019/102/ЭА от  22.01.2020, № 2019/109/ЭА от 22.01.2020, № 2019/110/ЭА от 22.01.2020, обязании ответчика  подписать акты выполненных работ по указанным договорам из расчета ставки 3,7% от  стоимости капительного ремонта фасада и крыши МКД,  

при участии в деле качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований  относительно предмета спора, Управление Федерального казначейства по Омской области,  

при участии в судебном заседании: 

от истца - (онлайн-соединение) ФИО1 по доверенности от 31.05.2021 (паспорт,  диплом), до перерыва также ФИО2 по доверенности от 04.07.2022, директор ФИО3 согласно протоколу от 14.04.2020,  

от ответчика - ФИО4 по доверенности от 14.03.2022 № 13 (паспорт, диплом);  от третьего лица – не явились, извещены,  

На основании изложенного, руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «ЗнакЪ качества»  удовлетворить.  

Обязать Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, 644099, 

<

...>) подписать  акты выполненных работ по оценке технического состояния многоквартирных домов,  разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества  многоквартирных домов, в соответствии с условиями заключенных договоров на проведение  капитального ремонта № 2019/097/ЭА от 22.01.2020г., № 2019/ 096/ ЭА от 22.01.2020г., №  2019/102/ЭА от 22.01.2020г.; № 2019/109/ЭА от 22.01.2020г., № 2019/110/ ЭА от 22.01.2020г. и  приложений к ним из расчета ставки 3,7% от стоимости капитального ремонта фасада и  крыши МКД, определенного с применением индекса изменения сметной стоимости в текущие  цены на момент составления локальных сметных расчетов по следующим объектам:  

По договору № 2019/097/ЭА от 22.01.2020г: 

22.01.2020 

 

Калачинск 

 

2019/097/ЭА от  22.01.2020  

 

Омская обл., Горьковский р-н,  

 

ФИО5 ул, 4 

 

фасад 

 

24.01.22 

 

р.п. Горьковское 

 

2019/097/ЭА от  22.01.2020  

 

Омская обл., Горьковский р-н,  

 

M. Горького ул, 7А  

 

крыша 

 

23.08.21 

 

р.п. Горьковское 

 

2019/097/ЭА от  22.01.2020  

 

Омская обл., Горьковский р-н,  

 

Мира ул, 3 

 

крыша 

 

23.08.21 

 

с. Октябрьское 

 

2019/097/ЭА от  22.01.2020  

 

Омская обл., Горьковский р-н,  

 

Мира ул, 5 

 

крыша 

 

23.08.21 

 

с. Октябрьское 

 

2019/097/ЭА от  22.01.2020  

 

Омская обл., Горьковский р-н,  

 

Мира ул, 7 

 

крыша 

 

23.08.21 

 

с. Октябрьское 

 

2019/097/ЭА от  22.01.2020  

 

Омская обл., Горьковский р-н,  

 

ФИО6 ул, 14  

 

крыша 

 

23.08.21 

 

р.п. Горьковское 

 

2019/097/ЭА от  22.01.2020  

 

Омская обл., Калачинск р-н, г.  

 

Омская ул, 71Б 

 

фасад 

 

23.08.21 

 

Калачинск 

 

2019/097/ЭА от  22.01.2020  

 

Омская обл., 

 

Пролетарская ул, 69  

 

фасад 

 

22.11.21 

 

Оконешниковский р-н, р.п.  

 

Оконешниково 

 

2019/097/ЭА от  22.01.2020  

 

Омская обл., 

 

Ленина ул, 113 

 

крыша 

 

12.01.22 

 

Кормиловский р-н, р.р. 

 

Кормиловка 

 

По договору № 2019/096/ЭА от 22.01.2020г: 

Договор 

 

Адрес 

 

Объект 

 

Вид работ  

 

Дата 

 

реализации  

 

(акта) 

 

2019/096/ЭА от  22.01.2020  

 

Омская обл., Таврический р-н, с.  

 

50 лет Октября ул, 12

 

крыша 

 

25.08.21 

 

Сосновское 

 

2019/097/ЭА от  22.01.2020  

 

Омская обл., Таврический р-н,  

 

Ленина ул, 145  

 

крыша 

 

23.08.21 

 

р.п. Таврическое 

 

2019/097/ЭА от  22.01.2020  

 

Омская обл., Таврический р-н,  

 

ФИО7 ул, 43  

 

крыша 

 

23.08.21 

 

р.п. Таврическое 

 

2019/097/ЭА от  22.01.2020  

 

Омская обл., Таврический р-н, п.  

 

Школьная ул, 10  

 

крыша 

 

23.08.21 

 

Новоуральский 

 

2019/097/ЭА от  22.01.2020  

 

Омская обл., Таврический р-н, п.  

 

Школьная ул, 13  

 

крыша 

 

23.08.21 

 

Новоуральский 

 

По договору № 2019/102/ЭА от 22.01.2020г: 

Договор 

Адрес, объект 

Вид работ  

Дата 

 

реализации  

 

(акта) 

 

2019/102/ЭА 22.01.2020  

Г. Омск 16-й Военный городок, 408  

крыша 

23.08.21 

 

2019/102/ЭА 22.01.2020  

Г. Омск 3-я Кордная ул, 24Б 

крыша 

23.08.21 

 

2019/102/ЭА 22.01.2020  

Г. Омск 3-я Молодежная ул, 56  

крыша 

23.08.21 

 

2019/102/ЭА 22.01.2020  

Г. Омск 3-я Молодежная ул, 58  

крыша 

23.08.21 

 

2019/102/ЭА 22.01.2020  

Г. Омск 5-я Кордная ул, 26 

крыша 

23.08.21 

 

2019/102/ЭА 22.01.2020  

Г. Омск 5-я Кордная ул, 62Б 

крыша 

23.08.21 

 

2019/102/ЭА 22.01.2020  

Г. Омск 5-я Кордная ул, 63Б 

крыша 

23.08.21 

 

2019/102/ЭА 22.01.2020  

Г. Омск 7-я Линия ул, 180 

крыша 

22.11.21 

 

2019/102/ЭА 22.01.2020  

Г. Омск 9-я Линия ул, 139А 

фасад 

23.08.21 

 

2019/102/ЭА 22.01.2020  

Г. Омск Ипподромная ул, 14А  

крыша 

23.08.21 

 

2019/102/ЭА 22.01.2020  

Г. Омск ФИО8 ул, 2 

крыша 

22.11.21 

 

2019/102/ЭА 22.01.2020  

Г. Омск ФИО9 ул, 14 

фасад 

23.08.21 

 

2019/102/ЭА 22.01.2020  

Г. Омск ФИО9 ул, 16 

фасад 

23.08.21 

 

2019/102/ЭА 22.01.2020  

Г. Омск ФИО9 ул, 5 

крыша 

22.11.21 

 

2019/102/ЭА 22.01.2020  

Г. Омск Рощинская ул, 2 

крыша 

23.08.21 

 

2019/102/ЭА 22.01.2020  

Г. Омск 5-я Кордная ул 13 

крыша 

12.01.22 

 

По договору № 2019/109/ЭА от 22.01.2020г: 

договор 

 

Дата 

 

Вид 

 

реализац  

 

адрес 

 

объект 

 

работ 

 

ии (акты)  

 

2019/109/ЭА от 22.01.2020  

Омск  

1 -й ФИО10 проезд, 5  

 

крыша 

22.11.21  

2019/109/ЭА от 22.01.2020  

Омск  

20 лет РККА ул, 175 

 

фасад 

23.08.21  

2019/109/ЭА от 22.01.2020  

Омск  

21-я Амурская ул, 6Б 

 

крыша 

23.08.21  

2019/109/ЭА от 22.01.2020  

Омск  

5-й Армии ул, 71 

 

крыша 

22.11.21  

2019/109/ЭА от 22.01.2020  

Омск  

Теплично-парниковый комбинат  

 

крыша 

23.08.21  

 

тер, 11 

 

2019/109/ЭА от 22.01.2020  

Омск  

Теплично-парниковый комбинат  

 

крыша 

23.08.21  

 

тер, 13 

 

2019/109/ЭА от 22.01.2020  

Омск  

Тимуровский проезд, 3  

 

крыша 

24.01.22  

2019/109/ЭА от 22.01.2020  

Омск  

10 лет Октября ул. 189  

 

крыша 

12.01.22  

2019/109/ЭА от 22.01.2020  

Омск  

10 лет Октября ул. 219 корп 1 

 

крыша 

12.01.22  

2019/109/ЭА от 22.01.2020  

Омск  

24-я Северная, ул, 172а  

 

крыша 

12.01.22  

2019/109/ЭА от 22.01.2020  

Омск  

Тимуровский проезд, 2  

 

крыша 

12.01.22  

 

По договору № 2019/110/ЭА от 22.01.2020г:  

 

Договор 

Адрес  

Объект 

 

Вид работ 

Дата 

 

реализац  

 

ии (акта)  

2019/110/ЭА 22.01.2020  

Омск г.  

Багратиона ул, 5 

 

фасад 

23.08.21  

2019/110/ЭА 22.01.2020  

Омск г.  

Герцена ул, 55 к57 

 

крыша 

22.11.21  

2019/110/ЭА 22.01.2020  

Омск г.  

ФИО5 ул, 115 

 

крыша 

23.08.21  

2019/110/ЭА 22.01.2020  

Омск г.  

Декабристов ул, 100 

 

крыша 

24.01.22  

2019/110/ЭА 22.01.2020  

Омск г.  

Декабристов ул, 71 

 

крыша 

23.08.21  

2019/110/ЭА 22.01.2020  

Омск г.  

Кирпичный завод № 7 ул,20  

 

крыша 

23.08.21  

2019/110/ЭА 22.01.2020  

Омск г.  

Куйбышева ул, 150 

 

крыша 

23.08.21  

2019/110/ЭА 22.01.2020  

Омск г.  

ФИО11 ул, 57А 

 

крыша 

22.11.21  

 

2019/110/ЭА 22.01.2020  

Омск г.  

ФИО12 ул, 46 

 

крыша 

23.08.21  

2019/110/ЭА 22.01.2020  

Омск г.  

Рабиновича ул, 124 

 

крыша 

16.04.21  

2019/110/ЭА 22.01.2020  

Омск г.  

Рабиновича ул, 132/134  

 

крыша 

23.08.21  

2019/110/ЭА 22.01.2020  

Омск г.  

ФИО13 ул, 68 

 

крыша 

12.01.22  

Взыскать с Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, 644099, 

<

...>) в пользу  общества с ограниченной ответственностью «ЗнакЪ качества» (ИНН6679069660, ОГРН  

<

***>, 620075, 

<

...> до 56, оф. 313) 30 000 руб.  расходов по уплате государственной пошлины.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия и может  быть обжаловано в этот же срок путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой  арбитражный апелляционный суд.  

Судья С.С. Пантелеева 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 18.03.2022 7:16:00Кому выдана Пантелеева Светлана Станиславовна