﻿Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40- 94730/21-3-670

г. Москва

30 июля  2021 г.

Резолютивная часть объявлена 10 июня  2021 г.

Дата изготовления решения в полном объеме 30 июля  2021 г. 

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Федоточкина А.А.,

при ведении протокола секретарём судебного заседания Сафиной Д.В.,

с использованием средств аудиозаписи,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску

Общества с ограниченной ответственностью "Орион" (117246, Россия, Москва г., муниципальный округ Черемушки вн.тер.г., Научный пр-д, д. 12, этаж 2, помещ. 22, ОГРН: 1137746345197, Дата присвоения ОГРН: 16.04.2013, ИНН: 7728841040)

к Федеральному государственному унитарному предприятию "Главный центр специальной связи" (129626, Москва город, 1-я Мытищинская улица, 17, ОГРН: 1027700041830, Дата присвоения ОГРН: 19.07.2002, ИНН: 7717043113)

о взыскании задолженности в размере 25 627 979 руб. 35 коп. 

В судебное заседание явились: 

От истца: Вырлеев-Балаев А.Ю. по дов. от 11.01.2021 г.

От ответчика: Филатова Н.В. по дов. №136/21 от 05.04.2021 г.

У С Т А Н О В И Л :

Общество с ограниченной ответственностью "Орион" обратилось в Арбитражный суд с исковым заявлением к Федеральному государственному унитарному предприятию "Главный центр специальной связи" о взыскании задолженности в размере 25 627 979 руб. 35 коп. 

Представитель истца требования поддержал в полном объёме, устно пояснил позицию по спору.

Представитель ответчика против удовлетворения исковых требований возражал, представил отзыв на исковое заявление, устно пояснил позицию по спору.

Представитель ответчика заявил ходатайство об отложении судебного заседания в целях мирного  урегулирования спора. 

Согласно ч. 2 ст. 138 АПК РФ стороны могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение или применяя другие примирительные процедуры, в том числе процедуру медиации, если это не противоречит федеральному закону.

При этом мировое соглашение должно содержать согласованные сторонами сведения об условиях, размере и сроках исполнения обязательств друг перед другом или одной стороной перед другой (ч.2 ст. 140 АПК РФ).

Таким образом, мировое соглашение по своей сути представляет собой гражданскую сделку в порядке ст. 153 ГК РФ, заключаемой сторонами под контролем суда на предмет его соответствия закону и законным интересам других лиц (ч.3 ст. 139 АПК РФ).

Доказательств о предложении реструктуризации долга, переписки сторон о возможности заключения мирового соглашения суду не представлено. Таким образом, довод ответчика о добровольном урегулировании возникшего спора во внесудебном порядке не нашел документального подтверждения.

Кроме того, согласно п. 1 ст. 138 АПК РФ мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта.

Поскольку взаимного согласия на подписание мирового соглашения сторонами не достигнуто, ходатайство ответчика об отложении судебного разбирательства не подлежит удовлетворению в целях экономии процессуального времени. 

Изучив материалы дела, оценив представленные доказательства, проверив обоснованность исковых требований по имеющимся в деле материалам, заслушав представителей сторон, суд пришел к следующим выводам.

Как установлено судом, между обществом с ограниченной ответственностью «ОРИОН» (подрядчик) и Федеральным государственным унитарным предприятием «Главный центр специальной связи» (заказчик) был заключен договор на выполнение ремонтно-строительных работ на объектах ФГУП ГЦСС № 19 от 30.12.2016 г., в соответствии с условиями которого Подрядчик обязуется на основании Заказа выполнить ремонтно-строительные работы из числа работ, перечисленных в приложении 1 к Договору (далее - Работы), на объектах Заказчика, указанных в Приложении 2 к Договору (далее - Объекты), включая обеспечение материалами, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их.

Цена настоящего Договора в течение срока его действия составляет сумму не более 150 000 000 руб., в том числе НДС 18 % в размере 22 881 355.93 руб.

	Согласно п. 2.3 договора Заказчик оплачивает Работы по ценам, указанным в заказах, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, согласно расценкам, указанным в Приложении 1 к настоящему Договору, с учетом раздела 3 Договора.

	Заказчик обеспечивает поэтапную оплату работ в следующем порядке:

-- аванс в размере 30% цены заказа перечисляется в течение 15 банковских дней с даты подписания Сторонами Заказа и выставления счета Подрядчиком:

- оставшаяся часть цены заказа выплачивается Заказчиком ежеквартально, в течение 15 банковских дней с даты завершения соответствующего  квартала, на основании акта о выполнении работ за соответствующий квартал, за вычетом аванса, пропорционально объему выполненных работ на основании промежуточных актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. подписанных Сторонами в соответствующем квартале после выставления Подрядчиком счета и счета-фактуры на сумму платежа.

	Заказчик направляет на электронную почту Подрядчика Заказ по форме, приведённой в Приложении 5 к Договору.

Заказ считается полученным Подрядчиком с момента получения Заказчиком электронного сообщения о подтверждении доставки и прочтения электронного сообщения (Reading Confirmation), а в случае неполучения Заказчиком сообщения о подтверждении доставки и прочтения электронного сообщения (Reading Confirmation) - по истечении 24 часов с момента отправки Заказчиком сообщения по электронной почте.

	Подрядчик в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения данных от Заказчика формирует и направляет на электронную почту Заказчика подписанные электронной подписью Подрядчика проекты технического задания и локальной сметы, являющихся неотъемлемыми приложениями к Заказу.

Подрядчик приступает к выполнению Работ по соответствующему Заказу после подписания Сторонами акта передачи объекта для производства работ, оформленного в соответствии с формой Приложения 3 к Договору.

            Работы по соответствующему Заказу должны быть выполнены в срок не более 60 календарных дней с момента подписания Заказа, если иной срок не определен в Заказе в соответствии с техническим заданием. Максимальный срок выполнения конкретного Заказа не может составлять менее срока, определенного в соответствии с Нормами продолжительности капитального ремонта жилых и общественных зданий и объектов городского благоустройства  (утв. Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР), а в случае неприменимости указанных Норм - не может составлять более 60 календарных дней.

	Приёмка выполненных Работ осуществляется в следующем порядке:

Для фиксации фактически выполненного объема Работ Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты завершения всех Работ, предусмотренных каждым заказом, передает Заказчику подписанный со своей стороны промежуточный акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 в 3  экземплярах, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме  КС-3  в 3 экземплярах. По согласованию с Заказчиком  Подрядчик вправе осуществлять промежуточную фиксацию отдельных объемов Работ до завершения выполнения Заказа в полном объеме.

Выполненные Подрядчиком Работы считаются принятыми Заказчиком после подписания сторонами акта о выполнении работ за соответствующий квартал (для целей исполнения настоящего Договора под кварталом понимаются каждые последовательные три месяца срока действия Договора, начиная со дня заключения Договора до истечения срока его действия/расторжения), включающего перечень всех Работ, выполнение которых зафиксировано в подписанных в течение отчетного квартала промежуточных актах о приемке выполненных работ по форме КС-2. с ценами, зафиксированными в соответствующих справках о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Проект акта о выполнении работ за соответствующий квартал формируется и направляется Подрядчиком в адрес Заказчика не позднее пяти рабочих дней с качала квартала, следующего за отчетным.

Заказчик устанавливает обеспечение исполнения обязательств по Договору, кроме гарантийных обязательств (обеспечение Договора). Размер обеспечения Договора устанавливается в размере 1 (Одного) процента от начальной (максимальной) цены Договора, что составляет 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Обеспечение Договора предоставляется участником закупки в форме обеспечительного платежа, т.е. денежных средств, подлежащих перечислению на счет Заказчика, указанный в п. 13 настоящею Договора.

Обеспечение Договора должно быть предоставлено Подрядчиком в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты получения проекта Договора.

Обеспечение Договора может быть удержано Заказчиком во всех случаях ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком обязательств по Договору, в том числе и при отказе Подрядчика от исполнения Договора. Обеспечение Договора предоставляется Подрядчиком для обеспечения надлежащею выполнения Подрядчиком принятых в соответствии с Договором обязательств, включая предусмотренные Договором обязательства по возврату неотработанного аванса, уплате неустойки и возмещению потерь, а также для обеспечения компенсации Заказчику возможных убытков, подлежащих возмещению в соответствии с Договором.

В случае окончания срока действия Договора или его расторжения денежные средства, указанные в п. 8.1 Договора, оставшиеся после удовлетворения требований Заказчика в соответствии с п. 8.4 Договора, подлежат возврату на расчетный счет Подрядчика в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты окончания срока действия либо расторжения настоящего Договора.

В соответствии с разделом 8 договора Подрядчик в обеспечение исполнения  обязательств по Договору подряда  был перечислен обеспечительный платеж в сумме 1 500 000 руб., что подтверждается платежным поручением №1 от 10.01.2017 г.

Истец указывает, что в соответствии с условиями Договора подряда № 19 выполнило ремонтно-строительные работы: в IV квартале 2018 года на сумму 17 660 446,01 руб. на основании заказов ФГУП ГЦСС  № 45 от 13.06.2018,  № 51 от 26.06.2018, № 61 от 20.07.2018, № 62 от 17.07.2018, № 63 от 13.07.2018, № 64 от 19.07.2018, № 65 от 19.07.2018, № 66 от 16.07.2018, № 68 от 20.07.2018, № 69 от 20.07.2018, № 70 от 19.07.2018, № 71 от 20.07.2018, № 72 от 04.07.2018, № 73 от 05.07.2018, № 74 от 10.07.2018, № 75 от 03.07.2018; в I квартале 2019 года – на сумму 299 845,04 руб., на основании заказа ФГУП ГЦСС № 67 от 18.07.2018;

	Общая сумма выполненных работ составила 17 960 291,05 руб., в том числе НДС 18%.

Выполненные работы были приняты заказчиком без  претензий по качеству, объему и срокам, что подтверждается подписанными актами выполненных работ. 

Вместе с тем между сторонами был заключен договор на выполнение ремонтно-строительных работ на объектах ФГУП ГЦСС № 18 от 30.12.2016 г., в соответствии с условиями которого  подрядчик обязался на основании заказов ФГУП ГЦСС выполнить ремонтно-строительные работы из числа работ, перечисленных в Приложении 1 к Договору на объектах Заказчика, указанных в Приложении 2 к Договору, включая обеспечение материалами, а Заказчик обязался принять результат Работ и оплатить их.

	Цена настоящего Договора в течение срока его действия составляет сумму не более 70 000 000 руб.., в том числе НДС 18 % в размере 10 677 966,10 руб.. 

	Заказчик оплачивает Работы по ценам, указанным в Заказах, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, согласно расценкам, указанным в Приложении 1 к настоящему Договору, с учетом раздела 3 Договора.

Заказчик направляет на электронную почту Заказ по форме, приведённой в Приложении 5 к Договору.

Заказ считается полученным Подрядчиком с момента получения Заказчиком электронного сообщения о подтверждении доставки и прочтения электронного сообщения (Reading Confirmation), а в случае неполучения Заказчиком сообщения о подтверждении доставки и прочтения электронного сообщения (Reading Confirmation) - по истечении 24 часов с момента отправки Заказчиком сообщения по электронной почте.

Подрядчик в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения данных от Заказчика формирует и направляет на электронную почту Заказчика подписанные электронной подписью Подрядчика проекты технического задания и локальной сметы, являющихся неотъемлемыми приложениями к Заказу.

Подрядчик приступает к выполнению Работ по соответствующему Заказу после подписания Сторонами акта передачи объекта для производства работ, оформленного в соответствии с формой Приложения 3 к Договору.

Работы по соответствующему Заказу должны быть выполнены в срок не более 60 календарных дней с момента подписания Заказа, если иной срок не определен в Заказе в соответствии с техническим заданием. 

Приёмка выполненных Работ осуществляется в следующем порядке:

Для фиксации фактически выполненного объема Работ Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты завершения всех Работ, предусмотренных каждым заказом, передает Заказчику подписанный со своей стороны промежуточный акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 в 3 экземплярах, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 3 экземплярах. По согласованию с Заказчиком Подрядчик вправе осуществлять промежуточную фиксацию отдельных объемов Работ до завершения выполнения Заказа в полном объеме.

Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней подписывает промежуточные акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 или направляет Подрядчику мотивированный отказ с указанием причин, препятствующих их подписанию.

В случае мотивированного отказа Стороны составляют двухсторонний акт с перечнем замечаний и сроками их устранения. В случае уклонения Подрядчика от участия в составлении двустороннего акта или от его подписания, Заказчик вправе самостоятельно составить такой акт и направить Подрядчику для исполнения.

Заказчик устанавливает обеспечение исполнения обязательств по Договору, кроме гарантийных обязательств (обеспечение Договора). Размер обеспечения Договора устанавливается в размере 1 (Одного) процента от начальной (максимальной) цены Договора, что составляет 700 000 (Семьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Обеспечение Договора предоставляется участником закупки в форме обеспечительного платежа, т.е. денежных средств, подлежащих перечислению на счет Заказчика, указанный в п. 13 настоящего Договора.

Обеспечение Договора должно быть предоставлено Подрядчиком в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты получения проекта Договора.

Обеспечение Договора может быть удержано Заказчиком во всех случаях ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком обязательств по Договору, в том числе и при отказе Подрядчика от исполнения Договора. Обеспечение Договора предоставляется Подрядчиком для обеспечения надлежащего выполнения Подрядчиком принятых в соответствии с Договором обязательств, включая предусмотренные Договором обязательства по возврату неотработанного аванса, уплате неустойки и возмещению потерь, а также для обеспечения компенсации Заказчику возможных убытков, подлежащих возмещению в соответствии с Договором.

	Как указывает истец, в соответствии с договором № 18 от 30.12.2016 г. был перечислен   обеспечительный платеж в сумме 700 000 руб.

В соответствии с Договором подряда № 18 истец выполнил работы в IV квартале 2018 года на сумму 5 385 740,34 руб. на основании заказов ФГУП ГЦСС № 12 от 11.07.2018, № 13 от 12.07.2018, № 15 от 13.07.2018, № 16 от 16.07.2018, № 17 от 20.07.2018, № 20 от 17.08.2018; в I квартале 2019 года – на сумму 81 947,96 руб., на основании заказа ФГУП ГЦСС № 18 от 16.07.2018;

Всего выполнено работ на сумму  5 467 688,30 руб., в том числе НДС 18%.

Указанные работы  были приняты заказчиком без замечаний по качеству, объемам и срокам, что подтверждается подписанными актами выполненных работ. 

Договоры на выполнение ремонтно-строительных работ № 18, № 19  от 30.12.2016 г. были расторгнуты соглашениями на следующих условиях. 

На момент расторжения договора № 18 от 30.12.2016 г. подрядчиком в полном объеме выполнены ремонтно-строительные работы, предусмотренные договором и заключенным заказам.

В соответствии с соглашением о расторжении заказчик обязан  произвести оплату за выполненные подрядчиком в 4 квартале 2018 и 1 квартале 2019 и принятые Заказчиком работы в размере 5 467 688,30 руб., в том числе НДС в размере 835 211,59 руб. в течение 20 (Двадцать) банковских дней с момента заключения Соглашения.

Согласно п. 8.8 Договора Заказчик в течение 5 календарных дней обязан перечислить на расчетный счет Подрядчика сумму обеспечительного платежа, перечисленного Подрядчиком Заказчику 10.01.2017 (платежное поручение № 2 от 10.01.2017) в целях обеспечения исполнения обязательств по Договору в соответствии с условиями раздела 8 Договора, в размере 700 000 руб. 

	В соответствии с соглашением о расторжении договора подряда № 19 от 30.12.2016 г. подрядчиком в полном объеме выполнены ремонтно-строительные работы, предусмотренные Договором, согласно заключенным заказам.

     Заказчик обязан произвести оплату за выполненные Подрядчиком в 4 квартале 2018 и 1 квартале 2019 и принятые Заказчиком работы в размере 17 960 291,05 руб., в том числе НДС в размере 2 743 940,51 руб. в течение 20 (Двадцать) банковских дней с момента заключения Соглашения.

     Согласно п. 8.8 Договора Заказчик в течение 5 (Пяти) календарных дней обязан перечислить на расчетный счет Подрядчика сумму обеспечительного платежа, перечисленного Подрядчиком Заказчику 10.01.2017 (платежное поручение № 1 от 10.01.2017) в целях обеспечения исполнения обязательств по Договору в соответствии с условиями раздела 8 Договора, в размере 1 500 000 руб.

	 Как указывает истец, выполнение работы по договорам № 18, № 19 ответчиком не оплачены, обеспечительные платежи не возвращены.

	  В целях досудебного урегулирования спора, истец направил в адрес ответчика претензии с требованиями  погасить задолженность и возвратить обеспечительные платежи.

           Денежные средства ответчиком не возвращены, в связи с чем истец обратился с настоящим иском. 

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства  должны  исполняться  надлежащим  образом  в   соответствии   с   условиями  обязательства   и требованиями закона,  иных  правовых  актов,  а  при  отсутствии  таких  условий   и  требований  в  соответствии с обычаями  делового  оборота  или  иными  обычно  предъявляемыми требованиями.      

Статья 310 ГК РФ указывает на то, что односторонний  отказ  от  исполнения  обязательства  и  одностороннее   изменение   его  условий  не  допускается.

Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с п. 1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Основанием для возникновения обязательства ответчика по оплате выполненных работ является сдача ему результата работ (ст. ст. 711, 720, 746, 753 ГК РФ).

Согласно п.1 ст. 753 ГК РФ, Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке.

Пунктом 4 ст. 753 ГК РФ установлено, что сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

В силу пункта 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда" основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Согласно п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Часть 1 статьи 381.1. ГК РФ установлено, что денежное обязательство, в том числе обязанность возместить убытки или уплатить неустойку в случае нарушения договора, и обязательство, возникшее по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 1062 настоящего Кодекса, по соглашению сторон могут быть обеспечены внесением одной из сторон в пользу другой стороны определенной денежной суммы (обеспечительный платеж). Обеспечительным платежом может быть обеспечено обязательство, которое возникнет в будущем. При наступлении обстоятельств, предусмотренных договором, сумма обеспечительного платежа засчитывается в счет исполнения соответствующего обязательства.

В случае ненаступления в предусмотренный договором срок обстоятельств, указанных в абзаце втором пункта 1 статьи 381.1. ГК РФ, или прекращения обеспеченного обязательства обеспечительный платеж подлежит возврату, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

Из приведенных норм следует, что лицо, получившее обеспечительный платеж, вправе использовать его в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения другой стороной своих обязательств для возмещения убытков или в счет уплаты неустойки.

В пункте 29 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2017, в случае исполнения контракта с просрочкой обеспечительный платеж удерживается заказчиком в размере, равном размеру имущественных требований заказчика к исполнителю, если иное не предусмотрено контрактом. Установление требования об обеспечении исполнения государственного контракта служит средством минимизации рисков неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком) своих обязательств по контракту, обеспечение исполнения контракта призвано обеспечить обязательства контрагента, вытекающие из контракта, а также обязанности, связанные с нарушением условий контракта, и упростить процедуру удовлетворения за счет суммы обеспечения требований заказчика к контрагенту. Вносимые исполнителем денежные средства как обеспечительный платеж обеспечивают в том числе исполнение денежного обязательства по уплате неустойки (часть 1 статьи 2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, пункт 1 статьи 381.1 Гражданского кодекса Российской Федерации). При этом по смыслу положений пунктов 1 и 2 статьи 381.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 94, 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ размер суммы удерживаемого обеспечения напрямую взаимосвязан с размером имеющихся у заказчика конкретных требований к исполнителю (поставщику, подрядчику), поскольку внесенные исполнителем денежные средства должны обеспечивать требование в том объеме, какое оно имеет к моменту удовлетворения.

Судом установлено, что выполненные работы подрядчиком были приняты заказчиком без каких-либо замечаний по качеству, объему и срокам, что подтверждается подписанными сторонами актами выполненных работ и проставленной печатями организаций.  

Принятие работ заказчиком свидетельствует о потребительской ценности выполненных подрядчиком работ и желании ими воспользоваться, а сдача результата работ заказчику является основанием для возникновения у заказчика обязательства по оплате выполненных работ (пункты 2, 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда»).

Ответчиком в материалы дела не представлено доказательств того, что лицо, подписавшее акты выполненных работ, являлось неуполномоченным, также не имеется сведений об утрате печати ответчиком. Подлинность печати Федерального государственного унитарного предприятия "Главный центр специальной связи" на данных документах ответчиком не оспорена, доказательств обращения в компетентные органы с заявлением об утрате либо хищении печати ответчика не представлено. 

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Информационном письме от 23.10.2000 № 57 «О некоторых вопросах практики применения статьи 183 Гражданского кодекса Российской Федерации», действия работников представляемого по исполнению обязательства, исходя из конкретных обстоятельств дела, могут свидетельствовать об одобрении, при условии, что эти действия входили в круг их служебных (трудовых) обязанностей, или основывались на доверенности, либо полномочие работников на совершение таких действий явствовало из обстановки, в которой они действовали (абзац 2 пункта 1 статьи 182 ГК РФ). 

В соответствии со ст. 64 АПК РФ - доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим кодексом и другими Федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования или возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела. В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио-видеозаписи, иные документы и материалы. 

Согласно ст. 65 АПК РФ - каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

В соответствии со ст. 71 АПК РФ - доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. 

Арбитражным процессуальным законодательством установлены критерии оценки доказательств в качестве подтверждающих фактов наличия тех или иных обстоятельств. 

Доказательства, на основании которых лицо, участвующее в деле, обосновывает свои требования и возражения должны быть допустимыми, относимыми и достаточными. 

Признак допустимости доказательств предусмотрен положениями ст. 68 АПК РФ. 

В соответствии с указанной статьей обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами. 

Достаточность доказательств можно определить как наличие необходимого количества сведений, достоверно подтверждающих те или иные обстоятельства спора. 

Отсутствие хотя бы одного из указанных признаков является основанием не признавать требования лица, участвующего в деле, обоснованными (доказанными). 

            Возражения ответчика, изложенные в отзыве, судом рассмотрены и отклонены как недоказанные и необоснованные, опровергаемые представленными истцом в материалы дела доказательствами и противоречащие обстоятельствам дела.

Выполнение и принятие работ по договорам № 18 , № 19  фактически ответчиком не оспариваются, каких-либо относимых и достоверных доказательств о невыполнении работ ответчиком не представлено. 

           Учитывая вышеизложенное, принимая во внимание, что Ответчик не доказал оплату задолженности по договору подряда № 19 в размере 17 960 291,05 руб., по договору подряда № 18 в размере 5 467 688,30 руб., задолженности  по возврату обеспечительного платежа по договору № 19 в размере 1 500 000 руб.,  задолженности  по возврату обеспечительного платежа по договору № 18 в размере 700 000 руб. в связи с чем, суд приходит к выводу, что в соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ, исковые требования по взысканию суммы задолженности правомерны и подлежат удовлетворению в полном объеме.

В порядке ст. 110 АПК РФ, расходы по уплате госпошлины за рассмотрение искового заявления подлежат взысканию с ответчика в пользу истца. 

Руководствуясь ст. ст. 8-12, 309, 310, 702, ГК РФ, ст. ст. 101, 106, 110, 168, 170, 171, 176 АПК РФ, суд		

Р Е Ш И Л :

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия "Главный центр специальной связи" (129626, Москва город, 1-я Мытищинская улица, 17, ОГРН: 1027700041830, Дата присвоения ОГРН: 19.07.2002, ИНН: 7717043113в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Орион" (117246, Россия, Москва г., муниципальный округ Черемушки вн.тер.г., Научный пр-д, д. 12, этаж 2, помещ. 22, ОГРН: 1137746345197, Дата присвоения ОГРН: 16.04.2013, ИНН: 7728841040) задолженность по договору подряда №19 в размере 17 960 291 (Семнадцать миллионов девятьсот шестьдесят тысяч двести девяносто один) руб. 05 коп., задолженность по договору подряда №18 в размере 5 467 688 (Пять миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят восемь) руб. 30 коп., задолженность по возврату обеспечительного платежа по договору №19 в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) руб., задолженность по возврату обеспечительного платежа по договору №18 в размере 700 000 (Семьсот тысяч) руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 151 140 (Сто пятьдесят одна тысяча сто сорок ) руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его  изготовления в полном объеме в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья						                          А.А. Федоточкин