РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № А40-19839/19-110-182

08 июля 2019 года

город Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 25 июня 2019 года 

Решение в полном объеме изготовлено 08 июля 2019 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В.  /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания помощником Зайченко О.И.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "УРБАН-ПРОЕКТ" (127299, Москва город, улица Академическая Б., 5, ОГРН: 1097746838970) к  обществу с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗИЯ ПРОЕКТ" (141400, Московская область, город Химки, шоссе Вашутинское, дом 1, корпус 2-3, помещение № 17, ОГРН: 1117746718100) о взыскании  12 082 934,76 руб.,

при участии:

от истца – Марченко  О.А. по дов.  от  21.02.2019 ,

от ответчика- Жидков  С.А. по дов.  от 09.07.2018 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "УРБАН-ПРОЕКТ" обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗИЯ ПРОЕКТ" о взыскании 900 000 руб. задолженности по Договору №577.ДОГОВОР.ДВОУ_АН.01.07.2015 от 01.07.2015, 53 075,35 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 10.04.2018 по 25.01.2019, 6 135 605 руб. задолженности по Договору №773.ДОГОВОР.ДА+ДВОУ-Проект.01.11.2016 от 01.11.2016, 176 091,86 руб. пеней за период с 17.04.2018 по 28.01.2019, 2 326 409,28 руб. задолженности по Договору №798.ДОГОВОР.ДА.ДВОУ-Проект.16.12.2016 от 16.12.2016, 73 281,89 руб. пеней за период с 20.03.2018 по 28.01.2019, 1 925 270,38 руб. задолженности по Договору №784.ДОГОВОР.ДА+ДВОУ-Проект.16.01.2017 от 16.01.2016, 76 818,29 руб. пеней за период с 23.12.2017 по 28.01.2019, 400 814,66 руб. задолженности по Договору №800.ДОГОВОР.ДА.ДВОУ-Проект.13.01.2017  от 13.01.2017, 14 870,22 руб. пеней за период с 20.01.2018 по 28.01.2019.

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве.

Заслушав представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам:

Как усматривается из материалов дела, В период с 01 июля 2015 года по 13 января 2017 года между Обществом с ограниченной ответственностью «Евразия Проект» (далее - Заказчик, Ответчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Урбан-Проект» (далее - Исполнитель, Истец) были заключены следующие Договоры:

Договор №577.ДОГОВОР.ДВОУ_АН.01.07.2015 от 01.07.2015 (далее - Договор 1);

Договор № 773 .ДОГОВОР.ДА+ДВОУ-Проект.01.11.2016 от 01.11.2016 г. (далее - Договор 2);

Договор № 798.ДОГОВОР.ДА.ДВОУ-Проект.16.12.2016 от 16.12.2016 г. (далее – Договор 3);

4)Договор № 784.ДОГОВОР.ДА+ДВОУ-Проект. 16.01.2017 от 16.01.2016 г. (далее – Договор 4);

5)Договор № 800.ДОГОВОР.ДА.ДВОУ-Проект.13.01.2017 от 13.01.2017 г. (далее – Договор 5).

В соответствии с п. 1.1. Договора № 577.ДОГОВОР.ДВОУ_АН.01.07.2015 от 01.07.2015 г. в целях обеспечения соответствия технических и технологических решений и технико-экономических показателей объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденной проектной документации, а также обеспечения высокого качества возводимых зданий и сооружений, Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя оказание услуг (далее - Услуги) по ведению авторского надзора за строительством Жилого комплекса по адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи дер. Сабурово.

Согласно п. 3.2. Договора,оплата оказанных услуг по Договору осуществляется на основании подписанного сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг в течение 10-ти календарных дней после его подписания Заказчиком.

В силу п. 2.1.3. Договора Заказчик обязуется производить приемку и оплату работ, выполненных в соответствии с условиями Договора.

ООО «Урбан-Проект» выполнило работы по Договору 1 на общую сумму в размере 3 300 000,00 руб., что подтверждается подписанными сторонами Актами сдачи-приемки оказанных услуг за период с 30.09.2015 г. по 30.03.2018 г. ООО «Евразия Проект» произвело частичную оплату выполненных работ на сумму в размере 2 400 000,00 руб., оставшаяся часть в размере 900 000,00 руб. до настоящего времени не оплачена, о чем свидетельствует Акт сверки взаимных расчетов за период действия Договора.

Согласно п. 5.1. Договора стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с условиями Договора и действующим законодательством РФ.

В соответствии с п. 3.1. Договора № 773.ДОГОВОР.ДА+ДВОУ-Проект.01.11.2016 от 01.11.2016 г. Исполнитель (Агент) обязуется за вознаграждение по поручению Заказчика (Принципал) от своего имени, но за счет Заказчика (Принципала) совершить действия, связанные с разработкой и согласованием Проектной документации на Объект: Жилой комплекс, расположенный по адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи дер. Сабурово, жилой дом 14 (услуги ст. 1005 ГК РФ), отвечать перед Заказчиком за неисполнение третьим лицом сделки (ст. 993, 1011 ГК РФ), оказать услуги по контролю Проектной документации на предмет ее соответствия техническим условиям, исходным данным, требованиям СНиП и др., а также по сопровождению Проектной документации для строительства (ст. 779 ГК РФ).

Согласно п.п. 3.2. - 3.3. Договора 2, цена услуг Агента, услуг Исполнителя и вознаграждение за делькредере определяются Протоколом согласования договорной. Оплата по Договору производится в течение 30-ти рабочих дней с момента окончания предыдущего месяца, при наличии подписанного Сторонами отчета Агента, копий первичных документов, подтверждающих расходы по компенсации.

В соответствии с п. 4.2.1 Договора 2 Заказчик обязан оплатить на условиях Договора вознаграждение Агента, вознаграждение Исполнителя, вознаграждение за делькредере, а также компенсировать расходы Агента.

ООО «Урбан-Проект» исполнило свои обязательства по Договору, что подтверждается подписанными Сторонами Актами сдачи приемки оказанных услуг и отчетами Агента за период с 29.12.2016 г. по 01.03.2018 г. на общую сумму в размере: 11 022 605,00 рублей, ООО «Евразия Проект» произвело частичную оплату по Договору в размере 4 887 000,00 рублей, оставшаяся часть в размере 6 135 605,00 рублей до настоящего времени не оплачена.

В соответствии с п. 3.1. Договора № 798.ДОГОВОР.ДА.ДВОУ-Проект.16.12.2016 от 16.12.2016 г. Исполнитель (Агент) обязуется за вознаграждение по поручению Заказчика (Принципал) от своего имени, но за счет Заказчика (Принципала) совершить действия, связанные с разработкой и согласованием Проектной документации на Объект: Жилой комплекс, расположенный по адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи дер. Сабурово, жилой дом 8 (услуги ст. 1005 ГК РФ), отвечать перед Заказчиком за неисполнение третьим лицом сделки (ст. 993, 1011 ГК РФ), оказать услуги по контролю Проектной документации на предмет ее соответствия техническим условиям, исходным данным, требованиям СНиП И др., а также по сопровождению Проектной документации для строительства (ст. 779 ГК РФ).

Согласно п.п. 3.2. - 3.3. Договора 3 цена услуг Агента, услуг Исполнителя и вознаграждение за делькредере определяются Протоколом согласования договорной. Оплата по Договору производится в течение 30-ти рабочих дней с момента окончания предыдущего месяца, при наличии подписанного Сторонами отчета Агента, копий первичных документов, подтверждающих расходы по компенсации.

В соответствии с п. 4.2.1 Договора 3 Заказчик обязан оплатить на условиях Договора вознаграждение Агента, вознаграждение Исполнителя, вознаграждение за делькредере, а также компенсировать расходы Агента.

ООО «Урбан-Проект» исполнило свои обязательства по Договору, что подтверждается подписанными Сторонами Актами сдачи приемки оказанных услуг и отчетами Агента за период с 26.05.2017 г. по 31.01.2018 г. на общую сумму в размере: 13 147 974,88 рублей, ООО «Евразия Проект» произвело частичную оплату по Договору в размере 10 821 565,60 рублей, оставшаяся часть в размере 2 326 409,28 рублей до настоящего времени не оплачена.

В соответствии с п. 3.1. Договора № 784.ДОГОВОР.ДА+ДВОУ-Проект.16.01.2017 от 16.01.2016 г. Исполнитель (Агент) обязуется за вознаграждение по поручению Заказчика (Принципал) от своего имени, но за счет Заказчика (Принципала) совершить действия, связанные с разработкой и согласованием Проектной документации на Объект: Жилой комплекс, расположенный по адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи дер. Сабурово, жилой дом 9 (услуги ст. 1005 ГК РФ), отвечать перед Заказчиком за неисполнение третьим лицом сделки (ст. 993, 1011 ГК РФ), оказать услуги по контролю Проектной документации на предмет ее соответствия техническим условиям, исходным данным, требованиям СНиП и др., а также по сопровождению Проектной документации для строительства (ст. 779 ГК РФ).

Согласно п.п. 3.2. - 3.3. Договора 4 цена услуг Агента, услуг Исполнителя и вознаграждение за делькредере определяются Протоколом согласования договорной. Оплата по Договору производится в течение 30-ти рабочих дней с момента окончания предыдущего месяца, при наличии подписанного Сторонами отчета Агента, копий первичных документов, подтверждающих расходы по компенсации.

В соответствии с п. 4.2.1 Договора 4 Заказчик обязан оплатить на условиях Договора вознаграждение Агента, вознаграждение Исполнителя, вознаграждение за делькредере, а также компенсировать расходы Агента.

ООО«Урбан-Проект» исполнило свои обязательства по Договору, что подтверждается подписанными Сторонами Актами сдачи приемки оказанных услуг и отчетами Агента за период с 16.01.2017 г. по 10.11.2017 г. на общую сумму в размере: 6 806 068,88 рублей, ООО «Евразия Проект» произвело частичную оплату по Договору в размере 4 880 798,50 рублей, оставшаяся часть в размере 1 925 270,38 рублей до настоящего времени не оплачена.

В соответствии с п. 3.1. Договора № 800.ДОГОВОР.ДА.ДВОУ-Проект.13.01.2017 от 13.01.2017 г. Исполнитель (Агент) обязуется за вознаграждение по поручению Заказчика (Принципал) от своего имени, но за счет Заказчика (Принципала) совершить действия, связанные с разработкой и согласованием Проектной документации на Объект: Дошкольное образовательное учреждение на 235 мест, расположенное по адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи дер. Сабурово, (услуги ст. 1005 ГК РФ), отвечать перед Заказчиком за неисполнение третьим лицом сделки (ст. 993, 1011 ГК РФ), оказать услуги по контролю Проектной документации на предмет ее соответствия техническим условиям, исходным данным, требованиям СНиП и др., а также по сопровождению Проектной документации для строительства (ст. 779 ГК РФ).

Согласно п.п. 3.2. - 3.3. Договора 5 цена услуг Агента, услуг Исполнителя и вознаграждение за делькредере определяются Протоколом согласования договорной. Оплата по Договору производится в течение 30-ти рабочих дней с момента окончания предыдущего месяца, при наличии подписанного Сторонами отчета Агента, копий первичных документов, подтверждающих расходы по компенсации.

В соответствии с п. 4.2.1 Договора 5 Заказчик обязан оплатить на условиях Договора вознаграждение Агента, вознаграждение Исполнителя, вознаграждение за делькредере, а также компенсировать расходы Агента.

ООО «Урбан-Проект» исполнило свои обязательства по Договору, что подтверждается подписанными Сторонами Актами сдачи приемки оказанных услуг и отчетами Агента за период с 13.03.2017 г. по 30.11.2017 г. на общую сумму в размере: 1 787 356,97 рублей, ООО «Евразия Проект» произвело частичную оплату по Договору в размере 1 386 542,31 рублей, оставшаяся часть в размере 400 814,66 рублей до настоящего времени не оплачена, о чем свидетельствует Акт сверки взаимных расчетов за период действия Договора.

18 декабря 2018 года ООО «Урбан-Проект» направило в адрес ООО «Евразия Проект» претензионные письма по указанным Договорам с требованием оплатить образовавшуюся задолженность, а также оплатить неустойку за просрочку исполнения обязательства по Договорам, однако указанное требование ООО «Евразия Проект» было оставлено без внимания, в связи с чем ООО «Урбан-Проект» вынуждено обратиться с настоящим исковым заявлением в Арбитражный суд за взысканием суммы основного долга, а также штрафных санкций с ООО «Евразия Проект» в принудительном порядке.

В соответствии с ч. 1 ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В силу ч. 1 ст. 781 заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Согласно ч. 1 ст. 1005 ГК РФ по агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала.

Согласно абз. 1 ст. 1006 ГК РФ Принципал обязан уплатить агенту вознаграждение в размере и в порядке, установленных в агентском договоре.

В соответствии ст. 1011 ГК РФ к отношениям, вытекающим из агентского договора, соответственно применяются правила, предусмотренные главой 49 (Поручение) или главой 51 (Комиссия) ГК РФ, в зависимости от того, действует агент по условиям этого договора от имени принципала или от своего имени, если эти правила не противоречат положениям настоящей главы или существу агентского договора.

Согласно ч. 1 ст. 991 ГК РФ комитент обязан уплатить комиссионеру вознаграждение, а в случае, когда комиссионер принял на себя ручательство за исполнение сделки третьим лицом (делькредере), также дополнительное вознаграждение в размере и в порядке, установленных в договоре комиссии.

При указанных обстоятельствах иск подлежит удовлетворению.

При  этом суд считает доводы ответчика несостоятельными, исходя из следующего.

Согласно п.п. 2.3.1., 4.4,4.5 Договора № 577.ДОГОВОР.ДВОУ_АН.01.07.2015 от 01.07.2015 г. Заказчик имеет право отказать Исполнителю в приемке услуг при невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем обязательств по Договору.

В случае отказа Заказчика от приемки услуг сторонами в течение 2-х рабочих дней с момента получения Исполнителем мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем разногласий и способов их урегулирования (п.4.4).

В случае неподписания Заказчиком полученного Акта сдачи-приемки оказанных услуг и отсутствия мотивированного отказа от его подписания услуги считаются принятыми по истечении 10-ти календарных дней от даты получения Акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчиком и подлежат оплате (п. 4.5).

Ответчик заявляет о том, что работы по Договору 1 были приняты частично, а подписанные сторонами акты оказанных услуг в дальнейшем были уничтожены, поскольку работы, по мнению Ответчика, выполнены Истцом не в полном объеме, однако со стороны Ответчика в адрес Истца претензии по качеству/объему выполненных ООО «Урбан-Проект» работ не поступали, мотивированный отказ от приемки работ со стороны ООО «Евразия проект» не заявлялся.

Кроме того, вышеуказанный Договор Ответчиком до настоящего времени не расторгнут, в связи с чем, подлежат исполнению со стороны ООО «Евразия проект».

Довод Ответчика об истечении срока исковой давности в отношении требований по акту № 1 от 30.09.2015 г., № 2 от 31.12.2015 г. по Договору № 577.ДОГОВОР.ДВОУ_АН.01.07.2015 от 01.07.2015 г. не влияет на предмет требований ООО «Урбан-Проект», поскольку работы по акту № 1, 2, а также 3, 4, 5, 6, 7, 8, были оплачены ООО «Евразия проект». Заказчик не оплатил оказанные ему услуги по актам:

№ 9 от 29.09.2017 г. на сумму 300 000,00 рублей;

№ 10 от 29.09.2017 г. на сумму 300 000,00 рублей;

№ 11 от 30.03.2018 г. на сумму 300 000,00 рублей.

Также довод Ответчика о том, что он авансировал невыполненные работы по Договору 1 на сумму 1 500 000,00 рублей не соответствует действительности и документально не подтверждено -Ответчиком в материалы дела не представлены платежные поручения на заявленную сумму с назначением платежа «аванс».

Согласно п. 4.2.2. Договора №773.ДОГОВОР.ДА+ДВОУ-Проект.01.11.2016 от 01.11.2016 ООО «Евразия проект» ежемесячно, не позднее 15-го числа текущего месяца, предоставить ООО «Урбан-Проект» мотивированный отказ или подписанные со совей стороны следующие документы: отчет Агента, акт сдачи-приемки оказанных услуг.

Ответчик также заявляет о том, что работы по договору №773.ДОГОВОР.ДА+ДВОУ-Проект.01.11.2016 от 01.11.2016 были приняты частично, а подписанные сторонами акты оказанных услуг и отчеты агента в дальнейшем были уничтожены, поскольку работы, по мнению Ответчика, выполнены Истцом не в полном объеме, однако со стороны Ответчика в адрес Истца претензии по качеству/объему выполненных ООО «Урбан-Проект» работ не поступали, мотивированный отказ от приемки работ со стороны ООО «Евразия проект» не заявлялся. Вышеуказанный Договор Ответчиком до настоящего времени не расторгнут, в связи с чем, подлежат исполнению со стороны ООО «Евразия проект».

Довод Ответчика о том,  что он авансировал неоказанные услуги по Договору 2 на сумму в размере 645 000,00 рублей по платежным поручениям: -№1337 от 16.12.2016 г.; -№2039 от 22.12.2016 г.; -№ 1359 от 23.12.2016 г.; -№1364 от 26.12.2016 г.; -№ 1377 от 28.12.2016 г.; -№ 1008 от 08.08.2017 г. не соответствует действительности и документально не подтверждено - Ответчиком в материалы дела не представлены платежные поручения на заявленную сумму с назначением платежа «аванс».

Согласно п. 4.2.2. Договора 3 ООО «Евразия проект» ежемесячно, не позднее 15-го числа текущего месяца, предоставить ООО «Урбан-Проект» мотивированный отказ или подписанные со совей стороны следующие документы: отчет Агента, акт сдачи-приемки оказанных услуг.

Ответчик также заявляет о том, что работы по Договору 3 были приняты частично, а подписанные сторонами акты оказанных услуг и отчеты агента в дальнейшем были уничтожены, поскольку работы, по мнению Ответчика, выполнены Истцом не в полном объеме, однако со стороны Ответчика в адрес Истца претензии по качеству/объему выполненных ООО «Урбан-Проект» работ не поступали, мотивированный отказ от приемки работ со стороны ООО «Евразия проект» не заявлялся. Е^пнеуказанный Договор Ответчиком до настоящего времени не расторгнут, в связи с чем, подлежат исполнению со стороны ООО «Евразия проект».

Довод Ответчика о том, он авансировал неоказанные услуги по Договору 3 на сумму в размере 2 125 139,23 рублей по платежным поручениям №№ 1051, 1043, 1095, 1114, 1135, 1298, 1340, 1360, 1370,1413, 1439,1340, 1476, 1502, 1503, 1535, 1561, 1562, 1572,1535, 1622, 1659,81 за период с 16.08.2017 г. по 19.01.2018 г., не соответствует действительности и документально не подтверждено, Ответчиком в материалы дела не представлены платежные поручения на заявленную сумму с назначением платежа «аванс».

Согласно п. 4.2.2. Договора 4 ООО «Евразия проект» ежемесячно, не позднее 15-го числа текущего месяца, предоставить ООО «Урбан-Проект» мотивированный отказ или подписанные со совей стороны следующие документы: отчет Агента, акт сдачи-приемки оказанных услуг.

Ответчик также заявляет о том, что работы по Договору 4 были приняты частично, а подписанные сторонами акты оказанных услуг и отчеты агента в дальнейшем были уничтожены, поскольку работы, по мнению Ответчика, выполнены Истцом не в полном объеме, однако со стороны Ответчика в адрес Истца претензии по качеству/объему выполненных ООО «Урбан-Проект» работ не поступали, мотивированный отказ от приемки работ со стороны ООО «Евразия проект» не заявлялся. Еышеуказанный Договор Ответчиком до настоящего времени не расторгнут, в связи с чем, подлежат исполнению со стороны ООО «Евразия проект».

Довод Ответчика о том, он авансировал неоказанные услуги по Договору 4 на сумму в размере 4 880 798,50 рублей по платежным поручениям №№ 968, 1076, 693, 700, 768, 777 за период с 03.08.2017 г. по 29.06.2017 г., не соответствует действительности и документально не подтверждено Ответчиком в материалы дела не представлены платежные поручения на заявленную сумму с назначением платежа «аванс».

Согласно п. 4.2.2. Договора 5 ООО «Евразия проект» ежемесячно, не позднее 15-го числа текущего месяца, предоставить ООО «Урбан-Проект» мотивированный отказ или подписанные со совей стороны следующие документы: отчет Агента, акт сдачи-приемки оказанных услуг.

Ответчик также заявляет о том, что работы по Договору 5 были приняты частично, а подписанные сторонами акты оказанных услуг и отчеты агента в дальнейшем были уничтожены, поскольку работы, по мнению Ответчика, выполнены Истцом не в полном объеме, однако со стороны Ответчика в адрес Истца претензии по качеству/объему выполненных ООО «Урбан-Проект» работ не поступали, мотивированный отказ от приемки работ со стороны ООО «Евразия проект» не заявлялся. Еышеуказанный Договор Ответчиком до настоящего времени не расторгнут, в связи с чем, подлежат исполнению со стороны ООО «Евразия проект».

Довод Ответчика о том, он авансировал неоказанные услуги по Договору 5 на сумму в размере 1 386 542,31 рублей по платежным поручениям №№ 586, 645, 710, 1299, 1302, 1395, 996 за период с 23.05.2017 г. по 07.08.2017 г., не соответствует действительности и документально не подтверждено - Ответчиком в материалы дела не представлены платежные поручения на заявленную сумму с назначением платежа «аванс».

Таким образом, доводы Ответчика о неисполнении Истцом в полном объеме своих обязательств по Договорам 1, 2, 3, 4, 5 и об «отзыве своей подписи» на актах оказанных услуг и отчетах агента по указанным Договорам не соответствует действительности и документально Ответчиком не подтвержден. ООО «Евразия проект» не представило в материалы дела ни одного документа, свидетельствующего об отказе от приемки оказанных ООО «Урбан-Проект» услуг по названным Договорам.

Согласно ч. 8 ст.75 АПК РФ письменные доказательства представляются в арбитражный суд в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. В соответствии с частью 9 названной статьи подлинные документы представляются в арбитражный суд в случае, если обстоятельства дела согласно федеральному закону или иному нормативному правовому акту подлежат подтверждению только такими документами, а также по требованию арбитражного суда.

По правилам части 6 статьи 71 Кодекса суд не может считать доказанным факт, подтвержденный только копией документа, если подлинник документа в материалы дела не представлен, а копии этого документа, представленные лицами, участвующими в деле, не тождественны между собой.

Следовательно, в остальных случаях суд вправе руководствоваться заверенными копиями документов при условии, что никто из лиц, участвующих в деле, не оспаривает их подлинность по правилам статьи 161 АПК РФ. Ходатайство о фальсификации в установленном порядке ООО «Евразия проект» не заявило и иные копии актов оказанных услуг и отчетов агента, отличные от копий, представленных Истцом, не предъявляло.

Согласно ч. 1 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Следовательно, с ответчика подлежат взысканию проценты за просрочку оплаты задолженности по Договору 1 за период с 10.04.2018 по 25.01.2019 в размере 53 075,35 руб.

Кроме того, на основании п. 5 Договоров  исполнение обязательств Сторон: по передаче, по приемке, по оплате обеспечиваются неустойкой в форме пени в размере 0,01% за день просрочки, но не более 5 % от стоимости (цены) обязательства, что по расчету истца, проверенному судом, составляют 341 062,26 руб. 

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по госпошлине относятся на ответчика.  

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123,156,169-171 АПК РФ,  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗИЯ ПРОЕКТ"  в пользу общества с ограниченной ответственностью "УРБАН-ПРОЕКТ" 11 688 099 руб. 32 коп. задолженности, 53 075 руб. 35 коп. процентов,341 062 руб. 26 коп. пени.

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗИЯ ПРОЕКТ"  в федеральный бюджет госпошлину в размере 83 415 руб. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

Судья:               А.В. Мищенко