РЕШЕНИЕ

 

Именем Российской Федерации

г.Москва

08.09.2017                                                                     Дело № А40-107737/17-110-1012  

         Резолютивная часть решения объявлена  05.09.2017

         Решение в полном объеме изготовлено 08.09.2017      

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В.  /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску   общества с ограниченной ответственностью архитектурно-строительная компания "ДОМИНАНТЕ" (ОГРН 

<

***>, 125047,

<

...>) к акционерному обществу "ОБОРОНСТРОЙПРОЕКТ СПБ" (ОГРН 

<

***>, 191028,

<

...>,литер А, помещение 57Н)  о взыскании 18 110 429,29 рублей,

при участии:

от истца – ФИО2 по дов.  от  28.03.2016 №45-03/16-Ю,

от ответчика-не явился, 

 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью архитектурно-строительная компания "ДОМИНАНТЕ" обратилось с иском к акционерному обществу "ОБОРОНСТРОЙПРОЕКТ СПБ" о взыскании 15 600 000 руб. задолженности, 2 510 429 руб. 29  коп. процентов.

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом о времени и месте судебного заседания. С учетом своевременного размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, суд рассмотрел спор в их отсутствие на основании ст.ст. 121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, п.5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011г. №12 «О некоторых вопросах применения АПК РФ в редакции Федерального закона от 27.07.2010 №228-ФЗ «О внесении изменений в АПК РФ». 

Заслушав представителя истца,  исследовав и оценив доказательства,  суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, 30 апреля 2014 года между Обществом с ограниченной ответственностью Архитектурно-строительная компания «Доминанте» (ранее Закрытое акционерное общество Архитектурно-строительная компания «Доминанте») (далее ООО АСК «Доминанте» или «Истец») и Акционерным обществом «ОБОРОНСТРОЙПРОЕКТ СПБ» (ранее Общество с ограниченной ответственностью «АсконСтрой») (далее АО «ОСП СПБ» или «Ответчик») был заключен договор №09/ПР/14-004 (№ 1415187376562090942000000/09/ПР/14-004) (далее «Договор»).

В соответствии с условиями Договора ООО АСК «Доминанте» обязалось по заданию АО «ОСП СПБ» выполнить научно-исследовательские, историко-архивные и проектные работы по объекту: «Реконструкция общевойсковой академии Вооруженных Сил Российской Федерации им. М.В. Фрунзе, расположенному по адресу: 

<

...> поля, д. 4 (далее «Объект»).

Общая стоимость Работ согласно п.4.1. Договора составляет 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 3 813 559 (три миллиона восемьсот тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 32 копейки.

13 августа 2015 года ООО АСК «Доминанте» было получено заключение Государственной историко-культурной экспертизы проектной документации по сохранению объекта культурного наследия

Сторонами подписаны следующие акты сдачи приемки выполненных работ по Договору:

1. Акт №1 приемки выполненных работ от 08 августа 2014 года (далее «Акт №1») (Приложение №5.1. к Исковому заявлению) по п. 1.1, п. 1.2. Этапа 1, Этапу 2, п.3.1. Этапа 3, п.4.1. Этапа 4 по Договору на общую сумму 12 370 000 (двенадцать миллионов триста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 1 886 949 (один миллион восемьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот сорок девять) рублей 15 копеек;

2. Акт №2 приемки выполненных работ от 06 июля 2016 года (далее «Акт №2») (Приложение №5.2. к Исковому заявлению) по п.1.3, п.1.4. Этапа 1, п.3.2. Этапа 3, п.4.2, п.4.3. Этапа 4, Этапа 5 по Договору на общую сумму 12 630 000 (двенадцать миллионов шестьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 1 926 610 (один миллион девятьсот двадцать шесть тысяч шестьсот десять) рублей 17 копеек;

3. Итоговый Акт приемки выполненных работ от 06 июля 2016 года (далее «Итоговый акт») (Приложение №5.3. к Исковому заявлению).

Общая стоимость Работ, принятых по актам сдачи приемки выполненных работ, составляет 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 3 813 559 (три миллиона восемьсот тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 32 копейки.

Согласно Акту №1 к оплате (за вычетом авансовых платежей) в адрес ООО АСК «Доминанте» подлежит сумма в размере 8 659 000 (восемь миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.

Согласно Акту №2 к оплате (за вычетом авансовых платежей) в адрес ООО АСК «Доминанте» подлежит сумма в размере 8 841 000 (восемь миллионов восемьсот сорок одна тысяча) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.

В соответствии с п.5.3. Договора оплата выполненных ООО АСК «Доминанте» работ производится АО «ОСП СПБ» в течение 30 (тридцати) банковских дней после подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ (Этапов работ), оригиналов счета и счета фактуры.

Оплата работ, выполненных ООО АСК «Доминанте», произведена АО «ОСП СПБ» не в полном объеме.

На 06 июня 2017 года у АО «ОСП СПБ» имеется задолженность перед ООО АСК «Доминанте» в размере 15 600 000 (пятнадцать миллионов пятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 2 379 661 (два миллиона триста семьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 02 копейки, Просрочка со стороны АО «ОСП СПБ» исполнения обязательств по оплате работ, выполненных ООО АСК «Доминанте», составляет:

1. По Акту №1 - 1002 (одна тысяча два) календарных дня (с 09 сентября 2014 года по 06 июня 2017 года);

2. По Акту №2 - 302 (триста два) календарных дня (с 09 августа 2016 года по 06 июня 2017 года).

При этом оплата Работ частичная оплата согласно Акту №1 производилась АО «ОСП СПБ» с просрочками относительно сроков, предусмотренных Договором.

17 марта 2017 года в адрес АО «ОСП СПБ» была направлена претензия (ИСХ. №09/17-056) (Приложение №7.1. к Исковому заявлению) (далее «Претензия») с требованием оплатить задолженность за фактически выполненные ООО АСК «Доминанте» Работы по Договору.

В соответствии с п. 12.4. Договора срок претензионного урегулирования споров -30 (тридцать) календарных дней с момента получения претензии Стороной.

Согласно п.12.5. Договора в случае не получения ответа на претензию в установленный Договором срок направившая ее сторона вправе обратиться в арбитражный суд г. Москвы.

По настоящий момент Претензия, направленная в АО «ОСП СПБ», оставлена без ответа, а задолженность в размере 15 600 000 (пятнадцать миллионов пятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 2 379 661 (два миллиона триста семьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 02 копейки АО «ОСП СПБ» не оплачена.

Согласно ст.309, ст.310 Гражданского кодекса РФ (далее «ГК РФ») обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями такого обязательства, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

При указанных обстоятельствах иск в этой части подлежит удволетворению.

В соответствии  со ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

Размер процентов, рассчитанный на 05 июня 2017 года, по расчету истца, проверенному судом, составляет 2 510 429 (два миллиона пятьсот десять тысяч четыреста двадцать девять) рублей 29 копеек.

При указанных обстоятельствах иск в этой части подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123,156,167-171 АПК РФ,

РЕШИЛ:

Взыскать с  акционерного общества "ОБОРОНСТРОЙПРОЕКТ СПБ"  в пользу общества с ограниченной ответственностью архитектурно-строительная компания "ДОМИНАНТЕ"15 600 000 руб. задолженности, 2 510 429 руб. 29  коп. процентов, 113 552 руб. в возмещение расходов по госпошлине.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

Судья:               А.В.Мищенко