4029/2017-399125(2) 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области 

Резолютивная часть решения

 

17 августа 2017 года. Дело № А56-38257/2017 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской  области  

решил:

Взыскать с публичного акционерного общества энергетики и электрификации  "Ленэнерго" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Коннолахтинский  55" 1 863 336 руб. 26 коп. неустойки за период просрочки с 31.12.2016 по 26.05.2017  и неустойки, рассчитанной в соответствии с пунктом 17 договора об осуществлении  технологического присоединения к электрическим сетям от 30.12.2015 № ОД-СПб- 16078-15/26168-Э-15 как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального  Банка Российской Федерации в размере 8,25% и общего размера платы за  технологическое произведение в сумме 11 049 850 руб. 31 коп., за последующий  период просрочки с 27.05.2017 по день фактического исполнения обязательства, а  также 37 633 руб. 00 коп. судебных расходов по оплате государственной пошлины за  рассмотрение дела в арбитражном суде первой инстанции.  

Обязать публичное акционерное общество энергетики и электрификации  "Ленэнерго" исполнить обязательства по договору от 30.12.2015 № ОД-СПб-16078- 15/26168-Э-15 об осуществлении технологического присоединения к электрическим  сетям жилого дома, расположенного по адресу: 

<

...>, литер А, к электрическим сетям в срок до 30.09.2017  

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца со дня принятия.  

Судья Бобарыкина О.А.