ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А45-26874/2021

г. Новосибирск

14 марта 2025 года

Резолютивная часть дополнительного решения объявлена 14 марта 2025 года 

Полный текст дополнительного решения изготовлен 14 марта 2025 года 

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи 

Гребенюк Д.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Савченко А.А., рассмотрев в судебном заседании вопрос о вынесении дополнительного решения по делу по первоначальному иску федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» (ОГРН 

<

***>),  

г. Новосибирск, 

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Стройкомплект» (ОГРН 

<

***>), г. Томск,  

о взыскании неустойки в размере 13 130 705 рублей 49 копеек, 

по встречному иску о взыскании задолженности в размере 40 039 093 рубля 20 копеек, неустойки в размере 4 080 811 рублей 01 копейки,  

при участии в судебном заседании представителей: 

истца - ФИО1, доверенность от 08.02.2021, паспорт, ФИО2, доверенность от 10.10.2023, паспорт;  

ответчика – не явился, извещен надлежащим образом, 

УСТАНОВИЛ:

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский  

государственный университет» (далее - ФГАОУВО «НГУ», истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Стройкомплект» (далее - ООО «СК «Стройкомплект», ответчик) о взыскании неустойки в размере 13 130 705 рублей 49 копеек.  

Определением от 26.10.2021 к производству принят встречный иск о взыскании задолженности по договору на выполнение работ № 20258 от 29.07.2020 в размере 50 000 рублей.  

В последующем требования встречного иска увеличены до 43 002 392 рублей 40 копеек.  

18.01.2022 ООО «СК «Стройкомплект» заявлено об увеличении размера требований по встречному иску до 64 720 068 рублей.  

26.05.2022 от ООО «СК «Стройкомплект» поступило заявление об уточнении исковых требований, согласно которому просит взыскать задолженность в размере 40 039 093 рубля 20 копеек.  

В рамках дела № А45-14804/2022 ООО «СК «Стройкомплект» заявлено требование о взыскании с ФГАОУВО «НГУ» неустойки по договору  

 № 20258 от 29.07.2020 в размере 50 000 рублей. В последующем размер исковых требований увеличен до 4 080 811 рублей 01 копейки.  

07.03.2025 судом оглашена резолютивная часть решения, Арбитражный суд Новосибирской области частично удовлетворил первоначальный и встречный иски.  

При изготовлении решения в полном объеме судом установлено, что при принятии решения не были рассмотрены требования встречного иска о взыскании неустойки с 08.06.2022 по 05.07.2023, неустойки с 06.07.2023 по день фактической оплаты задолженности, отраженные в заявлении об уточнении исковых требований от 04.07.2023 (т. 8 л.д. 56 – 58).  

В соответствии с частью 1 статьи 178 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, принявший решение, до вступления этого решения в законную силу по своей инициативе или по  

заявлению лица, участвующего в деле, вправе принять дополнительное решение в случае, если по какому-либо требованию, в отношении которого лица, участвующие в деле, представили доказательства, судом не было принято решение.  

Суд при вынесении решения не рассмотрел требования встречного иска о взыскании неустойки с 08.06.2022 по 05.07.2023, неустойки с 06.07.2023 по день фактической оплаты задолженности.  

На основании пункта 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательства может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.  

В соответствии со статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.  

Пунктом 10.8 договора предусмотрено, что в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от стоимости просроченного обязательства.  

Судом рассмотрено требование встречного иска о взыскании неустойки за период с 02.11.2021 по 07.06.2022 в размере 4 080 811 рублей 01 копейки, которое решением от 07.03.2025 удовлетворено частично - в сумме 2 712 625 рублей 20 копеек. Расчет содержится в решении.  

Согласно уточнений исковых требований от 04.07.2023 ответчиком заявлены требования о взыскании неустойки за период с 08.06.2022 по 05.07.2023 в размере 4 108 678 рублей 29 копеек, а также неустойки с 06.07.2023 по день фактической оплаты задолженности, которые судом не рассмотрены.  

Согласно пункту 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 7 от 24.03.2016 «О применении судами некоторых положений гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» по смыслу статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательств.  

Судом расчет ответчика проверен и признан неверным, с учетом установленной судом суммы, на которую подлежит начислению неустойка, исключения периода действия моратория на банкротства, размер неустойки согласно расчета суда составляет 2 269 480 рублей 18 копеек.  

Период просрочки 

 Задолженность с по дней Ставка Формула Неустойка  

11 704 384,61 

02.10.2022  

Новая задолженность на 11 704 384,61 руб. 

11 704 384,61 

02.10.2022  

05.07.2023 

277 

21 

11 704 384,61 × 277 × 1/300 × 21% 

2 269 480,18 р. 

Сумма основного долга: 11 704 384,61 руб. 

Сумма неустойки: 2 269 480,18 руб. 

Учитывая вышеизложенное, требование встречного иска в части  

взыскания неустойки с 08.06.2022 по 05.07.2023 признано судом подлежащим частичному удовлетворению – в размере 2 269 480 рублей 18 копеек. Неустойка подлежит начислению с 06.07.2023 по день фактической оплаты долга с применением 1/300 действующей ставки Центрального банка России на день уплаты долга от суммы долга (долг на дату вынесения решения - 11 704 384 рубля 61 копейка с учетом проведенного судебного зачета в части суммы основного долга).  

С учетом того, что по результатам удовлетворения не рассмотренного ранее судом требования встречного иска пропорция удовлетворенных требований по встречному иску изменилась (встречный иск удовлетворен на  

41,08 %), с истца в пользу ответчика дополнительно подлежат взысканию расходы на оплату судебной экспертизы в размере 13 860 рублей, в федеральный бюджет - с ответчика 2 637 рублей, с ответчика в доход федерального бюджета подлежит взысканию общая сумма государственной пошлины по встречному иску в размере 117 847 рубля.  

Так, по делу проведено 3 судебных экспертизы общей стоимостью 1 050 000 рублей. Доля расходов истца на оплату судебных экспертиз составляет 431 340 рублей, доля ответчика – 618 660 рублей. На депозит суда ответчиком внесено 730 000 рублей. Соответственно, с истца в пользу ответчика подлежат взысканию расходы по оплате судебной экспертизы в размере 111 340 рублей. Решением от 07.03.2025 с истца в пользу ответчика взыскано 97 480 рублей. Соответственно, дополнительно с истца подлежит взысканию 13 860 рублей (111 340 – 97 480). Государственная пошлина по встречному иску подлежит дополнительному взысканию в размере 2 637 рублей (82 153 – 4 000 – 75 516).  

По результатам рассмотрения требований о взыскании неустойки с 08.06.2022 по 05.07.2023, неустойки с 06.07.2023 по день фактической оплаты задолженности, судом произведен судебный зачет по первоначальному и встречному иску.  

 В результате судебного зачета с истца в пользу ответчика подлежит взысканию 16 686 489 рублей 99 копеек (14 828 520,40 + 2 712 625,20 + 2 269 480,18 - 3 124 135,79), судебные издержки в размере 22 686 рублей 47 копеек (97 480 + 13 860 - 88 653,53), а также неустойка с 06.07.2023 по день фактической оплаты долга с применением 1/300 действующей ставки Центрального банка России на день уплаты долга от суммы долга, которая подлежит начислению на сумму 11 704 384 рубля 61 копейка (с последующим уменьшением базы для ее начисления в случае поступления оплат).  

Руководствуясь статьями 167 – 171, 176, 178 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

По встречному иску взыскать с федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Стройкомплект» неустойку в размере 2 269 480 рублей 18 копеек, неустойку с 06.07.2023 по день фактической оплаты долга с применением 1/300 действующей ставки Центрального банка России на день уплаты долга, расходы по оплате судебной экспертизы в размере  

13 860 рублей. В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать. 

 В результате судебного зачета взыскать с федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Стройкомплект» 16 686 489 рублей 99 копеек, неустойку с 06.07.2023 по день фактической оплаты долга на дату вынесения решения с применением 1/300 действующей ставки Центрального банка России на день уплаты долга от суммы долга (долг на дату вынесения решения - 11 704 384 рубля 61 копейка), судебные издержки в размере 22 686 рублей 47 копеек.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Стройкомплект» в доход федерального бюджета государственную пошлину по встречному иску в размере 117 847 рубля.  

 Взыскать с федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» в доход  

федерального бюджета государственную пошлину по встречному иску в размере 2 637 рублей.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с момента его принятия. Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца со дня его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск). Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.  

 Судья Д.В. Гребенюк