АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

 

Дело №А27-24017/2023

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

именем Российской Федерации

 

28 февраля 2024 г.                                                                                             г. Кемерово

Резолютивная часть решения объявлена 21 февраля 2024 г.

Решение в полном объеме изготовлено 28 февраля 2024 г.

Арбитражный суд Кемеровской области в составе 

судьи                                                                                         Переваловой О.И., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГИЯ ПРОЕКТ", ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>

к муниципальному казенному учреждению "Жилищно - коммунальных услуг", ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>,

о взыскании 47626,67 руб. пени (с учётом принятого судом ходатайства в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации)  

у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГИЯ ПРОЕКТ" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Кемеровской области с иском к муниципальному казенному учреждению "Жилищно - коммунальных услуг" (далее – ответчик) о взыскании 47626,67 руб. пени (с учётом принятого судом ходатайства в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Исковые требования основаны на ненадлежащем исполнении ответчиком обязательств по оплате выполненных работ по муниципальному контракту № 41-22-ЭА от 07.07.2022.

Ответчик письменный отзыв не представил.

К настоящему судебному заседанию от  истца поступило ходатайство об  уточнении требований, согласно которому просит взыскать с ответчика  47626,67 руб. пени за период с 10.11.2023 по 28.11.2023. Уточнение принято судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Истец просил рассмотреть иск в отсутствие представителя.

Изучив материалы дела, суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

            Как следует из материалов дела, 08.07.2022г. между Муниципальным казенным учреждением «Жилищно-коммунальных услуг» (далее - Заказчик) и ООО «Энергия Проект» (далее - Подрядчик) заключен муниципальный контракт № 41-22-ЭА на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации объекта: "Строительство водопроводной сети по ул. Революции, ул. Крикуненко г. Топки" (далее - Контракт).

            В соответствии с п. 1.3. Контракта Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке проектно-сметной документации объекта: "Строительство водопроводной сети по ул. Революции, ул. Крикуненко г. Топки" (далее - Работа, Объект), подготовку отчетов о выполнении инженерных изысканий, разработку проектно-сметной и рабочей документации, получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий, выполнение иных действий Подрядчика, необходимых для выполнения работ по Контракту, и передать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ, в порядке и сроки, установленные Контрактом, получить заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного Объекта требованиям технических регламентов и проектно-сметной документации и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 

            Согласно п. 2.1 Контракта цена контракта составляет 4 700 000,00 руб.

            В соответствии с п. 4.5 Контракта приемка выполненной работы осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения Заказчиком проектно-сметной и рабочей документации, отчетов о выполнении инженерных изысканий, положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации и положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости и оформляется Актом приемки выполненных работ согласно Приложения № 3 к настоящему Контракту, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), либо Подрядчику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

            Согласно п. 4.6 Контракта работа считается выполненной надлежащего качества и в полном объеме после подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ.

             Согласно п. 2.4 и п. 2.5 Контракта Заказчик производит оплату работ после получения положительного заключения государственной экспертизы Проектно-сметной документации и при наличии положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости на расчетный счет Подрядчика в срок не более чем 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, согласно п.п. 4.7 4.8 настоящего Контракта (ч. 7 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ).

            Оценив возникшие правоотношения сторон, суд пришел к выводу, что между сторонами заключен договор подряда, отношения по которому регулируются главой 37 Гражданского кодекса РФ.

            В силу пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

            В силу пункта 4.7.  Контракта приемка результатов выполненных работ осуществляется посредством подписания документов о приемке товаров, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги в форме электронного документа в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС в сфере закупок) согласно Материалов для работы с документами о приемке товаров (работ, услуг) в электронной форме, размещенных на сайте ЕИС.

            Документы о приемке размещены в ЕИС 28.09.2023г. Электронная приемка результатов выполненных работ в соответствии с п.п. 4 п. 4.8 Контракта осуществляется Заказчиком в течение 20 рабочих дней.

            Следовательно, срок для подписания акта выполненных работ либо отказа от

подписания истек 26.10.2023г. Документы о приемке подписаны Заказчиком 27.10.2023г.

            Согласно п. 2.5 Контракта оплата производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в срок не более чем 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, согласно п.п. 4.7 4.8 настоящего Контракта (ч. 7 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ).

            С учетом положений статей 309, 310, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, условий договора следует считать наступившей обязанность ответчика оплатить принятый результат работы в полном объёме.

            Срок для оплаты выполненных работ (10 рабочих дней) истек 09.11.2023г., вместе с тем, оплата выполненных работ произведена 29.11.2023г. платежным поручением № 393919, таким образом, период просрочки оплаты по Контракту – с 10.11.2023 по 28.11.2023.

            В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.

Согласно п. 7.2 Контракта в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы (п. 7.3 Контракта).

Суд проверил расчет неустойки, признал его арифметически верным, соответствующим обстоятельствам дела, взысканию подлежит 47 626,67 руб. неустойки.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы от уплаты государственной пошлины за рассмотрение иска относятся на ответчика.

На основании изложенного, руководствуясь,    статьями         110, 167-171, 180-181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

удовлетворить иск. 

            взыскать с муниципального казенного учреждения "Жилищно - коммунальных услуг" (ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГИЯ ПРОЕКТ" (ИНН: 

<

***>) 47626,67 руб. пени, 2000 руб. расходов от уплаты государственной пошлины по иску, всего 49626,67  руб. 

            Обществу с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГИЯ ПРОЕКТ" (ИНН: 

<

***>)  возвратить из федерального бюджета 45758 руб.  государственной пошлины, излишне уплаченной по платежному поручению № 111 от 29.11.2023.

            Решение может быть обжаловано в арбитражный  суд апелляционной инстанции в течение одного месяца с момента его принятия.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба в Седьмой арбитражный апелляционный суд.

Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Кемеровской области.

Судья                                                                                      О.И. Перевалова