188/2019-55176(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51 / 53-02-05, http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть) 

город Омск  № дела  29 апреля 2019 года А46-10824/2018  

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Баландина В.А.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрел в открытом заседании суда дело по иску бюджетного  учреждения города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью  «Сибирский региональный союз» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),  

при участии в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований  относительно предмета спора, казенного учреждения Омской области открытого  акционерного общества «Союздорнии»,  

об обязании устранить дефекты 

В заседании приняли участие:  от истца - ФИО2 по доверенности от 25.05.2018 № 76;  

от ответчика – ФИО3 по доверенности от 05.02.2019 № 13;   ФИО4 по доверенности от 09.01.2019 № 1;  

от третьего лица – не явились;  

руководствуясь ст. ст. 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования бюджетного учреждения города Омска «Управление дорожного  хозяйства и благоустройства» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить  частично.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Сибирский региональный союз»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение одного месяца со дня вступления  решения в законную силу за счет собственных средств выполнить работы по устранению  дефектов на автомобильных дорогах в рамках гарантийных обязательств по Договорам на  выполнение подрядных работ по ремонту участков дорожно-транспортной сети города Омска   № 2016,94088 от 16 мая 2016 года, № 2016.95633 от 18 мая 2016 года и № 2016.92209 от 10  мая 2016, а именно:  

1) на участке от ул. Лукашевича до ул. Заозерная: устранить сетку продольных и  поперечных трещин (раскрытие от 5 до 20 мм., шаг 15-30 м., объем ремонта - 1350 п.м).  

2) по ул. Лукашевича (от ул. Волгоградская до моста имени 60-летия): устранить  продольные и поперечные трещины (раскрытие от 5 до 20 мм., шаг 10-30 м., объем ремонта1450 п.м.).  

3) по ул. Интернациональная (от ул. Красный путь до ул. Гагарина):  устранить колейность на ООТ «Главпочтамт» в сторону ул. Герцена (глубина колейности  

более 30 мм, объем ремонта 120 кв.м.).  

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сибирский региональный  союз» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу бюджетного учреждения города  Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) судебные расходы в размере 76 000 руб.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не  подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия  постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Омской области в порядке  апелляционного производства в Восьмой арбитражный апелляционный суд (644024, 

<

...> Октября, д. 42) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в  полном объеме).  

Судья В.А. Баландин 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 09.06.2018 10:43:21Кому выдана Баландин Виталий Александрович