СЕДЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

улица Набережная реки Ушайки, дом 24, Томск, 634050, http://7aas.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

город Томск Дело № А45-20276/2017 

Резолютивная часть постановления объявлена 06 ноября 2018 года.  Постановление изготовлено в полном объеме 07 ноября 2018 года.  

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Сухотиной В.М., судей Кайгородовой М.Ю.,  ФИО1, 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Стуловой М.В.  с использованием средств аудиозаписи, рассмотрел в судебном заседании общества с  ограниченной ответственностью СК «Базисстрой» ( № 07АП-7537/2018(2)) на решение от  07 августа 2018 года Арбитражного суда Новосибирской области (судья Зюзин С.Г.) по  делу № А45-20276/2017 по иску общества с ограниченной ответственностью СК  «Базисстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 630005, 

<

...>) к обществу с ограниченной ответственностью «Фуджи-Лифт» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, 630001, 

<

...>) о  взыскании 9 411 324,60 рублей задолженности и неустойки.  

В судебном заседании приняли участие: 

от истца: ФИО2 директор (паспорт), ФИО3 по доверенности от 09 апреля  2018 года (паспорт);  

от ответчика: ФИО4 по доверенности от 12 сентября 2017 года  (удостоверение).  

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью СК «Базисстрой» обратилось в Арбитражный  суд Новосибирской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью  «Фуджи-Лифт» о взыскании, с учетом уточнения в порядке статьи 49 Арбитражного  

процессуального кодекса Российской Федерации, 9 310 768,31 рублей основного долга и  2 173 369,04 рублей неустойки.  

Решением от 07 августа 2018 года исковые требования удовлетворены частично, с  ответчика в пользу истца взыскано 3 818 452,07 рублей основного долга; 503 130,06  рублей неустойки. В остальной части иска отказано. С истца в пользу ответчика взыскано  93 540 рублей судебных расходов по оплате стоимости экспертизы. В результате зачета с  ООО «Фуджи-лифт» в пользу ООО СК «Базисстрой» взыскано 3 724 912,07 рублей  основного долга и 503 130,06 рублей неустойки. С ООО СК «Базисстрой» в доход  федерального бюджета взыскано 50 158 рублей государственной пошлины. С ООО  «Фуджи-лифт» в доход федерального бюджета взыскано 30 263 рубля государственной  пошлины.  

Истец обратился с апелляционной жалобой. С учетом уточнения от 01 ноября 2018  года истец просил признать недопустимым доказательством заключение экспертов № 2816 от 28 мая 2018 года; признать ООО «Фуджи лифт» стороной, уклонившейся от  проведения дополнительной экспертизы, в соответствии с позицией Конституционного  Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 09 апреля 2002 года № 90-О,  признать выявленные при производстве первоначальной экспертизы недостатки не  препятствующими нормальной эксплуатации здания, не подлежащими устранению;  принять отказ от иска в части взыскания 201 624,48 рублей основного долга, 51 242,32  рублей неустойки; взыскать с ответчика 9 109 143,83 рубля основного долга, 2 122 126,72  рублей неустойки.  

Полагает, что в основу решения суда положено недопустимое доказательство, судом  применена двойная ответственность, приняты к расчету суммы по локально-сметным  расчетам эксперта, которые им впоследствии исправлены, не дана оценка контррасчету  истца, неправильно произведен расчет неустойки. Полученные после вынесения решения  рецензии дают основания полагать, что экспертами допущены грубейшие нарушения.  

В письменных возражениях ответчик просил оставить решение без изменения,  апелляционную жалобу – без удовлетворения.  

Заявленное представителем истца ходатайство о приобщении к материалам дела  рецензий, полученных истцом после вынесения решения и приложенных к апелляционной  жалобе, апелляционным судом оставлено без удовлетворения в связи с отсутствием  оснований, предусмотренных частью 2 статьи 268 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации.  

В судебном заседании представители сторон поддержали каждый свои доводы,  изложенные письменно.  

Представитель истца поддержала заявление об отказе от иска в части, последствия 

от отказа иска понятны, производство по делу в этой части исковых требований просила  прекратить.  

Согласно части 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается  рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном  суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично.  

Частью 5 той же статьи установлено, что арбитражный суд не принимает отказ истца  от иска, уменьшение им размера исковых требований, признание ответчиком иска, не  утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает  права других лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по существу.  

Пунктом 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации установлено, что арбитражный суд прекращает производство по делу, если  установит, что истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.  

Суд апелляционной инстанции принимает отказ истца от части исковых требований,  поскольку он не противоречит закону и не нарушает права других лиц, прекращает  производство по делу в указанной части.  

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, отзыва,  проверив в соответствии со статьей 268 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации законность и обоснованность решения в обжалуемой части,  арбитражный суд апелляционной инстанции приходит к выводу об изменении решения в  связи с несоответствием выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела.  

Из материалов дела следует, что между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик)  заключен договор подряда № П18/09 от 18.08.2016 года, по условиям которого подрядчик  обязуется выполнить строительно-монтажные работы, отсыпку фундамента и пазух  котлована на объекте «Здание торгового назначения по ул. Оловозаводская в Кировском  районе г.Новосибирска» (далее - объект), а заказчик обязуется принять работы и оплатить  их стоимость (далее - договор).  

Пунктом 3.1 согласована стоимость работ в размере 10 062 601,19 рублей. 

Истец во исполнение условий договора выполнил работы и уведомил ответчика о  готовности работ к приемке.  

Заказчик организовал приемку работ, по результатам которой был составлен акт  приемки объекта капитального строительства от 28.04.2017 года, подписанный истцом и  ответчиком без возражений и замечаний.  

Объект введен в эксплуатацию, ответчиком зарегистрировано право собственности  

ответчика и здание используется по назначению (передано в аренду под размещение  магазина).  

Общая стоимость выполненных истцом работ в соответствии с актами приемки  выполненных работ составила 9 310 768, рублей.  

Пунктом 3.3 установлено, что оплата работ производится в течение 20 банковских  дней с момента подписания актов приемки выполненных работ.  

В соответствии с реестром передаваемой документации от 26.06.2017 года истец  передал, а ответчик принял сметную документацию и акты приемки выполненных работ.  

Ответчик письмом от 17.07.2017 года потребовал от истца представить  исполнительную документацию, а также указал на необходимость устранения ранее  выявленных недостатков в соответствии с актом от 20.03.2017 года.  

Истец исполнительную документацию ответчику не направил, выявленные  недостатки не устранил.  

Претензией от 12.07.2017 года истец потребовал от ответчика оплатить стоимость  выполненных работ и неустойку за нарушение сроков оплаты.  

Письмом от 31.07.2018 года ответчик отказался оплачивать работы по причине того,  что истцом не передана исполнительная документация в полном объеме, а также не  устранены ранее выявленные недостатки работ.  

Отказ в оплате стоимости работ явился основанием для предъявления настоящего  иска.  

Согласно статье 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору  подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны  (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется  принять результат работы и оплатить его.  

В силу пункта 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если  договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или  отдельных её этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после  окончательной сдачи результатов работы, при условии, что работа выполнена  надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.  

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом,  подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем  делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной (часть 4 статьи 753  Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Согласно пункту 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации  односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом  

недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им  

обоснованными. 

Поскольку работы фактически приняты, объект введен в эксплуатацию и  используется по назначению, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что  у ответчика возникло обязательство по оплате стоимости выполненных работ.  

Неисполнение истцом обязательства по передаче исполнительной документации не  освобождает ответчика от оплаты выполненных работ. При этом суд учел, что объект  введен в эксплуатацию, право собственности зарегистрировано в установленном порядке,  что свидетельствует о наличии у ответчика необходимой для ввода объекта в  эксплуатацию исполнительной документации.  

Спор сводится, по сути, к определению объема и стоимости работ, подлежащих  оплате.  

По определению суда сторонами был произведен совместный осмотр объекта, по  результатам которого был составлен акт от 18.09.2017 года.  

В соответствии с актом при осмотре было установлено наличие недостатков  выполненных работ. Истец частично недостатки признал обоснованными (т.2 л.д.1).  

С учетом результатов осмотра объекта ответчиком было заявлено ходатайство о  проведении по делу судебной экспертизы с целью определения объемов фактически  выполненных работ, причин возникновения недостатков, установленных при осмотре, а  также стоимости их устранения.  

Определением суда от 19.10.2017 года проведение экспертизы было поручено  ФИО5 - эксперту общества с ограниченной ответственностью  «Негосударственная экспертиза Новосибирской области».  

Перед экспертом для дачи заключения были поставлены следующие вопросы:  

1. Определить, соответствуют ли виды и объем работы, указанные в актах приемки  выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 23.01.2017 (четыре акта), № 1 от 24.01.2017  (четыре акта), № 1 от 21.03.2017, № 1 от 03.04.2017, видами и объему работ, фактически  выполненных на объекте «Здание торгового назначения по адресу 

<

...>». Если нет, то определить виды, объем и стоимость работ, которые  включены в акты приемки, но фактически не выполнены; виды, объем и стоимость работ,  которые фактически выполнены, но не включены в акты приемки.  

2. Определить, имеются ли в фактически выполненных в соответствии с актами  приемки выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 23.01.2017 (четыре акта), № 1 от  24.01.2017 (четыре акта), № 1 от 21.03.2017, № 1 от 03.04.2017 года работах недостатки,  если да, то являются ли они существенными (неустранимыми) или несущественными  

(устранимыми). Определить стоимость устранения несущественных недостатков.  

Определить стоимость работ, выполненных с существенными недостатками.  

3. Определить, являются ли выявленные недостатки следствием ненадлежащего  выполнения исследуемых работ (работы, указанные в актах приемки выполненных работ  по форме КС-2 № 1 от 23.01.2017 (четыре акта), № 1 от 24.01.2017 (четыре акта), № 1 от  21.03.2017, № 1 от 03.04.2017) либо они возникли в результате выполнения работ иными  лицами до выполнения исследуемых работ (работы по устройству фундамента и части  металлокаркаса) и после окончания выполнения исследуемых работ (работы по  устройству системы кондиционирования и монтажу вывески на кровле).  

Согласно выводам эксперта фактически выполненные истцом работы имеют как  существенные, так и несущественные недостатки. Отвечая на первый вопрос, эксперт  указал, что частично работы, указанные в актах приемки выполненных работ не  выполнены, однако имеются фактически выполненные работы, но не вошедшие в акты  приемки выполненных работ.  

При допросе эксперта судом установлено, что фактически все объемы работ,  предусмотренные условиями договора, выполнены, однако в акты приемки выполненных  работ включено неверное наименование работ, отличное от вида фактически  выполненных работ. Так, например, в помещении ИТП проектом была предусмотрена  стена из кирпича (вид работ - кладка кирпичная), а фактически выполнена стена из мелких  блоков (вид работ - кладка перегородок из газобетонных блоков). Эксперт пояснил, что  работы по устройству лестничных маршей фактически выполнены, но выполненные  работы отличны от такого вида работ, как устройство опалубки типа «Дока».  

При ответе на второй вопрос эксперт указал, что выполненные работы имеют как  существенные, так и несущественные недостатки. При натурном осмотре экспертом  выявлены следующие недостатки: внутри помещения обнаружены многочисленные следы  протечки кровли; коррозия металлоконструкций; узел опирания колонны каркаса на  фундамент не обетонирован; просадка грунта под бетонным полом; трещина  перегородки, отделяющей ИТП от торгового зала; трещины бетонного пола. Оценив  указанные недостатки в своей совокупности, эксперт указал, что фундамент здания  находится в аварийном состоянии, для устранения которой требуется проведение  соответствующих работ.  

При ответе на третий вопрос эксперт сделал однозначный вывод, что все  выявленные недостатки являются следствием работ ненадлежащего качества,  допущенного истцом, и не относятся к эксплуатационным недостаткам, а также не  связаны с работами иных подрядчиков на объекте.  

В судебном заседании эксперт подтвердил свои выводы и дополнительно пояснил, 

что выявленные существенные недостатки являются существенными, но устранимыми. К  существенным недостаткам они отнесены по экономическому принципу, так как  стоимость их устранения сопоставима со стоимостью выполнения работ подобного вида в  том же объеме.  

Истец полагал выводы эксперта необоснованными, в связи с чем, эксперту были  поставлены соответствующие вопросы (т.4 л.д.98-99).  

Эксперт представил дополнительные письменные пояснения по вопросам истца, а  также дал устные пояснения при его допросе в судебном заседании (т.4 л.д.102-105).  

Поскольку экспертом в описательной части заключения было указано на нахождение  конструкций фундамента помещения объекта в аварийном состоянии, ответчик заявил  ходатайство о проведении дополнительной экспертизы с целью определения возможности  дальнейшей эксплуатации здания и стоимости работ по устранению недостатков  существенных недостатков.  

При этом ответчиком были представлены рекомендации по усилению несущих  конструкций 2/11-18, выполненные ООО «Николай II» (организация, разработавшая  проектную документацию в отношении объекта). Из указанных рекомендаций следует,  что они разработаны в соответствии с выводами эксперта в отношении выявленных им  существенных недостатков работ.  

При этом специалисты экспертной организации поддержали верность выводов  эксперта ФИО5, указав, что перечень работ по устранению существенных  недостатков определен верно.  

Для устранения существенных недостатков экспертной организацией были  предложены два варианта, которые отличаются только в способе устранения такого  недостатка работ, как просадка грунта. Вариант А предусматривал заполнение  образовавшихся пустот грунтом с последующим уплотнением пневмовибраторами, а  вариант Б предусматривал уплотнение грунта и заполнение пустот посредством  инъектирования специального состава URETEK.  

В отношении указанных рекомендаций истцом возражений не заявлено. При этом  истец частично наличие недостатков признал, представив контррасчет стоимости  устранения недостатков, в том числе существенных.  

С учетом изложенного судом была назначена по дела дополнительная экспертиза,  проведение которой было поручено ФИО5 и ФИО6 - экспертам общества с ограниченной ответственностью  «Негосударственная экспертиза Новосибирской области».  

Перед экспертом для дачи заключения были поставлены следующие вопросы: 

1. Определить, нарушают ли недостатки работ, выявленные при проведении 

первоначальной экспертизе, нормальные условия эксплуатации здания по адресу  

<

...>.  

2. Определить стоимость работ по восстановлению нормальных условий  эксплуатации здания по адресу 

<

...> учетом  рекомендаций по усилению несущих конструкций (разработанных ООО «Николай И»), а  также технической и экономической целесообразности.  

По результатам проведенного исследования в рамках дополнительной экспертизы  экспертами указано, что выявленные существенные недостатки в своей совокупности  нарушают нормальные условия эксплуатации здания и требуют устранения. Экспертом  наиболее технически и экономически целесообразным из предложенных проектной  организацией определен вариант «А». Стоимость работ по восстановлению нормальных  условий эксплуатации здания составит 2 534 099 рублей.  

Допрошенные в судебном заседании эксперты подтвердили свои выводы и  представили дополнительные пояснения, дополнительно представлены рабочие записи,  схемы и пояснения.  

В ходе допроса эксперты пояснили, каким образом ими был определен объем  бетонной смеси на укрепление грунта, а также пояснили технологию производства работ  (т.6 л.д.57).  

На схеме магазина эксперты указали место просадки пола и разрушения стены (т.6  л.д.58).  

При этом эксперты указали, что поскольку по периметру здания при осмотре  установлено наличие пустот и пазух между грунтом и бетонным полом, то справедливо  считать наличие таких пустот и в центральной части здания. Следовательно, устранение  таких недостатков как просадка грунта и просадка бетонного пола необходимо в тех  частях здания, как это определено экспертами при проведении исследования. Выполнение  работ на меньшей площади приведет к повторному образованию недостатков и не  восстановит нормальные условия функционирования здания.  

Эксперты указали, что выявленные недостатки работ в своей совокупности  значительно увеличили нагрузку на фундаменты и узлы опирания колонн на фундамент.  Возросшая нагрузка может превышать проектно-допустимую, что влечет дальнейшее  разрушение здания. Одним из показателей разрушения является наличие сквозных трещин  на перегородках, расположенных в зоне просадки бетонного пола, а также трещины  самого пола.  

Экспертами представлены дополнительно письменные пояснения по вопросам истца  (т.6 л.д.56).  

В судебном заседании судом с участием представителей сторон и экспертов  

обозревалась программа Гранд-Смета и локальный сметный расчет, выполненный в ней  экспертами при проведении первоначальной и дополнительной экспертизы. При этом  производилось раскрытие позиций сметы, оспариваемых истцом, и обозревались те  составляющие, которые были включены экспертами в расценку по спорному виду работ.  

С учетом возражений истца по дополнительной экспертизе экспертом был уточнен  расчет путем исключения программной ошибки, а также уточнения перечня работ.  

Общая стоимость восстановления нормальных условий эксплуатации здания с  учетом уточненного расчета составила 2 536 478 рублей.  

Отклоняя довод истца о недопустимости экспертного заключения в качестве  доказательства по делу со ссылкой на правовую позицию Конституционного Суда  Российской Федерации, изложенной в определении от 09 апреля 2002 года № 90-О,  апелляционный суд исходит из следующего.  

Согласно статьям 7, 8 Федерального закона от 31.05.2001 года № 73-ФЗ «О  государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» при  производстве судебной экспертизы эксперт независим, дает заключение, основываясь на  результатах проведенных исследований в соответствии со своими специальными  знаниями. Эксперт проводит исследования объективно, на строго научной и практической  основе, в пределах соответствующей специальности, всесторонне и в полном объеме.  Заключение эксперта должно основываться на положениях, дающих возможность  проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых  научных и практических данных.  

Имеющиеся в материалах дела экспертные заключения соответствует названному  закону, являются мотивированными, ясными, полными, каких-либо противоречий в них  не имеется, допущенные в расчетах ошибки экспертами устранены.  

Несогласие истца с имеющимся в деле экспертным заключением само по себе не  свидетельствует о его недопустимости.  

В пункте 12 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51  «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» разъяснено, что  наличие акта приемки работ, подписанного заказчиком, не лишает заказчика права  представить суду возражения по объему и стоимости работ.  

Согласно статье 723 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда  работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими  результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для  предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре  соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе,  

если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от  

подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного  уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение  недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда.  

Недостатки выполненных работ истцом не устранены. 

Суд первой инстанции верно указал, что стоимость работ, подлежащих оплате,  подлежит определению следующим образом: стоимость работ в соответствии с актами  приемки выполненных работ, уменьшенная на стоимость устранения несущественных  недостатков и уменьшенная на стоимость работ по восстановлению нормальных условий  эксплуатации здания.  

По расчету суда оплате подлежат работы общей стоимостью 3 818 452,07 рублей = 9  310 768,31 – 75 086 рублей (устранимые недостатки) - 2 880 752 рублей (работы  ненадлежащего качества) – 2 534 099 рублей (стоимость восстановления нормальных  условий эксплуатации здания).  

Вместе с тем, в расчете стоимость работ ненадлежащего качества указана без учета  корректировки, указанной экспертом. После корректировки их стоимость составила  1 783 209 рублей (т. 4 л.д. 114-125).  

Стоимость работ по восстановлению нормальных условий эксплуатации здания  также указана судом первой инстанции неверно, поскольку с учетом выявленной  экспертами в расчете ошибкой стоимость составила не 2 534 099 рублей, а 2 536 478  рублей (т. 7 л.д. 56-75).  

Таким образом, с учетом частичного отказа от исковых требований в суде  апелляционной инстанции, в том числе в части 75 086 рублей стоимости устранимых  недостатков, оплате подлежат работы стоимостью 6 572 665,43 рублей.  

Заявленное истцом требование о взыскании неустойки подлежит частичному  удовлетворению.  

В пункте 8.9 договора сторонами согласована неустойка за нарушение сроков  оплаты работ по договору в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день  просрочки, но не более 5% от суммы, указанной в пункте 3.1 договора.  

Нарушение ответчиком сроков исполнения обязательств по оплате работ  подтверждено материалами дела.  

Пунктом 3.3 договора установлен срок оплаты принятых работ - 20 банковских дней  с момента подписания актов приемки выполненных работ.  

Согласно расчету истца, с учетом частичного отказа от исковых требований в суде  апелляционной инстанции, размер неустойки составляет 2 122 126,72 рублей за период с  07.08.2017 по 10.07.2018 года.  

Расчет судом проверен и признан неверным. Кроме того, истцом не учтено ограничение, установленное пунктом 8.9 договора. 

Пунктом 3.1 договора определена стоимость работ в размере 10 062 601,19 рублей,  следовательно, предельный размер неустойки составляет 503 130,06 рублей.  

Таким образом, требование истца о взыскании неустойки подлежит удовлетворению  в размере 503 130,06 рублей.  

По правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации государственная пошлина по иску, судебные расходы по оплате экспертиз и  государственной пошлины по апелляционной жалобе относятся на стороны  пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.  

Руководствуясь статьями 49, 110, 150, 258, 268, пунктом 2 статьи 269, пунктом 3  части 1 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, апелляционный суд  

ПОСТАНОВИЛ:

принять отказ общества с ограниченной ответственностью СК «БазисСтрой» от исковых  требований о взыскании 201 624,48 рублей основного долга, 51 242,32 рублей неустойки,  решение 07 августа 2018 года Арбитражного суда Новосибирской области по делу №  А45-20276/2017 в этой части отменить, производство по делу в этой же части прекратить.  

Решение 07 августа 2018 года Арбитражного суда Новосибирской области по делу   № А45-20276/2017 изменить, изложив в следующей редакции.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Фуджи-Лифт» в пользу  общества с ограниченной ответственностью СК «БазисСтрой» 6 572 665,43 рублей  задолженности, 503 130,05 рублей неустойки, всего 7 075 795,49 рублей.  

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью СК «БазисСтрой» в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Фуджи-Лифт» 55 500 рублей расходов по  экспертизе.  

В результате зачета взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Фуджи- Лифт» в пользу общества с ограниченной ответственностью СК «БазисСтрой»  7 020 295,49 рублей.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Фуджи-Лифт» в доход  федерального бюджета 49 868 рублей государственной пошлины по иску.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью СК «БазисСтрой» в доход  федерального бюджета 29 288 рублей государственной пошлины по иску.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Фуджи-Лифт» в пользу 

общества с ограниченной ответственностью СК «БазисСтрой» 1 890 рублей судебных  расходов по государственной пошлине по апелляционной жалобе.   

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства  в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со  дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через  Арбитражный суд Новосибирской области.  

Председательствующий В.М. Сухотина Судьи М.Ю. Кайгородова  ФИО1