10187_11215457  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А53-12377/23

13 ноября 2023 г.

г. Ростов-на-Дону

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Казаченко Г. Б.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

общества с ограниченной ответственностью «ТК Русь» (ОГРН: 

<

***>,  

ИНН: 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Милана» (ОГРН: 

<

***>,  

ИНН: 

<

***>) о взыскании ущерба , обязании 

 Руководствуясь статьями 106, 110,150, 167-171,176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Милана» (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «ТК Русь» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в счет возмещения ущерба  140 817,93 рублей, расходы по оплате услуг оценщика в сумме 23 000 рублей, расходы по  оплате государственной пошлины в сумме 5 225 рублей, расходы по оплате услуг  представителя по соблюдению досудебного порядка в сумме 5 000 рублей.  

В удовлетворении остальной части требований о взыскании расходов на плату  услуг представителя по досудебному порядке урегулирования спора отказать.  

Прекратить производство по делу в части требований об обязании в месячный срок  с даты вступления решения суда в силу произвести работы по восстановлению  гидроизоляционного слоя перекрытий первого этажа, водосборных и водосбросных  устройств ливневой (аварийной) канализации Техническоого этажа МКД № 4 по ул. 30 лет  Победы в городе Волгодонске в помещениях технического этажа № 3,4,24,25 с  соблюдением технологии производства работ в соответствии с СП 17.13330, СП  71.13330.2017, в том числе, выполнить:  

- разборку существующего гидроизоляционного слоя, - демонтаж существующих воронок, 

- оштукатуривание участков вертикальных поверхностей конструкций из штучных  материалов (кирпича) на высоту наклеивания дополнительного водоизоляционного ковра  в месте примыкания кровли и конструкции, но не менее 300 мм;  

- восстановить цементно-песчаным раствором М-100 основания  уклонообразующего слоя с устройством водосборных желобов с соблюдением уклонов и  ровности;  

- устройство водоприемных воронок, 

- грунтование поверхности основания перед нанесением приклеивающих и  изоляционных составов сплошным слоем без пропусков и разрывов;  

- устройство водоизоляционного слоя из рулонных материалов с учетом мест  примыканий пола к стенам, фундаментам под оборудование, трубопроводам и другим  конструкциям, выступающим над полом. Выполнение работ сдать по актам скрытых  работ и по акту приемки выполненных работ истцу;  

 о взыскании судебной неустойки в размере 2 000 рублей за каждый день  просрочки исполнения вступившего в силу решения суда по настоящему делу, начиная со  дня, следующего за последним днем – даты окончания срока исполнения судебного  решения по настоящему делу и до даты фактического исполнения ООО «Милана»  решения по настоящему делу в полном объеме и с надлежащим качеством. В случае  неисполнения судебного решения установить порядок исчисления размера судебной  неустойки с увеличением за каждый последующий месяц на 500 рублей в день  (прогрессивная ставка).  

Разъяснить истцу, что при прекращении производства по заявлению повторное  обращение в арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по  тем же основаниям не допускается.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «ТК Русь» (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) из федерального бюджета уплаченную при подаче  иска по платежному поручению № 677 от 07.04.2023 года государственную пошлину в  сумме 6 000 рублей.  

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении  месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае  подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном  порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты  принятия решения через суд, принявший решение.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном  порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня  вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что  оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

 Судья Казаченко Г. Б.