Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-439/2022

г. Хабаровск

21 марта 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 03 марта 2022 года.

В полном объеме решение изготовлено 21 марта 2022 года.

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Д.Л. Малашкина

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «Инновационно-внедренческий центр «Энергоактив» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; адрес: 680054, 

<

...>, копр. 6, оф. 4; почтовый адрес: 680054, 

<

...>)

к Администрации Гудачинского сельсовета (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; адрес: 676100, 

<

...>) 

о взыскании 40 000 руб. 00 коп.,

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО2 представитель по доверенности от 10.01.2022,

от ответчика – не явились,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Инновационно-внедренческий центр «Энергоактив» (далее – истец, ООО «ИВЦ «Энергоактив»)  обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к Администрации Гудачинского сельсовета (далее – ответчик) о взыскании 40 000 руб. 00 коп. задолженности по оплате выполненных работ по муниципальному контракту № 1-МР-АТС/2020 от 08.12.2020 на выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения.

Определением суда от 21.01.2022 исковое заявление принято, возбуждено производство по делу № А73-439/2022, назначено предварительное судебное заседание и судебное разбирательство по существу на 03.03.2022 в 10 часов 40 минут.

Ответчик явку своего представителя в предварительное судебное заседание не обеспечил, извещен о времени и месте рассмотрения дела в соответствии с правилами статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации (далее - АПК РФ), в том числе путем размещения сведений в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Возражений относительно рассмотрения дела в свое отсутствие ответчик не заявил. Отзыв на иск ответчик в установленный судом срок не представил.

Зафиксированным в протоколе судебного заседания определением, при отсутствии возражений участвующих в деле лиц, на основании части 4 статьи 137 АПК РФ с учетом разъяснений, изложенных в пункте 27 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2006 № 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству», суд завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание первой инстанции.

В соответствии с частями 1, 3 статьи 156 АПК РФ дело рассмотрено в судебном заседании в отсутствие не явившегося ответчика по имеющимся доказательствам.

В судебном заседании представитель истца поддержала исковые требования в полном объеме, в обоснование привела обстоятельства, изложенные в исковом заявлении. 

Заслушав представителя истца, исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующие обстоятельства.

Между Администрацией Гудачинского сельсовета (Заказчик) и ООО «ИВЦ «Энергоактив» (Подрядчик) заключен муниципальный контракт № 1-МР-АТС/2020 от 08.12.2020 на выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения (далее – контракт).

В соответствии с пунктом 1.1 контракта Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по актуализации ранее утвержденных схем теплоснабжения Гудачинского сельсовета (далее – работы), по цене и в сроки, установленные в контракте, а Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить данные работы.

Работы выполняются Подрядчиком на основании данных представленных Заказчиком (пункт 1.2 контракта).

Согласно пункту 1.3 контракта по окончанию выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику Проект схемы теплоснабжения объекта, указанного в п. 1.1 настоящего контракта, содержащий в себе актуализированные данные, в количестве 2 экземпляров с приложением диска с электронной версией данной схемы теплоснабжения. 

Общая цена контракта включает в себя все расходы Подрядчика на выполнение работ и составляет 40 000 рублей. НДС не облагается в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения (пункт 2.1 контракта).

Оплата выполненных работ производится Заказчиком в рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в срок до 01.10.2021 на основании счета, выставленного Подрядчиком и подписанного Заказчиком акта о приемке выполненных работ. Счет на оплату работ и акт о приемке выполненных работ направляются Заказчику посредством факсимильной связи, либо в сканированном виде на электронную почту Заказчика и посредством услуг почтовой связи (заказным письмом с уведомлением) по реквизитам, указанным в разделе 10 контракта (пункт 2.3 контракта).

В соответствии с пунктом 4.1 контракта выполнение Подрядчиком работ по настоящему контракту осуществляется в течение пяти месяцев с момента согласования и подписания контракта. Все работы могут быть выполнены Подрядчиком досрочно.

Передача и приемка выполненных работ производится сторонами по акту выполненных работ, направленного Подрядчиком в адрес Заказчика. Направление Подрядчиком акта выполненных работ в адрес Заказчика производится посредством факсимильной связи и электронной почты с обязательным направлением оригинала данного акта посредством почтовой связи (заказным письмом с уведомлением) либо нарочно, при этом стороны согласовали, что согласованный с обеих сторон акт выполненных работ, направленный посредством факсимильной связи или электронной почты, считается оформленным надлежащим образом и имеет юридическую силу (пункт 4.3 контракта).

Срок согласования и подписания Заказчиком акта выполненных работ с последующим его направлением в адрес Подрядчика составляет 10 рабочих дней с момента его получения. В случае уклонения и немотивированного отказа Заказчика от принятия работ и подписания акта выполненных работ в течение 10 дней с момента предоставления Подрядчиком акта выполненных работ, данный акт выполненных работ считается согласованным и подписанным, а работы принятыми Заказчиком без замечаний (пункт 4.4 контракта).

Как следует из материалов дела, предусмотренные контрактом № 1-МР-АТС/2020 от 08.12.2020 работы ООО «ИВЦ «Энергоактив» выполнило, результат работы передан Заказчику и принят последним без замечаний, что подтверждается подписанным сторонами актом приемки выполненных работ № 050 от 16.04.2021.

В установленный контрактом срок Администрация Гудачинского сельсовета обязательство по оплате выполненных работ не исполнила. В результате образовалась задолженность в размере 40 000 руб. 00 коп. 

Письмом от 24.11.2021 исх. № 271, направленными в адрес Заказчика по электронной почте, ООО «ИВЦ «Энергоактив» просило произвести оплату выполненных работ по вышеуказанному контракту в течение десяти дней с момента получения настоящего уведомления.

Администрация Гудачинского сельсовета претензию Подрядчика оставила без ответа и удовлетворения.

Изложенные обстоятельства послужили основанием для обращения ООО «ИВЦ «Энергоактив» в Арбитражный суд Хабаровского края с рассматриваемым иском в соответствии с условием пункта 8.4 контракта о подсудности споров.

Оценив представленные доказательства в соответствии со статьей 71 АПК РФ, суд считает иск подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Правоотношения сторон по муниципальному контракту № 1-МР-АТС/2020 от 08.12.2020 регулируются нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а также общими положениями гражданского законодательства об исполнении обязательств надлежащим образом.

Согласно пункту 1 статьи 763 ГК РФ подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (пункт 2 статьи 763 ГК РФ).

В силу статьи 758 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

В соответствии с пунктом 1 статьи 760 ГК РФ к обязанностям подрядчика относится выполнение работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором; согласование готовой технической документации с заказчиком, а при необходимости вместе с заказчиком - с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления; передача заказчику готовой технической документации и результатов изыскательских работ.

Статьей 762 ГК РФ предусмотрено, что по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан, если иное не предусмотрено договором, уплатить подрядчику установленную цену полностью после завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов работ.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику (пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда»).

Согласно пункту 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

В силу статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 ГК РФ).

Истцом представлены в материалы дела надлежащие доказательства выполнения работ по муниципальному контракту № 1-МР-АТС/2020 от 08.12.2020 и передачи результата работ ответчику.

Факт приемки Администрацией Гудачинского сельсовета выполненных работ по контракту № 1-МР-АТС/2020 от 08.12.2020 подтверждается актом приемки выполненных работ № 050 от 16.04.2021.

Задолженность Администрации Гудачинского сельсовета перед ООО «ИВЦ «Энергоактив» по оплате выполненных работ составляет 40 000 руб. 00 коп.  

Доказательства оплаты долга в указанном размере ответчик не представил, возражения на иск не заявил, обстоятельства, изложенные в иске, не оспорил и не опроверг.

В силу части 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

При таких обстоятельствах, исковое требование ООО «ИВЦ «Энергоактив» о взыскании с Администрации Гудачинского сельсовета основного долга в размере 40 000 руб. 00 коп. подлежит удовлетворению.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика в соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ, учитывая, что истцом уплачена государственная пошлина в размере 2 000 руб. 00 коп. (платежное поручение № 6 от 13.01.2022).    

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Иск удовлетворить.

Взыскать с Администрации Гудачинского сельсовета (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Инновационно-внедренческий центр «Энергоактив» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) основной долг в размере 40 000 руб. 00 коп. и судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины в размере 2 000 руб. 00 коп., всего 42 000 руб. 00 коп.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

Судья                                                                                  Д.Л. Малашкин