1210/2022-7008(1) 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 14 февраля 2022 года 

по делу А33-6553/2021 Красноярск 

14 февраля 2022 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить частично. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная  компания «Сибиряк» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), г. Красноярск, устранить  следующие недостатки путем выполнения нижеприведенных объемов работ в течение двух  месяцев с момента вступления решения суда в законную силу, за исключением устранения  ниженазванных недостатков, выявленных на придомовой территории: такие недостатки  устранить в течение одного месяца с момента установления устойчивой положительной  температуры воздуха в городе Красноярске:  

Придомовая территория 

 № 

п.п.  

 

Наименование работ,  

 

Недостатки 

 

необходимых для устранения  

 

Объем работ  

 

строительных недостатков  

 

Прилегающая территория, западная сторона дома (внешняя сторона) 

 

1 

 

Ремонт покрытия из брусчатки.  

 

7,5 м2 

 

Проседание брусчатки на углу дома (вход в  

 

нежилое помещение) - 7,5 м.кв. 

Установка бордюрного камня в  проектное положение.  

 

3*3+2,55*2=  

 

=14,1 п.м. 

 

2 

 

Отхождение бетонной отмостки от цокольной  

 

Заделка трещин. 

 

18 п.м. 

 

части дома - 18 п.м. 

 

3 

 

Рядом со входом в подъезд № 7 провал  

 

Ремонт асфальтобетонного 

 

1 м2 

 

асфальтового покрытия 1 м.кв. 

 

покрытия. 

 

4 

 

На пешеходной дорожке разрушение  

 

Замена бордюрного камня (БР 

 

12 п.м. 

 

бордюрного камня (БР 100.20.08) - 12 п.м.  

 

100.20.08). 

 

5 

 

Ремонт асфальтобетонного 

 

2 м2 

 

На углу пешеходной дорожки провал  

 

покрытия. 

 

асфальтового покрытия 2 м.кв. 

Установка бордюрного камня в  проектное положение.  

 

4 п.м. 

 

6 

 

Отхождение отмостки от подпорной стены  

 

Заделка трещин. 

 

5 п.м. 

 

спуска в подвальное помещение - 5 п.м.  

 

7 

 

Перед спуском в подвальное помещение провал  

 

Ремонт асфальтобетонного 

 

1,5*1,8+2*0,1==2, 

 

асфальтового покрытия - 4 м.кв. 

 

покрытия. 

 

9 м2 

 

Прилегающая территория со стороны главного фасада (внешняя сторона) 

 

8 

 

Между нежилыми помещениями № 523 и № 522  

 

Ремонт отмостки. 

 

24*1,5=36 м2  

 

просела бетонная отмостка - 24 п.м.  

 

9 

 

Перед входом в нежилое помещение № 522-  

 

Ремонт покрытия из брусчатки.  

 

9 м2 

 

пр осела лестница, сделанная из брусчатки - 9  

 

Установка бордюрного камня в  

 

м.кв. 

 

12 п.м. 

 

№ п.п. 

 

Наименование работ, 

 

Недостатки 

 

необходимых для устранения  

 

Объем работ 

 

строительных недостатков  

 

10 

 

Перед входом в нежилое помещение № 521 -  

 

Ремонт покрытия из брусчатки.  

 

5 м2 

 

просела брусчатка - 5 м.кв. 

 

11 

 

Между нежилыми помещениями № 521 и № 520  

 

Ремонт покрытия из брусчатки.  

 

48 м2 

 

пр осела брусчатка, прилегающая к цокольной  

 

Установка бордюрного камня в  проектное положение.  

 

части дома - 48 м.кв. 

 

14 п.м. 

 

12 

 

Перед входом в нежилое помещение № 520  

 

Ремонт покрытия из брусчатки.  

 

3 м2 

 

просела брусчатка - 3 м.кв. 

 

13 

 

Окраска поверхности стен 

 

Отслоение штукатурно-окрасочного слоя  

 

водоэмульсионной краской с 

 

по дпорной стены перед входом в нежилое  

 

9 м2 

 

расчисткой старой краски более 

 

помещение № 519 - 9 м.кв. 

 

35%. 

 

14 

 

Ремонт покрытия из брусчатки.  

 

16 м2 

 

Между нежилым помещением № 519 и входом в 

 

подъезд № 3 провал брусчатки - 16 м.кв.  

Установка бордюрного камня в  проектное положение.  

 

10 п.м. 

 

15 

 

Ремонт покрытия из брусчатки.  

 

30 м2 

 

Между входом в подъезд № 3 и нежилым  

 

помещением № 518 провал брусчатки - 30  

Установка бордюрного камня в  проектное положение.  

 

12 п.м. 

 

16 

 

Между входом в подъезд № 3 и нежилым  

 

Окраска поверхности стен 

 

помещением № 518 расположен стек в  

 

водоэмульсионной краской с 

 

по двальное помещение, у подпорной стены  

 

20 м2 

 

расчисткой старой краски более 

 

спуска в подвальное помещение отслоение  

 

35%. 

 

штукатурно-окрасочного слоя - 20 м.кв.  

 

17 

 

На пешеходной дорожке, расположенной ближе  

 

к д ому имеются провалы в асфальтовом  

 

покрытии, в том числе: 

 

18 

 

- От угла дома с западной стороны до нежилого  

 

Ремонт асфальтобетонного 

 

18 м2 

 

помещения № 523 - 18 м.кв. 

 

покрытия и тактильной плитки.  

 

19 

 

- Между нежилыми помещениями № 523 и  

 

Ремонт асфальтобетонного 

 

2 м2 

 

№ 522 провал вокруг колодца - 2 м.кв.  

 

покрытия. 

 

20 

 

- Между нежилыми помещениями № 521 и  

 

Ремонт асфальтобетонного 

 

2 м2 

 

№ 520 провал вокруг колодца - 2 м.кв.  

 

покрытия. 

 

21 

 

- На против входа в подъезд № 3 провал вокруг  

 

Ремонт асфальтобетонного 

 

2 м2 

 

колодца - 2 м.кв. 

 

покрытия. 

 

22 

 

- На против нежилые помещения № 516 провал  

 

Ремонт асфальтобетонного 

 

2 м2 

 

вокруг колодца - 2 м.кв. 

 

покрытия. 

 

23 

 

Ремонт покрытия из брусчатки.  

 

60 м2 

 

Между нежилыми помещениями № 517 и № 516  

 

провал брусчатки - 60 м.кв. 

Установка бордюрного камня в  проектное положение.  

 

18 п.м. 

 

24 

 

От угла дома с западной стороны до нежилого  

 

Ремонт асфальтобетонного 

 

по мещения № 522 на парковке провал  

 

96 м2 

 

покрытия. 

 

асфальтового покрытия 96 м.кв. 

 

25 

 

На велодорожке, расположенной через дорогу  

 

Заделка трещин. 

 

5 п.м. 

 

мн огочисленные трещины - 20 п.м., разрушение  

 

Замена бордюрного камня (БР  100.20.08).  

 

бордюрного камня (БР 100.20.08) - 27 п.м.  

 

27 п.м. 

 

26 

 

Через дорогу в районе нежилого помещения №  

 

Ремонт покрытия из брусчатки.  

 

4 м2 

 

52 2 провал брусчатки на пешеходной дорожке -  

 

Установка бордюрного камня в  проектное положение.  

 

4 м.кв. 

 

6 п.м. 

 

Прилегающая территория, восточная сторона дома (внешняя сторона)  

 

27 

 

Ремонт покрытия из брусчатки.  

 

10 м2 

 

От угла дома до нежилого помещения № 515  

 

провал брусчатки - 10 м.кв. 

Установка бордюрного камня в  

 

7 п.м. 

 

№ п.п. 

 

Наименование работ, 

 

Недостатки 

 

необходимых для устранения  

 

Объем работ  

 

строительных недостатков  

 

28 

 

Между нежилыми помещениями № 515 и № 514  

 

Ремонт отмостки. 

 

4,5*1,5=6,8 м2  

 

проседание отмостки 2 м.кв. 

 

29 

 

Напротив нежилые помещения № 513 провал  

 

Ремонт покрытия из брусчатки.  

 

1 м2 

 

брусчатки - 1 м.кв. 

 

30 

 

Между нежилыми помещениями № 513 № 512  

 

22 м2 

 

расположено 2 спуска в подвальное помещение,  

 

Окраска поверхности стен 

 

у первого спуска отслоение штукатурно- 

 

водоэмульсионной краской с 

2,9*2,9+9,5=  

=17,9 м2 

 

окрасочного слоя - 22 м.кв., у второго спуска  

 

расчисткой старой краски более 

 

отслоение штукатурно-окрасочного слоя - 23  

 

35%. 

 

м.кв. 

 

31 

 

Ремонт покрытия из брусчатки.  

 

8 м2 

 

Напротив нежилые помещения № 511 провал  

 

брусчатки - 8 м.кв. 

Установка бордюрного камня в  проектное положение.  

 

4 п.м. 

 

32 

 

С торца отхождение отмостки от цокольной  

 

Заделка трещин. 

 

12 п.м. 

 

части дома - 12 п.м. 

 

33 

 

На пешеходной дорожке, расположенной через  

 

до рогу разрушение брусчатки - 2 м.кв., провалы  

 

Ремонт покрытия из брусчатки.  

 

2+5=7 м2 

 

5 м.кв. 

 

34 

 

Разрушение бордюрного камня в (БР 100.20.08)  

 

Замена бордюрного камня (БР 

 

14 п.м. 

 

- 14 п.м. 

 

100.20.08). 

 

Прилегающая территория, со стороны подъездов (детской площадки)  

 

35 

 

Окраска поверхности стен 

 

Между подъездами № 3 и № 4 расположен  

 

водоэмульсионной краской с 

 

спуск в подвальное помещение, отслоение  

 

8 м2 

 

расчисткой старой краски более 

 

шт укатурно-окрасочного слоя спуска в  

 

35%. 

 

подвальное помещение - 23 м.кв., трещина в  

 

Ремонт трещины. 

 

стене дома - 2 п.м. 

 

2 п.м. 

 

36 

 

Напротив хода в подъезд № 6 провал 

 

Ремонт асфальтобетонного 

 

1 м2 

 

асфальтового покрытия - 1 м.кв. 

 

покрытия. 

 

37 

 

Напротив, подъезда № 4 на пешеходной  

 

Ремонт покрытия из брусчатки и 

 

до рожке, расположенной на детской площадке  

 

8 м2 

 

тактильной плитки. 

 

провал брусчатки 8 м.кв. 

 

38 

 

На баскетбольной площадке трещины в  

 

Заделка трещин. 

 

50 п.м. 

 

асфальтовом покрытии - 50 п.м. 

 

39 

 

На пешеходной дорожке, расположенной с  

 

сев ерной стороны баскетбольной площадки  

 

Ремонт покрытия из брусчатки.  

 

5 м2 

 

провалы брусчатки 5 м.кв. 

 

40 

 

На дорожном полотне (асфальтовое покрытие)  

 

Заделка трещин. 

 

50 п.м. 

 

вдоль дома многочисленные трещины - 70 п.м.  

 

Помещения общего пользования подъезда № 1  

 №  п/п  

Местораспо

ложение 

недостатка  

Недостатки  

Наименование работ,  

необходимых для устранения  строительных недостатков  

Объем работ 

Машинное отделение 

 

1 

Отсутствует плинтус в  количестве 4 шт.  

Ремонт плинтуса. 

4 шт. 

(1,2 п.м.)  

15 этаж 

 

2 

Помещение  му соропрово 

да 

Отслоение штукатурного слоя0,5 кв.м. 

Окраска поверхности  водоэмульсионной краской,  с расчисткой старой краски  более 35%  

0,5 м2  

 

№  п/п  

Местораспо

ложение  недостатка  

Недостатки  

Наименование работ, 

необходимых для устранения  строительных недостатков  

Объем работ  

3 

Незадымляем 

ая 

лестничная 

клетка  

Отслоение штукатурного слоя1,0 кв.м.  

Окраска поверхности  водоэмульсионной краской,  с расчисткой старой краски  более 35%  

1,0 м2  

14 этаж 

 

4 

П омещение  мусоропрово 

 да 

Отсутствует плинтус в  количестве 4 шт.  

Ремонт плинтуса. 

4 шт. 

(1,2 п.м.)  

5 

Напольная кафельная плитка  (вздутие/отслоение) - 0,72 кв.м.  

Ремонт кафельной плитки.  

8*0,09=0,72  

м2 

6 

Незадымляем 

ая 

лестничная 

клетка  

Отслоение штукатурного слоя –  1,3 кв.м.  

Окраска поверхности  водоэмульсионной краской,  с расчисткой старой краски  более 35%  

1,3 м2  

7 

Отсутствует плинтус в  количестве 6 шт.  

Ремонт плинтуса. 

3 шт. 

(0,9 п.м.)  

13 этаж 

 

8 

Помещение  му соропрово 

да 

Отсутствует плинтус в  количестве 12 шт.  

Ремонт плинтуса. 

12 шт.  (3,6 п.м.)  

9 

Лифтовой и 

кв. холл  

Отсутствует плинтус в  количестве 7 шт.  

Ремонт плинтуса. 

5 шт. 

(1,5 п.м.)  

10  

Напольная кафельная плитка  (вздутие/отслоение) – 1,0 кв.м.  

Ремонт кафельной плитки.  

11*0,09=1 м2  

11  

Незадымляем 

ая 

лестничная  

клетка  

Отслоение штукатурного слоя –  0,5 кв.м.  

Окраска поверхности  водоэмульсионной краской,  с расчисткой старой краски  более 35%  

0,5 м2  

12  

Отсутствует плинтус в  количестве 6 шт.  

Ремонт плинтуса. 

3 шт. 

(0,9 п.м.)  

13  

Напольная кафельная плитка  (вздутие/отслоение) – 0,32 кв.м.  

Ремонт кафельной плитки.  

4*0,09=0,36  

м2 

12 этаж 

 

14  

Помещение  му соропрово 

да 

Отсутствует плинтус в  количестве 14 шт.  

Ремонт плинтуса. 

13 шт.  (3,9 п.м.)  

15  

Лифтовой и  

кв. холл  

Напольная кафельная плитка  (вздутие/отслоение) – 0,54 кв.м.  

Ремонт кафельной плитки.  

6*0,09=0,54  

м2 

16  

Незадымляем 

ая 

лестничная 

клетка  

Напольная кафельная плитка  (вздутие/отслоение) – 2,34 кв.м.  

Ремонт кафельной плитки.  

26*0,09=2,34  

м2 

11 этаж 

 

17  

Лифтовой и  

кв. холл  

Напольная кафельная плитка  (вздутие/отслоение) – 1,2 кв.м.  

Ремонт кафельной плитки.  

13*0,09=1,2  

м2 

18  

Незадымляем 

Отсутствует плинтус в  

Ремонт плинтуса. 

1 шт. 

 

№  п/п  

Местораспо

ложение  недостатка  

Недостатки  

Наименование работ, 

необходимых для устранения  строительных недостатков  

Объем работ  

 

лестничная 

клетка  

 

10 этаж 

 

19  

П омещение  мусоропрово 

 да 

Отсутствует плинтус в  количестве 9 шт.  

Ремонт плинтуса. 

9 шт. 

(2,7 п.м.)  

20  

Напольная кафельная плитка  (вздутие/отслоение) – 0,72 кв.м.  

Ремонт кафельной плитки.  

8*0,09=0,72  

м2 

21  

Лифтовой и  

кв. холл  

Напольная кафельная плитка  (вздутие/отслоение) – 1,0 кв.м.  

Ремонт кафельной плитки.  

11*0,09=1 м2  

22  

Незадымляем 

ая 

лестничная 

клетка  

Напольная кафельная плитка  (вздутие/отслоение) – 1,2 кв.м.  

Ремонт кафельной плитки.  

13*0,09=1,2  

м2 

9 этаж 

 

23  

Помещение  му соропрово 

да 

Напольная кафельная плитка  (вздутие/отслоение) – 1,2 кв.м.  

Ремонт кафельной плитки.  

13*0,09=1,2  

м2 

24  

Лифтовой и  

кв. холл  

Напольная кафельная плитка  (вздутие/отслоение) – 1,2 кв.м.  

Ремонт кафельной плитки.  

13*0,09=1,2  

м2 

8 этаж 

 

25  

Помещение  му соропрово 

да 

Напольная кафельная плитка  (вздутие/отслоение) – 1,2 кв.м.  

Ремонт кафельной плитки.  

13*0,09=1,2  

м2 

26  

Лифтовой и  

кв. холл  

Напольная кафельная плитка  (вздутие/отслоение) – 1,0 кв.м.  

Ремонт кафельной плитки.  

11*0,09=1 м2  

7 этаж 

 

27  

Лифтовой и  

кв. холл  

Отсутствует плинтус в  количестве 6 шт.  

Ремонт плинтуса. 

6 шт. 

(1,8 п.м.)  

28  

Незадымляем 

ая 

лестничная 

клетка  

Напольная кафельная плитка  (вздутие/отслоение) – 1,0 в.м.  

Ремонт кафельной плитки.  

11*0,09=1 м2  

6 этаж 

 

29  

Помещение  му соропрово 

да 

Отсутствует плинтус в  количестве 4 шт.  

Ремонт плинтуса. 

3 шт. 

(0,9 п.м.)  

30  

Незадымляем 

ая 

лестничная 

клетка  

Напольная кафельная плитка  (вздутие/отслоение) – 1,8  

 кв.м. 

Ремонт кафельной плитки.  

20*0,09=1,8  

м2 

5 этаж 

 

31  

Помещение  му соропрово 

да 

Отсутствует плинтус в  количестве 2 шт.  

Ремонт плинтуса. 

2 шт. 

(0,6 п.м.)  

 

№  п/п  

Местораспо

ложение  недостатка  

Недостатки  

Наименование работ,  

необходимых для устранения  строительных недостатков  

Объем работ  

32  

Лифтовой и  

кв. холл  

Напольная кафельная плитка  (вздутие/отслоение) – 0,32  

 кв.м. 

Ремонт кафельной плитки.  

4*0,09=0,36  

м2 

33  

Незадымляем 

ая 

лестничная 

клетка  

Отсутствует плинтус в  количестве 4 шт.  

Ремонт плинтуса. 

4 шт. 

(1,2 п.м.)  

4 этаж 

 

34  

Незадымляем 

ая 

лестничная 

клетка  

Отсутствует плинтус в  количестве 7 шт.  

Ремонт плинтуса. 

7 шт. 

(2,1 п.м.)  

3 этаж 

 

35  

Помещение  мусоропрово 

 да 

Отсутствует плинтус в  количестве 5 шт.  

Ремонт плинтуса. 

5 шт. 

(1,5 п.м.)  

36  

Напольная кафельная плитка  (вздутие/отслоение) – 0,32  

 кв.м. 

Ремонт кафельной плитки.  

4*0,09=0,36  

м2 

37  

Незадымляем 

ая 

лестничная 

клетка  

Напольная кафельная плитка  (вздутие/отслоение) – 0,32 кв.м.  

Ремонт кафельной плитки.  

4*0,09=0,36  

м2 

2 этаж 

 

38  

Помещение  му соропрово 

да 

Отсутствует плинтус в  количестве 5 шт.  

Ремонт плинтуса. 

5 шт. 

(1,5 п.м.)  

Помещения общего пользования подъезда № 2  

 №  п/п  

Местораспо

ложение  недостатка  

Недостатки  

Наименование работ,  

необходимых для устранения  строительных недостатков  

Объем работ  

Технический этаж 

 

1 

Незадымляем 

ая 

лестничная 

клетка  

Отсутствует плинтус в  количестве 4 шт.  

Ремонт плинтуса. 

4 шт. 

(1,2 п.м.)  

15 этаж 

 

2 

Помещение  му соропрово 

да 

Отсутствует плинтус в  количестве 9 шт.  

Ремонт плинтуса. 

9 шт. 

(2,7 п.м.)  

3 

Л ифтовой и 

кв. холл  

Отслоение штукатурного слоя –  0,4 кв.м.  

Окраска поверхности  водоэмульсионной краской,  с расчисткой старой краски  более 35%  

0,4 м2  

4 

Отсутствует плинтус в  

Ремонт плинтуса. 

7 шт. 

 

№  п/п  

Местораспо

ложение  недостатка  

Недостатки  

Наименование работ, 

необходимых для устранения  строительных недостатков  

Объем работ  

 

количестве 7 шт. 

 

14 этаж 

 

5 

Незадымляем 

ая 

лестничная 

клетка  

Напольная кафельная плитка  (вздутие/отслоение) – 0,36 кв.м.  

Ремонт кафельной плитки.  

4*0,09=0,36  

м2 

13 этаж 

 

6 

Помещение  му соропрово 

да 

Отсутствует плинтус в  количестве 4 шт.  

Ремонт плинтуса. 

4 шт. 

(1,2 п.м.)  

12 этаж 

 

7 

Лифтовой и  

кв. холл  

Отсутствует плинтус в  количестве 5 шт.  

Ремонт плинтуса. 

5 шт. 

(1,5 п.м.)  

11 этаж 

 

8 

П омещение  мусоропрово 

 да 

Напольная кафельная плитка  (вздутие/отслоение) – 0,54 кв.м.  

Ремонт кафельной плитки.  

6*0,09=0,54  

м2 

9 

Отсутствует плинтус в  количестве 5 шт.  

Ремонт плинтуса. 

5 шт. 

(1,5 п.м.)  

10 этаж 

 

10  

Помещение  му соропрово 

да 

Отсутствует плинтус в  количестве 9 шт.  

Ремонт плинтуса. 

9 шт. 

(2,7 п.м.)  

9 этаж 

 

11  

Помещение  му соропрово 

да 

Отсутствует плинтус в  количестве 15 шт.  

Ремонт плинтуса. 

15 шт.  (4,5 п.м.)  

12  

Лифтовой и 

кв. холл  

Отсутствует плинтус в  количестве 7 шт.  

Ремонт плинтуса. 

7 шт. 

(2,1 п.м.)  

13  

Напольная кафельная плитка  (вздутие/отслоение) – 0,54 кв.м.  

Ремонт кафельной плитки.  

6*0,09=0,54  

м2 

7 этаж 

 

14  

Помещение  му соропрово 

да 

Отсутствует плинтус в  количестве 8 шт.  

Ремонт плинтуса. 

8 шт. 

(2,4 п.м.)  

15  

Лифтовой и  

кв. холл  

Напольная кафельная плитка  (вздутие/отслоение) – 0,36 кв.м.  

Ремонт кафельной плитки.  

4*0,09=0,36  

м2 

16  

Незадымляем 

ая 

лестничная 

клетка  

Напольная кафельная плитка  (вздутие/отслоение) – 0,36 кв.м.  

Ремонт кафельной плитки.  

4*0,09=0,36  

м2 

6 этаж 

 

17  

Помещение  

мусоропрово 

Отсутствует плинтус в  количестве 9 шт.  

Ремонт плинтуса. 

9 шт. 

(2,7 п.м.)  

 

№  п/п  

Местораспо

ложение  недостатка  

Недостатки  

Наименование работ,  

необходимых для устранения  строительных недостатков  

Объем работ  

 

да 

 

18  

Лифтовой и  

кв. холл  

Отсутствует плинтус в  количестве 9 шт.  

Ремонт плинтуса. 

9 шт. 

(2,7 п.м.)  

19  

Незадымляем 

ая 

лестничная 

клетка  

Напольная кафельная плитка  (вздутие/отслоение) – 0,18 кв.м.  

Ремонт кафельной плитки.  

2*0,09=0,18 

м2 

5 этаж 

 

20  

Лифтовой и  

кв. холл  

Отсутствует плинтус в  количестве 6 шт.  

Ремонт плинтуса. 

6 шт. 

(1,8 п.м.)  

4 этаж 

 

21  

Помещение  му соропрово 

да 

Отсутствует плинтус в  количестве 5 шт.  

Ремонт плинтуса. 

5 шт. 

(1,5 п.м.)  

22  

Незадымляем 

ая 

лестничная 

клетка  

Отслоение штукатурного слоя0,2 кв.м.  

Окраска поверхности  водоэмульсионной краской,  с расчисткой старой краски  более 35%  

0,2 м2  

23  

Отсутствует плинтус в  количестве 2 шт.  

Ремонт плинтуса. 

2 шт. 

(0,6 п.м.)  

3 этаж 

 

24  

Незадымляем 

ая 

лестничная 

клетка  

Напольная кафельная плитка  (вздутие/отслоение) – 0,72 кв.м.  

Ремонт кафельной плитки.  

8*0,09=0,72 

м2 

2 этаж 

 

25  

Помещение  му соропрово 

да 

Напольная кафельная плитка  (вздутие/отслоение) – 0,5 кв.м.  

Ремонт кафельной плитки.  

6*0,09=0,54 

м2 

Помещения общего пользования подъезда № 3  

 №  п/п  

Местораспо

ложение  недостатка  

Недостатки  

Наименование работ,  

необходимых для устранения  строительных недостатков  

Объем работ  

Технический этаж 

 

1 

Незадымляем 

ая 

лестничная 

клетка  

Отслоение штукатурного слоя –  0,2 кв.м.  

Окраска поверхности  водоэмульсионной краской,  с расчисткой старой краски  более 35%  

0,2 м2  

 

Ремонт шва. 

1,7 п.м.  

15 этаж 

 

2 

Помещение  

мусоропрово 

ФИО1 штукатурного слоя  

Ремонт трещины 

5,28 п.м.  

 

№  п/п  

Местораспо

ложение  недостатка  

Недостатки  

Наименование работ, 

необходимых для устранения  строительных недостатков  

Объем работ 

 

да 

 

3 

Лифтовой и  

кв. холл  

Отслоение штукатурного слоя –  0,1 кв.м.  

Окраска поверхности  водоэмульсионной краской,  с расчисткой старой краски  более 35%  

0,1 м2  

 

Ремонт шва. 

2,8 п.м.  

14 этаж 

 

4 

Незадымляем 

ая 

лестничная 

клетка  

Отслоение штукатурного слоя –  0,2 кв.м.  

Окраска поверхности  водоэмульсионной краской,  с расчисткой старой краски  более 35%  

0,2 м2  

13 этаж 

 

5 

Незадымляем 

ая 

лестничная 

клетка  

Отслоение штукатурного слоя –  0,3 кв.м.  

Окраска поверхности  водоэмульсионной краской,  с расчисткой старой краски  более 35%  

0,3 м2  

12 этаж 

 

6 

Незадымляем 

ая 

лестничная 

клетка  

Отслоение штукатурного слоя –  0,5 кв.м.  

Окраска поверхности  водоэмульсионной краской,  с расчисткой старой краски  более 35%  

0,5 м2  

8 этаж 

 

7 

Незадымляем 

ая 

лестничная 

клетка  

Отсутствует плинтус в  количестве 6 шт.  

Ремонт плинтуса. 

6 шт. 

(1,8 п.м.)  

7 этаж 

 

8 

Помещение  му соропрово 

да 

Напольная кафельная плитка  (вздутие/отслоение) – 0,36 кв.м.  

Ремонт кафельной плитки.  

4*0,09= 

0,36 м2  

9 

Лифтовой и  

кв. холл  

Напольная кафельная плитка  (вздутие/отслоение) – 0,72 кв.м.  

Ремонт кафельной плитки.  

8*0,09= 

0,72 м2  

10  

Незадымляем 

ая 

лестничная 

клетка  

Отсутствует плинтус в  количестве 5 шт.  

Ремонт плинтуса. 

5 шт. 

(1,5 п.м.)  

 

Напольная кафельная плитка  (вздутие/отслоение) – 0,54 кв.м.  

Ремонт кафельной плитки.  

6*0,09= 

0,54 м2  

6 этаж 

 

11  

Помещение  му соропрово 

да 

Отсутствует плинтус в  количестве 2 шт.  

Ремонт плинтуса. 

1 шт. 

(0,3 п.м.)  

12  

Лифтовой и  

кв. холл  

Напольная кафельная плитка  (вздутие/отслоение) – 0,36 кв.м.  

Ремонт кафельной плитки.  

4*0,09= 

0,36 м2  

13  

Не задымляем 

Напольная кафельная плитка  

Ремонт кафельной плитки.  

8*0,09=  

 

№  п/п  

Местораспо

ложение  недостатка  

Недостатки  

Наименование работ,  

необходимых для устранения  строительных недостатков  

Объем работ  

 

ая 

лестничная 

клетка  

(вздутие/отслоение) – 0,72 кв.м.  

 

5 этаж 

 

14  

Помещение  му соропрово 

да 

Напольная кафельная плитка  (вздутие/отслоение) – 0,54 кв.м.  

Ремонт кафельной плитки.  

6*0,09=  0,54 м2  

15  

Лифтовой и  

кв. холл  

Напольная кафельная плитка  (вздутие/отслоение) – 0,9 кв.м.  

Ремонт кафельной плитки.  

10*0,09= 

0,9 м2  

16  

Незадымляем 

ая 

лестничная 

клетка  

Напольная кафельная плитка  (вздутие/отслоение) – 0,54 кв.м.  

Ремонт кафельной плитки.  

6*0,09=  0,54 м2  

4 этаж 

 

17  

Лифтовой и  

кв. холл  

Напольная кафельная плитка  (вздутие/отслоение) – 0,36 кв.м.  

Ремонт кафельной плитки.  

4*0,09=  0,36 м2  

18  

Незадымляем 

ая 

лестничная 

клетка  

Отсутствует плинтус в  количестве 5 шт.  

Ремонт плинтуса. 

5 шт. 

(1,5 п.м.)  

2 этаж 

 

19  

Помещение  му соропрово 

да 

Напольная кафельная плитка  (вздутие/отслоение) – 0,54 кв.м.  

Ремонт кафельной плитки.  

6*0,09=  0,54 м2  

Помещения общего пользования подъезда № 4  

 №  п/п  

Местораспо

ложение  недостатка  

Недостатки  

Наименование работ,  

необходимых для устранения  строительных недостатков  

Объем работ  

Машинное отделение 

 

1 

Незадымляем 

ая 

лестничная 

клетка  

Отсутствует плинтус в  количестве 17 шт.  

Ремонт плинтуса. 

17 шт.  (5,1 п.м.)  

Технический этаж 

 

2 

Незадымляем 

ая 

лестничная 

клетка  

Отсутствует плинтус в  количестве 7 шт.  

Ремонт плинтуса. 

17 шт.  (2,1 п.м.)  

15 этаж 

 

3 

Помещение  му соропрово 

да 

Отсутствует плинтус в  количестве 4 шт.  

Ремонт плинтуса. 

4 шт. 

(1,2 п.м.)  

4 

Незадымляем 

ая 

Отслоение штукатурного слоя –  0,5 кв.м.  

Окраска поверхности  водоэмульсионной краской,  

0,5 м2  

 

№  п/п  

Местораспо

ложение  недостатка  

Недостатки  

Наименование работ, 

необходимых для устранения  строительных недостатков  

Объем работ 

 

лестничная 

клетка  

с расчисткой старой краски  более 35%  

 

Ремонт шва. 

2,8 п.м.  

14 этаж 

 

5 

Помещение  му соропрово 

да 

Отсутствует плинтус в  количестве 5 шт.  

Ремонт плинтуса. 

5 шт. 

(1,5 п.м.)  

13 этаж 

 

6 

Помещение  му соропрово 

да 

Отслоение штукатурного слоя –  0,2 кв.м.  

Окраска поверхности  водоэмульсионной краской,  с расчисткой старой краски  более 35%  

0,2 м2  

10 этаж 

 

7 

Незадымляем 

ая 

лестничная 

клетка  

Отсутствует плинтус в  количестве 8 шт.  

Ремонт плинтуса. 

8 шт. 

(2,4 п.м.)  

9 этаж 

 

8 

Лифтовой и  

кв. холл  

Напольная кафельная плитка 

(вздутие/отслоение) – 0,32 кв.м.  

Ремонт кафельной плитки. 

4*0,09= 

0,36 м2  

9 

Незадымляем 

ая 

лестничная 

клетка  

Отсутствует плинтус в  количестве 8 шт.  

Ремонт плинтуса. 

6 шт. 

(2,4 п.м.)  

8 этаж 

 

10  

Помещение  му соропрово 

да 

Отсутствует плинтус в  количестве 5 шт.  

Ремонт плинтуса. 

5 шт. 

(1,5 п.м.)  

11  

Лифтовой и  

кв. холл  

Отсутствует плинтус в  количестве 5 шт.  

Ремонт плинтуса. 

5 шт. 

(1,5 п.м.)  

7 этаж 

 

12  

Помещение  му соропрово 

да 

Отсутствует плинтус в  количестве 4 шт.  

Ремонт плинтуса. 

4 шт. 

(1,2 п.м.)  

13  

Лифтовой и  

кв. холл  

Отсутствует плинтус в  количестве 5 шт.  

Ремонт плинтуса. 

5 шт. 

(1,5 п.м.)  

14  

Незадымляем 

ая 

лестничная 

клетка  

Отсутствует плинтус в  количестве 4 шт.  

Ремонт плинтуса. 

5 шт. 

(1,2 п.м.)  

 

Помещения общего пользования подъезда № 5  

 №  п/п  

Местораспо

ложение  недостатка  

Недостатки  

Наименование работ, 

необходимых для устранения  строительных недостатков  

Объем работ 

Машинное отделение 

 

1 

Незадымляем 

ая 

лестничная 

клетка  

Отсутствует плинтус в  количестве 6 шт.  

Ремонт плинтуса. 

6 шт. 

(1,8 п.м.)  

15 этаж 

 

2 

Помещение  му соропрово 

да 

Отсутствует плинтус в  количестве 8 шт.  

Ремонт плинтуса. 

8 шт. 

(2,4 п.м.)  

3 

Лифтовой и 

кв. холл  

Отслоение штукатурного слоя 

(пятно после потеков) – 0,2 в.м.  

Окраска поверхности  водоэмульсионной краской,  с расчисткой старой краски  более 35%  

0,2 м2  

4 

Напольная кафельная плитка  (вздутие/отслоение) - 0,54 кв.м.  

Ремонт кафельной плитки.  

6*0,09=  0,54 м2  

5 

Незадымляем 

ая 

лестничная 

клетка  

Отсутствует плинтус в  количестве 7 шт.  

Ремонт плинтуса. 

7 шт. 

(2,1 п.м.)  

14 этаж 

 

6 

Помещение  му соропрово 

да 

Отсутствует плинтус в  количестве 4 шт.  

Ремонт плинтуса. 

4 шт. 

(1,2 п.м.)  

7 

Незадымляем 

ая 

лестничная 

клетка  

Отслоение штукатурного слоя –  0,2 кв.м.  

Окраска поверхности  водоэмульсионной краской,  с расчисткой старой краски  более 35%  

0,2 м2  

 

Ремонт шва. 

2,8 п.м.  

8 

Напольная кафельная плитка  (вздутие/отслоение) - 0,72 кв.м.  

Ремонт кафельной плитки.  

8*0,09=  0,72 м2  

13 этаж 

 

9 

Лифтовой и  

кв. холл  

Напольная кафельная плитка  (вздутие/отслоение) – 0,54 кв.м.  

Ремонт кафельной плитки.  

6*0,09=  0,54 м2  

12 этаж 

 

10  

Лифтовой и  

кв. холл  

Напольная кафельная плитка  (вздутие/отслоение) – 0,32 кв.м.  

Ремонт кафельной плитки.  

4*0,09=  0,36 м2  

11  

Незадымляем 

ая 

лестничная 

клетка  

Отслоение штукатурного слоя –  0,4 кв.м.  

Окраска поверхности  водоэмульсионной краской,  с расчисткой старой краски  более 35%  

0,4 м2  

 

Ремонт шва. 

2,8 п.м.  

11 этаж 

 

№  п/п  

Местораспо

ложение  недостатка  

Недостатки  

Наименование работ, 

необходимых для устранения  строительных недостатков  

Объем работ 

12  

Помещение  му соропрово 

да 

Отслоение штукатурного слоя –  0,4 кв.м.  

Окраска поверхности  водоэмульсионной краской,  с расчисткой старой краски  более 35%  

0,4 м2  

13  

Незадымляем 

ая 

лестничная 

клетка  

Отсутствует плинтус в  количестве 8 шт.  

Ремонт плинтуса. 

8 шт. 

(2,4 п.м.)  

10 этаж 

 

14  

Лифтовой и  

кв. холл  

Отсутствует плинтус в  количестве 4 шт.  

Ремонт плинтуса. 

4 шт. 

(1,2 п.м.)  

15  

Незадымляем 

ая 

лестничная 

клетка  

Отслоение штукатурного слоя –  0,6 кв.м.  

Окраска поверхности  водоэмульсионной краской,  с расчисткой старой краски  более 35%  

0,6 м2  

 

Ремонт шва. 

2,8 п.м.  

9 этаж 

 

16  

Лифтовой и  

кв. холл  

Отсутствует плинтус в  количестве 9 шт.  

Ремонт плинтуса. 

9 шт. 

(2,7 п.м.)  

17  

Незадымляем 

ая 

лестничная 

клетка  

Отслоение штукатурного слоя –  0,2 кв.м.  

Окраска поверхности  водоэмульсионной краской,  с расчисткой старой краски  более 35%  

0,2 м2  

 

Ремонт шва. 

2,8 п.м.  

8 этаж 

 

18  

Помещение  му соропрово 

да 

Отсутствует плинтус в  количестве 6 шт.  

Ремонт плинтуса. 

6 шт. 

(1,8 п.м.)  

19  

Незадымляем 

ая 

лестничная 

клетка  

Отсутствует плинтус в  количестве 5 шт.  

Ремонт плинтуса. 

5 шт. 

(1,5 п.м.)  

7 этаж 

 

20  

Помещение  му соропрово 

да 

Отсутствует плинтус в  количестве 9 шт.  

Ремонт плинтуса. 

9 шт. 

(2,7 п.м.)  

21  

Незадымляем 

ая 

лестничная 

клетка  

Отсутствует плинтус в  количестве 5 шт.  

Ремонт плинтуса. 

5 шт. 

(1,5 п.м.)  

6 этаж 

 

22  

Незадымляем

 ая 

лестничная  

Отсутствует плинтус в  количестве 4 шт.  

Ремонт плинтуса. 

4 шт. 

(1,2 п.м.)  

 

№  п/п  

Местораспо

ложение  недостатка  

Недостатки  

Наименование работ,  

необходимых для устранения  строительных недостатков  

Объем работ  

 

клетка  

 

5 этаж 

 

23  

Помещение  му соропрово 

да 

Напольная кафельная плитка  (вздутие/отслоение) – 0,72 кв.м.  

Ремонт кафельной плитки.  

8*0,09=  0,72 м2  

24  

Лифтовой и 

кв. холл  

Отслоение штукатурного слоя –  0,2 кв.м.  

Окраска поверхности  водоэмульсионной краской,  с расчисткой старой краски  более 35%  

0,2 м2  

25  

Отсутствует плинтус в  количестве 6 шт.  

Ремонт плинтуса. 

6 шт. 

(1,8 п.м.)  

26  

Незадымляем 

ая 

лестничная 

клетка  

Отсутствует плинтус в  количестве 7 шт.  

Ремонт плинтуса. 

7 шт. 

(2,1 п.м.)  

4 этаж 

 

27  

Помещение  му соропрово 

да 

Отсутствует плинтус в  количестве 3 шт.  

Ремонт плинтуса. 

3 шт. 

(0,9 п.м.)  

3 этаж 

 

28  

Лифтовой и  

кв. холл  

Отсутствует плинтус в  количестве 5 шт.  

Ремонт плинтуса. 

5 шт. 

(1,5 п.м.)  

Помещения общего пользования подъезда № 6  

 №  п/п  

Местораспо

ложение  недостатка  

Недостатки  

Наименование работ,  

необходимых для устранения  строительных недостатков  

Объем работ  

15 этаж 

 

1 

 Помещение  мусоропрово 

да 

Вокруг мусоропровода подтеки  на потолке  

Окраска поверхности  водоэмульсионной краской,  с расчисткой старой краски  более 35%.  

0,5 м2  

2 

Отсутствует плинтус в  количестве 8 шт.  

Ремонт плинтуса. 

9 шт. 

(2,7 п.м.)  

14 этаж 

 

3 

П омещение  мусоропрово 

 да 

Отсутствует плинтус в  количестве 8 шт.  

Ремонт плинтуса. 

8 шт.  (2,1 п.м.)  

4 

ФИО1 штукатурного слоя  

Ремонт трещины 

2,64 п.м.  

5 

Незадымляем 

ая 

лестничная 

клетка  

Отсутствует плинтус в  количестве 5 шт.  

Ремонт плинтуса. 

5 шт. 

(1,8 п.м.)  

 

№  п/п  

Местораспо

ложение  недостатка  

Недостатки  

Наименование работ, 

необходимых для устранения  строительных недостатков  

Объем работ 

13 этаж 

 

6 

Помещение  му соропрово 

да 

ФИО1 штукатурного слоя  

Ремонт трещины 

2,64 п.м.  

7 

Отслоение штукатурного слоя –  1,0 кв.м.  

Окраска поверхности  водоэмульсионной краской,  с расчисткой старой краски  более 35%  

1 м2 

8 

Отсутствует плинтус в  количестве 9 шт.  

Ремонт плинтуса. 

9 шт. 

(2,7 п.м.)  

12 этаж 

 

9 

П омещение  мусоропрово 

 да 

ФИО1 штукатурного слоя  

Ремонт трещины 

2,64 п.м.  

10  

Отсутствует плинтус в  количестве 8 шт.  

Ремонт плинтуса. 

8 шт. 

(2,4 п.м.)  

11 этаж 

 

11  

Помещение  му соропрово 

да 

Отсутствует плинтус в  количестве 8 шт.  

Ремонт плинтуса. 

8 шт. 

(2,4 п.м.)  

12  

Незадымляем 

ая 

лестничная 

клетка  

Отсутствует плинтус в  количестве 2 шт.  

Ремонт плинтуса. 

2 шт. 

(0,6 п.м.)  

10 этаж 

 

13  

Помещение  му соропрово 

да 

Отсутствует плинтус в  количестве 8 шт.  

Ремонт плинтуса. 

8 шт. 

(2,4 п.м.)  

9 этаж 

 

14  

Помещение  му соропрово 

да 

Отсутствует плинтус в  количестве 8 шт.  

Ремонт плинтуса. 

8 шт. 

(2,4 п.м.)  

8 этаж 

 

15  

П омещение  мусоропрово 

 да 

Отсутствует плинтус в  количестве 7 шт.  

Ремонт плинтуса. 

7 шт. 

(2,1 п.м.)  

16  

Напольная кафельная плитка  (вздутие/отслоение) – 0,32 кв.м.  

Ремонт кафельной плитки.  

4*0,09= 

0,36 м2  

17  

Незадымляем 

ая 

лестничная 

клетка  

Отсутствует плинтус в  количестве 4 шт.  

Ремонт плинтуса. 

4 шт. 

(1,2 п.м.)  

7 этаж 

 

18  

Лифтовой и  

кв. холл  

Напольная кафельная плитка  (вздутие/отслоение) – 0,63 кв.м.  

Ремонт кафельной плитки.  

7*0,09= 

0,63м2  

6 этаж 

 

№  п/п  

Местораспо

ложение  недостатка  

Недостатки  

Наименование работ,  

необходимых для устранения  строительных недостатков  

Объем работ  

19  

Незадымляем 

ая 

лестничная 

клетка  

Отсутствует плинтус в  количестве 3 шт.  

Ремонт плинтуса. 

3 шт. 

(0,9 п.м.)  

20  

Незадымляем 

ая 

лестничная 

клетка  

Отсутствует плинтус в  количестве 2 шт.  

Ремонт плинтуса. 

2 шт. 

(0,6 п.м.)  

5 этаж 

 

21  

Помещение  му соропрово 

да 

Отсутствует плинтус в  количестве 7 шт.  

Ремонт плинтуса. 

7 шт. 

(2,1 п.м.)  

4 этаж 

 

22  

Лифтовой и  

кв. холл  

Отсутствует плинтус в  количестве 2 шт.  

Ремонт плинтуса. 

2 шт. 

(0,6 п.м.)  

23  

Незадымляем 

ая 

лестничная 

клетка  

Отсутствует плинтус в  количестве 2 шт.  

Ремонт плинтуса. 

2 шт. 

(0,6 п.м.)  

Помещения общего пользования подъезда № 7  

 №  п/п  

Местораспо

ложение  недостатка  

Недостатки  

Наименование работ,  

необходимых для устранения  строительных недостатков  

Объем работ  

Машинное отделение 

 

29  

Незадымляем 

ая 

лестничная  

клетка  

Отсутствует плинтус в  количестве 5 шт.  

Ремонт плинтуса. 

5 шт. 

(1,5 п.м.)  

30  

Напольная кафельная плитка  (вздутие/отслоение) – 2 кв.м.  

Ремонт кафельной плитки.  

22*0,09=2 м2  

15 этаж 

 

31  

Помещение  му соропрово 

да 

Отсутствует плинтус в  количестве 10 шт.  

Ремонт плинтуса. 

10 шт.  (3,0 п.м.)  

32  

Лифтовой и  

кв. холл  

Отслоение штукатурного слоя –  0,5 кв.м.  

Окраска поверхности  водоэмульсионной краской,  с расчисткой старой краски  более 35%  

0,5 м2  

13 этаж 

 

33  

Лифтовой и  

кв. холл  

Отсутствует плинтус в  количестве 1 шт.  

Ремонт плинтуса. 

1 шт. 

(0,3 п.м.)  

12 этаж 

 

34  

Незадымляем 

ая 

лестничная 

клетка  

Отсутствует плинтус в  количестве 3 шт.  

Ремонт плинтуса. 

3 шт. 

(0,9 п.м.)  

 

№  п/п  

Местораспо

ложение  недостатка  

Недостатки  

Наименование работ, 

необходимых для устранения  строительных недостатков  

Объем работ 

11 этаж 

 

35  

Помещение  му соропрово 

да 

Отсутствует плинтус в  количестве 5 шт.  

Ремонт плинтуса. 

5 шт. 

(1,5п.м.)  

10 этаж 

 

36  

Помещение  му соропрово 

да 

Отсутствует плинтус в  количестве 8 шт.  

Ремонт плинтуса. 

8 шт. 

(2,4 п.м.)  

37  

Лифтовой и  

кв. холл  

Отсутствует плинтус в  количестве 8 шт.  

Ремонт плинтуса. 

8 шт. 

(2,4 п.м.)  

9 этаж 

 

38  

П омещение  мусоропрово 

 да 

Отсутствует плинтус в  количестве 12 шт.  

Ремонт плинтуса. 

12 шт.  (3,6 п.м.)  

39  

Напольная кафельная плитка  (вздутие/отслоение) – 0,32 кв.м.  

Ремонт кафельной плитки.  

4*0,09= 

0,36 м2  

40  

Лифтовой и  

кв. холл  

Напольная кафельная плитка  (вздутие/отслоение) – 0,32 кв.м.  

Ремонт кафельной плитки.  

4*0,09= 

0,36 м2  

41  

Незадымляем 

ая 

лестничная 

клетка  

Отслоение штукатурного слоя –  0,1 кв.м.  

Окраска поверхности  водоэмульсионной краской,  с расчисткой старой краски  более 35%  

0,1 м2  

 

Ремонт шва. 

2,8 п.м.  

8 этаж 

 

42  

Помещение  му соропрово 

да 

Отсутствует плинтус в  количестве 3 шт.  

Ремонт плинтуса. 

3 шт. 

(0,9 п.м.)  

7 этаж 

 

43  

Помещение  му соропрово 

да 

Отсутствует плинтус в  количестве 7 шт.  

Ремонт плинтуса. 

7 шт. 

(2,1 п.м.)  

6 этаж 

 

44  

Помещение  му соропрово 

да 

Отсутствует плинтус в  количестве 9 шт.  

Ремонт плинтуса. 

9 шт. 

(2,7 п.м.)  

45  

Лифтовой и  

кв. холл  

Отсутствует плинтус в  количестве 5 шт.  

Ремонт плинтуса. 

5 шт. 

(1,5 п.м.)  

5 этаж 

 

46  

Помещение  му соропрово 

да 

Отсутствует плинтус в  количестве 10 шт.  

Ремонт плинтуса. 

10 шт.  (3,0 п.м.)  

47  

Лифтовой и  

кв. холл  

Отслоение штукатурного слоя 

(мокрое пятно) – 2 кв.м. 

Окраска поверхности  водоэмульсионной краской,  с расчисткой старой краски  

2 м2 

 

№  п/п  

Местораспо

ложение  недостатка  

Недостатки  

Наименование работ, 

необходимых для устранения  строительных недостатков  

Объем работ 

 

более 35% 

 

4 этаж 

 

48  

Лифтовой и 

кв. холл  

Отсутствует плинтус в  количестве 3 шт.  

Ремонт плинтуса. 

3 шт. 

(0,9 п.м.)  

49  

Напольная кафельная плитка  (вздутие/отслоение) – 0,63 кв.м.  

Ремонт кафельной плитки.  

7*0,09=  0,63 м2  

3 этаж 

 

50  

Лифтовой и 

кв. холл  

Поврежден штукатурный слой –  2,0 кв.м.  

Окраска поверхности  водоэмульсионной краской,  с расчисткой старой краски  более 35%  

2 м2 

51  

Напольная кафельная плитка  (вздутие/отслоение) – 0,72 кв.м.  

Ремонт кафельной плитки.  

8*0,09=  0,72 м2  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная  компания «Сибиряк» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), г. Красноярск, в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальный центр «Покровский»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), 

<

...> 000 руб. расходов по уплате  государственной пошлины.  

В случае неисполнения настоящего решения взыскать с общества с ограниченной  ответственностью «Управляющая строительная компания «Сибиряк» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>), г. Красноярск, в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Жилищно-коммунальный центр «Покровский» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),  г. Красноярск, денежную сумму в размере 10 000 руб. (астрент) за каждый день  неисполнения обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная  компания «Сибиряк» своих обязательств по устранению указанных выше недостатков.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья И.С. Нечаева